국립고궁박물관 상설전시관 리노베이션 계획

□ 추진 목적

ㅇ 상설전시관의 노후한 전시시설 보수 및 최적의 전시 환경 조성

ㅇ 왕실문화 콘텐츠 보완을 통한 관람객 이해도 및 만족도 향상

□ 사업 개요

ㅇ 사업 규모 : 상설전시실(3개층) 10개실/ 5,463㎡

ㅇ 사업 기간 : 2014∼2018년

ㅇ 총사업비 :  10,752백만원

2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
1,852백만원	2,600백만원	2,200백만원	1,900백만원	2,200백만원

※ 상설전시 리노베이션 전체 일정은 ‘기본계획 수립 용역 결과보고서’ 참조

단, 상설전 운영과 박물관 주요사업 일정에 따라 4개년 계획으로 단축 가능

□ 세부 추진 내용

노후 전시 시설 및 환경 개선		전시 콘텐츠 강화
1. 전시실 인테리어 공사 (바닥, 천정, 벽체, 전기, 조명, 통신) 2. 유물 진열장 제작 구입 3. 영상 장비 구입 4. 안내 사인물 확대		1. 다양한 전시기법 활용 2. 유물·복제품 활용 재현전시 3. 전시 영상 제작 4. 전시 보조물 제작

전시실 구성 (안)

기 존			변 경	비고
지상 2층	제 1실 : 조선의 국왕		—
	제 2실 : 조선의 궁궐		—
	제 3실 : 왕실의 생활		—
	기획전시실Ⅰ		—
지상 1층	제 1실 : 왕실의 의례		제 1실 : 왕실의 문예	전시준비실 대체장소 마련 (왕실의문예실 뒤편)
	제 2실 : 대한제국과 황실		—
	제 3실 : 천문과 과학 1		—
	전시준비실		제 4실 : 신규전시실
	영상실		—
지하 층	제 1실 : 왕실의 행차		제 1실 : 왕실의 의례	기획전시실Ⅱ에 임시 격납되어 있는 수장고 유물 이전
	제 2실 : 궁중의 음악
	제 3실 : 왕실의 회화		—
	제 4실 : 천문과 과학 2		—
	기획전시실 Ⅱ		전시교육 복합공간 (테마전, One-stop 교육)

○  1층 ‘왕실의 의례’실을  ‘왕실의 문예‘실로 개편하여 ‘대한제국과 황실’실로 이어지는 동선을 고려하고, 스토리텔링을 강화함

○  1층 전시준비실을 전시실로 신규 개편하여 전시 콘텐츠 확대

○  기존 ‘왕실의 의례’실 전시 콘텐츠 부족을 지하층의 궁중음악/왕실행차 전시실과 통합 전시함으로써 콘텐츠를 보완 강화함

○  지하층 기획전시실Ⅱ를 전시와 교육이 연계되는 복합공간으로 활용

연차별 공사 일정

차례	연도	1 안(5개년)		2 안(4개년)		비고
1	2014	2층	조선의 국왕	2층	조선의 국왕
2	2015	2층	조선의 궁궐 왕실의 생활	2층	조선의 궁궐 왕실의 생활
3	2016	1층	대한제국과 황실 왕실 문예실 신규 전시실	1층	대한제국과 황실 왕실 문예실 신규 전시실
4	2017	지하층	왕실의 의례 기획전시실 Ⅱ	지하층	왕실의 의례 왕실의 회화 천문 과학 1, 2 기획전시실 Ⅱ
5	2018	지하층	왕실의 회화 천문 과학 1, 2	—	—

※ 박물관 주요사업 및 상설전 운영 계획에 따라 공사 일정 변경 가능

1차년도 추진 일정

□ 사업기간 : 2014. 1월 ~12월

□ 사업대상 : 2층 조선의 국왕실(883.5㎡/267.3평)

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
행정	상설전시 리모델링 계획 수립
	실시설계, 검토보완
	공사 일상감사, 조달
	업체계약 완료 (건축,진열장,전기,조명,통신)
	시설 공사
전시	전시실 폐쇄, 유물 격납
	전시구성안 작성
	자료조사, 원고 작성 및 교정
	영상 및 모형물 제작
	전시 보조물 제작 (받침대․패널․네임카드)
	유물 대출, 가전시
	음성안내 설치
홍보	홍보물 제작(리플렛, 그래픽 등)
	보도자료 배포, 홈페이지 수정