숭례문 복구(단청, 기와, 지반) 계획 (주요내용)

Ⅰ	기본원칙 및 복구방향

〈기본원칙〉

❍ 숭례문 복구(단청, 기와, 지반)는 기한에 구애 없이 원형에 충실하게 복구 추진, 필요시 현대과학 기술을 활용․보완

❍ 문화재위원, 학계, 기술자, 시민단체 등 전문가로「숭례문 복구 자문위원단」을 구성ㆍ운영하여 투명성, 객관성 제고

〈복구방향〉

❍ 숭례문 단청은 박락된 현 단청 제거 후, 고증과 검토를 거쳐 재추진

- 단청안료* 및 교착제 품질평가와 성능실험 후 ‘숭례문 복구 자문위원단’ 및 ‘문화재위원회’ 검토를 거쳐 단청안료, 교착제 선정

* 광물, 토양을 기반으로 한 천연 단청안료 및 전통 인공 무기안료

❍ 숭례문 지반 및 기와 등은 ‘숭례문 복구 자문위원단’ 및 ‘문화재위원회‘ 심의 등을 거쳐 장·단기 복구 추진

Ⅱ	부실복구 원인 및 대책

❍ 단청공사

- (원인) 아교와 합성수지 교차시공에 따른 장력차이로 단청박락 ⇒ 단청장에 대한 시공능력 검증 및 시공기법 검토 소홀

- (대책) 국립문화재연구소 개발 전통안료 또는 검증된 국내·외 생산 천연 단청안료에 대한 성능실험과 품질검증('14~'18년) 등을 거쳐 단청 재추진(‘18년 이후/약 31억원)

* 천연 단청안료에 대한 성능실험 결과 탈색·변색 발생 등에 따라 사용이 불가능한 색상 발생시 근대인공안료 활용 추진

❍ 기와공사

- (원인) 숭례문 복구용 기와 규격을 고증 및 검토 없이 제작 시공으로 지붕이 원형에 부합되지 않게 복구됨

- (대책) 기 복구된 기와는 구조·성능에 문제가 없는 점을 감안하여 기와 교체시기 및 방법 등에 대한「문화재위원회」심의 등을 거쳐 향후 숭례문 번와보수 시 교체(중장기 추진)

❍ 지반공사

- (원인) 지반을 조선 중·후기 시점으로 복원토록 계획 하였으나, 현대  토층면 존치

- (대책) 고증을 거쳐 육축 전·후 및 홍예 내부 현대 표토층 제거, 조선 중·후기 지반으로 회복(’15. 6월/1.2억원)

Ⅲ	추진체계 및 일정

1. 추진체계

❍ 「숭례문 복구 T․F」 구성 및 유관기관 협의체 구성

-「숭례문 복구 T․F」 구성 : 4명(3, 4급 1명, 5급 1명, 6급 2명)

- 국립문화재연구소·한국전통문화대학교, 국책연구기관(한국표준과학연구원 등) 협업 및 기술협력체계 구축

❍ 「숭례문 복구 자문위원단」 구성․운영

- 문화재 단청공사 시공경험이 풍부한 ‘단청기술자’ 및 ‘단청기능자’ 등 실무형 검토·자문 인력 보강

- ‘숭례문 복구 자문위원단’ 상시 확인, 점검 및 자문 체계 구축

․ 단청안료 배합, 교착제 사용 시 자문위원단 직접 확인

- 단청복구 공사 진행 투명성 강화를 위한 시민모니터링 추진

2. 단청복구

❍ 국립문화재연구소에서 시장을 사전조사하여 개발된 천연 단청안료 및 교착제에 대해서는 성능실험과 품질검증(‘14~’18년)을 거치고, 미개발된 안료는 개발하여 단청 재추진(18년 이후/31억원)

- 천연 단청안료 사전조사 및 수집·분석(‘14. 8~'15. 4월)

ㆍ국ㆍ내외 천연안료(석채, 토채) 및 전통인공 무기안료(5방색 포함 13색), 교착제

ㆍ안료 및 시공법에 따른 시험용 시편 제작

ㆍ천연물질 여부(성분, 결정구조, 입자형태 등) 및 촉진내후성 시험 및 평가 등

- 시공법 평가(옥외 폭로시험 및 모니터링)(‘15. 5 ~ ’17. 4월)

- 복구용 단청안료 품질기준 및 시방서 마련(‘17. 5 ~ '18년)

- 숭례문 단청 복구 실시설계 및 공사 착공(‘18년 이후)

※ 단청문양에 대한 관계전문가 고증 등을 거쳐 복원시기 및 부재별 단청문양(15종) 선정(‘14 ~ ‘18년)

3. 기와복구

❍ 숭례문 제작기와 구조·성능에는 문제가 없으므로 기와  교체시기 및 방법 등에 대한「문화재위원회」심의 등을 거쳐 향후 숭례문 번와보수 시 보완(중장기 추진)

4. 지반복구

❍ 숭례문 육축 전·후면 좌·우측 하부 기초 유구가 노출되지 않도록 지반높이를 자연스럽게 조정

❍ 관계전문가 등 고증을 거쳐 홍예하부는 발굴조사 시 나타난 조선 중·후기 토층면 상단에 자연석 박석(평균 두께 20㎝)을 설치하되, 문지방석 등은 관람객의 통행불편이 없도록 방안 강구 (‘15.6월 복구 / 1억2천)

붙임 : 1. 전통 단청소재 시장 사전조사 방안 1부.

2. 전통 단청소재 연구개발 계획 1부.  끝.

붙임 1

전통 단청소재 시장 사전조사 방안

1		추진 목적

❍ 국․내외 생산되는 전통 단청소재의 현황과 품질, 성능 등을 파악하여 전통 단청소재 개발 및 품질기준 수립을 위한 기초자료로 활용

2		추진 방안

❍ 추진주체 : 국립문화재연구소(단청안료), 전통문화대학교(교착제)

❍ 방    법 : 시장 사전조사 및 시료수집, 수집시료의 품질 및 성능평가

※ 시료 수집은 필요 시 추후 공개 수집 검토

❍ 조사대상

1. 단청안료

- 문화재수리시방에서 지정한 단청색상 여섯 가지 계통의 원색안료 위주로 조사

구분	대상 범위(5방색 및 녹색)
색상	․적색계 : 주홍, 석간주, 장단 ․청색계 : 양청, 군청 ․녹색계 : 뇌록, 하엽, 양록	․황색계 : 황토, 황 ․백색계 : 호분(합분), 백토, 연백 ․흑색계 : 먹

- 성  분

구분	성분 범위
천연안료	전통안료로서, 천연의 광물이나 토양, 조개껍질을 분쇄, 수비하거나, 열을 가하여 발색시킨 안료 예) 석록, 석청, 진사, 뇌록, 석간주, 주토, 황토, 패분(호분, 합분) 등
전통 인공무기안료	전통안료로서, 고대로부터 인공적으로 합성하여 사용되어 온 안료 예) 연백, 연단(장단), 녹청 등

※ 전통 안료 : 근대 이전 문헌에 기록된 안료 중 기존의 문화재 단청 등 유물에  대한 자연과학적 분석에서 확인된 안료에 한정함

2. 교착제 : 아교(우교) 1종

❍ 조사방법

- 사전조사 및 시료수집 → 안료 및 교착제 분석 → 성능 및 시공법 평가

구분	평가 내용 및 방법
안료분석	전통 및 천연여부 확인, 물질 확인 ․구성 원소 분석 : 주성분 분석(WDXRF 등) ․화합물 분석 : 결정구조 분석(XRD 등) ․성상 분석 : 입자형태 분석(SEM 등), 입도분석(입도분석기) 색도 분석(색도분석기)
아교분석	기초 특성 확인 ․점성도 분석(점성도 측정기) ․불순물 함량 : 수분 및 불용해분 분석
성능 및 시공법 평가	안료 및 아교의 변․퇴색특성, 시공방법에 따른 균열․박락 특성 평가 (※ KS시험 규격 적용) ․1차(단기평가) : 촉진내후성, 내공해성, 동결융해시험 ․2차(장기평가) : 옥외 폭로시험(2년)

붙임 2

전통 단청소재 연구개발 계획

1		사업 개요

○ 기 간 : 총 5년 (2014~2018년, 모니터링 기간 포함)

○ 주 체 : 국립문화재연구소(복원실), 한국전통문화대학교(전통기술소재은행)

○ 목 적 : 문화재 수리복원용 전통 단청소재의 제법 및 생산기술 확보

○ 예 산 : 총 40억원 예정(※ 연구소 20억, 대학교 20억/연간 8억)

2		추진 계획

가. 연구대상

○ 안  료 : 6색 계열 천연 및 인공안료 약 20종 (원색 기준)

○ 교착제 : 아교(우교) 1종

계 열	적색계 (3종)	황색계 (6종)	청색계 (3종)	녹색계 (4종)	백색계 (4종)	흑색계 (2종)
토양성	석간주	토황		뇌록	백토
암석성	주홍(진사)	석웅황, 석자황	석청	석록
인공합성	장단(연단)	밀타승		동록	진분(연백)
기 타					호분(합분)	송연, 유연
미 확 인 (고증필요)		도황, 동황	심중청 회청	하엽	정분

※ 토양성 광물안료: 천연 흙을 가공, 수비(물을 이용, 체질)하여 제조

※ 암석성 광물안료: 천연 광석을 분쇄, 수비하여 제조(예 : 석록-공작석, 석청-남동광, 주홍-진사, 석황-계관석)

※ 인공합성 안료: 화학적 합성과정을 거쳐 만든 금속화합물

나. 연구 추진일정 (‘14~’18년/ 5년)

○ 전통안료 관련 기초조사 및 고증 : ‘14~’15년(2년)

○ 전통 단청 안료 복원 및 개발(천연 광물, 인공합성안료 등) : ‘15~’18년(4년)

○ 전통아교(우교 1종) : ‘14~’17년(4년)

○ 연차별 로드맵

구분	‘14	‘15	‘16	‘17	‘18
원재료 조사	토양성, 암석성 광물안료		전통인공안료 및 기타안료	표준 DB구축
제법연구	제법관련 기초조사	토양성, 암석성 광물안료		전통인공안료 및 기타안료	표준 DB구축 품질기준 수립
시공법연구	시공법 발굴	시공기술 개발		안정성평가 및 적용연구
생산기술 개발	호분, 생산 pilot plant 구축		토양성, 암석성 광물안료		표준 DB 구축 생산기술 확립
품질평가 모니터링	평가기준조사	시판안료	토양성, 암석성 광물안료		전통인공안료 및 기타안료
아 교	표준물성 DB	생산기술 개발		품질평가	: :	연구소 대학교

※ 대체안료 개발은 동 연구결과에 따라 2018년 이후 진행예정

3		성과 활용

가. 연구 결과물

○ 전통 단청소재의 지속적 생산을 위한 원천기술 확보, 표준화

○ 전통 단청소재 인증체제 구축을 위한 품질기준 마련

○ 전통 단청 수리시방 지침 수립 (소재, 시공법 등)

나. 개발 이후 향후계획

○ 전통 단청소재 생산, 시공기술 공개 (본청→민간/ ‘18년)

○ 전통 단청소재 생산 진흥 (민간기업 참여, 생산 유도/ ‘19~’20년)

○ 전통 단청소재 인증시스템 운영 (고품질·저비용의 전통소재 선정/ ‘21~‘22년)

⇒ 문화재 수리·복원공사 점진적 적용(2023년)