「전통건축부재보존센터」건립 계획

사업 목적

전통건축문화재의 수리 시 교체되는 부재 중 보존가치가 있음에도 보관 장소가 없어 관리되지 못하는 부재를 수집 ․ 보존

이를 통하여 전통건축문화의 변천 및 발달과정을 체계적으로 연구 ․ 수장 ․ 전시 ․ 교육 할 수 있는 기반을 조성

사업 개요

위    치 : 경기도 파주시 탄현면 법흥리 1631

총사업비 : 246억원 / 사업기간 : 2012년 ~ 2016년(5년)

- 설계비 12억, 건축공사 257억, 책임감리 20억, 시설부대비 및 수용비 2억

- 연도별 예산액                                            (단위: 억원)

연도	2012	2013	2014	2015(안)	2015이후 투자계획	계
사업비	4.8	15.5	23.5	70.0	132.3	246.1

건물개요

- 관리, 전시, 연구, 교육시설 : 지상 2층, 지하 1층, 철근콘크리트 구조

- 수장고 : 중층 철골구조

- 직원관사 : 지상 3층 철근콘크리드 구조

규  모 : 대지 30,000㎡, 건축연면적 12,233㎡

구 분	수 장	전 시	연 구	교 육	관 리	공 용	주 차	계
면적(㎡)	4,125	761	693	772	1,615	3,549	714	12,233

사업시행방법 : 직접수행

사업시행주체 : 문화재청

전통건축부재보존센터 공사감리 개요

계 약 명 : 전통건축부재보존센터 전면책임감리용역

계 약 자 : ㈜건축사사무소 건원엔지니어링(대표 : 윤인섭)

계약금액 : 총차 : 15억2천만원 / 2차 : 2억6천만원

계약방법 : 일반경쟁입찰

공사기간 : 총차 : '14.1.14 ∼ '17.1.27 / 2차 : '14.3.3 ∼ '14.12.27

주요 추진경과 및 계획

2008 : 숭례문 화재로 인한 고부재 보존의 중요성(필요성) 제기

2011 : 전통건축부재보존센터 건립 부지 30,000㎡ 확보(기재부 비축토지 협의)

2012 : 센터 건립 기본설계용역 추진

2013 : 센터 건립 실시설계용역 추진, 건축공사 및 감리용역 발주 및 계약

2014 : 건축공사 및 감리용역 1차년도 착공

2015 : 건물 골조 및 내부 마감공사 부분 종료(약 46.1% 집행예상)

2016 : 내부 마감, 전시, 주변정비 공사 완료하여 전체공사 종료

기대 효과

전통건축문화재의 수리 시 교체되는 부재 중 보존가치가 있음에도 보관장소가 없어서 버려지는 부재를 수집 ․ 보존 ․ 연구

해체된 건축문화재 및 주요부재 모형의 유형별 ․ 시대별 전시 가능

전통건축문화 전반(전통도구, 주요건축 모형)에 대한 대국민 교육 및 홍보

붙임 : 전통건축부재보존센터 관련 도면

1. 조감도

2. 배치도