2014년 국립무형유산원 상설전시실

체험코너 제작 및 운영 계획(안)

I	목 적

ㅇ 무형유산에 대한 종합적 이해를 돕는 전시 기획을 통해 무형유산의 가치 확산 및 국립무형유산원 정체성 확립

ㅇ 전시 관련 다양한 체험코너 제작 및 운영을 통해 청소년 등 미래세대에 무형유산에 대한 인식 제고 기회 제공

ㅇ 관람객을 고려한 전시 서비스 환경 조성 및 전시실 운영 내실화

Ⅱ	추진 개요

ㅇ 내    용 : 상설전시실 체험코너 제작 및 운영

ㅇ 기    간 : ’14. 8~9월

ㅇ 장    소 : 상설전시실(열린마루) 1, 2층 및 로비 공간

ㅇ 소요예산 : 총 99,300천원

ㅇ 예산과목 : 2131-303-210-01, 210-02, 240

Ⅲ	추진 방침

1. 전시품 대여기간 연장 및 체험코너 구성

ㅇ 상설전시실 전시품 대여기간 연장 추진

- 상설전시실 전시품 보험가입

ㅇ 상설전시실 체험코너 인테리어 디자인 및 관련 물품 제작

- 체험코너 인테리어 디자인 및 체험용 도구 등 제작

- 체험코너 복식 구입

- 체험학습지 제작

ㅇ 상설전시실 안내용 배너 등 제작

ㅇ 추진방식: 건별 수의계약

ㅇ 소요예산: 45,000천원

2. 상설전시 인쇄 홍보물 제작

ㅇ 리플릿 제작 추진(한국어, 영어)

- 사양: 발간부수(10,000부), 규격(22.0×29.0cm, 국배판 변형), 면수 및 제본(양면 20p, 중철제본), 용지(랑데뷰 120g), 인쇄(5도)

- 내용: 기관소개, 전시실 안내 및 전시품 설명 등

- 한글원고 작성 후 영어 번역 및 외국인 감수

ㅇ 추진방식: 건별 수의계약

ㅇ 소요예산: 27,000천원

3. 음성안내기 제작

ㅇ	음성안내기 제작(한국어, 영어)

※ 기타 외국어는 향후 지속적으로 추진 예정

- 한글원고 작성 후 영어 번역 및 외국인 감수

- 언어선택형, 자동 및 수동 음성안내 가능 센서형

ㅇ 추진방식: 수의계약

ㅇ 소요예산: 22,000천원

4. 관계전문가 자문수당

ㅇ	상설전시실 전시품 관련 자문수당 지급

- 200천원×5명×5회=5,000천원

ㅇ 소요예산: 5,000천원

5. 관계전문가 간담회

ㅇ 전시 자문회의 등 관계전문가 간담회 실시(2회)

ㅇ 소요예산: 300천원

Ⅳ	추진 일정

ㅇ 계획보고(’14. 8월 3주)

ㅇ 용역 계약요청 및 계약 추진(’14. 8월 4주)

ㅇ 음성안내기 한글원고 작성(’14. 8월 4주~9월 1주)

ㅇ 상설전 체험코너 디자인 및 제작(’14. 8~9월)

ㅇ 상설전 리플릿 등 인쇄물 제작(’14. 8~9월)

ㅇ 상설전 음성안내기 제작 및 설치(’14. 8~9월)

ㅇ 체험학습지 제작(’14. 8~9월)

ㅇ 전시 개막(’14. 10. 1.)

※ 상설전시실 개막 관련 홍보는 국립무형유산원 개원식 홍보에 포함하여 진행

붙임 : 소요예산내역서 1부.  끝.

소요예산내역서

예산과목	산출내역	금액(원)
210-01	상설전시실 체험코너 인테리어 디자인 및 체험용 도구 등 제작	22,000,000
	상설전시실 체험코너 복식 구입	10,000,000
	상설전시실 홍보용 배너 등 제작	5,000,000
	체험학습지 제작	5,000,000
	상설전시실 인쇄 홍보물(리플릿) 제작	22,000,000
	리플릿 원고 영문 번역 및 감수	5,000,000
	음성안내기 제작	22,000,000
	자문수당	5,000,000
소계 ①		96,000,000
210-02	상설전시품 보험료	3,000,000
소계 ②		3,000,000
240-01	관계전문가 간담회비	300,000
소계 ③		300,000
합계	①+②+③	99,300,000