서해수중유물보관동 건립

2014.  11.

「서해수중유물보관동」건립

사업 목적

서해에서 발굴되는 고선박과 수중유물을 체계적이고 과학적으로 보관 전시

수중문화재 학술연구와 수중고고학 훈련기지 및 문화교육 자원으로 활용

사업 개요

위    치 : 충남 태안군 근흥면 신진도리 산2-18번지 일원

사업기간 : 2012 ~ 2016년(5년)

총사업비 : 253.5억원(문화재보호기금)

- 설계비 10억, 공사비 230.6억, 책임감리 12.4억, 시설부대비 0.5억

(단위 : 억원)

총사업비	2012년(설계)	2013년	2014년	2015년	2016년
253.5	10	60	35	70	78.5

사업규모 : 건축연면적 9,990㎡(3,028평), 지하 2층, 지상 3층

- 도자기류 등 유물 5만여점 수장, 고선박 4∼5척 보관 가능 규모

부지현황 : 34필지 48,288㎡(대지 42,098㎡, 원형보전산지 등 6,190㎡)

담당부서 : 국립해양문화재연구소 기획운영과(061-270-2032)

추진 경과

‘08.06.   : 보관동 건립 관계기관 협의(문화재청, 충청남도, 태안군)

‘10.11.   : 타당성조사 및 기본계획 용역(목포대학교)

‘13. 8.30 : 설계용역 완료(설계기간 ’12.4.27∼’13.8.30)

‘13.11.20 : 실시계획인가

‘13.12. 2 : 건축공사 및 책임감리 용역 착수

‘14. 4. 9 : 보관동 건립사업 보상업무 위·수탁 협약 체결(태안군)

‘14. 2.18 ~ 4.23 : 1차 공사중지(토지 및 지장물매입 지연 / 65일간)

‘14. 4.24 : 공사 일부 재개(수목이식, 석면해체철거 및 폐기물 처리)

‘14. 6.12 ~ 8.26 : 2차 공사중지(토지 및 지장물매입 지연 / 76일간)

‘14. 8.27 : 공사재개(토지 및 지장물 보상과 거주자 이주완료)

시설 면적(안)

부 문	실 명	규모(㎡)	비율(%)	비고
수장부분 (보관)	수 장 고	1,934.66	23.64
	유물정리실 (촬영, 실측, 기록정리 등)	427.39
	소 계	2,362.05
전시부분	전 시 실	981.74	20.21
	전실, 준비실	294.19
	휴게 및 관리 공간	273.91
	기획 전시실	469.42
	소 계	2,019.26
기 타 (진입, 관리)	강 당	510.68	56.15
	사 무 실	1,248.08
	기계, 전기, 발전기실	1,722.32
	기 타	2,128.42
	소 계	5,609.50
총 계		9,990.81	100

공사 계약현황(총공사)

공사기간 : 2013. 12. 2 ~ 2016. 12. 5

계약금액 : 24,240백만원

- 책임감리용역 : 1,238백만원(신성종합건축사사무소<주>)

- 건축(토목, 조경, 기계 포함) : 12,876백만원(광남개발<주>)

- 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 : 3,022백만원(우리전력주식회사 등)

- 관급자재 : 7,104백만원(미계약분 포함)

계약방법 : PQ, 적격심사낙찰제(5등급), 일반경쟁, 수의계약

1차년도('13.12~'14.12) 공사 계약현황

공사기간 : 2013. 12. 2 ~ 2014. 12. 5

계약금액 : 5,960백만원

- 책임감리용역 : 285백만원

- 건축(토목, 조경, 기계 포함) : 3,950백만원

- 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 : 431백만원 / 관급자재 : 1,294백만원

공사현황 : 석면해체철거 및 지장물 철거 완료

- 수목이식공사 완료(105주), 석면 철거완료(970.2㎡) 및 폐기물처리 (11.8톤) 지장물 철거완료(15건), 벌목 80% 완료(7,380㎡)

- 표토제거, 흙막이 가시설 설치등 토목공사 진행중

※ ‘14.11.25일 현재 공정률 : 7.66%

추진현황 : 소유주 미확인토지 1필지(66㎡)수용절차 진행중

(태안군 매입추진 / ‘14년 11월 수용완료 예정)

향후 추진 계획

‘13. 12. ~ ’14. 12. : 1차공사 추진 및 완료

‘14. 12.  : 2차공사 계약 및 착공

기대 효과

안전한 수중유물 보관시설을 기반으로 서해 수중발굴 지속 가능

고려시대 산업･물류, 생활문화, 해양사, 선박사 등 학술연구 활성화

고선박 및 수중유물 전시 활용으로 교육 및 문화체험 서비스 제고