[별지 제3호서식]

종친부 이전·복원 공사

정책실명제

등록번호

2013-30

담당부서

작성자

(문화재정책국 / 정책총괄과)

(김태구/042-481-4856/

taegoo@ocp.go.kr)

정 책 명

종친부 이전복원 공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

-'81년 구 기무사에서 인근 정독도서관으로 이전된 종친부 건물을 현 국립현대미술관 서울관 건립부지에서 옛 유구가 발견됨에 따라 문화재 원형보존 위하여 원래 위치로 이전․복원

○ 추진기간 : 2011.11.1 ~ 2013.8.31

○ 총사업비 : 3,930백만원

○ 주요내용

- 문화재명 : 종친부 경근당․옥첩당(서울시 유형문화재 제9호)

- 원 소재지 : 서울시 종로구 소격동 165-10번지 일원

- 구 소재지 : 종로구 화동 2번지 (정독도서관 내)

- 규모 : 경근당, 옥첩당, 익랑 등 3동 332.03㎡

- 소유자 : 건물-문화재청 / 대지-문화체육관광부

○ 추진경과

- '81년   : 종친부, 종로구 소격동 현 위치(정독도서관 내)로 건물 이전

- '09.01.15 : 대통령, ‘구 기무사 대지에 국립미술관(서울관) 조성’ 발표

- '09.03월 ～ : 국립현대미술관, 서울관 건립사업 본격 추진

- '10.06.09  : 문화부장관, 종친부 건물 원위치 이전 언론 발표

-'10.01.13 : 종친부 건물 터의 기단 발견

- 종친부 이전복원 문화재위원회 심의 통과

․매장분과('10.29), 사적분과('11.4.4), 서울시 문화재위원회('11.4.28)

- '11.12월 : 복원설계 완료

- '12.4월 ~ ’13.8월 : 공사 발주 및 완료(건축, 소방, 통신, 감리)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 고도보존팀 5급 이성희

- 최종 결재자 : 고도보존팀 팀장 심영섭

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과장	김원기	과장	‘13.4.1~’13.8.31	총괄 감독
과장	김동영	과장	‘13.3.23~’13.3.31	총괄 감독
팀장	박한규	팀장	‘13.2.4~’13.3.22	총괄 감독
팀장	심영섭	팀장	‘11.11.1~’13.2.3	총괄 감독
담당	김태구	5급	‘12.9.7~’13.8.31	공사 감독
담당	이성희	5급	‘11.11.1~’12.9.6	공사 감독

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

- 종합건축사사무소 대연건축

○ 시공자

- ㈜에이치디토건

○ 감리자

- ㈜금성종합건축사사무소, ㈜무림설계기술단

추진실적