[별지 제3호서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-26

담당부서

작성자

(국립해양문화재연구소 / 기획운영과)

(이광수/ 061-270-2032

/ forest98@korea.kr)

정 책 명

서해수중유물보관동 건립

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 최근 수중발굴조사가 집중적으로 진행되고 있는 서해(충남·

경기․인천 등)에서 인양한 유물(고선박, 청자, 목간 등)을

적정 보존환경에서 안전하게 보관 및 활용할 수 있는 시설 확보

- 수중문화재 학술연구와 수중고고학 훈련기지로 활용하며,

인양 고선박의 보존처리 및 복원과정 등을 공개하는 문화교육

자원으로 활용

- 수중문화재의 전시와 교육 및 체험 활동 등을 통해 수중

문화재에 대한 국민의 이해도 제고와 문화향유 서비스에 기여

○ 추진기간 : 2012 ～ 2016

○ 총사업비 : 29,600백만원

○ 주요내용

- 위    치 : 충남 태안군 근흥면 신진도리 산2-18번지 일원

- 사업규모 : 건축연면적 9,990.81㎡, 지하 2층, 지상 3층

- 주요시설 : 전시실, 수장고, 유물정리실, 강당, 사무실 등

○ 추진경과

- ‘10.11.    : 타당성조사 및 기본계획 용역(목포대학교)

- ‘12. 1.12 : 서해수중유물보관동 건립 추진계획 보고(문화재청장)

- ‘12. 4.27 : 설계용역 계약 및 착수

- ‘12. 5.22 : 설계감리용역 계약 및 착수

- ‘13. 4.19 : 기본설계 완료

- ‘13. 8.30 : 실시설계용역 완료

- ‘13. 9.11 : 건립공사 시행계획 보고(문화재청장)

- ‘13. 9.16 : 건립공사 계약요청(조달청)

- ‘13. 9.25 : 전면책임감리용역 계약 요청(조달청)

- ‘13.11.20 : 실시계획인가(태안군)

- ‘13.11.26 : 건축공사 계약

- ‘13.11.28 : 전면책임감리용역 계약

- ‘13.12. 2 : 건축공사 착공(12.3 건축협의 완료)

- ‘14. 2.18 : 공사중지

- ‘14. 3. 7 : 공사중지 일부해제(수목이식,폐기물처리등)

- ‘14. 6.12 : 제1차공사 공사 중지

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 기획운영과 시설사무관 김재길

- 최종 결재자 : 문화재청장 변영섭

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
청장	김찬	청장	‘12.1.~’13.3	문화재청 업무 총괄
	변영섭	청장	‘13.3~‘13.12
	나선화	청장	‘13.12~현재
차장	김창준	차장	‘12.1.~’13.4	문화재청 업무 부총괄
	박영대	차장	‘13.4~현재
소장	성낙준	소장	‘12.1.~’13.5.	국립해양문화재연구소 업무 총괄
	소재구	소장	'13.5.~현재
과장	김영국	과장	‘12.1.~’13.1.	기획운영과 업무 총괄
	전칠수	과장	'13.1.~'14.6.
	홍창남	과장	'14.7.~현재
사무관	김재길	시설사무관	'12.1.~'14.3.	건립사업 업무 총괄
	오명석	시설사무관	'14.3.~현재
담당	김병화	8급	'12.1.~현재	건축,기계 담당
	이재용	8급	'12.1.~현재	전기,통신,소방 담당
	김영렬	6급	‘12.1.~’13.1.	토목,조경 담당
	이광수	8급	'13.1.~현재	토목,조경 담당
	노경준	8급	‘12.1~’13.1	열관리 담당

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

- (주)삼우종합건축사사무소 한종률 / (주)삼우전기컨설턴트 이철규

- 기간 : 2012.4.27 ~ 2013.8.30

- 계약금액 : 874,680천원

○ 설계감리자

- 가야건축사사무소 박종경 / (주)광명토탈엔지니어링 김재곤

- 기간 : 2012.5.22 ~ 2013.9.30

- 계약금액 : 125,320천원

○ 공사시공자

공사명	계약자	계약기간	계약금액
건축공사 (1차년도)	(주)광남개발 대표 심원식 (주)우석건설 대표 박해상 (주)세운건설 대표 강창식	2013.12.2.~2014.7.31.	3,950,909,000원
전기공사 (1차년도)	(주)우리전력 대표 가양현 (주)용천전력 대표 이용천	2013.12.2.~2014.7.31.	131,779,000원
정보통신공사 (1차년도)	(주)윈테크 대표 이의균 (주)세기정보 대표 박종빈	2013.12.2.~2014.7.31.	113,906,000원
소방공사 (1차년도)	(주)열린소방이엔지 대표 박영자 (주)아람방재설비 대표 김종수	2013.12.2.~2014.7.31.	119,789,000원
전면책임감리 (1차년도)	(주)신성종합건축사사무소 대표 권오준	2013.12.2.~2014.7.29.	285,000,000원
건설폐기물처리 (혼합)용역 (1차년도)	(주)열린환경 대표 김흥숙	2014.1.10.~2014.7.30.	4,866,000원
건설폐기물처리 (임목,지장물)용역	(주)태영환경 대표 최 영	2014.1.2.~ 2014.7.30.	17,512,000원
지정폐기물(석면)처리 용역	(주)조은이엔지 대표 박상목	2014.1.2.~ 2014.7.30.	4,994,000원
석면 해체 및 철거 용역	(주)한결건설 대표 이광재	2013.12.10.~2014.4.30.	42,837,260원
관급자재 레미콘(1차)	대전세종충청레미콘공업협동조합 대표 박필복	2013.12.24.~2014.7.30.	317,255,600원
관급자재 철근구매 (건축 1차)	동국제강(주) 장세주	2013.11.29.~2014.7.30.	373,984,150원
관급자재 철근 구매(토목)	동국제강(주) 장세주	2013.11.29.~2014.7.30.	143,480,940원
관급자재 콘크리트파일 구매	동진산업(주) 이명수	2013.12.23.~2014.7.30.	41,076,750원
관급자재 자동제어설비 (1차년도)	한국디지탈콘트롤(주) 이용해	2013.11.20.~2014.7.30.	46,973,840원
지열설비 (1차년도)	가진기업(주) 최재상	2013.11.27.~2014.7.30.	372,565,780원

추진실적

붙임 추진실적 자료 참조