2014년 문화재 전자행정 구축사업

과 업 지 시 서

2014. 3.

정보화담당관실

목     차

1. 과 업 명	1

2. 과업목적	1

3. 과업기간	2

4. 추진체계	2

5. 업무현황	4

가. 구성현황	4

나. 구축업무 연계현황	4

다. 주요업무 처리절차	5

라. 주요업무 활용현황	5

마. 전산장비 현황	8

6. 주요과업	10

7. 과업세부사항	13

가. 기능 요구사항	13

나. 성능 요구사항	28

다. 보안 요구사항	29

라. 품질 요구사항	31

마. 제약사항	31

바. 프로젝트 관리 요구사항	32

사. 프로젝트 지원 요구사항	37

8. 추진일정	38

9. 기술적용 계획표	39

1. 과 업 명

『2014년 문화재 전자행정 구축』

2. 과업목적

가. 목    적
□ 문화재행정을 온라인 업무처리로 개선하여 체계화 및 효율화
□ 지자체 등 유관기관과 정보의 연계․공유․협업 기반마련
□ 문화재 보존행정 역량강화 및 투명행정 체계마련을 통한 고품격
민원서비스 제공

나. 구축방향

□ 관련 규정, 지침, 업무양식 변경사항을 반영한 안정적 행정시스템 구축

□ 문화유산3.0의 가치를 반영하여 수요자 중심의 정보 생산 및 공개 확대

□ 문화재GIS 인트라넷 시스템, 문화재청 홈페이지 등 타 시스템과의 연계를 통한 정보 융합

□ 문화재 전자행정 처리대상을 시도지정문화재로 확대

다. 중점 구축 과제

□ 문화재청 용역관리시스템 구축

□ 문화재 보수정비 국고보조사업 정보공개 시스템 구축

□ 문화재 보수정비사업 대상 시도지정문화재로 확대 구축

□ 문화재 수리기술자․수리업자 경력(실적) 관리시스템 구축

□ 소규모 발굴조사 지원시스템 구축

□ 시도지정문화재 정보 통합관리시스템 구축

□ 위치 기반 문화재 전자행정 적용(7개 업무)

□ 개인정보보호법에 따른 시스템 보안 강화 등

3. 과업기간 : 계약일로부터 210일 간(2014년 11월 30일 限)

4. 추진체계

가. 추진조직

							문 화 재 청
																협조기관 (안전행정부, 중앙박물관)
자문위원 사업추진 실무팀
																주관사업자
본 청(각 부서)							소 속 기 관							광역자치단체
17과							국립문화재연구소, 궁․능, 유적관리소 등							17개 광역지자체 (1특별시,6광역시,8도, 1특별자치시,1특별자치도)
기타							유 관 기 관							기초자치단체
문화재민간소장자․법인 및 단체, 지표발굴 사업 시행자, 일반국민							문화재조사기관(150개), 대한수의사협회, 천연기념물 치료소(250개), 무형문화재 보유단체 및 전승자, 문화재 감정관실(16개소) 등							전국 227개 시․군․구

나. 기관별 역할

기관명		역 할
주관기관 (문화재청)	정보화담당관실 (사업총괄)	- 사업계획 수립 및 과업내용서 작성 - 사업 운영 및 고도화내역 개발 - 문화재 정보공동 활용계획 수립 및 운영관리 - 과제 수행관리 및 감리, 결과 평가 - 전자행정시스템 총괄 개발 관리 - 지자체, 유관기관 간 공동활용 계획수립 - 납품장비 및 개발시스템 검사 - 개발시스템 인수․운영
	각 부서 (업무소관)	- 대상업무 분석 및 업무재설계 추진시 참여 - 소관업무 개발관련 업무협조 및 자료제공 - 초기자료 구축관련 자료변환 및 추가작업 지원 - 개발 구축된 소관업무 검사 및 시험운영 지원
안전행정부		- 문화재관련 정보시스템 지자체 연계협의 및 지원 - 지자체 자료 공동활용 및 표준화 관계 협의 - 지자체 정보시스템 개발사업 총괄주관 - 지자체 및 시도행정정보시스템 개발관련 협의
지방자치단체 (광역, 기초)		- 지자체 소관업무 및 연계업무 개발협조 - 문화재청 연계관련 협의 및 지원 - 구축시스템 활용 및 활성화 협조 등 - 기타 문화재 정보자료 공동활용 등
자문위원 및 사업추진 실무추진팀		- 자문위원은 정보화 및 문화재 관련 전문가로 위촉 - 실무추진팀은 각과 소관업무 관계실무자로 구성 - 시스템 구축관련 업무재설계 및 표준화 추진협조 - 사업추진에 따른 문제점 및 검토사항 협의 확정 - 시스템 개발에 따른 실무회의 개최 등
주관사업자		- 대상업무 재설계 및 사용자 요구분석 - 시스템 구축 및 서비스 개발 - 산출물 제출 및 세부 추진실적 보고 - 시스템 설치, 운영자 교육, 기술 이전 및 유지보수 - 기타 과제수행에 필요한 사항 등
유관기관 (문화재조사기관(150개), 대한수의사협회, 천연기념물 치료소(250개), 무형문화재 보유단체 및 전승자, 문화재 감정관실 (16개소) 등), 한국문화재보호재단		- 자체 문화재소관업무 개발 - 문화재청 연계관련 협의 및 지원 및 의견제출 - 협업업무 개발지원 및 활용 - 자체 운영시스템과 문화재청 시스템간 연계협력․개발

5. 업무현황

가. 구성 현황

나. 구축업무 연계현황

다. 주요업무 처리절차

라. 주요업무 활용현황

ㅇ 문화재 통합 관리대장 전자화

ㅇ 문화재 현상변경 허가업무 처리

ㅇ 국고보조/보수정비 업무 지자체 온라인 관리

ㅇ 지표․발굴조사업무 협업기관 온라인 처리

마. 전산장비 현황

ㅇ 하드웨어(H/W)  현황

구 분	시스템명	세부사양	대 수
전자 행정 시스템	ㅇ 전자행정 Web/WAS	ㅇ Sun Fire V880	1
	ㅇ 전자행정 DB/ECM서버	ㅇ Sun Fire V4800	1
	ㅇ 국고보조 서버	ㅇ Sun Fire V890	1
	ㅇ 출토유물 서버	ㅇ Sun Fire V890	1
	ㅇ 연계서버	ㅇ Sun M4000	1
	ㅇ 행정포털 서버	ㅇ Sun Fire V490	1
	ㅇ 행정포털 DB서버	ㅇ Sun M4000	1
	ㅇ 전자민원 Web/WAS	ㅇ Sun Fire V880	1
	ㅇ Disk Array	ㅇHitachi Thunder 9500V - 총 15TB + 1.5TB	1
	ㅇ 백업장비	ㅇ Quantum Scalar i500	1
	ㅇ 백업장비	ㅇ M2500	1
RFID	ㅇ 나주연구소 수장고관리	ㅇ 산업용PC 및 RFID 리더	1식
	ㅇ 부여연구소 수장고관리	ㅇ 산업용PC 및 RFID 리더	1식
기타 업무 (UNIX)	ㅇ 국가기록유산 포털	ㅇ SUN Fire V880, V1280 ㅇ SUN Enterprise 450	3
	ㅇ 국가문화유산 포털	ㅇ SUN Fire V880, V4800	2
	ㅇ 국가지정문화재 서비스	ㅇ SUN Enterprise 3500	1
	ㅇ 전자결재 시스템	ㅇ SUN V480, V880	2
	ㅇ 전자인사관리시스템	ㅇ SUN 280R	1
	ㅇ 자료관시스템	ㅇ HP rp3440	1
	ㅇ 문화재청 홈페이지	ㅇ SUN Fire V440, V890,V490 ㅇ HP ML 450	4
	ㅇ 지식관리시스템	ㅇ SUN Fire V480, V880	2
	ㅇ 문화재 지리정보시스템	ㅇ SUN Fire V480 ㅇ HP ML570, ML370	3
	ㅇ 문화재활용정보시스템	ㅇ SUN Fire V880	1
	ㅇ 문화재기록정보화 통합시스템	ㅇ SUN Fire V490	1
기타 업무 (윈도우)	ㅇ 정책홍보관리시스템	ㅇ Compaq ML450	1
	ㅇ 문화재도서검색 시스템	ㅇ HP ML370, ML450	2
총 계			34

ㅇ 소프트웨어(S/W) 현황

종 류	수 량	사 양	용 도
통합뷰어	1	DAVA	문화재 전자행정 정보시스템
리포트 툴	1	OZ3.5
ECM	1	Enterprise Contents Management
WAS	2	JEUS 4.2
Web Server	2	WebToBe
DBMS	2	Oracle9i
보안장비	1	DDos방지(Sniper DDX2000)
	2	DB암호화(XecureDB)
	2	키보드보안
O/S	10	Solaris 2.7, 2.8	각 서버 운영체제
	7	SUN 5.9
	1	Win svr 2003
Language	1	Power Builder	서버PG 개발도구
DBMS	3	Oracle 8i, 9i	기록유산 포털
이미지 S/W	1	이미지 서버 SW	기록유산포털
WAS	2	Oracle9iAS
XML 엔진	2	메타빌드 Exus
REPORT 엔진	1	Oz 2.5
검색 엔진	3	Litchi 다센21	기록유산 포털 국가문화유산종합정보
웹서버	3	iPlanet Web Server 4.1, 6.0	기록유산 포털 국가문화유산 포털
웹서버	1	Sun One Web Server	문화재활용정보시스템
통합뷰어	1	Simmentry AutoVUE Solid Model for Java 18
DBMS	1	Oracle 10g	문화재기록정보화통합 시스템
WAS	2	JEUS 5
Web Server	2	WebToBe 4

ㅇ 네트워크 현황

대상 기관	연결 구간	회선 속도	회선구분	운용 업무
인터넷서비스	KT ↔ 문화재청	20M	ATM	문화유산 포털 및 홈페이지운용
국립문화재연구소	문화재청 ↔ 국립문화재 연구소	10M	초고속국가망	문화재보존관리 시스템 운용
한국전통문화학교	문화재청 ↔ 한국전통 문화학교	10M	정부고속망	전자결재 등 그룹웨어 활용
연구소, 궁능관리소	문화재청↔지자체↔소속기관	2M	정부고속망	전자결재 등 그룹웨어 활용

6. 주요과업

가. 문화재청 용역관리시스템 구축

ㅇ 문화재청에서 추진하는 모든 용역사업의 시작에서 종료까지의 절차를 온라인으로 나타낼 수 있도록 구축

ㅇ 각 사업의 진행단계를 나타내고, 각 단계에서 산출되는 성과물 등록, 문화재청 홈페이지와 연동하여 대국민 공개

ㅇ 기 운영중인 연구관리시스템, 원형기록정보시스템과의 연계 검토

나. 문화재 보수정비 국고보조사업 정보공개 시스템 구축

ㅇ 문화재 보수정비사업의 참여인력 사업정보, 설계도면 및 변경내역, 공정 사진 등의 정보 대국민 공개

다. 문화재 보수정비사업 대상 시도지정문화재로 확대 구축

ㅇ 지자체에서 시비보조, 자체예산으로 국가지정․시도지정문화재 보수정비사업 추진 시 착수 자료, 완료 자료 제출 기능 구축

ㅇ 착수 시 수리기술자 정보, 사업 진행 중 수리기술자 변경 정보, 완료 시 수리보고서 등록 및 보완요청 시 재등록 기능

ㅇ 보수정비사업 수리기술자 투입현황보고서 출력 기능 구축

라. 문화재 수리기술자․수리업자 경력(실적) 관리시스템 구축

ㅇ 대상자의 경력(실적) 정보관리, 관련기관 정보제공 및 공유

ㅇ 입력되는 정보의 중복, 오류 여부 자동 검출

마. 문화재 수리기술자․수리업자 행정처분 정보이용 확대

ㅇ 수리기술자․수리업자 행정처분 내역 조회 기능 구축

ㅇ 문화재 보수정비 착수신고, 접수 시 수리기술자․수리업자가 받은 행정처분 내역 조회 기능 구축

바. 소규모 발굴조사 지원시스템 구축

ㅇ「접수→검토→지원결정→허가 신청 및 승인→조사 착수→조사 완료」의 과정을 실시간 제공

ㅇ 조사 착수, 조사 완료 시점 예측 서비스 제공

ㅇ「문화재청↔문화재보호재단↔지자체↔국민」간 연계시스템 구축

사. 문화재발굴사 자격시험 업무 관리시스템 구축

ㅇ 문화재발굴사, 준문화재발굴사 자격시험 서류접수, 수수료 결제, 응시자 정보관리, 합격자 발표 등의 전 과정 온라인 처리

ㅇ 구축 시스템은 운영중인 매장문화재 종사자 관리기능 및 기 구축한 합격자 정보 및 자격증 발급관리 기능과 연동

아. 시도지정문화재 정보 통합관리시스템 구축

ㅇ 경상북도 지정문화재 관리대장 정보, 지정 사진자료, 수리보수 현황 등 통합관리시스템 구축

ㅇ 경상북도 디지털데이터 이관 및 데이터베이스 등록

자. 문화재위원회 회의록 공유 기능 구축

ㅇ 1962년부터 2012년의 50년간의 문화재위원회 회의록 등록

ㅇ 문화재명 등의 검색조건에 해당되는 심의결과 조회

차. 해양출토유물관리시스템 구축

ㅇ 다양한 분류체계 수립으로 검색 조건 다양화, 통계 자료 표출

ㅇ 유물정보 일괄등록 및 유물 보관위치 변경사항 관리

ㅇ 운영중인 출토유물 기능과 연동

카. 문화재 전자행정, 협업포털, 행정포털 기능개선

ㅇ (전자행정) 문화재 지정신청 기능에서 추가지정 기능 추가

ㅇ (전자행정) 문화재 정기조사 시기 정보 조회 기능 추가

ㅇ (전자행정) 문화재위원회 관리기능 개선

ㅇ (전자행정) 홈페이지와 연계하여 발굴보고서 공개

ㅇ (전자행정) 발굴조사보고서 제출 및 국가귀속 신고 지연 알림 기능

ㅇ (전자행정) 지표․발굴조사 업무 통계 분석 프로그램 개발

ㅇ (협업포털) 조사기관 간 지표․발굴보고서 공유기능 구축

ㅇ (협업포털) 국가귀속문화재 등록관리시스템 개선

- 지자체 출토유물현황 공고결과 확인기능 추가

- 국가귀속유물 보관관리기관, 소관기관(재위임 기관) 간 유물정보 공유기능 구축

- 발굴조사 완료단계에서 출토유물 없는 경우 유적목록 완결 처리

ㅇ (행정포털) 디지털예산회계시스템의 성과지표 자료 조회 기능

ㅇ (행정포털) 법률자문 공유게시판, 소송자료 등록, 검색 기능 구축

ㅇ (행정포털) SMS 전화번호부에서 번호로 성명 검색 기능 구축

ㅇ (행정포털) 시스템 디자인 개선 및 사용자 친화적 페이지 구축

ㅇ 그 외 문화재 관련 법․제도, 업무지침, 처리절차 변경 시 업무 표준화 후 기능 개선

타. 위치 기반 문화재 전자행정 적용

ㅇ 문화재 위치정보를 전자행정의 7개 업무에 적용

- 지정, 현상변경, 보수정비, 지표조사, 발굴조사, 천연기념물 조난, 무형문화재 단체

ㅇ 문화재GIS 인트라넷시스템과 연계하여 행정업무 처리 시 해당 지역 소재 문화재의 이력을 지도에서 확인

파. 수장고 관리시스템 모바일용 윈도우 프로그램 개발

ㅇ 수장고관리시스템 운영 위한 모바일용 윈도우 프로그램 개발

하. 시스템 보안 강화

ㅇ 시스템 접근권한 부여․변경․말소 기록 저장기능 구축

ㅇ 지자체 대상 GPKI 기반 통합 로그인체계 구축

- 대상 시스템 : 전자행정, 문화재GIS 인트라넷시스템, 홈페이지 관리시스템(플라자), 허브뱅크시스템 등

거. 행정포털 데이터베이스 이관 처리

ㅇ 행정포털 신규 시스템으로 데이터베이스 이관 및 전자행정 간 데이터베이스 링크

7. 과업 세부사항

가. 기능 요구사항

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		문화재청 용역관리시스템 구축
요구 사항 상세 설명	정의	용역사업의 각 진행 단계의 성과물을 등록하고 홈페이지로 연계
	세부 내용	ㅇ 문화재청에서 추진하는 모든 용역사업의 시작에서 종료까지의 절차를 온라인으로 관리할 수 있도록 구축 ㅇ 각 사업의 진행단계를 나타내고, 각 단계에서 산출되는 성과물을 등록하도록 구축 ㅇ 시스템에 등록된 성과물은 문화재청 홈페이지와 연동하여 자동 공개 ㅇ 국립문화재연구소의 연구관리시스템, 정보화담당관실의 원형기록정보시스템과의 연계 필요성을 검토하고 필요시 입력되는 자료 연계 ㅇ 용역사업의 계약내용은 리포팅되게 하고, 엑셀 등 파일 출력 가능 ㅇ 용역관리시스템 체계도
요구사항 출처		문화재청 창조행정담당관실

요구사항 분류

기능요구사항

요구사항 고유번호

SFR-002

요구사항 명칭

문화재 보수정비 국고보조사업 정보공개 시스템 구축

요구

사항

상세

설명

정의

문화재 보수정비사업의 주요 정보 대국민 공개 기능 구축

세부

내용

ㅇ 문화재 보수정비사업의 참여인력정보, 설계도면 및 변경내역, 공정 사진 등의 정보 대국민 공개

ㅇ 문화재 전자행정 시스템의 ‘보수정비(진행)’ 메뉴에서 지자체가 입력하는 정보에 대해 대국민 공개대상 정보 추출

ㅇ 절차 흐름도

설계(변경)승인 신청	→	설계(변경) 승인	⇆	도면 및 내역 추출	⇆	열람 및 조회
(시군구)		(문화재청)		(시스템)		(일반인)
		↓
		(변경)착공계 제출	⇆	참여인력 정보 추출	⇆	열람 및 조회
		(시군구)		(시스템)		(일반인)

요구사항 출처

문화재청 수리기술과

요구사항 분류

기능요구사항

요구사항 고유번호

SFR-003

요구사항 명칭

문화재 보수정비사업 대상 시도지정문화재로 확대 구축

요구

사항

상세

설명

정의

시도지정문화재에 대한 보수정비사업 자료 등록 기능 구축

세부

내용

ㅇ 지자체에서 시도지정문화재에 대한 보수정비사업 추진 시 착수 단계에서 생성되는 자료, 완료단계에서 생성되는 자료를 등록할 수 있도록 기능 구축

ㅇ 기존의 국비보조로 추진되는 국가지정문화재에 대한 보수정비사업 자료만 제출하였던 것에서 확대하여, 시비보조, 자체예산으로 추진하는 보수정비사업 자료도 제출하도록 구축

ㅇ 착수 시 수리기술자 정보, 사업 진행 중 수리기술자 변경 정보, 완료 시 수리보고서 등록 및 보완요청 시 재등록 기능

ㅇ 보수정비사업 수리기술자 투입현황보고서 출력 기능 구축

ㅇ 절차 흐름도

수리보고서 작성, 제출	→	접수 또는 보완 요청	→ (접수)	등재 및 관리	⇆	열람 및 조회
(시군구)		(문화재청)		(문화재청)		(일반인)
		↓(보완)		↑(접수)
		수리보고서 보완 작성	⇆ (보완)	접수 또는 보완 요청
		(시군구)		(문화재청)

요구사항 출처

문화재청 수리기술과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		문화재 수리기술자․수리업자 경력(실적) 관리시스템 구축
요구 사항 상세 설명	정의	문화재 수리기술자․수리업자 경력(실적)을 입력하고 유관기관과 공유
	세부 내용	ㅇ 문화재 수리기술자․수리업자 등 대상자의 경력(실적) 정보를 입력하고 조회하는 기능 구축 ㅇ 입력되는 정보의 중복, 오류 여부 자동 검출 ㅇ 입력된 정보에서 각종 통계치 추출하여 리포팅 ㅇ 지자체 등 유관기관에 통계정보 제공 ㅇ 업무처리절차 - 대상자의 경력(실적) 신고 → 전산 입력 → 증명발급 → 경력(실적) 수정 보완 → 통계관리 → 관련기관 정보제공 및 공유 ※ 증명 발급은 오프라인 작업임
요구사항 출처		문화재청 수리기술과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		문화재 수리기술자․수리업자 행정처분 정보 이용 확대
요구 사항 상세 설명	정의	문화재 수리기술자․수리업자 행정처분 내역 조회
	세부 내용	ㅇ 행정처분 이력이 있는 수리기술자․수리업자 목록만 검색할 수 있도록 검색 조건 추가 ㅇ 행정처분 기간임에도 보수정비사업을 수행하는 수리업자나 현장 투입된 수리기술자가 있는지 조회할 수 있는 기능 구축 ㅇ 지자체에서 문화재 보수정비사업 착수신고 시, 사업수행업체 입력할 때 입력한 사업수행업체의 행정처분 이력을 조회할 수 있도록 구축 ㅇ 문화재청에서 착수신고서 접수 시 사업수행업체와 현장배치된 수리기술자․수리업자가 받은 행정처분 내역 조회 기능 구축
요구사항 출처		문화재청 수리기술과

요구사항 분류

기능요구사항

요구사항 고유번호

SFR-006

요구사항 명칭

소규모 발굴조사 지원시스템 구축

요구

사항

상세

설명

정의

세부

내용

ㅇ 소규모 발굴조사 지원 신청 접수 → 검토 → 지원결정 → 발굴 허가 신청  → 승인 → 조사 착수 → 조사 완료의 전 과정 중 접수, 검토, 지원 결정 단계 구축

ㅇ 조사 착수, 조사 완료 시점 예측 서비스 제공

ㅇ 문화재청 ↔ 문화재보호재단 ↔ 지자체 ↔ 국민 간 연계시스템 구축

ㅇ 입력된 정보에서 각종 통계치 추출하여 리포팅

- 접수현황, 검토결과, 지원 결정현황 조회

- 검색조건(조회 대상 기간, 지자체별 등) 다양화 등

ㅇ 신규 구축되는 1단계의 처리결과도 SMS 발송되도록 구축

구분	1단계 (발굴 허가 전)			2단계 (발굴 허가 후)
절차	접수	검토	지원 결정	허가 신청 및 승인	조사 착수	조사 완료
관련 기관	사업시행자 ↔ 지자체 ↔ 보호재단			사업시행자 ↔ 문화재청
과업범위	신규 구축			문화재청 전자행정시스템 기구축
특성	문서 수발신 (또는 유선 통보)			- 처리단계 실시간 확인 - SMS 알림 서비스

요구사항 출처

문화재청 발굴제도과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		문화재발굴사 자격시험 업무 관리시스템 구축
요구 사항 상세 설명	정의	문화재발굴사 자격시험 업무 관리시스템 구축
	세부 내용	ㅇ 문화재발굴사, 준문화재발굴사 자격시험 서류접수, 수수료 결제, 응시자 정보관리, 합격자 발표 등의 전 과정 온라인 처리 ㅇ 준문화재발굴사 자격시험 관리업무 - 필기시험 응시자는 협업포털에서 시험일정 조회, 응시원서 작성, 수수료 결제 후 응시원서를 제출할 수 있도록 하고, 수험표를 출력할 수 있도록 함 - 접수자 현황은 시험관리기관은 협업포털에서, 문화재청 담당자는 전자행정에서 조회할 수 있도록 함 - 시험관리기관이 협업포털에 필기시험 합격자를 등록하고 문화재청에 제출할 수 있도록 함 - 문화재청 담당자는 전자행정시스템에서 명단을 검토하여 승인 또는 반려할 수 있도록 함 - 시험관리기관은 협업포털에서 합격자 발표를 하고, SMS를 자동 발송할 수 있도록 함 - 실기시험 응시 절차는 필기시험 절차와 동일하게 구축함 - 실기시험 접수자 현황 조회도 필기시험과 동일하게 구축함 - 실기시험 응시자는 협업포털에서 필기시험 면제여부 및 실기시험 합격 여부를 조회할 수 있도록 함 ㅇ 문화재발굴사 자격시험 관리업무 - 서류심사 응시자는 협업포털에서 시험일정 조회, 응시원서 작성, 수수료 결제 후 응시원서를 제출할 수 있도록 하고, 수험표를 출력할 수 있도록 함 - 접수자 현황은 시험관리기관은 협업포털에서, 문화재청 담당자는 전자행정에서 조회할 수 있도록 함 - 시험관리기관이 협업포털에 서류심사 합격자를 등록하고 문화재청에 제출할 수 있도록 함 - 문화재청 담당자는 전자행정시스템에서 명단을 검토하여 승인 또는 반려할 수 있도록 함 - 시험관리기관은 협업포털에서 합격자 발표를 하고, SMS를 자동 발송할 수 있도록 함 - 면접심사 응시 절차는 서류심사 절차와 동일하게 구축함 - 면접심사 접수자 현황 조회도 서류심사와 동일하게 구축함 - 면접심사 응시자는 협업포털에서 면접심사 합격자를 조회할 수 있도록 함 ㅇ 구축 시스템은 운영중인 매장문화재 종사자 관리기능 및 기 구축한 합격자 정보조회 및 자격증 발급관리 기능과 연동
요구사항 출처		문화재청 발굴제도과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		매장문화재 발견신고업무 처리
요구 사항 상세 설명	정의	매장문화재 발견신고업무의 전 과정을 온라인 처리하도록 구축
	세부 내용	ㅇ 매장문화재 발견신고 업무절차 민원인→지자체→경찰서공고(90일)요청, 문화재청→국립문화재연구소(예비평가)→문화재청 발견신고 평가심의 문화재위원회→결과통보(지자체)→민원인 ㅇ 매장문화재 발견한 민원인이 지자체에 신고하면 지자체는 문화재청에 발견신고서를 전자행정 시스템을 통해 제출하고 있음 ㅇ 발견신고 절차 전 단계를 지자체와 문화재청(국립문화재연구소)이 전자행정시스템을 통해 처리하도록 구축 < 처리 절차 > 1. 문화재청→지자체, 국립문화재연구소 : 발견신고에 대한 회신 2. 국립문화재연구소→문화재청 : 예비평가 결과 입력 3. 지자체→문화재청 : 경찰서 공고일자, 90일이내 소유권유무확인서 입력 4. 문화재청→지자체 : 평가심의 결과(보상금액 등) 통보 ㅇ 민원인에게 SMS로 처리결과 통보 서비스 구축
요구사항 출처		문화재청 발굴제도과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		시도지정문화재 정보 통합관리시스템 구축
요구 사항 상세 설명	정의	시도지정문화재 정보를 전자행정 시스템을 통해 관리할 수 있도록 구축
	세부 내용	ㅇ 시도지정문화재 관리대장 정보, 지정 사진자료, 수리보수 현황 등을 등록, 조회, 관리할 수 있도록 통합관리시스템 구축 ㅇ 전자행정 시스템의 국가지정문화재 관리기능과 유사함 ㅇ 지자체 직원이 전자행정 시스템에서 자료 등록, 조회, 관리할 수 있도록 기능 구축 ㅇ 경상북도 지정문화재 관련 디지털데이터를 이관 받아 신규 구축한 시스템에 등록함
요구사항 출처		문화재청 창조행정담당관실, 정보화담당관실, 경상북도 문화재과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 명칭		문화재위원회 회의록 공유 기능 구축
요구 사항 상세 설명	정의	50년 어치의 문화재위원회 회의록을 등록하고 검색할 수 있도록 구축
	세부 내용	ㅇ 1962년부터 2012년까지 50년간의 문화재위원회 회의록을 전자행정 시스템에 등록함 ㅇ 회의록은 PDF파일 형태임 ㅇ 문화재명 등 검색조건을 입력하면 그에 해당되는 회의록이 검색결과로 나올 수 있도록 함
요구사항 출처		문화재청 정책총괄과

요구사항 분류

기능요구사항

요구사항 고유번호

SFR-011

요구사항 명칭

해양출토유물관리시스템 구축

요구

사항

상세

설명

정의

국립해양문화재연구소 소장 해양출토유물 정보 관리시스템 구축

세부

내용

ㅇ 국립해양문화재연구소에서 소장하고 있는 해양출토유물의 정보를 등록, 조회, 관리할 수 있는 인터넷 시스템 구축

ㅇ 다양한 분류체계를 적용하여 여러 검색조건을 활용할 수 있도록 하고, 여러 통계치를 리포팅할 수 있도록 함

- 검색조건 : 유물번호, 유물명, 유물 종류, 발굴 유적명 등

예) 유물종류 : 발굴유물, 기증 및 구입유물, 발견유물 등

유물분류 : 해유1~15000, 해술1~600, 태안, 마도 등

유물명 : 청자매병, 철제솥 등

발굴 유적별 : 태안 마도 해저, 군산 비안도 해저 등

ㅇ 유물정보 일괄등록 기능 구축

ㅇ 유물 보관위치 변경 시 이동사항을 관리할 수 있도록 함

- 이동사항 입력 항목 예시

순번	이동일자	이동구분	보관처
1	20120116	격납	수장고 3수장실
2	20120427	일반전시	1실(고려선실)-1-18
3	20130305	대여	국립박물관

- 보관처가 변경될 때마다 줄을 추가하여 이동사항을 입력하도록 함

ㅇ 운영 중인 출토유물 기능과 연동되도록 함

요구사항 출처

문화재청 국립해양문화재연구소 전시홍보과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-012
요구사항 명칭		위치 기반 문화재 전자행정 적용
요구 사항 상세 설명	정의	전자행정의 7개 업무에 문화재 위치정보를 표시함
	세부 내용	ㅇ 전자행정의 7개 업무에 문화재 위치정보를 표시함 - 지정, 현상변경, 보수정비, 지표조사, 발굴조사, 천연기념물 조난, 무형문화재 단체 ㅇ 문화재GIS 인트라넷시스템과 연계하여 7개 행정업무 처리 시 해당 지역 소재 문화재의 이력을 지도에서 확인할 수 있도록 함
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-013
요구사항 명칭		문화재 지정신청 기능에서 추가지정 기능 추가
요구 사항 상세 설명	정의	문화재 지정신청 기능에서 추가지정 기능 추가
	세부 내용	ㅇ 기 구축되어 있는 문화재 지정신청 기능에서 추가지정 기능 추가함
요구사항 출처		문화재청 보존정책과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-014
요구사항 명칭		문화재 정기조사 시기 정보 조회 기능 추가
요구 사항 상세 설명	정의	문화재 정기조사 시기 정보 조회 기능 추가
	세부 내용	ㅇ 어떤 문화재에 대해 정기조사 해야 할 시기가 언제인지에 대한 정보를 조회할 수 있도록 함 ㅇ 정기조사할 시기가 일정기간 앞으로 다가온 문화재에 대해 알려줄 수 있도록 함
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-015
요구사항 명칭		문화재위원회 관리기능 개선
요구 사항 상세 설명	정의	문화재위원회 관리기능 개선
	세부 내용	ㅇ 문화재위원회 회의결과 분류를 세분화하여 등록할 수 있도록 함 - 예) 회의록, 설명 PPT, 회의결과, 속기첨부란 ㅇ 문화재위원회 목록 게시판에서 회의결과 분류를 아이콘화하여 목록만 보고도 회의록 제출/미제출 위원회를 가려낼 수 있도록 함 ㅇ 문화재위원회 관련 정보의 입력항목을 추가하여 위원회에 대한 더 많은 자료를 등록할 수 있도록 함 ㅇ 검색조건, 통계 리포팅 종류를 확대하여 다양한 자료를 이용할 수 있도록 함
요구사항 출처		문화재청 정책총괄과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-016
요구사항 명칭		문화재청 홈페이지와 연계하여 발굴보고서 공개
요구 사항 상세 설명	정의	문화재청 홈페이지와 연계하여 발굴보고서 공개
	세부 내용	ㅇ 전자행정 시스템에 등록되어 있는 발굴보고서를 문화재청 홈페이지에서 누구나 볼 수 있도록 공개함 ㅇ 이를 위해 문화재청 홈페이지와 연계함
요구사항 출처		문화재청 발굴제도과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-017
요구사항 명칭		발굴조사보고서 제출 및 국가귀속 신고 지연 알림 기능
요구 사항 상세 설명	정의	발굴조사보고서 제출 및 국가귀속 신고 지연 알림 기능
	세부 내용	ㅇ 발굴조사 완료 시 조사기관은 협업포털에서 현장조사 완료일을 기재하도록 되어 있으며, 이를 기준으로 보고서 제출일 및 국가귀속 신고 기한일이 자동으로 산정됨 ㅇ 산정된 기한 내에 조사기관에서 국가귀속 서류 및 보고서 미제출 시 전자행정 시스템에서 자동으로 알려주는 기능 구축 ㅇ 전자행정 시스템에 처리지연 페이지 또는 팝업창으로 표시되도록 함
요구사항 출처		문화재청 발굴제도과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-018
요구사항 명칭		지표․발굴조사 업무 통계 분석 프로그램 개발
요구 사항 상세 설명	정의	지표․발굴조사 업무 통계 분석 프로그램 개발
	세부 내용	ㅇ 지표조사보고서 제출, 협의 및 보존조치 지시 업무 등 전자행정시스템에서 운영되는 지표조사 업무 전반에 대한 월별, 연도별, 업무유형별, 지역별 등의 통계를 요구 부서에서 필요 시 추출 및 분석할 수 있도록 구축 ㅇ 발굴조사 허가 신청 및 승인, 보존조치, 완료조치 등 전자행정시스템에서 운영되는 발굴조사 업무 전반에 대한 월별, 연도별, 업무유형별, 지역별 등의 통계를 요구 부서에서 필요 시 추출 및 분석할 수 있도록 구축 ㅇ 기타 조사기관 등록, 조사요원 승급 관리 등 업무 전반에 대한 통계 자료 리포팅 기능 구축
요구사항 출처		문화재청 발굴제도과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-019
요구사항 명칭		조사기관 간 지표․발굴보고서 공유기능 구축
요구 사항 상세 설명	정의	조사기관 간 지표․발굴보고서 공유기능 구축
	세부 내용	ㅇ 조사기관이 협업포털에 로그인하면 지표 및 발굴 메뉴의 초기화면에서 검색조건에 따라 검색할 수 있도록 구축 - 조사지역의 지자체별(광역/기초) 조사결과 검색 - 사업명, 사업시행자명을 통한 검색 ㅇ 검색은 지표․발굴보고서(보고서, 약보고서)에 한함
요구사항 출처		문화재청 발굴제도과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-020
요구사항 명칭		국가귀속문화재 등록관리시스템 개선
요구 사항 상세 설명	정의	국가귀속문화재 등록관리시스템 개선
	세부 내용	ㅇ 지자체에서 출토유물현황을 공고하였는지의 여부를 조사기관이 협업포털에서 확인할 수 있도록 함 ㅇ 국가귀속유물 보관관리기관, 소관기관(재위임기관) 간 유물정보 공유기능 구축 - 보관관리기관에서 소관기관을 재위임하였으나 소관기관이 협업포털 계정이 없는 경우 별도 계정 마련 ㅇ 국가귀속 대상 유물이 없는 경우에 대한 개선 - 발굴조사 완료단계에서 출토유물 없는 경우 ‘출토유물없음’을 체크하면 유물정보창에서 자동으로 생성되는 유적목록이 ‘완결(출토유물없음)’으로 표시되도록 처리 - 선별회의 결과에서 선별된 유물이 없는 경우 유적목록이 ‘완결(해당 유물 없음)’로 표시되도록 처리 - 연차 발굴 후 통합귀속을 할 경우 최종건을 제외한 나머지 건에 대하여 ‘완결(연차 발굴)’로 표시되도록 처리
요구사항 출처		문화재청 발굴제도과

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-021
요구사항 명칭		디지털예산회계시스템의 성과지표 자료 조회 기능
요구 사항 상세 설명	정의	디지털예산회계시스템의 성과지표 자료 조회 기능
	세부 내용	ㅇ 행정포털의 재정집행상황 메뉴에서 디지털예산회계시스템의 성과지표 자료를 조회할 수 있도록 함 ㅇ 자료 조회 방법이나 시스템 연계 방안은 조달청과 협의함
요구사항 출처		문화재청 기획재정담당관실

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-022
요구사항 명칭		법률자문 공유게시판 구축
요구 사항 상세 설명	정의	법률자문 공유게시판 구축
	세부 내용	ㅇ 각 부서에서 보유한 법률자문 내용을 등록할 게시판 신설함 ㅇ 누구나 게시판에 법률자문 내용을 등록할 수 있도록 함 ㅇ 자문내용을 간략히 서술하고 파일을 등록함 ㅇ 검색지원 - 제목 및 내용(본문) 검색어 찾기 지원 - 관련 법조문별 정렬 지원 ㅇ 행정포털의 메인화면에서 쉽게 찾을 수 있도록 메뉴 구성
요구사항 출처		문화재청 법무감사담당관실

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-023
요구사항 명칭		문화재 관련 소송자료 등록, 검색 기능 구축
요구 사항 상세 설명	정의	문화재 관련 소송자료 등록, 검색 기능 구축
	세부 내용	ㅇ 문화재 관련 소송 자료를 등록할 게시판 신설함 ㅇ 관련 소송에 대한 자료 검색시 유사한 소송건을 용이하게 찾도록 검색 기능을 구축함
요구사항 출처		문화재청 법무감사담당관실

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-024
요구사항 명칭		SMS 전화번호부에서 번호로 성명 검색 기능 구축
요구 사항 상세 설명	정의	SMS 전화번호부에서 번호로 성명 검색 기능 구축
	세부 내용	ㅇ 행정포털의 GroupSMS 메뉴에서 전화번호로 직원 성명을 검색할 수 있도록 구축
요구사항 출처		문화재청 창조행정담당관실

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-025
요구사항 명칭		수장고 관리시스템 모바일용 윈도우 프로그램 개발
요구 사항 상세 설명	정의	수장고관리시스템 운영 위한 모바일용 윈도우 프로그램 개발
	세부 내용	ㅇ 태블릿 PC를 이용해 수장고관리시스템을 이용하기 위한 모바일용 윈도우 프로그램을 개발함 ㅇ 요구 부서에서 장비 도입 시 프로그램을 설치하고 사용자 교육을 실시함 ※ 모바일 전자정부 서비스 관리지침(안전행정부 예규), 행정업무 모바일 서비스 구축 가이드라인 등을 활용하여 구축 ※ 개발 후 모바일 전자정부지원센터 등록 검증 배포 절차 지원
요구사항 출처		문화재청 국립나주문화재연구소

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-026
요구사항 명칭		스마트 문화재행정 웹 앱 개발
요구 사항 상세 설명	정의	스마트 문화재행정 웹 앱 개발
	세부 내용	ㅇ 모바일 전자정부 프레임워크를 적용하여 ‘스마트 문화재행정’을 웹 앱으로 개발 ㅇ 아이디/비밀번호 방식으로 로그인할 수 있게 하고, 비밀번호 3회 이상 입력 실패 시 서비스 사용을 차단하고 관리자 확인 후 차단 해제하도록 구현 ㅇ 최초 접속 시 보안조치 준수에 대한 동의/미동의 여부를 확인할 수 있도록 하고, 미동의 시 접속 차단할 수 있도록 구현 ㅇ 웹 표준을 준수하고 HTML5를 이용하여 주요 브라우저에서 호환 가능하도록 구현 ㅇ 소통의 장, 경조사, 노조소식 등 행정포털의 게시판 내용 추가 ※ 모바일 전자정부 서비스 관리지침(안전행정부 예규), 행정업무 모바일 서비스 구축 가이드라인 등을 활용하여 구축 ※ 개발 후 모바일 전자정부지원센터 등록 검증 배포 절차 지원
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-027
요구사항 명칭		문화재 전자행정 업무 표준화
요구 사항 상세 설명	정의	법제도, 업무지침, 처리절차 변경업무 표준화 후 개발에 반영
	세부 내용	ㅇ 법제도, 업무지침, 처리절차 변경 시 관련 업무 절차와 양식 표준화 후 시스템에 반영 - 문화재 보호법 시행규칙(별지서식 등)을 참조하여 각종 신청서, 출력물, 개인정보수집 서식 등을 법 규정에 맞도록 현행화 - 문화재보호법, 문화재 수리 등에 관한 법률, 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 개정사항을 반영 - 시스템 개발에 반영할 부분 도출하여 기능 개발 ㅇ 행정구역 개편에 따른 전자행정 시스템의 영향검토, 조치계획 수립 및 시스템 변경사항 조치, 안정화
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-028
요구사항 명칭		개인정보보호법에 따른 시스템 보안 강화
요구 사항 상세 설명	정의	개인정보보호법에 따른 시스템 보안 강화
	세부 내용	ㅇ 시스템 접근권한 부여․변경․말소 기록 저장기능 구축 ㅇ 시스템에 저장된 개인정보에 접근하는 개인정보취급자의 접속기록 보관 및 위․변조 방지 기능 구축 ㅇ 시스템에 저장된 개인정보별 접근권한이 부여된 사용자 목록 조회 기능 구축
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-029
요구사항 명칭		지자체 대상 공인인증서 기반 통합 로그인체계 구축
요구 사항 상세 설명	정의	지자체 대상 공인인증서 기반 통합 로그인체계 구축
	세부 내용	ㅇ 지자체 직원들이 전자행정, 문화재GIS 인트라넷시스템, 홈페이지 관리시스템(플라자), 허브뱅크시스템 등 통합 로그인 화면에서 아이디 대신 공인인증서로 로그인하도록 변경
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-030
요구사항 명칭		행정포털 데이터베이스 이관 처리
요구 사항 상세 설명	정의	행정포털 데이터베이스 이관 처리
	세부 내용	ㅇ 광주통합전산센터에 신규 도입되는 시스템에 행정포털 시스템의 환경과 동일한 환경을 구축함 ㅇ 문화재청과 광주센터의 두 시스템 간 동일한 환경 구축 후 3개월 간 시스템을 모니터링하여 동일한 처리결과가 나오는지 확인함 ㅇ 미비사항은 보완조치하고, 조치 완료 후 광주센터의 행정포털 시스템과 전자행정 시스템과의 DB 링크를 처리함
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 고유번호		SFR-031
요구사항 명칭		시스템 디자인 개선
요구 사항 상세 설명	정의	시스템 디자인 개선 및 사용자 친화적 페이지 구축
	세부 내용	ㅇ 행정포털 시스템 메인화면, 통합 로그인 페이지 등에 대한 디자인을 개선함 ㅇ 행정포털 로그인 시 음악이나 환영 메시지가 나오도록 개선 ㅇ 그 외 사용자 친화적인 간단한 기능 추가
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

나. 성능요구사항

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		처리속도가 느린 작업에 대한 사전 안내
요구 사항 상세 설명	정의	처리속도가 느린 작업에 대한 사전 안내
	세부 내용	ㅇ 협업포털에서 출토유물 일괄등록 시 상당한 시간이 걸리므로 작업을 시작하는 버튼 클릭 시 수행시간이 상당히 걸림을 사용자에게 팝업 메시지로 알림
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		시스템 성능향상
요구 사항 상세 설명	정의	시스템 성능향상을 위한 구조 개선
	세부 내용	ㅇ 전자행정 시스템의 스키마 및 키, 테이블구조 등을 재정리하여 시스템구조를 단순화하고, DB Table Layout 세부명세서를 작성함 ㅇ 테이블 구조 단순화 등을 통한 성능개선 테스트를 실시하고 성능이 개선되었음을 나타내는 결과를 제출함 ㅇ 전자행정, 협업포털, 행정포털 시스템은 운영체제의 버전에 따른 오동작이 발생하지 않도록 충분히 테스트하고 운영하여야 함
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		시스템 모니터링
요구 사항 상세 설명	정의	월간 시스템 모니터링 수행
	세부 내용	ㅇ 매월 활용 현황을 점검하고 시스템 용량, 성능 등에 대한 모니터링 결과를 보고함
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

다. 보안 요구사항

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안관련 규정 준수
요구 사항 상세 설명	정의	정보시스템 보안관련 규정 및 지침에 대한 준수
	세부 내용	ㅇ 공공기관의 개인정보보호를 위한 기본지침(안전행정부) 준수 ㅇ 홈페이지 보안관리 매뉴얼 (국가정보원) 준수 ㅇ 소프트웨어 개발보안 가이드(안전행정부) 준수
요구사항 출처		위에 명기된 관련 규정 및 지침

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		개발 보안 의무사항 준수
요구 사항 상세 설명	정의	시스템 개발시 주관사업자의 보안의무사항
	세부 내용	ㅇ 사업과정에 참여한 인력에 대하여 보안서약서 집행 및 보안교육 및 불시 보안점검에 응하여야 함 ㅇ 용역업체에 대한 보안관리는 문화재청 보안관리 및 정보보안 업무규정에 따르며 용역에 투입되는 문서ㆍ장비 등의 보안관리 계획을 수립하여 제시하여야 함 ㅇ 사업과정에 참여하는 주관사업자와 인력 전원은 시스템 구축과정에서 지득하게 되는 개인정보, 정보통신망 구성도, PC현황 등 관련사항을 사업진행 중은 물론 사업종료 후에도 외부에 누출하거나 유출할 수 없으며, 동 사항을 위반하는 경우 관련규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있음 ㅇ 사업과정에서 확보된 시스템 구성도, 네트워크 구성도, 업무연계관계 등의 자료는 사업 진행 중은 물론 사업종료 후에도 대외누출 할 수 없음 ㅇ 투입인력에 대한 정보보호, 내부정보 유출방지, 권한 외 시스템 접근 금지 및 통제방안을 제시하여야 함 ㅇ 시스템 개발을 위하여 인가되지 않은 개인이 개발서버에 접근하는 것을 불허하며, 주관사업자는 개발서버 보안을 위하여 접근관리 대장을 기록하여야 함 ㅇ 접근통제 취약점, 부적절한 파리미터 사용, XSS 등을 고려하여 주요 보안 취약점에 대한 대책을 제시하여야 함 ㅇ 사용자별 권한 설정으로 시스템 자원에 대한 접근을 제한함 ㅇ 데이터베이스 자원에 대한 접근을 제한함 ㅇ 웹 보안 방안을 제시하여야 함 ㅇ 통신장비, 보안장비 및 운영체제를 이용한 보안 방안을 마련함
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		누출금지 정보 관리
요구 사항 상세 설명	정의	주관사업자의 개발 의무사항(정보누출, 유출 금지사항)
	세부 내용	ㅇ 계약대상자는 과업을 수행을 통하여 지득한 정보에 대해서 문화재청 외부에 누설하거나 유출할 수 없으며, 그 범위는 다음과 같다. ① 기관 소유 전산시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황 ② 세부 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도 ③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보 ④ 전산시스템 취약점분석 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드(문화재청과 협의된 사항 제외) ⑥ 사업을 통하여 지득하게 되는 국가용 보안시스템 및 정보보호 시스템 도입현황, 시스템 이전업무를 수행하면서 습득하게 되는 통합전산센터 관련 자료일체 ⑦ 방화벽ㆍIPS 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 ⑧ ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 ⑨ ‘공공기관 개인정보보호에 관한 법률’ 제2조2호의 개인정보 ⑩ ‘보안업무규정’ 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제7조3항의 대외비 ※ 동 사항을 위배하여 외부로 누출하는 경우 국가계약법 시행규칙(별표2) 부정당업자의 입찰참가자격 제한기준(영 제76조 제1항 관련)에 따라 입찰참가자격을 제한한다. - 정보 누출 횟수가 2회 이상인 경우 : 3개월 제한 - 정보 누출 횟수가 1회인 경우 : 1개월 제한 ※ 주관사업자는 개발완료 후 사업 투입인력 전원에 대해서 USB, 노트북, 웹하드 등 데이터 이동 가능한 매체를 통하여 사업수행시의 정보를 보관하거나 유출하지 않는다는 보안각서를 제출하여야 함
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

라. 제약사항

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		구축 시스템에 대한 기술표준 관련 지침에 대한 준수
요구 사항 상세 설명	정의	구축 시스템에 대한 기술표준 관련 지침에 대한 준수
	세부 내용	ㅇ 인터넷 웹 콘텐츠 접근성 지침 및 웹 호환성 준수지침 준수 ㅇ ‘정보시스템 구축운영 기술 가이드라인 2.0’ 및 ‘정보시스템 구축운영 기술지침’ 준수
요구사항 출처		위에 명기된 관련 규정 및 지침

마. 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		산출물 관리
요구 사항 상세 설명	정의	산출물 목록 및 관리방안 마련
	세부 내용	ㅇ 주관사업자는 사업추진 과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요 내용, 작성 및 제출 시기, 제출 부수 등을 제시하여야 함 ㅇ 산출물 및 각종 안내서(시스템 운영자, 사용자 안내서 등)의 관리 방안을 제시하여야 함
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		품질보증
요구 사항 상세 설명	정의	품질보증방안 마련
	세부 내용	ㅇ 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등 품질 보증을 보장하기 위한 품질보증방안을 수립하여야 함 ㅇ 주관사업자는 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류를 제시하여야 함
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		저작권 침해 사전 방지
요구 사항 상세 설명	정의	저작권 침해 사전 방지
	세부 내용	ㅇ 시스템 구축 시 이용하는 이미지, 프로그램 소스 등 개발관련 일체의 사항에 대하여 타인의 저작권을 위배하지 않도록 조치하여 구축 해야 함 ㅇ 저작권 등 타인의 권리를 침해함으로 인하여 발주기관에게 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 배상하여야 함
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		저작권(저작재산권) 양도
요구 사항 상세 설명	정의	저작권(저작재산권) 양도
	세부 내용	ㅇ 사업수행자는 사업 수행으로 발생한 저작물에 대한 모든 저작권 (2차적 저작물 작성권 포함)을 발주기관에게 양도함 ㅇ 발주기관은 저작물에 대하여 수정․변경하여 이용할 수 있고, 사업수행자는 저작인격권을 근거로 어떠한 이의도 제기하지 않음 ㅇ 발주기관이 양도받은 저작재산권을 등록하고자 하는 경우 사업 수행자는 성실히 협조하여야 함
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		시스템 장애 대책 수립
요구 사항 상세 설명	정의	시스템 개발, 운영 시 위험에 대한 대책 수립
	세부 내용	1. 시스템 운영방안 ㅇ 도입 시스템은 1일 24시간, 365일 상시 운영함을 기본으로 함 ㅇ 도입시스템은 시스템별 단위시험, 통합시험, 성능시험을 실시 2. 장애 대책 ㅇ 백업을 통한 서비스 시스템의 중요 구성요소에 대한 장애발생시 복구방안을 제시하여야 함 ㅇ 장애대비 기능과 관리 기능을 제공하는 시스템과 운영체제의 도입방안을 제시하여야 함 ㅇ RAID 구성을 통한 디스크 장애 시 복구기능 방안을 제시하여야 함 ㅇ 백업시스템 등을 활용하여 중요 데이터에 대한 백업을 통한 장애 대비방안을 제시하여야 함 3. 위험 관리 ㅇ 품질저하 등 위험발생을 사전에 예방하고 발생 시 대책방안 마련 ㅇ 사업추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 마련
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		사업수행 시 의무사항
요구 사항 상세 설명	정의	사업수행 시 의무사항
	세부 내용	<사업수행 일반사항> 1. 계약체결 후 지정된 시한 내에 다음 서류를 제출하여야 함 - 착수계 - 사업수행자의 실적 및 참여자 명단(신원조사 서류, 경찰청 양식) - 사업수행 책임자 및 참여자 전원의 보안각서 2. 사업완료 시 노트북, USB 등을 통하여 자료를 유출하지 않음을 확인하는 각서 제출 < 사업관리 > 1. 사업수행에 필요한 개발장비 및 집기, 비품 등은 자체 준비하여야 함 2. 사업 수행 시 관련 자료의 외부유출을 방지하고, 작업의 효율성을 제고하기 위하여 발주기관 내부에 상주함을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 상호협의 하에 원활한 의사소통을 위해 청사외부의 근거리로 선정함. 다만, 핵심 개발인력이 아닌 지원인력의 근무 장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 달리 정할 수 있음 3. 당해 계약의 이행을 위하여 필요한 경우 그 사유 및 기간 등을 정하여 발주기관의 승인을 얻은 후 사업에 투입되는 인력을 합의하에 정해진 작업 장소 이외에서도 근무하게 할 수 있음 4. 청사 내부 작업장에 상주할 경우 발생하는 발주기관 시설 임대비용은 발주기관의 의사결정에 따라 발주기관에서 제시하는 국유재산 사용료 기준에 따라 발주기관과 협의하여 납부함 5. 사업 추진일정계획은 전체일정과 세부일정으로 구분하여 제출함
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류

프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호

PMR-007

요구사항 명칭

산출물 제출

요구

사항

상세

설명

정의

산출물 제출

세부

내용

1. 산출물 목록 및 제출시기

	산출물 종류	제출일정	제출부수
산출물명	사업수행계획서	계약체결 후 7일이내	2부
	요구사항분석서	요구분석완료 후 7일이내	3부
	상세설계서	상세설계완료 후 7일이내	3부
	프로그램명세서	구현 완료 후 7일이내	3부
	통합시험계획서	구현 완료 후 7일이내	2부
	통합시험보고서	시험 완료 후 7일이내	2부
	사용자 매뉴얼	시스템 검사 완료 후 14일이내	100부
	운용자 매뉴얼	시스템 검사 완료 후 14일이내	5부
	완료보고서	시스템 검사 완료 후 14일 이내	5부

ㅇ 각 단계별 사업수행완료 시 오브젝트 산출물은 별도 제출
또한, 각 산출물은 그 내용이 담긴 CD-ROM도 함께 제출

ㅇ 각 산출물 및 지침서 등은 이전 사업의 산출물과 합본하여 제출
(CD-ROM 포함 제출)

ㅇ 사업수행에 따른 최종 산출물은 문화재청 EA시스템에 적합한 형태로 제출하여야 함

2. 보고유형 및 내용

구 분	시기	보고자	보고대상	보고사항
일일보고	수시	PM, PL	감독 공무원	∙ 작업내역(자료 종류, 작업량) ∙ 문제점 보고/해결결과
주간업무 현황보고	매주	PM	주관기관	∙ 작업내역(자료 종류, 작업량) ∙ 주간 예정사항 ∙ 문제점 보고/해결결과
월간업무 현황보고	매월	PM	주관기관	∙ 작업내역(자료 종류, 작업량) ∙ 월간실시사항 ∙ 월간 예정사항 ∙ 위험관리 현황 및 결과 보고

ㅇ 보고방법

- 사업수행자는 주간업무현황보고서와 월간업무현황보고서를

발주기관에 제출

- 사업수행자는 발주기관이 조치를 요구한 경우, 그 조치결과를

차기 업무현황보고서에 포함

요구사항 출처

문화재청 정보화담당관실

바. 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		관련 행사 지원
요구 사항 상세 설명	정의	사업 관련 행사 추진 시 지원
	세부 내용	ㅇ 전시회, 학회, 포럼, 자문회의, 워크숍 등 사업내용 관련 각종 대내외 행사 3회 지원 ㅇ (외국어) 홍보동영상, 팸플릿, 브로슈어, 패널자료 등 홍보자료 제작 등
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		고객지원 인력 상주
요구 사항 상세 설명	정의	고객지원 인력 상주 및 주간 처리현황 보고
	세부 내용	ㅇ 전자행정, 협업포털, 행정포털에 대한 문화재청 내부직원, 지자체 직원, 유관기관 사용자, 민원인 등에 대한 문의사항 답변 및 사용법 안내 등을 수행할 인력 상주 ㅇ 웹페이지의 하단에 고객지원 인력 직통전화번호를 명기하여 바로 통화될 수 있도록 조치 ㅇ 고객지원인력은 민원접수, 처리 현황을 주간 단위로 보고
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		유지보수 및 기술지원
요구 사항 상세 설명	정의	유지보수 및 기술지원
	세부 내용	1. 유지보수 ㅇ 기 구축되어 운영하고 있는 문화재 전자행정, 행정포털, 전자민원시스템의 원활한 운영지원 ㅇ 유지보수 기간은 검수 후 1년으로 하며 일정기간(3개월) 개발자가 상주하여 지원하여야 함 ㅇ 유지보수 기간 중 시스템의 설계, 성능, 설치 등에 결함이 발생할 경우 무상으로 보수하여야 함 ㅇ 개발단계에서 참여한 인력 및 전문기술요원으로 유지보수 전담팀을 구성하여 시스템 및 서비스 신뢰성을 유지하고 안정성을 확보 하는데 최선을 다하여야 함 ㅇ 유지보수 방법은 내용에 따라 다양한 형태의 지원이 될 수 있으며, 가능한 On-site로 처리함 2. 기술지원 요건 ㅇ 관련분야에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응해야 함 ㅇ 사업수행 관련으로 기능 보완이 필요한 경우 제반 기술사항 지원 ㅇ 시스템에 대한 사양과 운영에 대하여 기술 지원
요구사항 출처		문화재청 정보화담당관실

요구사항 분류

프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호

PSR-004

요구사항 명칭

사용자 교육 실시

요구

사항

상세

설명

정의

사용자 교육 실시

세부

내용

1. 운영자 교육

ㅇ 시스템 구축 및 운영에 필요한 교육을 지속적으로 실시하고 사용자가 자체운영에 문제가 없도록 하여야 함

ㅇ 교육대상, 방법, 일정 등의 내용이 포함된 교육계획서 및 기술이전 계획서를 제출

ㅇ 교육계획의 구체적인 일정 및 내용은 발주기관과 협의하여 실시

ㅇ 교육 내용

구분	내용	대상	기간
실무자	문화재전자행정시스템 운용 - 고도화 및 신규개발 시스템	2명이상	∙ 계약후 2개월이내, 완료보고전 1개월 이내 ∙ 필요시 수시
	∙모바일 웹, 엡 서비스 운영관리 ∙관리방법 교육		∙ 완료보고전 1개월 이내 ∙ 필요시 수시
운영자	∙ 하드웨어 및 네트워크 운영관리 - 서버 및 네트워크 장비 등 ∙ 백업소프트웨어를 통한 자료의 주기적 교체입력 및 관리	2명이상	∙ 계약후 2개월이내, 완료보고전 1개월 이내 ∙ 필요시 수시
	∙ DBMS 및 검색엔진 사용법 ∙ 데이터베이스 백업 및 복구관리		∙ 완료보고전 1개월 이내 ∙ 필요시 수시

2. 사용자 교육

ㅇ 문화재청 직원, 지자체 직원, 협업기관 등 사용자교육 각 1회 이상 실시

ㅇ 교육 교재, 매뉴얼을 충실히 작성하여야 함

요구사항 출처

문화재청 정보화담당관실

8. 추진일정

구 분	구축 세부일정
	M1		M2		M3		M4		M5		M6		M7		M8		M9		M10
ㅇ 기획 및 업무분석
- 사업추진팀 구성
- 시스템 아키텍처 분석
- 사용자 요구사항 분석
- 신규 및 고도화 대상업무 분석
ㅇ 시스템 설계
- 업무 분석 설계
- 시스템 설계
- 시스템 아키텍처 설계
ㅇ 시스템 구현
- 업무시스템 개발(프로그래밍)
- 시스템 구현 및 안정화
- 고도화 대상 업무 구현
ㅇ 검사 및 통합시험
- 시스템 단위 테스트
- 시스템 통합 테스트
- 시스템 과부하 성능 테스트
ㅇ 시스템 검사 및 시범운영
- 시스템 검사
- 시스템 교육 및 운영계획 수립
ㅇ 유지보수
- 시스템 유지보수

※ 소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준(미래창조과학부고시 제2014-16호, 2014.2.14)에 의거, "소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준"에 따름

※ 추진일정은 사업 착수계획서 제출시 계약상황에 맞게 보완가능

9. 기술적용 계획표