2018 하반기 특별전

‘우리 탈놀이 이야기(가제)’추진계획

1		전시 목적

□ 국가무형문화재로 지정된 우리 탈놀이를 테마로 한 특별전시 개최로 우리 무형문화재에 대한 가치 확산

□ 우리 탈놀이에 대한 전반적인 역사, 관련 문헌자료, 회화자료 및 전하는 탈 등의 전시를 통해 탈놀이의 심도 있는 이해 도모

□ 국가지정문화재 지정을 중심으로 오늘날의 전승현황 소개를 통해 탈놀이의 현재적 가치 조명

2		전시 개요

□ 전 시 명 : ‘우리 탈놀이 이야기(가제)’

□ 전시기간 : 2019. 12. 10.(화) ~ 2020. 2. 23.(일) / 76일간 ※ 매주 월요일 휴관

- 개 막 식 : 2019. 12. 9.(월) 15:00 예정

□ 전시장소 : 국립무형유산원 기획전시실 및 로비

□ 전 시 품 :‘안동 하회탈 및 병산탈’(국보 제121호), 『중암고』(강이천, 18세기) 등

총 118건 193점【붙임2 참조】

□ 소요예산 : 301,700천원【붙임4 참조】

□ 예산과목 : 1132-303-210-01·02·07·09·14, 240-01

3		업무 계획

전시 연출 및 보조물 제작, 설치

□ 내    용

- 전시 연출 디자인 및 설치

- 전시 진열장·보조대 등 제작·설치

- 패널, 네임카드 등 설명보조물 제작

- 전시실 로비 체험존 등 제작·설치

- 전시장 외부 공간 포토월 및 유도사인 조성

□ 추진방식 : 협상에 의한 계약

□ 대    상 : 488㎡(147평)

- 기획전시실(284㎡/85.91평), 로비(154㎡/46평), 전시장 외부(50㎡/15평)

□ 소요예산 : 180,000천원

전시 도록 및 인쇄홍보물 제작

□ 내    용 : 전시 도록 및 인쇄홍보물(포스터, 초청장, 리플릿) 제작

□ 추진방식 : 협상에 의한 계약

□ 소요예산 : 30,000천원         ※ 용지·규격·면수·제본 등 세부 사양 변경 가능

구 분	도록	포스터	초청장	리플릿
발간부수	1,000	500	500	3,000
규 격(cm) 세로×가로	29.0×22.5	90.0×60.0	18.0×14.0	21.0×14.8
면수/제본	200쪽 내외 / 무선제본 또는 반양장	1면	양면(4p) / 접지	A3 내외 / 접지
용 지	표지: 랑데뷰 240g 내지: 랑데뷰 130g 면지: 밍크 120g	몽블랑 160g	몽블랑 160g	몽블랑 130g
인 쇄	5도	5도	5도	5도
내 용	· 발간사 · 도판 및 설명 · 논고 · 도판목록 · 부록	· 특별전 개최 안내	· 특별전 개막식 초청	· 특별전 소개 · 주요전시품 설명
비 고	․ 발송용 박스(1,000개) 및 마감 스티커 포함	․ 발송용 케이스(500개) 및 마감 스티커 포함	․발송용 봉투(500개) 및 스티커 포함	· 1종

외부홍보물 제작·설치

□ 내    용 : 각종 외부 현수막·배너 제작 및 설치

□ 추진방식 : 수의계약

□ 소요예산 : 4,000천원

사진촬영

□ 내    용 : 전시품 사진촬영, 개막식·전시실 사진촬영

□ 추진방식 : 수의계약

□ 소요예산 : 10,000천원

전시 영상물 제작 및 편집

□ 내    용

- 인터렉티브 영상 제작

- 전시 영상물 편집

□ 추진방식 : 일반경쟁

□ 소요예산 : 29,000천원

대여 전시품 보험 가입 및 운송

□ 내    용 : 대여기관으로부터 우리 원까지의 전시품 포장 및 운송

□ 추진방식 : 수의계약

□ 소요예산 : 20,000천원

원고작성, 논고 의뢰, 외국어 번역 및 원어민 감수

□ 내    용

- 도록 원고 및 패널, 전시품 설명 원고 작성

- 도록 수록 논고 의뢰(3편)

- 영어 번역(도록/서신 포함) 및 원어민 감수

□ 소요예산 : 3,000천원

개막행사 개최

□ 내    용

- 행사용 무대 제작 및 설치

- 음향시설 등 행사용품 설치․운영

- 개막 기념 공연 진행

- 테이프 커팅 및 전시 관람, 기념 촬영, 다과 및 리셉션 등

□ 장    소 : 얼쑤마루 1층 로비 및 기획전시실 등

□ 추진방식 : 수의계약

□ 소요예산 : 7,000천원

전시 홍보물 배포

□  특별전 홍보물 배포

- 인쇄홍보물(포스터·초청장 등) 배포

· 무형문화유산 관련기관, 전주 한옥마을 관광안내소, 지역 내 관공서·학교·관련 단체 등 700부 내외

- 특별전 도록 배포 : 무형문화유산 관계 기관, 관계자 등 800부 내외

- 소요예산 : 5,000천원

문화상품 제작·구입

□ 내    용 : 전시 관련 문화상품 제작·구입

□ 소요예산 : 5,000천원

4		홍보 계획

❍ 언론매체를 통한 홍보

- 방송사 및 신문사 대상 보도자료 배포

- 전시 안내 관련 기사

❍ 온라인 홍보

- 국립무형유산원, 문화재청 및 소속기관 홈페이지를 통한 안내

- 국립무형유산원 블로그, 페이스북, 인스타그램 등 SNS 매체를 이용한 홍보

❍ 오프라인 홍보

- 전시 포스터‧리플릿 제작 및 배부

· 한옥마을 관광안내소, 전북 16개 지자체 및 교육청‧교육지원청, 전국 문화시설(박물관, 도서관, 미술관 등), 무형문화유산 관련 기관

- 옥외 홍보물 설치

· 현수막 등 기관 인근 주요 지점 설치 : 무형원 앞 도로 등

- 교육청 연계, 지역 학생 대상 관람 홍보 실시

· 대상 : 지역 내 유치원, 초·중·고등학교 등

5		추진 일정

□ 사전 자문회의 개최 및 도록 논고 의뢰 : 7월

□ 전시 개최 계획 보고 : 8월

□ 전시품 사진촬영 : 9~10월

□ 도록, 패널, 전시품 설명 원고 작성 및 교정 : 9~11월 초

□ 전시 영상물 제작 : 9~11월

□ 대여 전시품 보험 가입 및 포장·운송 : 10월

□ 전시 연출 및 보조물 설계 및 제작·설치 : 10~11월

□ 포스터·초청장 제작 및 발송 : 10~11월

□ 외국어 번역 및 원어민 감수 : 11월 초

□ 도록·리플릿 제작 및 배포 : 11월

□ 언론홍보 및 대중교통 홍보 : 11월

□ 전시 개막 행사 개최 : 12. 9.(월)

□ 전시 오픈 : 12. 10(화)

□ 전시 철거 및 대여 전시품 반환 : 2020. 2월

※ 세부 일정은 추진 상황에 따라 일부 변동 가능

6		협조 사항

□ 기획운영과

- 전시실 전기 및 조명공사 시 점검 협조

- 전시 준비 및 운영기간 중 시설 운영 관련 사항 협조

□ 전승지원과

- 소장 전시품 대여 및 출·격납 지원

□ 조사연구기록과

- 전시기간 전·후의 대여 전시품 수장고 출·격납 지원

- 기록도서 및 기록화 영상 등 소장자료 제공

붙임 1. 전시구성(안) 1부

2. 전시품 목록(안) 1부

3. 전시배치도(안) 1부

4. 소요예산내역서(안) 1부.  끝.