【별지 제1호 서식】

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

수리기술과

②담당자

(전화번호)

조율호 주무관

(042-481-4828)

③정책사업명

전통건축부재보존센터 건립 추진

④선정기준

5억 이상 예산 투입 사업

⑤사업기간

2012~2016

⑥주요내용

ㅇ 추진목적

- 전통건축문화재의 수리 시 부식·파손 등으로 교체되는 건축부재를 보존

- 이를 연구·전시·교육하여 전통건축의 변천과정을 보존하고 전승

ㅇ 사 업 비 : 70억원(총 사업비 241억원)

ㅇ 사업내용 : 건축공사(골조·창호·수장), 전기·통신·설비공사 등

ㅇ 세부추진계획

구 분	추진계획
1/4분기	ㅇ전기,통신공사 1차(2014년) 준공 ㅇ건축 2차공사 진행 ㅇ3차년도(2015년) 공사 및 용역 계약
2/4분기	ㅇ관급자재(창호, 테크플레이트 등) 발주 ㅇ진입도로공사 착수 ㅇ건축, 전기, 통신, 소방공사 수행 (전체 예정공정율 : 23%)
3/4분기	ㅇ건축 2차공사 준공(계약금액 4억원) ㅇ관급자재(철근, 레미콘, 전기 등) 발주 ㅇ건축3차, 전기·통신·소방공사 2차공사 수행 (전체 예정공정율 : 32%)
4/4분기	ㅇ건축 골조공사 완료 ㅇ3차년도(2015년) 공사 및 용역 준공 (전체 예정공정율 : 40%)