정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-32

담당부서

작성자

(문화재청 / 궁능문화재과)

(김태영/4778/kty1@korea.kr)

정 책 명

덕수궁 즉조당 보수공사

사업개요

및

추진경과

□ 추진 배경

ㅇ 덕수궁 내 노후된 즉조당을 보수하여 효율적인 문화재 보존 및 관람환경을 개선하고자 함.

□ 추진 경과

ㅇ 2008. 5. : 덕수궁 즉조당 보수설계용역 착수

- 설계업체 : 선영건축사사무소(대표:이배영)

- 계약금액 : 42,022천원

ㅇ 2008. 11. : 덕수궁 즉조당당 보수설계용역 완수

ㅇ 2012. 3 : 덕수궁 즉조당 보수공사 착공

ㅇ 2012. 5 : 관계전문가 자문회의 개최

- 자문위원 : 전 문화재위원 김동현, 윤홍로

- 자문안건

․ 즉조당 기와 막새 및 망와 문양 제작 방안 검토

․ 즉조당 보수방안 검토 등

ㅇ 2012. 5 : 즉조당 상량문 수습 및 긴급보존처리

- 상량문(1,128㎝×94㎝) 1점, 부적 1점, ‘水’자 은제유물 3점

ㅇ 2012. 6 : 즉조당 보수공사 제1차 설계변경

- 공사금액 : 489,749천원(감, 30,898천원)

- 주요내용

․ 장연, 단연, 선자연 등 목부재 교체물량 감소에 따른 감액

․ 추녀 1본, 사래 4본, 종도리 7본 등 구조부재 훼손부위 수지처리 추가

․ 지붕기와 교체물량 증가(당초 80%→90%교체) 및 망와 10매 추가 제작

ㅇ 2012. 6 : 덕수궁 즉조당 상량문 봉안

- 내  용 : 덕수궁 즉조당 수리 상량문

- 작성자 : 정도준(서예가)

ㅇ 2012. 7 : 즉조당 보수공사 제2차 설계변경

- 공사금액 : 519,260천원(증, 29,511천원)

- 주요내용

․ 설계도서에서 누락된 즉조당 배면 지붕기와 해체 및 잇기 물량 추가 반영에 따라 공사금액 증액

․ 목조반자틀 전체 교체에서 일부 부식 및 훼손된 부분만 보수토록 감액

ㅇ 2012.  8 : 덕수궁 즉조당 보수공사 준공

□ 주요 내용

ㅇ 공 사 명 : 덕수궁 즉조당 보수공사

ㅇ 공사금액 : 501,184,970원

ㅇ 시 공 사 : (유)유심종합건설 (대표 양한철)

ㅇ 공사기간 : 2012. 3. 14 ~ 2012. 08. 13

ㅇ 공사내용

- 규 모 : 104.36㎡(정면 7칸, 측면 3칸)

- 양  식 : 팔작지붕, 겹처마, 굴도리 5량가, 초익공

- 공사내용 : 즉조당 기와해체 후 부식재 교체 및 번와보수

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 궁능문화재과   김태영

- 최종 결재자 : 문화재청장     변영섭

ㅇ 관련자 변경이령

- 과장 최이태 2012.3~2012.8

- 사무관 이재서 2012.3~2012.8

- 담당 김태영 2012.3~2012.8

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
청장	변영섭	청 장	'13.03.18～	문화재 업무 총괄
차장	박영대	차 장	'13.04.22～	문화재 업무 부총괄
과장	정영훈	과 장	'13.10.25 ～	궁능문화재과 총괄
담당	이성희	사무관	'12.09.16～	공사진행 총괄
담당	김태영	주무관	'11.05.25 ～	공사감독

다른기관 또는

민간인 관련자

< 즉조당 보수공사 자문위원 명단 >

성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
김동현	전 문화재위원	‘12.5.～8월	자문위원
윤홍로	전 문화재위원	〃	〃