민속마을 보존․활용 및

종합정비세부실천계획

2004. 5.

문 화 재 청

-ⅰ-

차   례

1. 민속마을 보존 기본원칙 ----------------------------------	1
2. 가옥내 주민편의시설 설치기준 -----------------------------	2
3. 민속마을 시설 설치기준 ----------------------------------	6
4. 민속마을 종합정비 세부실천계획 ---------------------------	9
가. 계획의 수립배경 및 목적 --------------------------------	9
나. 주요내용 ---------------------------------------------	10
다. 안동하회마을 -----------------------------------------	15
1) 문화재 현황 -----------------------------------------	15
2) 정비실적 --------------------------------------------	16
3) 사업추진계획 ----------------------------------------	17
가) 기본방침 ------------------------------------------	17
나) 사업개요 -----------------------------------------	17
다) 세부추진계획 --------------------------------------	17
(1) 문화재 원형보존 ----------------------------------	17
(2) 마을공동시설 정비 --------------------------------	21
(3) 마을기반시설 정비 --------------------------------	23
(4) 관람객 편의시설 설치 ------------------------------	26
(5) 관광시설 조성 ------------------------------------	28
라) 소요예산 -----------------------------------------	31
마) 가옥별 현황 및 정비계획 ----------------------------	35
라. 성읍민속마을 -----------------------------------------	51
1) 문화재 현황 -----------------------------------------	51
2) 정비실적 --------------------------------------------	53
3) 사업추진계획 ----------------------------------------	53
가) 기본방침 -----------------------------------------	53

-ⅱ-

나) 사업개요 -----------------------------------------	53
다) 세부추진계획 --------------------------------------	53
(1) 문화재 원형보존 ----------------------------------	53
(2) 관아복원 및 성곽보수정비---------------------------	57
(3) 마을기반시설 정비 --------------------------------	60
(4) 관람객 편의시설 설치------------------------------	63
(5) 관광시설 조성 ------------------------------------	65
라) 소요예산------------------------------------------	68
마) 가옥별 현황 및 정비계획 ----------------------------	71
라. 월성양동마을 ------------------------------------------	82
1) 문화재 현황 -----------------------------------------	82
2) 정비실적 --------------------------------------------	84
3) 사업추진계획 ----------------------------------------	85
가) 기본방침 -----------------------------------------	85
나) 사업개요 ------------------------------------------	85
다) 세부추진계획 --------------------------------------	85
(1) 문화재 원형보존 ----------------------------------	85
(2) 마을공동시설 정비---------------------------------	88
(3) 마을기반시설 정비---------------------------------	88
(4) 관람객 편의․관광시설 설치 ------------------------	92
라) 소요예산 -----------------------------------------	97
마) 가옥별 현황 및 정비계획 ----------------------------	100
마. 고성왕곡마을 -----------------------------------------	118
1) 문화재 현황 -----------------------------------------	118
2) 정비실적 --------------------------------------------	119
3) 사업추진계획 ----------------------------------------	119
가) 기본방침------------------------------------------	119
나) 사업개요 -----------------------------------------	120
다) 세부추진계획 -------------------------------------	120
(1) 문화재 원형보존 ----------------------------------	120
(2) 마을공동시설 정비 --------------------------------	123
(3) 마을기반시설 조성 ---------------------------------	124

(4) 관람객 편의․관광시설 설치 -------------------------	127
라) 소요예산 -----------------------------------------	130
마) 가옥별 현황 및 정비계획 ----------------------------	133
바. 아산외암마을 -----------------------------------------	143
1) 문화재 현황 -----------------------------------------	143
2) 정비실적 --------------------------------------------	144
3) 사업추진계획 ----------------------------------------	144
가) 기본방침 -----------------------------------------	144
나) 사업개요 -----------------------------------------	144
다) 세부추진계획 --------------------------------------	145
(1) 문화재 원형보존 ----------------------------------	145
(2) 마을공동시설 정비 ---------------------------------	149
(3) 마을기반시설 정비 --------------------------------	150
(4) 관람객 편의시설 설치 -----------------------------	153
(5) 관광시설 조성 ------------------------------------	157
라) 소요예산 -----------------------------------------	162
마) 가옥별 현황 및 정비계획 ----------------------------	167
5. 전통민속마을 활용기본계획--------------------------------	176
6. 민속마을 초가이엉잇기사업 개선방안 ------------------------	185
7. 마을주민이 시행할 수 있는 경미한 수리행위 확대 -------------	187
8. 민속마을 보존활동에 대한 주민참여 권고---------------------	188

-ⅲ-

민속마을 보존 기본원칙

민속마을 보존․정비 및 종합정비 세부실천계획

민속마을 보존 기본원칙

1. 민속마을의 보존은 그 지역의 역사적, 문화적 환경과 함께 고려되어야 한다.

2. 민속마을의 보존 계획은 각 마을의 특성에 맞게 개개 마을별로 수립한다.

3. 마을주민의 화합과 자율적인 참여가 민속마을의 보존을 위한 필수 요소임을 인식하고 주민참여방안을 강구한다.

4. 민속마을 보존을 위하여 문화유산 관광이 유익함을 인식하고 역사문화적 요소를 활용하도록 하되, 마을의 원형 보존이 유지되도록 한다.

5. 원형보존만이 지속가능한 관광자원이 되며 주민소득 향상에 도움이 됨을 인식한다.

6. 조상에게 물려받은 유산을 잘 보존하여 후손에게 온전히 물려줄 책임이 있음을 인식한다.

가옥내 주민 편의시설 설치기준

시행일 : 2004. 3. 2

적용대상

이 편의시설 설치기준은 문화재로 지정된 민속마을내 가옥에 적용하며, 개별 단위문화재로 지정된 가옥은 별도의 주민편의시설 설치기준을 마련한다.

기본원칙

오랜 기간을 거쳐 형성된 각 마을별 가옥내 건물의 전통적인 공간 배치구조는 보존되어야 할 문화유산으로 각종 시설의 설치로 인해 훼손되어서는 안된다.

가옥 본채 및 부속건물의 외부형태는 마을별 가옥구조․형태 등이 반영된 조선시대 전통양식을 원형으로 한다.

가옥내 주민 편의시설 설치기준

외부로 노출되는 기단부와 초석은 석재를 사용하여 전통수법으로 설치하되, 건축물의 기능과 용도, 규모에 맞도록 한다.

건물 외부로 시멘트, 금속, 플라스틱 등 현대적인 재료가 노출되어서는 안된다.

가옥내 주민펀의시설 설치기준

생활의 필요에 의해 불가피하게 건물의 신축이 필요한 경우 전통가옥의 배치수법에 따라 위치를 선정하고, 신축 건물의 높이와 규모는 당해 가옥내 기존 건물의 규모를 과도하게 초과해서는 안되며, 전체적인 형태는 기존 가옥과 어울려야 한다.

이미 원형을 크게 훼손한 시설은 이 지침에 의거하여 점진적으로 원형으로 환원한다.

화장실 내부시설, 욕실 내부시설, 부엌 내부, 보일러․난방시설, 현대식 창호, 기타 가옥의 원형이 아닌 생활편의시설의 설치비용은 거주자가 부담한다.

이 지침에 의하여 편의시설 설치시, 관련 법령에 의하여 문화재 현상변경허가 등의 절차가 필요한 경우에는 별도로 동 절차를 이행하여야 한다.

세부 설치기준

구 분	설 치 기 준	비 고
방	○ 전체적인 평면은 원칙적으로 원형을 유지해야 한다. ○ 방을 크게 사용하기 위한 내부 칸막이 벽 제거는 구조적으로 지장이 없는 범위 내에서 제거할 수 있으나, 원형의 가구(架構)를 확인할 수 있는 부분은 가능한 보존한다. ○ 난방시설은 전통 구들을 보존하는 범위내에서 설치할 수 있다.
부 엌	○ 추후 원형을 복원하는 경우를 고려하여 가능한 한 원형을 제거하지 않은 상태에서 바닥을 높이는 시공방법을 모색한다. ○ 부엌에 설치하는 가구는 가옥과 어울리는 형태와 색상을 선택한다.
대 청	○ 마루 전면에 창을 설치하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. ○ 바닥마루를 제거하고 다른 재료로 개수해서는 안된다. ○ 마루벽을 제거하여 큰방으로 구조 변경해서는 안된다. ○ 마루 후면에 덧대어 새로운 벽을 설치해서는 안된다.
보일러실	○ 가능한 한 실내에 두어 외부에서 보이지 않도록 한다(본채 내부, 창고 내부 등). ○ 외부에 설치할 경우 단독건물로 하지 말고 필요한 부속공간을 합쳐 한 건물 속에 들어가도록 한다(예 : 창고＋화장실＋보일러실). ○ 본채에 붙여 달아낼 경우 처마선 이내로 하고 본채의 구조, 재료와 어울리도록 한다. ○ 연료탱크는 외부로 노출시키지 말고 본채와 유사한 재료 등을 사용하여 외부를 가리도록 한다.
화장실	○ 본채 외형 및 평면의 변형을 주지 않는 한도 내에서 본채 내에 화장실을 설치할 수 있다. ○ 본채 외부로 덧붙인 화장실은 설치할 수 없다. ○ 평면 변형이 없는 한도 내에서 창고 등 부속채에 화장실을 설치할 수 있다. ○ 부속채가 없는 경우 창고, 화장실, 욕실, 보일러실을 함께 넣어 설치할 수 있다. ○ 가옥 여건상 화장실(욕실 포함)만 별동으로 설치해야 하는 경우 외형은 가옥에 어울리는 전통양식으로 하되, 내부는 현대식으로 설비할 수 있다.

구 분	설 치 기 준	비 고
욕 실	○ 본채 외형 및 평면의 변형을 주지 않는 한도내에서 본채 내에 욕실을 설치할 수 있다. ○ 본채 외부로 덧붙인 욕실은 설치할 수 없다. ○ 평면 변형이 없는 한도 내에서 창고 등 부속채에 욕실을 설치할 수 있다. ○ 부속채가 없는 경우 창고, 화장실, 욕실, 보일러실을 함께 넣어 욕실을 설치할 수 있다.
대문․ 담장	○ 대문과 담장은 고증에 따라 설치유무를 결정하며, 고증에 따라 대문을 설치할 경우 대문의 위치․형태․규모 및 재질 등은 가옥의 규모와 형태를 감안하여 결정한다. ○ 담장내 설치하는 부출입문은 불허하며, 기 설치된 부출입문은 점차적으로 원형대로 환원한다.
굴 뚝	○ 굴뚝은 원래의 형태와 규모로 보수하여야 한다. ○ 굴뚝의 형태와 규모를 확인할 수 없을 때에는 건물의 형태와 규모를 감안하여 결정한다.
부속채 (농기구고, 창고 등)	○ 블럭구조, 슬레이트 지붕 등으로 변형된 부속채는 원형으로 보수한다. ○ 원형고증이 어려운 부속채 배치 및 보수는 본채의 형태와 구조를 감안하여 잘 어울리도록 한다. ○ 부속채 단독건물의 규모는 마을내 일반적인 부속채의 규모에 준한다.
창호 ․ 벽체	○ 외부로 노출되는 창은 전통적인 형태와 재료를 사용하되 건축물의 기능과 용도, 규모에 맞도록 한다. ○ 기존의 전통창호는 변형할 수 없으며 안쪽에 이중 창을 설치할 때는 목재와 유사한 색상과 모양으로 만들어야 한다. ○ 벽체 내부에는 외형에 변화를 주지 않는 범위 내에서 단열성이 높은 재료를 사용할 수 있다. ○ 전기계량기, 분전반, 전화단자함 등 건물에 부착되는 시설은 가능한 한 외부에서 보이지 않도록 은폐하며, 그 색상과 재료는 마을별 가옥 특성이 반영되도록 한다.

구 분	설 치 기 준	비 고
축 사	○ 축사는 가옥내 시설물 활용을 원칙으로 한다. ○ 주민불편 및 환경오염을 초래할 수 있는 축사는 마을내 설치할 수 없다, ○ 마을내 전통가옥의 일반적인 부속채 크기를 벗어난 규모의 축사시설 설치는 불허하며, 기존 시설은 마을경관을 해치지 않는 곳으로 이전한다.
마 당	○ 마당의 표면은 흙바닥이나 마사토 깔기를 원칙으로 하며, 전통적인 옛 모습대로 유지하도록 한다 ○ 마당에는 전통수종을 심고, 외래수종은 점차 전통수종으로 교체한다. ○ 건물앞 마당에는 교목류의 수목을 심지 않는다.
기타 시설물	○ 처마에 차양이 필요한 경우 전통수법을 응용하여 설치할 수 있다. ○ 전통적인 모습을 해치지 않는 범위 내에서 협의를 거쳐 부분적으로 현대재료를 사용할 수 있다. ○ 외부로 노출되는 냉방기기는 나무, 대나무, 발 등 전통재료를 이용하여 가리개 또는 함을 만들어 가옥경관에 어울리도록 한다. ○ 프로판 가스통은 나무, 대나무, 발 등 전통재료를 이용하여 가리개 또는 함을 만들어 가옥경관에 어울리도록 한다.

민속마을 시설 설치기준

시행일 : 2004. 3. 2

이 설치기준은 가옥내 시설을 제외한 시설물에 대하여 적용함

시 설	설 치 기 준	비 고
	< 마을 기반 시설 >	민속마을 시설 설치기준
배수로	○ 배수로는 노출형․매립형 등 지형여건에 맞게 설치한다. ○ 우수로와 오수로는 분리 설치함을 원칙으로 한다. ○ 오수로는 악취를 방지하여 쾌적한 마을 분위기를 조성하기 위해 매립형을 기본으로 하여, 정화시설로 연결한다. ○ 배수로는 하단부에 흙막이 정도의 높이만 자연석 석축을 쌓고, 그 위는 흙으로 경사처리 한다. - 필요한 경우 상부에는 마을내 자생 야생화초류를 심는다 ○ 배수로의 석축은 전통 석축양식으로 정비하고, 기존의 견치석 석축 등 조잡한 석축은 점차 전통양식으로 정비한다. ○ 배수로(우수)는 자연재해 우려 등 불가피한 경우를 제외하고는 인위적으로 직선화하거나 폭을 넓히지 않고 자연 그대로 정비한다.
교 량	○ 차량운행이 필요한 곳을 제외하고는 소규모의 전통적인 모습으로 경관에 어울리게 설치한다. ○ 차량운행 도로는 최대한 마을경관을 해치지 않는 장소와 외관을 고려하여 설치한다. ○ 마을 경관에 어울리지 않는 장식적이고 화려한 교량은 경관에 어울리는 것으로 정비한다(기존 교량의 내구연한 등 고려).
소하천 정비	○ 기존의 자연스러운 곡선, 폭 등을 훼손하지 않는다. ○ 하단부에 흙막이 정도의 높이만 자연석 석축을 쌓고, 그 위는 흙으로 경사처리 한다. - 필요한 경우 상부에는 마을내 자생 야생화초류를 심는다

시 설	설 치 기 준	비 고
조경 및 환경정비	○ 조경은 외래 조경양식을 배제하고, 전통양식으로 한다. - 마을내 자생하는 수종, 화훼 식재 ○ 마을내 외래수종은 점진적으로 전통수종으로 교체한다. ○ 기존에 조성된 견치석축 등 외래조경 시설물 등은 점진적으로 전통적인 방식으로 정비한다.
소화전․ 소화기	○ 소화전 함은 주변경관과 어울리는 형태․재료로 제작한다. ○ 소화전을 마을길에 설치하는 경우 돌출되지 않도록 한다. - 담장내 매입, 지중화 등 고려 ○ 소화기는 마을별 특성에 맞게 별도의 가리개 또는 함을 제작 보관토록 한다.
가로등	○ 마을 특성에 맞는 형태․재질로 제작하여 설치한다. ○ 담장내에 매입하거나 담장높이 이하로 하여 노출이 최소화되도록 한다.
전기․통신 시설	○ 가옥외부 간선시설은 지하매설을 원칙으로 한다. ○ 가옥 내부 등의 각종 지선은 가급적 외부에 노출되지 않도록 하며, 외부 노출시에는 마을 특성에 맞는 형태․재질을 사용 은폐한다(전화․전기단자, 변압기 등). ○ T.V 안테나 등은 가급적 공용화하여 한 곳에 설치하고, 각 가옥으로의 연결선은 지하에 매립한다.
	< 마을 공동시설 >
농기계 보관시설	○ 농기계는 원칙적으로 각 가옥내 창고 등 부속채를 활용한다. ○ 농기계 수량 증가 또는 가옥 구조상 가옥내 보관이 어려운 경우 공동보관시설을 설치하되, 장소는 마을외부에 위치토록 한다. - 마을에서 조망되는 경우 구릉조성, 수목식재 등 차폐시설 설치 ○ 공동보관시설의 외관은 마을별 특성에 맞는 양식으로 하며, 내부구조 및 재질은 현대건축양식을 활용할 수 있다.
마을공동 창고	○ 농기계 보관시설 설치기준을 준용하되, 규모가 큰 경우에는 적당한 크기로 분리․배치한다.

시 설	설 치 기 준	비 고
마을회관	○ 마을회관은 마을내 공가 등 기존 시설물을 활용토록 하고, 마을내 별도의 건물을 신축하지 않도록 한다. ○ 마을 구조상 불가피하게 신축해야 할 경우, 마을 경관에 지장이 없는 장소 및 규모로 건립한다.
관리 사무소	○ 관리사무소를 신축할 경우에는 마을 밖 주차장 또는 집단상가시설 조성지역 등 마을외부에 설치함을 원칙으로 한다
공동축사 시설	○ 마을내에는 공동축사 시설을 설치할 수 없다. ○ 공동축사시설이 필요한 경우에는 마을 경관을 해치지 않는 곳에 환경 문제 등이 발생하지 않도록 설치한다.
	< 관람편의․관광시설>
공중 화장실	○ 공중화장실은 마을내 공가의 화장실을 최대한 활용하며, 내부는 현대식으로 설비할 수 있다. ○ 화장실을 마을내 신축해야 하는 경우에는 마을별 특성에 따라 가옥형태․경관 등에 어울리는 형태․재질을 사용하여 건립한다.
관람객용 주차장	○ 관람객용 주차장은 마을경관을 고려하여 마을에서 조망되지 않는 곳에 설치한다. ○ 입지조건상 불가피하게 마을에서 조망되는 곳에 설치하는 경우에는 구릉조성, 수목식재 등을 통해 차폐한다. ○ 주차장 위치를 선정할 때에는 ‘주차장 - 진입공간(마을입구, 도보로 접근) - 마을’의 관람동선을 고려하여 선정한다.
전시관 등 홍보시설	○ 전시관 등 홍보시설은 마을 공가 등 기존 시설물 등을 우선적으로 활용한다. ○ 규모가 큰 전시시설 등은 마을외부에 위치한 관광시설단지에 설치한다.
기 타 시설물	○ 음수대, 벤치, 휴지통, 이정표, 안내설명판 등 관람편의시설은 마을별 특성을 감안하여 최대한 간결하게, 친환경적으로 제작․설치한다. ○ 음수대, 벤치, 휴지통, 이정표 등은 마을내 산발적으로 설치하지 않고, 관람로 상의 주요 지점에 집중 배치한다.

민속마을

민속마을 종합정비 세부실천계획

총괄편

종합정비세부실천계획

Ⅰ. 계획의 수립배경 및 목적

1. 배 경

2000～2002년간 실시한 민속마을 종합정비계획 연구용역보고서를 토대로 세부시행계획을 수립하여 체계적이고 지속적인 정비 추진

2. 목 적

◦ 민속마을의 원형보전

주변경관을 포함하여 원형대로 보존하는 것을 기본원칙으로 한 문화재의 체계적인 보존ㆍ정비

◦ 지역주민 생활여건의 개선

- 훼손ㆍ변형된 전통가옥들을 원형대로 보수하되,

- 선조들의 삶의 모습을 계승ㆍ유지하면서 민속마을이 주민의 주거공간으로 기능할 수 있도록 최소한의 문화시설을 허용하고 편의시설을 확충, 생활불편사항 해소

◦ 관람편의시설 및 관광프로그램 개발

- 편의시설을 종합적으로 정비하여 마을의 특성이 반영된 다양한 관광프로그램 개발․운영 기반 조성

3. 기본방향

◦ 동 종합정비세부실천계획은 2003년부터 2012년까지 10개년 계획으로 민속마을 정비에 필요한 소요예산을 추정함

◦ 동 계획은 국가 및 지방재정여건과 문화재 행정환경 변화를 수용하고 관련전문가의 의견을 수렴하여 탄력적으로 수정ㆍ보완하여 추진

◦ 사업별 소요예산은 사업성격에 맞는 관련부서․관련단체와 협의하여 예산확보를 극대화하며 재정여건의 변동 등이 있는 경우 추진시기 조정

◦ 2년 단위로 사업추진 및 예산집행 상황을 분석․평가하여 마을별 사업 우선순위 조정

Ⅱ. 주요내용

계획기간 : 2003～2012년(10년간)

대상마을 : 중요민속자료로 지정된 민속마을

○ 안동하회, 성읍민속, 월성양동, 고성왕곡, 아산외암

정비분야

○ 각 마을별로 ① 문화재 원형보존 ② 마을공동시설 ③ 마을기반시설 ④ 관람객 편의시설 ⑤ 관광시설 분야를 기본으로 정비계획 수립

총 투자액 : 193,980백만원(국고 118,817, 지방비 75,163)

마을별 ․ 연도별 투자액

(단위 : 백만원)

구분	계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
계	193,980 (118,817)	16,620 (9,931)	13,762 (8,877)	20,526 (13,116)	27,485 (14,253)	24,189 (14,577)	23,768 (14,524)	20,312 (13,071)	18,246 (11,729)	16,718 (10,718)	12,354 (8,021)
하회	27,226 (17,839)	4,354 (2,631)	2,555 (1,577)	4,088 (2,631)	4,271 (2,959)	3,378 (2,314)	3,575 (2,413)	2,242 (1,479)	1,351 (896)	768 (508)	644 (431)
성읍	51,980 (30,479)	3,142 (2,200)	3,770 (2,100)	4,013 (2,704)	4,911 (2,973)	7,740 (4,935)	7,137 (3,717)	6,221 (3,704)	6,700 (3,704)	5,265 (2,880)	3,081 (1,712)
양동	54,513 (30,741)	3,985 (2,200)	3,142 (2,200)	5,507 (3,155)	10,689 (3,140)	5,894 (2,725)	5,266 (3,426)	5,084 (3,437)	4,057 (2,839)	4,913 (3,438)	5,976 (4,181)
고성	23,099 (15,681)	2,742 (1,500)	2,152 (1,500)	3,302 (2,305)	3,481 (2,429)	2,014 (1,403)	1,768 (1,229)	1,518 (1,054)	2,916 (2,034)	2,748 (1,915)	458 (312)
아산	37,162 (24,077)	2,397 (1,400)	2,143 (1,500)	3,616 (2,321)	4,133 (2,752)	5,163 (3,200)	6,022 (3,739)	5,247 (3,397)	3,222 (2,256)	3,024 (1,977)	2,195 (1,535)

* (   )은 국고

분야별 투자액 및 단위사업 현황

(금액단위 : 백만원)

구 분		합 계	안동하회	성읍민속	월성양동	고성왕곡	아산외암
문화재원형보존	단위사업	26	5	4	3	4	10
	소요예산	57,172	10,813	8,563	21,890	7,884	8,022
		(39,945)	(7,569)	(5,993)	(15,318)	(5,450)	(5,615)
마을공동시설 (성읍 : 관아지, 성곽정비)	단위사업	19	4	9	-	3	3
	소요예산	27,779	2,400	19,209	-	1,240	4,930
		(19,445)	(1,680)	(13,446)	( -)	(868)	(3,451)
마을기반시설	단위사업	39	6	6	10	9	8
	소요예산	57,270	3,150	10,456	26,369	5,815	11,480
		(28,276)	(2,205)	(3,983)	(11,048)	(3,651)	(7,010)
관람객편의․ 관광시설	단위사업	63	10	12	13	5	23
	소요예산	51,759	10,863	13,752	6,254	8,160	12,730
		(31,530)	(6,385)	(7,057)	(4,375)	(5,712)	(8,001)
합 계	단위사업	147	25	31	26	21	44
	소요예산	193,980	27,226	51,980	54,513	23,099	37,162
		(118,817)	(17,839)	(30,479)	(30,741)	(15,681)	(24,077)

마을별 사업내용 및 투자액

안동하회마을 (중요민속자료 제 122호, ‘84. 1.10 지정)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 용	투자액
계		27,226
문화재 원형보존	퇴락․변형가옥 정비(147개소), 담장보수(4,371m), 초가이엉잇기(307동), 공가관리, 대문정비(철대문 12개소) 등	10,813
마을 공동시설	농기계보관창고(100평), 마을창고(100평), 주민공용주차장, 마을회관(60평) 등	2,400
마을 기반시설	마을안길정비 1,650m, 오․폐수 정화시설(200톤/일), 배수로정비(3,000m), 소화전 설치(5개소), 가로등(23개소) 정비 등	3,150
관람객 편의시설	마을내 공중화장실 설치(2개소)․음수대 설치(2개소), 이정표 정비, (구)풍남초등학교부지 활용(유물전시관건립)	4,525
관광시설	관광단지조성․주차장 정비․마을환경 조경정비, 탈놀이전수관 보수, 나룻배 제작 등 (문광부 예산사업),	6,338

* (구)풍남초등학교 부지활용 : 사업추진 여부 별도 검토

성읍민속마을 (중요민속자료 제188호, ‘84. 6. 7 지정)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 용	투자액
계		51,980
문화재 원형보존	퇴락․변형가옥 정비(279동), 지정문화재보수(초가 10동), 지정문화재 매입(초가 9동), 초가이엉잇기(연415동) 등	8,163
관아지․성곽 복원․정비	관아지 토지매입․발굴조사․복원(21동), 성곽 저촉지 토지매입, 치성․여장․동문 복원 등	19,209
마을 기반시설	마을공동주차장(2개소), 성곽탐방로, 오수․우수관로 분리(2,573m), 전기통신 지중화(7,156m), 가로등 정비(83개소) 등	10,456
관람객 편의시설	주차장 조성(6,600㎡), 관리사무소․안내소(각 1동), 편의시설(휴게소, 공중화장실, 음수대 등) 등	3,810
관광시설	관광기반시설(34,955㎡), 전시관/전수관(1,873㎡), 전통공예․특산품 판매장(10동), 야외공연장(7,720㎡), 체험가옥(15동) 등	9,942

* 관아지․성곽정비, 전시관/전수관. 체험가옥 등은 사업추진여부 및 규모, 별도 재검토

월성양동마을 (중요민속자료 제189호, ‘84.12.24 지정)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 용	투자액
계		54,513
문화재 원형보존	변형․퇴락가옥보수(142가옥), 지정문화재보수(16가옥), 초가이엉잇기(연90동) 등	21,890
마을 공동시설	농기계보관창고(대지 7,177㎡, 건물 933㎡ - 1,310백만원) - 창고 2동, 각 414㎡, 정비 및 관리소 105㎡	‘02국고보조사업
마을 기반시설	마을도로포장(마을내, 우회도로), 소교량 정비(11개소), 소하천 정비(1,080m), 배수로 정비(1,800m), 공동구 설치, 오․폐수 정화시설(300㎡/일), 배수펌프장 조성, 조경․환경정비 등	26,369
관람객편의․ 관광시설	주차장․휴게소(36,815㎡), 동산정비(2개소), 안내소건립(1동), 양동교회 이전, 각종 휴식공간 조성 등	6,254

고성왕곡마을 (중요민속자료 제235호, ‘00. 1. 7 지정)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 용	투자액
계		23,099
문화재 원형보존	퇴락․변형가옥 정비(160동), 담장보수(20가옥), 초가이엉잇기(124동), 공가관리(7가옥) 등	7,884
마을 공동시설	농기계보관창고(2동, 120평), 마을창고(2동, 100평), 집단축사시설(300평)	1,240
마을 기반시설	마을안길정비(6,800㎡), 소하천정비(1,000m), 하수도정비(500m), 전기통신 지중화, 소화전 저수조 설치, 교량개보수(6개소, 60m) 등	5,815
관람객편의․ 관광시설	전시가옥 조성(6동), 전통공예생활용품 전시관(200평), 주차장 (5,000평) 및 안내소(20평), 집단상가 및 먹거리타운 등	8,160

* 전통공예생활용품 전시관 : 추후 사업추진여부 재검토

아산외암마을 (중요민속자료 제235호, ‘00. 1. 7 지정)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 용	투자액
계		37,162
문화재 원형보존	퇴락․변형가옥 정비(43동), 담장보수(3,000m), 초가이엉잇기(130동), 공가관리(5가옥) 등	8,593
마을 공동시설	농기계보관창고(300평), 집단축사시설(500평), 서당복원 등	4,930
마을 기반시설	마을안길정비(456m), 오수관로 매설(2,700m), 소화전설치(10개소), 우회도로 개설(2,000m), 공동구설치, 전선지중화 등	11,480
관람객 편의시설	마을 환경정비 및 쉼터 조성, 마을안내표지 정비(45개소), 가로등 교체(31개소), 변압기 등 경관저해물 차폐 등	1,480
관광시설	저자거리조성(15,000평), 마을안내소설치(1동, 7평), 종합주차장 설치(4,000평), 관리사무소 신축(40평), 등산로 및 산책로조성, 잔디광장 조성(2,000평), 마을입구 근대정미소 복원 등	11,250

마을별 별도 검토 대상사업 - 15,970백만원

○ 안동하회마을 : (구)풍남초등학교 부지 활용(3,825백만원)

- 전시관 건립 위치 타당성에 대한 보다 신중한 검토 필요

○ 성읍민속마을(9,565백만원)

- 관아건물복원(3,390), 성곽 치성․여장․동문루 등 복원(3,269)

․사유 : 발굴 등 조사결과에 따라 복원대상 및 규모 결정

- 전시관/전수관․체험가옥(3,000)

․마을내 공가, 관아 등 기존 건물 우선 활용, 건립필요성 신중히 검토

○ 고성왕곡마을 : 전통공예생활용품전시관(2,580백만원)

- 왕곡마을과 직접적인 관련이 없는 생활공예품으로 방문객 추이 등을 고려하여 계획연도 후반기에 사업타당성 재검토

안동 하회(安東 河回) 마을

안동하회마을

Ⅰ. 문화재 현황

1. 지 정 별 : 중요민속자료 제122호(1984. 1.10 지정)

2. 위    치 : 경북 안동시 풍천면 하회리

3. 연혁 및 특징

○ 고려말 전서공 류종혜 공이 풍산에서 이거한 후 형성된 풍산 류씨 집성촌으로 600여년의 문화와 전통이 잘 간직된 민속마을

○ 국보 2건, 보물 4건, 중요무형문화재 1건, 중요민속자료10건, 사적 1건 등이 국가지정문화재로 지정되어 있으며, 하회 별신굿, 선유놀이 등의 민속이 전승되고 있음

4. 일반현황(2003. 2. 28. 현재)

□ 지정면적 : 5,288,008㎡(약 1,599,622평)

□ 가구(호) : 127가옥

□ 인   구 : 237명

□ 건물현황 : 437동

(단위 : 동)

계	한식와가	초가	기타(함석 등)	기타
437	102	204	131

□ 개별문화재 지정현황

○ 총괄

(단위 : 건)

계	국보	보물	사적	중요민속자료	중요무형문화재
18	2	4	1	10	1

○ 세부내역

지정별 및 지정일		문화재명	수 량	소재지	비고
국보 121	‘64. 3.30	하회탈 및 병산탈	13個	중앙박물관
국보 132	‘69.11.11	징 비 록	1冊	풍천 하회656
보물 160	‘63. 1.21	류성룡종손가문적	11種	〃
보물 306	〃	안동양진당	1棟	풍천 화회729-4
보물 414	‘65.11.14	충 효 당	2棟	풍천 하회656
보물 460	‘67. 7.15	류성룡종손가유물	1括	〃
사적 260	‘78. 3.31	병산서원		풍천 병산30
중요민속자료 84	‘79. 1.23	하회북촌댁	1廓	풍천 하회706
중요민속자료 85	〃	하회원지정사	2棟	풍천 하회712-1
중요민속자료 86	〃	하회빈연정사	1棟	풍천 하회727
중요민속자료 87	〃	하회류시주가옥	1廓	풍천 하회672-1
중요민속자료 88	〃	하회옥연정사	1廓	풍천 광덕20
중요민속자료 89	〃	하회겸암정사	2棟	풍천 광덕37
중요민속자료 90	〃	하회남촉댁	1廓	풍천 하회624
중요민속자료 91	〃	하회주일재	1廓	풍천 하회625
중요민속자료122	‘84. 1.10	안동하회마을	1,175筆	풍천 하회
중요민속자료177	‘84. 1.10	하회동하동고택	1廓	풍천 하회739-2
중요무형문화재69	‘80.11.17	하회별신굿탈놀이		풍천 하회844-1

Ⅱ. 정비실적

○ 기    간 : ‘84～2002년

○ 사업비 : 13,439백만원(국비 9,405, 지방비 4,034)

○ 사업내용

- 퇴락가옥보수 183동, 담장보수 2,348m, 마을안길보수1,088m, 배수로정비 593m, 부지매입 13,971㎡, 관리사무소 건립, 화장실신축 3동, 주차장 조성 365평, 가로등 정비 33개소, (구)풍남초등학교 건물철거 등

Ⅲ. 사업추진계획

1. 기본방침

◦ 사업추진은 ① 문화재 원형보존 ② 마을공동시설 ③ 마을기반시설 ④ 관람객 편의시설 ⑤ 관광시설 조성 사업으로 구분하여 연차계획으로 추진함

2. 사업개요

□ 추진기간 : 2003 ～ 2012년(10개년)

□ 총사업비 : 27,226백만원 (국비 17,839, 지방비 9,387)

□ 사업내용

○ 문화재원형정비 : 변형․퇴락가옥 보수, 초가이엉잇기, 담장․대문보수 등

○ 마을공동시설정비 : 농기계보관창고 건립, 마을회관 건립, 주민공용주차장 조성, 마을공동창고 건립 등

○ 마을기반시설정비 : 마을안길 보수, 오․폐수 정화시설 설치, 배수로 정비, 소화전 설치, 가로등 정비 등

○ 관람객 편의시설 설치 : 공중화장실 설치, 음수대 등 편의시설 설치, 안내판 정비 등

○ 관광지 조성 : 관광단지 조성, 주차장 신설․정비, 마을환경 및 조경정비, 탈놀이공연장 조성 등

3. 세부추진계획

가. 문화재 원형보존

사업대상
	◦ 퇴락가옥 정비 147개소, 담장보수 4,371m, 초가이엉잇기 307동, 대문정비(철대문 12개소, 목대문․싸리문 정비), 공가관리 10동

추진방향
	◦ 기존 가옥 보수정비는 퇴락 및 원형유지 정도에 따라 분류ㆍ정비 ◦ 개별 문화재로 지정된 가옥은 엄격한 원형보존차원에서 보수ㆍ정비 ◦ 비지정 가옥은 외부는 전통양식(가옥형태, 지붕, 담장)을 유지 - 내부는 「가옥내 주민편의시설 설치기준」(‘04. 2.28) 적용 ◦ 가옥 및 담장보수공사 등 사업추진시 설계․시공과정 등에 소유자․지역주민 등이 원형고증에 참여할 수 있도록 함 ◦ 장기적으로 방치되는 공가는 원형보존을 원칙으로 하여 매입 또는 소유자와 협의, 활용방안 강구

세부사업 추진계획

퇴락․변형가옥 보수(‘03～’12)

◦ 소요예산 : 6,476백만원(국 4,533, 지 1,942)

◦ 사업내용 : 퇴락가옥 보수, 변형가옥 원형․전통양식 복원

◦ 사업물량 : 147동, 3,564㎡

담장보수(‘03～’07)

◦ 소요예산 : 1,967백만원(국 1,377, 지 590)

◦ 사업내용 : 퇴락․변형 담장 원형보수 및 복원

◦ 사업물량 : 4,371m

◦ 사업추진 : 지역전문가의 자문을 받아 하회의 전통적인 담장형태, 높이, 곡선 등이 나타나도록 정비

초가이엉잇기(‘03～’12)

◦ 소요예산 : 1,670백만원(국 1,169, 지 501)

◦ 사업내용 : 이엉잇기 재료확보 및 이엉잇기

◦ 사업물량 : 307동(향후 복원예정 초가 포함)

◦ 사업추진 : 현행 연간 1회 일괄 이엉잇기에서 점차적으로 연중 수시 이엉잇기 체제로 전환

◦ 볏짚확보방안

- 보존회 및 인근지역 농가와 협의, 계약재배를 통해 볏짚의 안정적 확보방안 마련

- 마을내 및 인근 토지매입 가능지역을 매입, 볏짚 생산과 마을 체험프로그램에 활용

- 여분의 비축볏짚을 확보하여 긴급보수 필요시 사용하고, 전통적 방법의 보관방법을 사용하여 체험프로그램 소재로 활용

◦ 이엉잇기 기능인력 확보

- 보존회와 협의, 마을내 이엉잇기 기능을 보유한 기능인에 의한 마을주민 기능전수 기회 제공

․이엉잇기 기능을 지방무형문화재로 지정하는 방안 추진

변형대문 정비(‘03～’04)

◦ 소요예산 : 100백만원(국 70, 지 30)

◦ 사업내용 : 원형과 다르게 설치되어 경관을 해치는 대문을 전통양식으로 정비(목대문, 싸리대문 등)

◦ 사업규모 : 철대문 12개소 등

공가관리(‘03, ’08)

◦ 소요예산 : 600백만원(국 420, 지 180)

◦ 사업내용

- 매입 또는 소유자와 협의, 공가를 전통문화체험공간으로 활용

- 원형보존이 필요한 까치구멍집, 토담집 등을 매입, 활용

※ 공가현황 및 관리계획

가옥명	구 조	규 모	관리계획
계	12가옥
류한걸	목조초가	3동
류규하	〃	〃
류무하	목조와가	3동
류시돈	토벽초가	〃
남촌관리사1	〃	4동	전통문화 체험장 활용
남촌관리사2	〃	3동	〃

가옥명	구 조	규 모	관리계획
남촌댁	목조와가	5동	중요민속자료 제90호
류건우	목조와가	7동
류강하	토벽초가	2동
류한욱	목조초가	1동
류봉식	〃	2동	전통체험장으로 활용(공방으로 활용)
류강하	토벽초가	1동	전통문화 체험장 활용(대장간으로 활용)

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
문화재원형보존	◦퇴락가옥 정비	147개소 3,564㎡	계	6,476	3,996	1,171	545	474	994	812	2,480	655	502	561	418	344
			국비	4,533	2,796	820	381	332	695	568	1,737	459	351	393	293	241
			지방비	1,943	1,200	351	164	142	299	244	743	196	151	168	125	103
	◦담장보수	4,371m	계	1,967	1,967	338	586	560	407	76
			국비	1,377	1,377	237	410	392	285	53	0	-	-	-	-	-
			지방비	590	590	101	176	168	122	23	0	-	-	-	-	-
	◦초가이엉 잇기	307동	계	1,670	720	120	130	150	150	170	950	170	190	190	200	200
			국비	1,169	504	84	91	105	105	119	665	119	133	133	140	140
			지방비	501	216	36	39	45	45	51	285	51	57	57	60	60
	◦공가관리	전통 체험장 활용	계	600	100	100	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-
			국비	420	70	70	-	-	-	-	350	350	-	-	-	-
			지방비	180	30	30	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-
	◦대문정비	철대문 12개소	계	100	100	50	50	-	-	-	0	-	-	-	-	-
			국비	70	70	35	35	-	-	-	0	-	-	-	-	-
			지방비	30	30	15	15	-	-	-	0	-	-	-	-	-
합 계		5개 사업	계	10,813	6,883	1,779	1,311	1,184	1,551	1,058	3,930	1,325	692	751	618	544
			국비	9,037	5,622	1,246	917	829	1,085	909	3,415	1,356	559	618	478	404
			지방비	3,244	2,066	533	394	355	166	318	1,178	397	208	225	185	163

※ 가옥별 현황 및 정비계획 : 별첨

나. 마을공동시설 정비

사업대상
	◦ 농기계보관창고․마을공동창고․마을회관건립, 마을공용주차장 조성

추진방향
	◦ 주민공동 시설물은 향후의 이용도․주민의 편리성 등을 종합적으로 고려하여 필요시 마을 경관을 해치지 않는 범위 내에서 설치 - 시설 설치시 「마을내 시설 설치기준」(‘04. 2.28)을 적용

세부사업 추진계획

농기계보관창고․마을공동창고 건립

※ 건물 규모, 위치 등은 사업추진시 별도 검토

농기계보관창고 (‘08년)

- 소요예산 : 200백만원(국 140, 지 60)

- 규 모 : 건평 100평 (농기계 20대 정도 보관, 1대당 15㎡)

- 위 치 : 하회마을내 (조망영역을 벗어난 곳을 선정)

- 형 태 : 철골조로 하되, 마을경관에 어울리는 외부 마감재 사용

마을공동창고 건립 (‘09~’10)

- 소요예산 : 400백만원(국 280, 지 120)

- 규 모 : 건평 100평 (공동작업장 포함)

- 위 치 : 하회마을내 (주민의 이용이 용이한 곳)

- 형 태 : 철골조로 하되, 마을경관에 어울리는 외부 마감재 사용

주민 공용주차장 조성 (‘08년)

◦ 소요예산 : 300백만원(국 210, 지 90)

◦ 사업규모 : 100평 정도 (소형차 30대 정도 주차, 1대당 11㎡)

◦ 위    치 : 마을내 빈공간을 자연스럽게 정비하여 활용

◦ 사업추진 : 일정지역에 대규모 공간을 조성하지 않고 가능한 분산 설치하며, 필요시 토지 매입

마을회관 건립 (‘05～’06)

◦ 소요예산 : 1,500백만원(국 1,050, 지 450)

◦ 사업규모 : 화수당 부지 시․발굴 등 조사 결과에 따라 규모 결정

◦ 위    치 : (구)풍남초등학교 철거부지 활용

◦ 형    태 : 한식와가

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
마을공동시설	◦농기계 보관창고	건물신축 100평	계	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
			국비	140	0	-	-	-	-	-	140	140	-	-	-	-
			지방비	60	0	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-
	◦마을창고 건립	건물신축 100평	계	400	0	0	0	0	0	0	400	0	200	200	0	0
			국비	280	0	-	-	-	-	-	280	-	140	140	-	-
			지방비	120	0	-	-	-	-	-	120	-	60	60	-	-
	◦주민공용 주차장건립	100여평	계	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
			국비	210	0	-	-	-	-	-	210	210	-	-	-	-
			지방비	90	0	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-
	◦마을회관 (화수당)	추후결정	계	1,500	1,500	0	0	700	800	0	0	0	0	0	0	0
			국비	1,050	1,050	-	-	490	560	-	0	-	-	-	-	-
			지방비	450	450	-	-	210	240	-	0	-	-	-	-	-
합 계		4개 사업	계	2,400	1,500	0	0	700	800	0	900	500	200	200	0	0
			국비	1,680	1,050	0	0	490	560	0	630	350	140	140	0	0
			지방비	720	450	0	0	210	240	0	270	150	60	60	0	0

다. 마을기반시설 정비

사업대상
	◦ 마을안길포장, 마을우회도로 개설, 우․오수관로매설, 소화전 설치, 교량개량, 공동구 설치, 상수도시설, 마을입구 전선 지중화사업 등

추진방향
	◦ 마을안길은 자연상태 유지를 원칙으로 하되, 필요시 주도로는 경화 포장하여 주민 및 관람객의 편의도모 ◦ 현재 토사․콘크리트․자연석 등으로 되어있는 배수로는 원형을 찾아 정비하되, 필요시 자연석 석축을 활용하여 정비 ◦ 우ㆍ오수관로는 분리하여 오수관로는 지중화하고 정화시설로 연결 ◦ 전기, 통신, 소방, 급․배수시설, 상하수도 등 지하 매설이 가능한 시설은 마을경관 유지를 위해 공동구 등을 설치, 지중화 함 ◦ 소화시설, 가로등 등은 타 시설물에 매입하는 방법 등을 활용, 경관에 어울리게 정비 ◦ 공시청시설, 가로등 등은 마을 경관에 저해되지 않도록 설치

세부사업 추진계획

마을안길포장 (‘03～’07)

◦ 소요예산 : 600백만원(국 420,지 180)

◦ 사업규모 : 6,150m

◦ 사업추진

- 주도로 포장은 현재까지 개발된 경화포장 공법 중 마을분위기에 가장 잘 어울리는 공법을 활용

- 샛길은 최대한 원래모습대로 복구, 콘크리트 포장 철거

오․폐수 처리시설 (‘05～’07)

◦ 소요예산 : 1,000백만원(국 700, 지 300)

◦ 사업규모 : 처리량 200톤/일 규모

◦ 위    치 : 하회마을 관리소 옆 (건물높이를 최대한 낮추어 설치)

◦ 추진일정

- 2005년 : 기본계획 용역 및 관로 매설

- 2006～2007년 : 관로 매설 및 처리시설 설치

배수로 정비 (‘03, ’05～‘07)

◦ 소요예산 : 510백만원(국 357, 지 153)

◦ 사업규모 : 3,000m(마을내 기존 배수로 및 가옥 배수로 정비)

◦ 사업추진 : 원형을 찾아 정비하되, 필요시 석축 활용

- 석축 활용시에는 하상에서 한 두단 흙막이 정도만 석축을 쌓고 상부는 자연스럽게 정비

- 가옥내 오수 배수로는 환경․위생문제를 고려하여 지중화

소화전 설치 (‘03, 05년)

◦ 소요예산 : 240백만원(국 168, 지 72)

◦ 사업규모 : 물탱크 이건 1개소, 소화전 추가설치 5개소 및 관로보수,

소화기 교체

◦ 위    치 : 마을내 화재취약지역

◦ 형    태 : 소화전함은 주변경관과 어울리는 재료로 시공

소방지소 시설 건립 (’06년)

※ 경북도 등 관계기관과 협의, 마을내 소방지소 설치 추진

◦ 소요예산 : 200백만원(국 140, 지 60)

◦ 사업규모 : 소방관 대기소 1동, 차고 1동

◦ 형    태 : 마을경관에 어울리는 소박한 형태로 건립

◦ 위    치 : 추후 별도 검토하여 결정

가로등 정비 (‘08년)

◦ 소요예산 : 400백만원(국 280, 지 120)

◦ 사업규모 : 마을내 가로등 23개소 정비

◦ 형    태 : 민속마을에 어울리는 재료와 형태로 설치

◦ 사업추진 : 최대한 담장내 매입하거나 담장높이 이하로 설치하여

외부로 노출되는 부분을 최소화 함

위성TV안테나 정비 및 차폐시설 설치 (‘07년)

◦ 소요예산 : 200백만원(국 140, 지 60)

◦ 사업규모 : 마을내 설치된 위성안테나를 정비, 공용안테나를 설치

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
마을기반시설정비	◦마을안길 정비	6,150m	계	600	600	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0
			국비	420	420	84	84	84	84	84	0	-	-	-	-	-
			지방비	180	180	36	36	36	36	36	0	-	-	-	-	-
	◦오․폐수 정화시설	처리시설, 관로매설 200톤/일규모	계	1,000	1,000	0	0	500	300	200	0	0	0	0	0	0
			국비	700	700	-	-	350	210	140	0	-	-	-	-	-
			지방비	300	300	-	-	150	90	60	0	-	-	-	-	-
	◦배수로 정비	3,000m	계	510	510	60	70	80	150	150	0	0	0	0	0	0
			국비	357	357	42	49	56	105	105	0	-	-	-	-	-
			지방비	153	153	18	21	24	45	45	0	-	-	-	-	-
	◦소화전 및 소방 지소 설치	소화전5기, 관로보수 소방지소 시설물	계	440	440	40	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
			국비	308	308	28	-	140	140	-	0	-	-	-	-	-
			지방비	132	132	12	-	60	60	-	0	-	-	-	-	-
	◦가로등 정비	마을내 23개소	계	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0
			국비	280	0	-	-	-	-	-	280	280	-	-	-	-
			지방비	120	0	-	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-
	◦위성TV 안테나 정비	공용안테나 설치 차폐시설	계	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
			국비	140	140	-	-	-	-	140	0	-	-	-	-	-
			지방비	60	60	-	-	-	-	60	0	-	-	-	-	-
합 계		7개 사업	계	3,150	2,750	220	190	900	770	670	400	400	0	0	0	0
			국비	2,205	1,925	154	133	630	539	469	280	280	0	0	0	0
			지방비	945	825	66	57	270	231	201	120	120	0	0	0	0

라. 관람객 편의시설 설치

사업대상
	◦ 공중화장실 설치, 음수대 설치, 문화재안내판 설치, (구)풍남초등학교부지 활용

추진방향		「마을내 시설 설치기준」(2004. 3. 2) 적용
	◦ 문화재의 가치가 훼손되지 않도록 친환경적으로 설치 ◦ 관람객 지향의 편의․관광시설을 설치, 체류형 관광지로 조성 ◦ 마을내 활용 가능한 공간을 경관에 맞게 정비하여 주민 및 관람객의 휴식공간으로 활용 ◦ 안내판, 이정표 등 관람객 편의시설은 마을 경관과 마을 특성에 맞는 재질과 형태로 제작․설치 ◦ (구)풍남초등학교 부지활용은 별도의 검토 결과에 따라 추진여부 결정

세부사업 추진계획

공중화장실 설치(‘05, ‘10년)

◦ 소요예산 : 300백만원(국210, 지 90)

◦ 사업규모 : 15평 규모 2개소(기존화장실 보수 포함)

◦ 위    치 : 탈놀이전수관 옆, 주관람로상 남측 제방부근 공터

◦ 형    태 : 목초초가형태(하회마을과 어울리는 형태로 건립)

※ 공중화장실은 이외 마을내 공가 등을 최대한 활용

음수대설치(‘07년)

◦ 소요예산 : 100백만원(국 70, 지 30)

◦ 사업대상 : 2개소(전통우물양식으로 설치)

◦ 위    치 : 남촌관리사 앞 우물, 북촌댁 앞

안내판 정비(‘07년)

◦ 소요예산 : 300백만원(국 210, 지 90)

◦ 사업대상 : 마을내 위치한 안내판 및 이정표 전량

◦ 형    태 : 마을경관과 마을특성에 맞는 재질과 형태로 제작

(구)풍남초등학교부지 활용 (‘03, ’06～’09)

◦ 소요예산 : 3,825백만원(국 2,660, 지1,165)

◦ 사업내용 : 전시관 건립(180평), 영상관 설치(지하), 부지조성

(2,320평), 휴식공간 조성 등

◦ 사업추진 : 기본계획용역에 따라 문화재청과 협의하여 추진

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
관람객편의시설	◦공중 화장실설치	2개소	계	300	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0
			국비	210	105	-	-	105	-	-	105	-	-	105	-	-
			지방비	90	45	-	-	45	-	-	45	-	-	45	-	-
	◦음수대설치	2개소	계	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
			국비	70	70	-	-	-	-	70	0	-	-	-	-	-
			지방비	30	30	-	-	-	-	30	0	-	-	-	-	-
	◦안내판정비	1식	계	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
			국비	210	210	-	-	-	-	210	0	-	-	-	-	-
			지방비	90	90	-	-	-	-	90	0	-	-	-	-	-
	◦(구)풍남 초등학교 부지활용	전시관 건립	계	3,825	2,025	25		-	1,000	1,000	1,800	900	900
			국비	2,660	1,400	-		-	700	700	1.260	630	630	-	-	-
			지방비	1,165	625	25		-	300	300	540	270	270	-	-	-
합 계		4개 사업	계	4,525	2,575	25	0	150	1,000	1,400	1,950	900	900	150	0	0
			국비	3,150	1,785	-	-	105	700	980	1,365	630	630	105	-	-
			지방비	1,375	790	25	-	45	300	420	585	270	270	45	-	-

라. 관광시설 조성

사업대상
	◦ 관광지조성, 주차장신설, 주차장정비, 마을내 환경 및 조경정비 ◦ 부용대 관광시설 정비, 탈놀이전수관 보수

추진방향		「마을내 시설 설치기준」(2004. 3. 2) 적용
	◦ 체류형 전통문화 체험마을 조성을 위해 필요한 상가, 주차장 등은 마을 외부에 조성하고, 마을내부는 원형대로 보존 ◦ 시설조성시에는 마을경관과 전통민속마을 분위기를 해치지 않는 방안을 강구 ◦ 전문가의 자문을 받아 만송정주변 소나무를 식재하여 옛모습으로 복원을 추진하고, 마을 주변에는 전통수종을 심어 환경 정비

세부사업 추진계획

【문화관광부 예산사업】

관광단지조성(‘03～‘05)

◦ 소요예산 : 3,908백만원(민간자본보조 15,530백만원 제외)

◦ 사업규모 : 전통상가 및 기념품판매점 20동, 기반시설정비 등

◦ 위    치 : 하회탈 박물관 일대

주차장 조성(‘08～‘09)

◦ 소요예산 : 600백만원

◦ 사업규모 : 3,394㎡ 1개소

◦ 위    치 : 관광단지 조성 부지 내

주차장 정비(‘07, ‘10년)

◦ 소요예산 : 200백만원

◦ 사업규모 : 2개소

◦ 사업내용 : 기존 주차장 보수 및 정비

◦ 위    치 : 마을입구 및 전수관 앞

마을내 환경 및 조경정비(‘04～‘12)

◦ 소요예산 : 1,300백만원

◦ 사업규모 : 마을 내 전통수종 식재, 전통문화체험공간 및 전통농경지 조성

◦ 위    치 : 하회마을내

◦ 세부사업내용

- 마을내 환경정비 및 조경정비(2004～2012)

- 만송정내 소나무식재(2005년)

- 전통문화체험공간 및 전통농경지 조성(2008～2011)

부용대 관광시설 정비(‘03년)

◦ 소요예산 : 120백만원

◦ 사업내용 : 관람객이 편리하게 부용대를 관람할 수 있도록 부용대 입구계단을 정비, 나룻배를 제작하여 운행

◦ 사업대상 : 하회마을내, 부용대 입구

◦ 사업규모 : 나룻배 제작 2척, 부용대 계단정비 400m

탈놀이 전수관 보수(‘03년)

◦ 소요예산 : 210백만원

◦ 사업내용 : 퇴락한 탈놀이 전수관을 보수

연도별 소요예산 (문화관광부 예산)

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
관람객 편의시설정비 및 관 광 지 조 성	◦관광단지 조성	184,000㎡	계	3,908	3,908	2,000	954	954	0	0	0	0	0	0	0	0
			국비	1,954	1,954	1,000	477	477	-	-	0	-	-	-	-	-
			지방비	1,954	1,954	1,000	477	477	-	-	0	-	-	-	-	-
			민자	(15,530)			(7,765)	(7,765)
	◦주차장 신설	1개소, 3,394㎡	계	600	0	0	0	0	0	0	600	300	300	0	0	0
			국비	300	0	-	-	-	-	-	300	150	150	-	-	-
			지방비	300	0	-	-	-	-	-	300	150	150	-	-	-
			민자
	◦주차장 정비	2개소 정비	계	200	100	0	0	0	0	100	100	0	0	100	0	0
			국비	100	50	-	-	-	-	50	50	-	-	50	-	-
			지방비	100	50	-	-	-	-	50	50	-	-	50	-	-
			민자
	◦마을환경 조경정비	전통문화체험공간, 전통농경지 조성	계	1,300	600	0	100	200	150	150	700	150	150	150	150	100
			국비	650	300	-	50	100	75	75	350	75	75	75	75	50
			지방비	650	300	-	50	100	75	75	350	75	75	75	75	50
			민자
	◦부용대 관광시설 정비	나룻배 제작 부용대 계단설치	계	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			국비	84	84	84	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
			지방비	36	36	36	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	◦탈놀이 전수관 보수	전수관 보수	계	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			국비	147	147	147	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
			지방비	63	63	63	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
합 계		6개 사업	계	6,338	4,938	2,330	1,054	1,154	150	250	1,400	450	450	250	150	100
			국비	3,235	2,535	1,231	527	577	75	125	700	225	225	125	75	50
			지방비	3,103	2,403	1,099	527	577	75	125	300	225	225	125	75	50
			민자	(15,530)			(7,765)	(7,765)

자료1		안동하회마을 종합정비 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
문화재원형보존	◦퇴락가옥 정비	147개소 3,564㎡	계	6,476	3,996	1,171	545	474	994	812	2,480	655	502	561	418	344
			국비	4,533	2,796	820	381	332	695	568	1,737	459	351	393	293	241
			지방비	1,943	1,200	351	164	142	299	244	743	196	151	168	125	103
	◦담장보수	4,371m	계	1,967	1,967	338	586	560	407	76	0	-	-	-	-
			국비	1,377	1,377	237	410	392	285	53	0	-	-	-	-	-
			지방비	590	590	101	176	168	122	23	0	-	-	-	-	-
	◦초가이엉 잇기	307동	계	1,670	720	120	130	150	150	170	950	170	190	190	200	200
			국비	1,169	504	84	91	105	105	119	665	119	133	133	140	140
			지방비	501	216	36	39	45	45	51	285	51	57	57	60	60
	◦공가관리	전통 체험장 활용	계	600	100	100	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-
			국비	420	70	70	-	-	-	-	350	350	-	-	-	-
			지방비	180	30	30	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-
	◦대문정비	철대문 12개소	계	100	100	50	50	-	-	-	0	-	-	-	-	-
			국비	70	70	35	35	-	-	-	0	-	-	-	-	-
			지방비	30	30	15	15	-	-	-	0	-	-	-	-	-
소 계		5개 사업	계	10,813	6,883	1,779	1,311	1,184	1,551	1,058	3,930	1,325	692	751	618	544
			국비	7,569	4,817	1,246	917	829	1,085	740	2,752	928	484	526	433	381
			지방비	3,244	2,066	533	394	355	466	318	1,178	397	208	225	185	163
마을공동시설	◦농기계 보관창고	1동 100평	계	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
			국비	140	0	-	-	-	-	-	140	140	-	-	-	-
			지방비	60	0	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-
	◦마을창고 건립	1동 100평	계	400	0	0	0	0	0	0	400	0	200	200	0	0
			국비	280	0	-	-	-	-	-	280	-	140	140	-	-
			지방비	120	0	-	-	-	-	-	120	-	60	60	-	-
	◦주민공용 주차장 건립	100여평	계	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
			국비	210	0	-	-	-	-	-	210	210	-	-	-	-
			지방비	90	0	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-
	◦마을회관 (화수당)	추후 결정	계	1,500	1,500	0	0	700	800	0	0	0	0	0	0	0
			국비	1,050	1,050	-	-	490	560	-	0	-	-	-	-	-
			지방비	450	450	-	-	210	240	-	0	-	-	-	-	-
소 계		4개 사업	계	2,400	1,500	0	0	700	800	0	900	500	200	200	0	0
			국비	1,680	1,050	0	0	490	560	0	630	350	140	140	0	0
			지방비	720	450	0	0	210	240	0	270	150	60	60	0	0

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
마을기반시설정비	◦마을안길 정비	6,150m	계	600	600	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0
			국비	420	420	84	84	84	84	84	0	-	-	-	-	-
			지방비	180	180	36	36	36	36	36	0	-	-	-	-	-
	◦오․폐수 정화시설	처리시설, 관로매설 200톤/일 규모	계	1,000	1,000	0	0	500	300	200	0	0	0	0	0	0
			국비	700	700	-	-	350	210	140	0	-	-	-	-	-
			지방비	300	300	-	-	150	90	60	0	-	-	-	-	-
	◦배수로 정비	3,000m	계	510	510	60	70	80	150	150	0	0	0	0	0	0
			국비	357	357	42	49	56	105	105	0	-	-	-	-	-
			지방비	153	153	18	21	24	45	45	0	-	-	-	-	-
	◦소화전 및 소방 지소 설치	소화전5기, 관로보수 소방지소 시설물	계	440	440	40	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
			국비	308	308	28	-	140	140	-	0	-	-	-	-	-
			지방비	132	132	12	-	60	60	-	0	-	-	-	-	-
	◦가로등 정비	마을내 23개소	계	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0
			국비	280	0	-	-	-	-	-	280	280	-	-	-	-
			지방비	120	0	-	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-
	◦위성TV 안테나 정비	공용안테나 설치 차폐시설	계	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
			국비	140	140	-	-	-	-	140	0	-	-	-	-	-
			지방비	60	60	-	-	-	-	60	0	-	-	-	-	-
소 계		6개 사업	계	3,150	2,750	220	190	900	770	670	400	400	0	0	0	0
			국비	2,205	1,925	154	133	630	539	469	280	280	-	-	-	-
			지방비	945	825	66	57	270	231	201	120	120	-	-	-	-
관람객편의시설	◦공중 화장실설치	2개소	계	300	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0
			국비	210	105	-	-	105	-	-	105	-	-	105	-	-
			지방비	90	45	-	-	45	-	-	45	-	-	45	-	-
	◦음수대설치	2개소	계	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
			국비	70	70	-	-	-	-	70	0	-	-	-	-	-
			지방비	30	30	-	-	-	-	30	0	-	-	-	-	-
	◦안내판정비	1식	계	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
			국비	210	210	-	-	-	-	210	0	-	-	-	-	-
			지방비	90	90	-	-	-	-	90	0	-	-	-	-	-
	◦(구)풍남 초등학교 부지활용	전시관건립 마을회관 건립	계	3,825	2,025	25	-	-	1,000	1,000	1,800	900	900	0	0	0
			국비	2,660	1,400	-	-	-	700	700	1,260	630	630	-	-	-
			지방비	1,165	625	25	-	-	300	300	540	270	270	-	-	-
소 계		4개 사업	계	4,525	2,575	25	0	150	1,000	1,400	1,950	900	900	150	0	0
			국비	3,150	1,785	-	-	105	700	980	1,365	630	630	105	-	-
			지방비	1,375	790	25	-	45	300	420	585	270	270	45	-	-

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
관광시설조성	◦관광단지 조성 (문광부)	184,000㎡	계	3,908	3,908	2,000	954	954	0	0	0	0	0	0	0	0
			국비	1,954	1,954	1,000	477	477	-	-	0	-	-	-	-	-
			지방비	1,954	1,954	1,000	477	477	-	-	0	-	-	-	-	-
			민자	(15,530)			(7,765)	(7,765)
	◦주차장 신설 (문광부)	1개소, 3,394㎡	계	600	0	-	-	-	-	-	600	300	300	-	-	-
			국비	300	0	-	-	-	-	-	300	150	150	-	-	-
			지방비	300	0	-	-	-	-	-	300	150	150	-	-	-
	◦주차장 정비 (문광부)	2개소 정비	계	200	100	-	-	-	-	100	100	-	-	100	-	-
			국비	100	50	-	-	-	-	50	50	-	-	50	-	-
			지방비	100	50	-	-	-	-	50	50	-	-	50	-	-
	◦마을환경․ 조경정비 (문광부)	전통문화체험공간, 전통농경지 조성	계	1,300	600	-	100	200	150	150	700	150	150	150	150	100
			국비	650	300	-	50	100	75	75	350	75	75	75	75	50
			지방비	650	300	-	50	100	75	75	350	75	75	75	75	50
	◦관람객 편의시설 설치(문광부)	나룻배 제작 부용대 계단설치	계	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			국비	84	84	84	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
			지방비	36	36	36	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	◦탈놀이 전수관보수 (문광부)	전수관 보수	계	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			국비	147	147	147	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
			지방비	63	63	63	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
소 계		6개 사업	계	6,338	4,938	2,330	1,054	1,154	150	250	1,400	450	450	250	150	100
			국비	3,235	2,535	1,231	527	577	75	125	700	225	225	125	75	50
			지방비	3,103	2,403	1,099	527	577	75	125	700	225	225	125	75	50
			민자	(15,530)			(7,765)	(7,765)
합 계		25개 사업	계	27,226	18,646	4,354	2,555	4,088	4,271	3,378	8,580	3,575	2,242	1,351	768	644
			국비	17,839	12,112	2,631	1,577	2,631	2,959	2,314	5,727	2,413	1,479	896	508	431
			지방비	9,387	6,534	1,723	978	1,457	1,312	1,064	2,853	1,162	763	455	260	213
			민자	(15,530)			(7,765)	(7,765)

자료2		소관별 재원부담

(단위 : 백만원)

소관	사업명	총 소요예산		1단계						2단계
				계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
문화재청	◦문화재원형 정비	계	10,813	6,883	1,779	1,381	1,114	1,551	1,058	3,930	1,325	692	751	618	544
		국비	7,569	4,817	1,246	966	780	1,085	740	2,752	928	484	526	433	381
		지방비	3,244	2,066	533	415	334	466	318	1,178	397	208	225	185	163
	◦마을공동시설	계	2,400	1,500	0	0	700	800	0	900	500	200	200	0	0
		국비	1,680	1,050	0	0	490	560	0	630	350	140	140	0	0
		지방비	720	450	0	0	210	240	0	270	150	60	60	0	0
	◦마을기반시설	계	3,150	2,750	220	120	970	770	670	400	400	0	0	0	0
		국비	2,205	1,925	154	84	679	539	469	280	280	0	0	0	0
		지방비	945	825	66	36	291	231	201	120	120	0	0	0	0
	◦관람객 편의시설	계	4,525	2,575	25	0	150	1,000	1,400	1,950	900	900	150	0	0
		국비	3,150	1,785	-	-	105	700	980	1,365	630	630	105	0	0
		지방비	1,375	790	25	-	45	300	420	585	270	270	45	0	0
문화재청 소관 합계		계	20,888	13,708	2,024	1,501	2,934	4,121	3,128	7,180	3,125	1,792	1,101	618	544
		국비	14,604	9,577	1,400	1,050	2,054	2,884	2,189	5,027	2,188	1,254	771	433	381
		지방비	6,284	4,131	624	451	880	1,237	939	2,153	937	538	330	185	163
		민자	(15,530)				(7,765)	(7,765)
문 화 관광부	◦관광시설	계	6,338	4,938	2,330	1,054	1,154	150	250	1,400	450	450	250	150	100
		국비	3,235	2,535	1,231	527	577	75	125	700	225	225	125	75	50
		지방비	3,103	2,403	1,099	577	75	125	700	225	225	125	75	50	50

자료3		가옥별 현황 및 정비계획

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
계	127가옥						8,443,000
남1	류시덕	안채	목조초가	17.03				양호		잇기
		화장실	블록·슬레이트	3.05	3.05	목조초가복원	5,000	불량	A
		담장	블록, 생울타리	55.10	55.10	토담이엉복원	27,000	불량	A
남2	류시화	안채	목조초가	62.34				양호		잇기
		화장실	블록·슬레이트	2.02	2.02	토벽초가환원	5,000	불량	C
		농기계창고	파이프천막	70.00	70.00	토벽초가환원	70,000	불량	C
		담장	자연석담	36.10	36.10	토담이엉복원	18,000	보통	A
남3	류시훈	안채	목조초가	31.61				양호		잇기
		광채.화장실	토벽초가	11.48				양호		잇기
		담장	생울타리	52.50	52.50	토담이엉복원	26,000	보통	A
남4	이규성	안채	목조초가	42.28				양호		잇기
		축사 광	블록스레트	45.00	45.00	초가환원	68,000	불량	A	잇기
		화장실	블록·슬레이트	10.70	10.70	목조초가복원	10,000	불량	A	잇기
		담장	토석담	41.40	41.40	토담이엉보수	26,000	불량	A
남5	류창한	안채	목조일식기와	33.79	33.79	초가환원	87,000	불량	A	잇기
		아래채	목조일식기와	25.62	25.62	초가환원	62,000	불량	A	잇기
		부속채	블록일식기와	13.36	13.36	초가환원	25,000	불량	A	잇기
		광채	토벽·슬레이트	24.05	24.05	초가환원	36,000	불량	A	잇기
		화장실	블록·슬레이트	3.19	3.19	초가환원	10,000	불량	A	잇기
		축사	알미늄앵글.천막	60.50	10.00	철거후축사신축	30,000	불량	A	잇기
		일각문	R·C 스라브	1개소	1개소	철거후신축	5,000	불량	A	잇기
남6	류도중	안채	목조초가	66.58				양호		잇기
		축사 광	블록초가	63.50	63.50	토벽초가복원	96,000	불량	E	잇기
		화장실 광	목조초가	10.00	10.00	개축	10,000	불량	A	잇기
		담장	양와 토담	63.00	40.00	토담이엉보수	20,000	불량	A
남7	류한걸	안채	목조초가	36.71				양호		잇기
		화장실	토벽초가	3.00				양호		잇기
		축사	토벽초가	47.65	47.65	토벽보수	15,000	보통	C	잇기
		담장	토담	72.00				양호

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
남8	류시정	안채	목조초가	41.46				양호		잇기
		화장실	블록초가	6.70	6.70	토벽초가보수	5,000	불량	A	잇기
		축사 광	토벽초가	23.04	23.04	토벽초가보수	23,000	불량	A	잇기
		헛간	철파이프스레트	8.00	8.00	초가환원보수	8,000	불량	A	잇기
		담장	바자울	24.00	24.00	토담이엉복원	12,000	불량	A
남9	류규하	안채	목조초가	44.63				양호		잇기
		축사	토벽초가	49.23				양호		잇기
		아래채	목조초가	15.63				양호		잇기
		담장	이엉토담	60.10				양호
남10	류무하	안채	목조초가	48.51				양호		잇기
		광채	토벽초가	20.06				양호		잇기
		화장실	토벽초가	4.18				양호		잇기
		담장	이엉토담	58.00				양호
남11	류일하	안채	목조일식기와	56.00	56.00	초가환원	140,000	불량	D	잇기
		광채	블록·슬레이트	32.00	32.00	초가환원	80,000	불량	D	잇기
		아래채	블록스라브	6.80	6.80	초가환원	17,000	불량	D	잇기
		화장실	목조초가	3.00	3.00	신설	10,000	불량	D	잇기
		담장	블록담	39.50	39.50	토담이엉복원	15,000	불량	B
남12	류종한	안채	목조와가	110.94				양호
		문간채	목조초가	30.42				양호		잇기
		화장실	블록초가	2.25	2.25	목조초가환원	5,000	불량	A	잇기
		담장	토담기와	170.00	46.00	토담기와	23,000	불량	A
남13	류시국	안채	목조와가	64.98				양호
		문간채	목조와가	62.00				양호
		아래채1	목조초가	30.55				양호		잇기
		아래채2	목조와가	18.00				양호
		화장실	블록·슬레이트	7.50	7.50	토벽초가복원	18,000	불량	A	잇기
		우사	블록 스레트	20.00	15.00	토벽초가환원	37,000	불량	A	잇기
		담장	토담기와	124.30	41.30	토담기와환원	20,000	불량	A
남14	류한국	안채	목조초가	36.15				양호		잇기
		광채	토벽·슬레이트	16.39	16.39	토벽초가환원	30,000	불량	A	잇기
		화장실	블록초가	2.16	2.16	토벽초가환원	10,000	불량	A	잇기
		담장	토석양와	44.00	44.00	토담이엉보수	22,000	불량	A
남15	류대우	안채	시멘트일식기와	38.38	38.38	초가환원	58,000	보통	C	잇기
		아래채	목조초가	28.12				양호		잇기
		광채	일식기와	18.80	18.80	초가환원	28,000	불량	A	잇기
		화장실	토벽·슬레이트	5.25	5.25	토벽초가환원	5,000	불량	A	잇기
		담장	토석양와	53.00	53.00	토담이엉보수	27,000	불량	A

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
남16	류시활	안채	목조일식기와	63.52	63.52	초가환원	156,000	불량	D	잇기
		사랑채	목조일식기와	26.78	26.78	초가환원	67,000	불량	D	잇기
		광채	목조일식기와	21.00	21.00	초가환원	53,000	불량	D	잇기
		축사	철파이프	38.64	38.64	초가환원	38,000	불량	D	잇기
		화장실	블록초가	3.00	3.00	토벽초가환원	5,000	불량	A	잇기
		담장	토석기와	79.00	79.00	토담이엉보수	40,000	불량	A
남17	류시동	안채	목조초가	27.03				양호		잇기
		축사	토벽초가	6.30				양호		잇기
		아래채	목조초가	21.32				양호		잇기
		담장	이엉토담	41.50				양호
남18	류영하	안채	목조초가	40.10				양호		잇기
		축사	블록초가	56.91	56.91	토벽초가보수	85,000	보통	E	잇기
		화장실	블록초가	1.80	1.80	토벽초가환원	5,000	보통	A	잇기
		담장	토담양와	81.60	53.00	토담이엉보수	27,000	불량	A
남19	하회교회	교회	R·C 기와	87.50				양호
		청소년 수련장	블록판넬	41.25	41.25	목조초가보수	10,000	보통	E	잇기
		화장실	블록스레트	12.00	12.00	토벽초가보수	30,000	보통	B	잇기
		담장	토담기와	94.50	94.50	기와보수	14,000	보통	B
남20	류재하	안채	블록·슬레이트	69.98	69.98	초가환원	175,000	불량	C	잇기
		아래채	블록·슬레이트	38.00	38.00	초가환원	95,000	불량	C	잇기
		화장실	블록·슬레이트	1.96	1.96	토벽초가보수	5,000	불량	B	잇기
		담장	토석양와	25.00	25.00	토담이엉보수	13,000	불량	B
남21	류시효	안채	목조초가	31.21				양호		잇기
		아래채	목조초가	34.51				양호		잇기
		헛간	파이프천막	32.00	32.00	초가환원	48,000	불량	C	잇기
		화장실	토벽초가	5.00	5.00	보수	5,000	보통	B	잇기
		담장	토석양와	42.00	42.00	토담이엉보수	20,000	불량	B
남22	정귀임	안채	목조와가	74.94				양호
		문간채	목조초가	12.21				양호		잇기
		화장실	토벽초가	2.25	2.25	보수	5,000	양호	A	잇기
		담장	토담기와	115.00	40.00	토담기와보수	20,000	불량	A

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
남23	류시돈	안채	토벽초가	48.00	48.00	재건축(붕괴)	120,000	불량	B	잇기
		아래채	토벽초가	19.00	19.00	재건축(붕괴)	47,000	불량	B	잇기
		화장실	토벽초가	3.00	3.00	재건축(붕괴)	5,000	불량	B	잇기
		담장	바자울	47.00	47.00	보수	5,000	불량	B
남24	강창구	안채	목조초가	18.83				양호		잇기
		아래채	목조초가	12.32				양호		잇기
		헛간	토벽초가	11.49				양호		잇기
		화장실	목조초가	3.24				양호		잇기
		담장	이엉토담	75.40				양호
남25	류청하	안채	목조와가	85.35	85.35	번와보수	60,000	보통	C
		문간채	목조와가	35.37	35.37	번와보수	24,000	보통	C
		화장실	목조와가	5.00	5.00	번와보수	4,000	보통	C
		담장	토담기와	122.50	44.00	토담보수	22,000	불량	A
남26	류시문	안채	목조스레트	75.39	75.39	초가환원	189,000	불량	A	잇기
		아래채	토벽초가	41.36				양호		잇기
		화장실	토벽초가	3.40				양호		잇기
		담장	기와토담	99.00	51.50	토담이엉보수	26,000	불량	A
남27	조순희	안채	목조와가	81.26				양호
		사랑채	목조와가	17.94				양호
		문간채	목조초가	23.95				양호		잇기
		화장실	목조초가	3.00				양호		잇기
		담장	토석기와	145.00	77.20	보수	38,000	불량	A
남28	강영구	안채	목조초가	41.09				양호		잇기
		아래채	목조초가	28.73				양호		잇기
		축사	토벽스레트	34.80	34.80	토벽초가보수	52,000	불량	A	잇기
		헛간	목조초가	9.10				양호		잇기
		화장실	목조초가	2.73				양호		잇기
		담장	이엉토담	59.80	12.50	토담이엉보수	6,000	불량	A
남29	류시달	안채	목조일식기와	40.00	40.00	초가환원	100,000	불량	C	잇기
		아래채	블록일식기와	11.00	11.00	초가환원	28,000	불량	C	잇기
		화장실	블록스레트	3.00	3.00	초가환원	10,000	불량	B	잇기
		담장	토석기와	48.50	48.50	토담이엉보수	24,000	불량	B
남30	류시국	안채	목조초가	34.60				양호		잇기
		부속채	토벽초가	14.14	14.14	초가이엉보수	14,000	보통	A	잇기
		창고	토벽초가	11.25				양호		잇기
		담장	토석기와	41.00	20.00	토담이엉보수	10,000	불량	A

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
남31	교회 사택	안채	목조초가	29.95				양호		잇기
		화장실 창고	블록초가	7.50	7.50	목조초가보수	11,000	불량	A	잇기
		담장	토석양와	40.00	40.00	토담이엉복원	20,000	불량	A
남32	류재영	안채	목조초가	47.73				양호		잇기
		아래채	목조초가	34.92				양호		잇기
		광채	토벽초가	18.36				양호		잇기
		화장실	블록스레트	3.44	3.00	초가환원	10,000	불량	B	잇기
		담장	블록담	111.60	74.00	토담이엉보수	37,000	불량	B
남33	류운하	안채	목조초가	53.45				양호		잇기
		아래채	목조초가	24.80				양호		잇기
		우사	블록초가	17.25	17.25	목조초가환원	43,000	불량	C	잇기
		헛간	블록스레트	18.60	18.60	목조초가환원	28,000	불량	C	잇기
		화장실	블록스레트	3.00	3.00	초가환원	10,000	보통	B	잇기
		담장	토담기와	67.30	51.00	토담이엉환원	25,000	불량	B
남34	류민하	안채	목조초가	44.56				양호		잇기
		아래채	목조초가	22.26				양호		잇기
		화장실	목조초가	3.80				양호		잇기
		담장	토석양와	77.00	77.00	토담이엉환원	38,000	불량	A
남35	류근후	안채	목조일식기와	62.56	62.56	초가환원	156,000	보통	D	잇기
		아래채	목조일식기와	21.57	21.57	초가환원	54,000	보통	D	잇기
		문간채	목조일식기와	15.60	15.60	초가환원	37,000	보통	D	잇기
		화장실	목조초가	3.00	3.00	신설	10,000	보통	D	잇기
		담장	토담기와	42.50	22.50	보수	11,000	보통	A
남36	류시건	안채	목조초가	26.75				양호		잇기
		광채	토벽초가	15.41				양호		잇기
		담장	토석양와	75.00	30.00	토담이엉보수	15,000	불량	C
남37	류시길	안채	목조와가	11.80				양호
		아래채	목조초가	5.60				양호		잇기
		화장실	블록스레트	7.00	7.00	초가환원	10,000	불량	B	잇기
		담장	토담기와	68.00	10.00	토담기와	5,000	보통	B
남38	류시중	안채	목조와가	87.10				양호
		문간채	목조와가	29.28				양호
		광채	목조와가	7.50				양호
		화장실	목조와가	4.56				양호
		담장	토담기와	87.00	87.00	기와보수	17,000	보통	C
남39	류석하	안채	목조초가	56.34				양호		잇기
		아래채	목조초가	19.52				양호		잇기
		광채.화장실	RC 블록	10.52	10.52	토벽초가환원	16,000	불량	A	잇기
		담장	토담기와	64.50	64.50	토담이엉보수	32,000	불량	A

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
남40	류세하	안채	목조와가	50.00	50.00	번와보수	75,000	불량	A
		문간채	목조초가	43.27				양호		잇기
		화장실	토벽초가	1.21				양호		잇기
		담장	토담기와	155.00	60.00	토담기와보수	30,000	불량	A
남41	주일재	안채	목조와가	68.16				양호
		사랑채	목조와가	48.70				양호
		방앗간	목조일식기와	17.70	17.70	한식기와로보수	44,000	보통	E
		문간채	목조일식기와	7.56	7.56	한식기와로보수	19,000	보통	E
		사당	목조와가	7.78				양호
		화장실	목조초가	2.25				양호		잇기
		담장	토석기와	152.80	115.30	토담기와로보수	58,000	불량	A
남42	류시창	안채	목조초가	33.72				양호		잇기
		광채	블록스레트	13.05	13.05	토벽초가환원	33,000	보통	A	잇기
		화장실	목조초가	1.21				양호		잇기
		담장	토담기와	65.50	47.50	토담이엉보수	24,000	불량	A
남43	류한섭	안채	목조초가	34.13				양호		잇기
		헛간 화장실	목조초가	9.10				양호		잇기
		담장	토석기와	26.00	11.00		5,000	불량	A
남44	류시발	안채	목조초가	59.36				양호		잇기
		사랑채	목조일식기와	44.28	44.28	초가환원	110,000	보통	C	잇기
		광채	목조일식기와	35.00	32.27	초가환원	88,000	보통	C	잇기
		화장실	목조초가	2.25				양호		잇기
		담장	토석기와	53.30				양호
남45	류경한	안채	목조일식기와	57.48	57.48	초가환원	144,000	보통	E	잇기
		아래채	목조일식기와	43.83	43.83	초가환원	110,000	보통	E	잇기
		화장실	블록초가	3.00	3.00	토벽초가환원	5,000	보통	E	잇기
		창고	토벽스레트	23.76	23.76	토벽초가보수	35,000	불량	A	잇기
		담장	토석기와	83.30	32.00	토담이엉보수	16,000	불량	A
남46	남촌관리사1	안채	목조초가	45.15				양호		잇기
		광채	목조초가	17.50				양호		잇기
		아래채	목조초가	44.24				양호		잇기
		화장실	목조초가	4.00				양호		잇기
		담장	이엉토담	101.00				양호

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
남47	남촌 관리사2	안채	목조초가	46.90				양호		잇기
		아래채	목조초가	29.20				양호		잇기
		축사	토벽초가	23.20	23.20	토벽초가	44,000	보통	C	잇기
		담장	이엉토담	20.00	20.00	보수	8,000	보통	A
남48	남촌댁	정자	목조와가	60.06				양호
		별당채	목조와가	28.16				양호
		사당	목조와가	21.30				양호
		문간채	목조와가	40.00	40.00	번와보수	60,000	불량	A
		화장실	목조초가	3.24				양호		잇기
		담장	토담기와	302.00	12.30	토담기와	6,000	보통	A
남49	류교우	안채	목조와가	70.98				양호
		방앗간	토벽초가	16.92				양호		잇기
		화장실	토벽초가	3.60				양호		잇기
		화장실	블록초가	3.00	3.00	토벽초가환원	5,000	보통	B	잇기
		담장	토벽기와토석	55.00	11.00	토담기와로보수	5,000	보통	B
남50	류한욱	안채	목조초가	46.00				양호		잇기
		문간채	목조초가	30.00				양호		잇기
		담장	와편기와	15.00	15.00	와편기와로보수	8,000	보통	B
남51	하동고택	안채	목조와가	103.90				양호
		사랑채	목조와가	33.00				양호
		문간채	목조초가	25.00				양호		잇기
		방앗간	목조초가	22.05				양호		잇기
		화장실	토벽초가	2.87				양호		잇기
		담장	기와와편	226.60	65.80	토담기와로보수	33,000	보통	B
남52	류성묵	안채	목조일식기와	51.50	51.50	초가환원	129,000	보통	B	잇기
		아래채	목조초가	25.14	25.14	초가보수	62,000	보통	B	잇기
		화장실	블록초가	4.00	4.00	초가환원	10,000	보통	B	잇기
		담장	토담기와	90.00	66.00	토담기와로보수	33,000	불량	B
남53	류건우	안채	목조와가	78.45				양호
		사랑채	목조초가	22.30				양호		잇기
		문간채	목조와가	31.72				양호
		아래채	블록스레트	43.00		철거대상		양호
		창고	토벽스레트	22.80	22.80	초가환원	34,000	불량	B	잇기
		광	블록스라브	16.32		철거대상		양호
		화장실	목조스레트	2.42	2.42	목조초가로보수	5,000	불량	B	잇기
		담장	토석기와	96.00	76.00	토담기와로보수	38,000	불량	B

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
남54	류시광	안채	목조와가	87.00				양호
		문간채	목조와가	30.96				양호
		담장	토석기와	80.20				양호
남55	류시억	안채	목조초가	58.90				양호		잇기
		아래채	목조초가	30.29				양호		잇기
		담장	토석담	26.00	26.00	토담이엉보수	18,000	양호	C
남56	류충하	안채	목조일식기와	70.00	70.00	초가환원	105,000	불량	A	잇기
		문간채	목조초가	22.46				양호		잇기
		헛간	토벽초가	27.60				양호		잇기
		화장실	블록스레트	8.00	8.00	초가환원	8,000	보통	A	잇기
		담장	토담기와	87.70	87.70	토담이엉보수	44,000	불량	A
남57	류영수	안채	토벽초가	30.68				양호		잇기
		헛간	토벽초가	21.75				양호		잇기
		화장실	목조초가	15.25				양호		잇기
		담장	이엉토담	91.80				양호
남58	류전하	안채	목조일식기와	70.00	70.00	초가환원	105,000	불량	A	잇기
		아래채	토벽초가	70.64				양호		잇기
		화장실	블록초가	6.30	6.30	목조초가로보수	10,000	불량	A	잇기
		담장	토석기와	56.00	29.00	토담이엉보수	15,000	불량	A
남59
		안채	목조초가	27.75				양호		잇기
		담장	토석담	19.00	10.00	토담이엉보수	5,000	불량	A
남60	류강하	안채	토벽초가	35.00				양호		잇기
		화장실	블록초가	3.00	3.00	토벽초가환원	5,000	보통	A	잇기
		담장	바자울 생울타리	42.00	42.00	토담이엉보수	21,000	보통	A
남61	류시천	안채	목조일식기와	58.00	58.00	초가환원	145,000	불량	B	잇기
		문간채	목조일식기와	26.00	26.00	초가환원	65,000	불량	B	잇기
		헛간	토벽초가	17.20				양호		잇기
		화장실	토벽초가	5.80				양호		잇기
		담장	토담이엉	130.70	75.70	토담이엉보수	38,000	보통	B
남62	류무하	안채	목조와가	36.55				양호
		문간채	목조와가	47.16				양호
		사랑채	목조와가	45.90				양호
		대문채	목조와가	24.38				양호
		사당	목조와가	31.68				양호
		삼문	목조와가	7.02				양호
		화장실	목조초가	1.44				양호		잇기
		담장	토담기와	97.00	12.80	재축.보수	6,000	보통	C

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
남63	류시언	안채	목조와가	74.41				양호
		사랑채	목조와가	41.00				양호
		대문채	목조초가	17.00				양호		잇기
		화장실	블록기와	5.72	5.72	초가환원	10,000	보통	A	잇기
		담장	토담기와	146.00	112.90	토담기와보수	56,000	보통	A
남64	류한승	안채	목조초가	41.98				양호		잇기
		문간채	목조초가	15.51				양호		잇기
		화장실	블록스레트	3.00	3.00	목조초가로보수	5,000	불량	A	잇기
		화장실	블록스레트	3.00	3.00	목조초가로보수	15,000	불량	A	잇기
		담장	토석기와	41.30				양호
남65	류한준	안채	목조와가	96.36				양호
		문간채	목조초가	20.73				양호		잇기
		사당	목조와가	10.78				양호
		보일러실	목조와가	7.35				양호
		화장실	토벽초가	9.00				양호		잇기
		담장	토석기와	107.30	107.30	토담기와로보수	54,000	불량	B
남66	류태건	안채	목조초가	57.56				양호		잇기
		대문채	목조초가	27.99				양호		잇기
		화장실	목조초가	2.21				양호		잇기
		담장	토석기와	35.50	35.50	토석기와보수	18,000	보통	B
남67	충효당	안채	목조와가	243.44				양호
		문간채	목조와가	76.27				양호
		사당	목조와가	35.00	35.00	번와보수	25,000	보통	A
		사주문	목조와가	8.13				양호
		영모각	RC 와가	179.97	179.97	번와보수	120,000	보통	B
		화장실	목조와가	5.67	10.00	와가증축	70,000	보통	A
		화장실	목조초가	3.09				양호		잇기
		담장	토석기와	406.00	234.80	토담기와로보수	118,000	보통	A
남68	류시진	안채	목조초가	39.40				양호		잇기
		헛간	토벽스레트	3.42	3.42	초가환원	8,000	불량	A	잇기
남69
		안채	목조초가	31.86	31.86	초가보수	48,000	보통	A	잇기
		화장실	블록스레트	3.42	3.42	초가환원	8,000	불량	A	잇기
남70	류걸하	안채	목조초가	21.90				양호		잇기
		화장실	블록스레트	1.44	1.44	초가환원	8,000	불량	A	잇기
		담장	토석양와	30.00	30.00	토석이엉	12,000	불량	A

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
남71	류원목	안채	목조초가	41.22				양호		잇기
		광채	토벽초가	8.00				양호		잇기
		방앗간	토벽초가	10.90				양호		잇기
		화장실	목조초가	1.21				양호		잇기
		담장	토석기와	56.10				양호
북1	류일하	안채	목조와가	98.18				양호
		대문채	목조와가	38.22				양호
		화장실	목조와가	7.91				양호
		담장	토석기와	150.00	20.00	토석기와	10,000	보통	A
북2	윤용숙	안채	목조와가	151.25				양호
		문간채	목조와가	37.87				양호
		화장실	목조초가	6.85				양호		잇기
		담장	토담기와	101.00				양호
북3	류석호	안채	목조와가	113.46				양호
		사랑채	목조와가	35.65				양호
		대문재	목조와가	9.18				양호
		광채	목조일식기와	6.85	6.85	목조와가보수	15,000	보통	B
		담장	토담기와	97.00				양호
북4	최재광	안채	토벽초가	45.06				양호		잇기
		화장실 헛간	블록초가	5.00	5.00	목조초가로보수	8,000	불량	A	잇기
		담장	이엉토담기와토담	36.00				양호
북5	류원식	안채	토담초가	26.40				양호		잇기
		아래채	목조초가	15.00	15.00	목조초가보수	23,000	불량	A	잇기
		화장실	목조초가	3.00				양호		잇기
		담장	자연석담	6.00				양호
북6	류성태	안채	목조일식기와	56.10	56.10	초가환원보수	140,000	보통	A	잇기
		문간채	목조와가	20.80	20.80	와가보수	41,000	보통	A
		화장실	블록일식기와	5.65	5.65	초가환원	10,000	불량	A	잇기
		담장	토담기와	87.40	87.40	토담기와로보수	44,000	불량	A
북7	김홍남	안채	목조초가	35.47				양호		잇기
		헛간	토벽초가	17.20				양호		잇기
		담장	토담이엉	14.10				양호
북8	장기영	안채	목조초가	33.30				양호		잇기
		아래채	목조초가	32.80				양호		잇기
		화장실	목조초가	4.90				양호		잇기
		담장	토담이엉	15.70				양호

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
북9	장주봉	안채	토벽스레트	65.00	65.00	초가환원	163,000	불량	D	잇기
		아래채	토벽스레트	10.00	10.00	초가환원	25,000	불량	D	잇기
		축사	토벽스레트	9.80	9.80	초가환원	25,000	불량	D	잇기
		화장실 헛간	목조스레트	12.90	12.90	초가환원	32,000	불량	D	잇기
북10	류영하	안채	토벽초가	66.00				양호		잇기
		아래채	토벽초가	26.20				양호		잇기
		화장실	목조초가	3.00	3.00	신설	10,000	보통	A	잇기
		담장	토담이엉	55.20	55.20	토담이엉보수	28,000	보통	A
북11	류영하	안채	토벽초가	42.00				양호		잇기
		아래채	토벽초가	18.40				양호		잇기
		헛간	블록스레트	3.00	3.00	토벽초가환원	10,000	불량	C	잇기
		담장	토담이엉	28.00				양호
북12	류시관	안채	목조와가	60.00				양호
		사랑채	목조와가	30.78				양호
		아래채	목조초가	29.70				양호		잇기
		문간채	목조초가	20.09				양호		잇기
		화장실	블록초가	9.00	9.00	목조초가환원	10,000	양호	C	잇기
		담장	토석기와	109.00	20.00	토석기와	10,000	보통	A
북13	북촌댁	안채	목조와가	222.00	222.00	안채보수	200,000	양호	A
		문간채	목조와가	44.15				양호
		별채	목조와가	98.67				양호
		사당	목조와가	21.40				양호
		삼문	목조와가	6.52				양호
		방앗간	토벽초가	23.10				양호		잇기
		화장실	목조초가	9.00				양호		잇기
		담장	기와와편토석토담	311.00	54.60	토담기와로보수	27,000	보통	A
북14	류한욱	안채	목조초가	23.00				양호		잇기
		담장	토담이엉	64.30				양호
북15	류도봉	안채	목조초가	43.60				양호		잇기
		사주문	목조초가	48.65				양호		잇기
		화장실	블록초가	1.44	1.44	목조초가환원	10,000	보통	A	잇기
		담장	토석이엉	69.70				양호
북16	류익하	안채	목조초가	37.00				양호		잇기
		문간채	목조초가	28.90				양호		잇기
		화장실	목조초가	6.37				양호		잇기
		담장	토담이엉	85.00				양호

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
북17	류영하	안채	목조와가	71.66				양호
		사랑채	목조와가	45.97				양호
		문간채	토벽초가	28.71				양호		잇기
		화장실	목조초가	3.00				양호		잇기
		담장	토담기와	199.90				양호
북18	진료소	안채	목조와가	71.28				양호
		담장	토석기와	65.00	65.00	토담기와로보수	10,000	불량	A
북19	노인회관	안채	목조와가	58.05				양호
		문간채	목조초가	31.12				양호		잇기
		담장	토담기와	63.70	30.00	보수	15,000	보통	A
북20	류택근	안채	목조초가	44.06				양호		잇기
		아래채	토벽초가	57.37				양호		잇기
		문간채	토벽초가	23.56				양호		잇기
		헛간	목조초가	12.60				양호		잇기
		화장실	목조초가	1.69				양호		잇기
		담장	토담기와	42.00	42.00	토담기와보수	21,000	보통	A
북21	이원소	안채	목조초가	53.90				양호
		화장실	블록스레트	3.00	3.00	초가환원	10,000	보통	A	잇기
		담장	토석기와	24.00	24.00	토석기와로보수	12,000	보통	A
북22	이원소	안채	목조와가	61.03				양호
		사랑채	목조와가	29.55				양호
		문간채	목조와가	71.15				양호
		화장실	토벽초가	3.00				양호
		담장	토석기와	122.00	70.20	토담기와로보수	35,000	불량	A
북23	류경우	안채	목조와가	52.33				양호
		아래채	목조초가	18.17				양호		잇기
		화장실	블록스레트	2.08	3.00	초가환원	10,000	불량	A	잇기
		담장	토석기와	169.20	117.50	토석기와보수	59,000	불량	A
북24	류돈우	안채	목조와가	88.46				양호
		문간채	목조와가	37.59				양호
		창고	목조와가	8.75				양호
		화장실	목조와가	3.60				양호
		담장	토석기와	94.00				양호
북25	류운하	안채	목조와가	72.00				양호
		문간채	목조와가	43.29				양호
		사랑채	목조와가	58.49				양호
		아래채	목조초가	32.80				양호		잇기
		화장실	목조초가	7.40				양호		잇기
		담장	토담기와	148.40	40.00	토담기와보수	20,000	불량	A

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
북26	류청	안채	목조와가	93.40				양호
		문간채	목조와가	35.64				양호
		화장실	목조와가	3.24				양호
		담장	토석기와	169.40				양호
북27	양진당	안채	목조와가	301.72				양호
		사랑채	목조와가	76.70				양호
		사당	목조와가	41.30				양호
		삼문	목조와가	13.80				양호
		화장실	목조와가	2.70				양호
		화장실	블록스레트	3.24	3.24	목조와가보수	15,000	불량	A
		담장	토담기와	348.20				양호
북28	류시주	안채	목조와가	46.54				양호
		아래채	목조초가	13.00				양호		잇기
		창고.화장실	블록초가	14.18	14.18	목조초가보수	21,000	보통	C	잇기
		담장	토담기와	65.40	41.40	토담기와보수	20,000	보통	A
북29	류기달	안채	목조와가	50.00				양호
		문간채	목조초가	49.00				양호		잇기
		화장실	목조초가	2.25				양호		잇기
		담장	토석기와	88.20	30.00	토석기와보수	15,000	양호	A
북30	류영하	안채	목조초가	34.60				양호		잇기
		아래채	토벽초가	15.90	15.90	초가보수	10,000	양호	B	잇기
		문간채	목조초가	7.50				양호		잇기
		화장실	목조초가	15.87				양호		잇기
		담장	토담기와	42.00				양호
북31	류선우	안채	목조와가	127.80				양호
		문간채	목조와가	42.36				양호
		광채	목조와가	21.00				양호
		담장	토석기와	140.00	140.00	기와잇기	21,000	양호	B
북32	류시보	안채	목조와가	39.78				양호
		아래채	목조초가	16.24	16.24	해체보수	41,000	불량	A	잇기
		담장	토담기와	38.00	38.00	토담기와보수	19,000	불량	A
북33	류대하	안채	목조초가	51.20				양호		잇기
		문간채	목조초가	31.56				양호		잇기
		광채	토벽초가	9.80	9.80	보수	15,000	보통	B	잇기
		화장실	목조초가	2.25				양호		잇기
		담장	토담기와	63.00				양호

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
북34	류시흡	안채	목조와가	49.14				양호
		아래채	목조와가	25.92				양호
		대문채	목조와가	15.12				양호
		담장	토담기와	111.70				양호
북35	류현하	안채	목조와가	50.00				양호
		사랑채	목조초가	16.29				양호		잇기
		아래채	목조초가	22.90				양호		잇기
		화장실	블록초가	2.21	3.00	목조초가보수	10,000	보통	A	잇기
		담장	토담이엉	46.90	46.90	토담기와로보수	23,000	보통	A
북36	류석하	안채	목조초가	26.94				양호		잇기
		아래채	목조초가	45.00				양호		잇기
		화장실	목조초가	1.21				양호		잇기
		담장	토담기와	57.50				양호
북37	류달우	안채	목조일식기와	44.00	44.00	초가환원	110,000	불량	B	잇기
		아래채	블록일식기와	22.00	22.00	초가환원	55,000	불량	B	잇기
		부속채	토벽초가	29.00	29.00	보수	44,000	불량	B	잇기
		화장실	목조초가	3.00	3.00	신설	10,000	불량	B	잇기
		담장	토석기와	59.70	59.70	토담이엉으로보수	30,000	불량	B
북38	류시홍	안채	목조와가	40.16				양호
		사랑채	목조초가	33.30				양호		잇기
		방앗간	목조초가	15.20				양호		잇기
		화장실창고	블록스레트	6.12	6.12	목조초가환원	15,000	보통	C	잇기
		담장	토석기와	74.30				양호
북39	빈연정사	정사	목조와가	28.04				양호
		담장	토담기와	81.10	81.10	담장보수	12,000	보통	B
북40	류문하	안채	목조와가	40.84				양호
		문간채	목조초가	50.16				양호		잇기
		헛간	목조초가	25.00				양호		잇기
		화장실	목조초가	3.00				양호		잇기
		담장	토담기와	27.00	12.00	토담기와로보수	6,000	보통	B
북41	이분희	안채	목조초가	55.57				양호		잇기
		화장실	목조초가	4.27				양호		잇기
북42	원지정사	정사	목조와가	30.75				양호
		연자루	목조와가	38.51				양호
		사주문	목조와가	5.00				양호
		담장	토석기와	145.00				양호

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
북43	류동일	안채	목조초가	26.83				양호		잇기
		아래채	블록초가	26.85	26.85	토벽초가보수	40,000	보통	C	잇기
북44	류수창	안채	토벽초가	44.43				양호		잇기
		아래채	블록스레트	54.00	54.00	초가환원	135,000	보통	C	잇기
		화장실	목조초가	3.00	3.00	신설	10,000	보통	B	잇기
		담장	토석양와	64.60	64.60	토담이엉보수	32,000	양호	B
북45	정분선	안채	토벽초가	44.80				양호		잇기
		창고 화장실	블록초가	11.63	11.63	초가환원.보수	18,000	보통	C	잇기
		담장	토석바자울	39.20	39.20	토담이엉으로보수	20,000	보통	C
북46	류재하	안채	토벽초가	26.05				양호		잇기
북47	류역하	안채	목조일식기와	42.30	42.30	초가환원	105,000	보통	E	잇기
		화장실 광	블록초가	9.00	9.00	토벽초가로보수	14,000	보통	E	잇기
북48	류재하	안채	목조일식기와	52.00	52.00	초가환원	130,000	양호	E	잇기
		화장실	블록초가	3.20	3.20	토벽초가로보수	10,000	보통	B	잇기
북49	류시중	안채	토벽초가	37.49				양호		잇기
		화장실	블록스레트	3.00	3.00	토벽초가환원	10,000	보통	B	잇기
		콘테이너	콘테이너	18.00	18.00	초가로개축	45,000	불량	B	잇기
		담장	바자울	50.00	50.00	바자울보수	3,000	보통	B
북50	장기인	안채	목조일식기와	45.06	45.06	초가환원	115,000	보통	C	잇기
		사랑채	토벽일식기와	38.98	38.98	초가환원	98,000	보통	C	잇기
		화장실	토벽초가	7.05	70.50	초가보수	10,000	보통	C	잇기
		담장	토담이엉	23.00				양호
북51	류영하	안채	토벽초가	41.97				양호		잇기
		부속채	블록스레트	18.50	18.50	토벽초가환원	28,000	불량	B	잇기
		화장실	목조초가	4.14	3.00	신설	10,000	불량	A	잇기
		담장	토담이엉	33.00	33.00	토담이엉으로보수	17,000	불량	B
북52	류영하	안채	목조초가	44.40				양호		잇기
		문간채	목조초가	32.15				양호		잇기
		창고	토벽초가	12.22				양호		잇기
		방앗간	토벽초가	11.18				양호		잇기
		담장	토담,바자울	46.00	46.00	토담이엉으로보수	23,000	불량	B
북53	류영하	안채	토벽초가	48.50				양호		잇기
		화장실	블록초가	2.26	3.00	토벽초가환원	10,000	보통	B	잇기
		담장	토벽,바자울	44.00	44.00	토담이엉보수	22,000	보통	B

번호	소유자	건물명	구조양식	규모 (㎡, m)	사업계획			상태	우선 순위	비고
					사업량	보수범위	사업비(천)
북54	류봉식	안채	목조초가	38.50				양호		잇기
		아래채	목조초가	18.05				양호		잇기
		담장	토벽양와	25.00	25.00	토담이엉보수	13,000	보통	B
북55	류강하	안채	토벽초가	55.88				양호		잇기
		담장	토벽,바자울	55.50	55.50	토담이엉보수	28,000	보통	B
북56	권오장	안채	토벽초가	43.03				양호		잇기
		화장실	목조초가	3.00				양호		잇기
		담장	바자울	40.00	40.00	바자울보수	2,000	보통	B

※ 우선순위는 퇴락 및 변형 유지정도에 따라 “A, B, C, D, E" 등급으로 분류함

- 사업추진년도 : A등급(‘03～’04), B등급(‘05～’06), C등급(‘07～’08), D등급(‘09～’10), E등급  (‘11～’12)으로 추진함.

- 예산사정 등으로 계획년도에 사업물량을 완료하지 못하는 경우 다음연도로 순연

성읍 민속(城邑 民俗) 마을

성읍민속마을

Ⅰ. 문화재 현황

1. 지 정 별 : 중요민속자료 제188호(1984.12.24 지정)

2. 위    치 : 제주도 남제주군 표선면 성읍리

3. 연혁 및 특징

◦ 세종 5년(1423) 정의현청을 성산읍 고성리에서 이곳으로 옮긴 이래 1914년 군현제가 폐지될 때까지 약 500년 동안 현청 소재지였던 마을

◦ 1980년 5월 6일 지방민속자료 제5호로 지정 보호되다가 1984년 6월 7일 국가지정 중요민속자료 제188호로 지정되었으며, 제주 중산간촌의 민가와 풍물들이 잘 보존되어 있는 마을

4. 일반현황(2003. 2. 28. 현재)

□ 지정면적 : 935필지 790,747㎡(239,200평)

□ 가구 (호) : 263가구

◦ 전통초가 : 중민 5가구 16동, 비지정 초가 258가구 399동

□ 인    구 : 1,363 명

□ 건물현황

(단위: 동)

구 분	한식와가	초가	스레트지붕	슬라브지붕	함석지붕	기타	계
계	18	415	227	15	6	39	720
성 안	14	176	88	1	-	-	279
성 밖	4	239	139	4	6	39	441

* 성안 97가구 279동, 성밖 166가구 441동

□ 개별 문화재 지정현황

○ 총  괄

(단위 : 건)

종별 지정별	계	천기	중민	유형	무형문화재	민속자료	비 고
계	10점	1	6	1	3	1
국가지정	8점	1	6		1
도 지정	2점			1		1

○ 세부내역

지정별 및 지정일	문화재명	수 량	소재지	비고
국가지정중민 ‘84. 6. 7	성읍민속마을	935필지 790,747㎡	제주도 남제주군 표선면 성읍리	제188호
국가지정중민 ‘64. 1. 31	성읍리느티나무 및 팽나무	팽나무3주 느티나무 1주	남제주군 표선면 성읍리 881-1 외 3필지	제161호
국가지정중민 ‘79. 1. 23	성읍리이영숙 가옥	1곽 2동	남제주군 표선면 성읍리 799	제70호
국가지정중민 ‘79. 1. 23	성읍리고평호 가옥	1곽 4동	남제주군 표선면 성읍리 858, 859	제69호
국가지정중민 ‘79. 1. 23	성읍리한봉일 가옥	1곽 3동	남제주군 표선면 성읍리 928	제71호
국가지정중민 ‘79. 1. 23	성읍리고상은 가옥	1곽 2동	남제주군 표선면 성읍리 862	제72호
국가지정중민 ‘79. 1. 23	성읍리조일훈 가옥	1곽 5동	남제주군 표선면 성읍리 872	제68호
국가지정중무 ‘89. 12. 1	제주민요	오돌또기 맷돌노래 산천초목 봉지가 등	남제주군 표선면 성읍리	제95호
지방지정유형 ‘71. 8. 26.	정의향교	1곽 3동	남제주군 표선면 성읍리 820-1	제5호
지방지정유형 ‘75. 3. 12	일관헌	1곽 1동	남제주군 표선면 성읍리 809-1	제7호
지방지정무형 ‘90. 5. 30	성읍민속마을 오메기술	음식 (오메기술제조)	남제주군 표선면 성읍리	제3호
지방지정무형 ‘95. 4. 20	고수리술	음식 (전통토속주제조)	남제주군 표선면 성읍리	제11호
지방지정민속 ‘71. 8. 26.	돌하르방	12기	남제주군 표선면 성읍리	제2호

Ⅱ. 정비실적

◦ 기    간 : ’84 ～ 2002년

◦ 사 업 비 : 12,947백만원 (국비 8,958, 지방비 3,989)

◦ 사업내용

- 초가이엉잇기 연415동, 성곽보수, 남․서문루 복원, 띠밭매입 141,770㎡, 동․서문루 발굴조사, 마을안길포장, 성곽순찰도로포장, 연자마 복원, 객사 복원, 신당보수, 내아 및 객사부지 발굴조사, 토지 및 건물매입, 종합정비계획용역등.

- 가옥정비 : 263가구(중민 5가구, 비지정 가옥 258가구, 2,458백만원)

Ⅲ. 사업추진계획

1. 기본방침

◦ 사업추진은 ① 문화재원형보존 ② 관아복원․성곽보수 ③ 마을기반시설 ④ 관람객 편의시설 ⑤ 관광시설 사업으로 구분하여 연차계획으로 추진

2. 사업개요

◦ 추진기간 : 2003～2012년 (10개년)

◦ 총 사업비 : 51,980백만원 (국비 30,479, 지방비 21,501)

◦ 사업내용

- 전통초가잇기, 전통가옥보수, 관아지․성곽 발굴조사․정비, 민속자료 보수, 토지매입, 관람객편의시설정비, 관광지 조성 등

3. 세부추진계획

가. 문화재 원형보존

사업대상
	◦ 변형․퇴락가옥 정비 : 258가구 920동 - 성안 92가구 279동 ◦ 지정초가 보수 5가구 10동, 지정초가 건물 및 토지매입 9동 2,079㎡ ◦ 초가이엉잇기 : 연 415동

추진방향
	◦ 기존 가옥 보수정비는 퇴락 및 원형유지 정도에 따라 분류․정비 ◦ 개별 문화재로 지정된 가옥은 엄격한 원형보존차원에서 보수․정비 ◦ 성안지역은 엄격한 원형보존차원에서 보수정비 되도록 하고, 성밖지역의 경우 가옥 외부는 전통양식(가옥형태, 지붕, 담장)을 유지토록 하고 내부는 주민생활편의를 고려(일부 개조 허용) - 내부는「가옥내 주민편의시설 설치기준」(‘04. 2.28) 적용 ◦ 가옥 및 담장보수공사 등 사업추진시 설계․시공과정 등에 소유자․지역주민 등이 원형고증에 참여할수 있도록 함 ◦ 매입가능한 가옥은 지속적으로 매입하여 체험공간 등으로 활용 ◦ 띠밭은 매입하여 이엉잇기 재료를 안정적으로 확보하고, 이엉잇기기능인력 양성방안을 강구

세부사업 추진계획

변형․퇴락가옥 보수(‘03~’12)

◦ 소요예산 : 5,085백만원(국 3,560, 지 1,536)

◦ 사업내용 : 퇴락가옥 보수, 변형가옥 원형․전통양식 복원

- 초가정비, 담장보수, 텃밭조성, 전통조경

◦ 사업물량 : 279동(성안지역 가옥)

◦ 사업추진 : 소유자, 지역전문가의 자문을 받아 마을의 전통적인 담장형태, 높이, 곡선 등이 나타나도록 정비

* 성밖지역 가옥(441동) 정비는 성안지역 가옥정비사업 완료 후 검토․추진

지정문화재 보수(‘04~’07)

◦ 소요예산 : 848백만원(국 594, 지 254)

◦ 사업내용 : 퇴락가옥 보수, 변형건물을 원형대로 복원

◦ 사업물량 : 5가구 10동(초가)

지정문화재(초가) 매입(‘04~’06)

◦ 소요예산 : 650백만원(국 455, 지 195)

◦ 사업내용 : 보존이 필요한 중요민속자료 토지․건물 매입

◦ 사업물량 : 9동 2,079㎡

초가이엉잇기(‘03～’12)

◦ 소요예산 : 1,980백만원(국 1,386, 지 594)

◦ 사업내용 : 이엉잇기 재료확보 및 이엉잇기

◦ 사업물량 : 연 415동

◦ 사업추진 : 현행 연간 1회 일괄 이엉잇기에서 점차적으로 연중 수시 이엉잇기 체제로 전환

◦ 볏짚확보방안

- 마을내 및 인근 토지매입 가능지역을 매입, 띠 생산과 체험프로그램에 활용

- 여분의 띠를 확보하여 긴급보수 필요시 사용하고, 전통적 방법의 보관방법을 사용하여 체험프로그램 소재로 활용

- 이엉잇기 기능인력 확보

- 보존회와 협의, 마을내 이엉잇기 기능을 보유한 기능인에 의한 마을주민 기능전수 기회 제공

․이엉잇기 기능을 지방무형문화재로 지정하는 방안 추진

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1 단계						2 단계
					소 계	03	04	05	06	07	소 계	08	09	10	11	12
문화재원형보존	초가이엉 잇기	연 415동	계	1,980	920	160	180	180	200	200	1,060	200	200	220	220	220
			국 비	1,386	644	112	126	126	140	140	742	140	140	154	154	154
			지방비	594	276	48	54	54	60	60	318	60	60	66	66	66
	지정초가 보수	5가구 10동	계	848	848		172	200	200	276
			국 비	594	594		120	140	140	193
			지방비	254	254		52	60	60	83
		건물및토지 매입 9동 2079㎡	계	650	650		180	220	250
			국 비	455	455		126	154	175
			지방비	195	195		54	66	75
	퇴락/ 변형가옥 정비	성안 92가구 279동 -가옥․담장보수 - 텃밭조성 - 전통조경	계	5,085	2,996	396	500	600	700	800	2,089	500	500	500	589
			국 비	3,560	2,097	277	350	420	490	560	1462	350	350	350	412
			지방비	1,526	899	119	150	180	210	240	627	150	150	150	177
합 계		4개 사업	계	8,563	5,414	556	1,032	1,200	1,350	1,276	3,149	700	700	720	809	220
			국 비	5,993	3,789	389	722	840	945	893	2,204	490	490	504	566	154
			지방비	2,570	1,625	167	310	360	405	383	945	210	210	216	243	66

※ 가옥별 현황 및 정비계획 : 별첨

나. 관아복원 및 성곽보수 정비

□ 현실태

◦ 관아지 현황 (부지 21,063㎡, 일관헌<지방유형 제7호>, 객사채, 대문채)

- 일관헌은 1975년 콘크리트로 복원

- 객사터는 발굴조사 후 객사채와 대문채 기복원

◦ 성곽현황 (길이 1,100m, 치성 10개소, 문루 3개소, 성곽저촉토지 9,742㎡)

- 치성 10개소 중 7개소, 동서남 문루 3개소의 유구가 있음

- 서문과 남문은 기복원, 동문은 문지만 발굴조사 완료

- 성곽안쪽에 가옥, 유채밭 등이 성곽과 접해 있고, 성곽 기생식물로 인해 성벽의 균열이 진행되는 상태

- 1948. 4. 3 사건 당시 주민들이 축조한 성벽은 체성 단면과 맞지 않고, 계단이 남문에만 설치되는 등 전체적으로 원형훼손이 많은 상태

□ 정비실적

구 분	사업내용	정비실적(’02년까지)		비고
		사업내용	소요예산
계			3,252,000
관아지복원	일관헌외 21동	․ 일관헌 및 내대문복원 ․ 내아부지발굴조사	163,000
성곽보수	성곽 및 문루복원	․ 성곽보수 1,100m ․ 남․서문루 복원 ․ 동문지 발굴조사	1,882,000
토지매입	관아부지 및 성곽저촉 토지 매입	․ 토지매입 13,623㎡	1,207,000

사업대상
	◦ 관아 복원 - 관아부지 매입, 발굴조사, 일관헌 등 건물복원 ◦ 성곽정비 - 성곽보수, 성곽저촉지 매입, 치성복원, 여장․옹성복원, 동문루복원, 방죽․우물지 정비

추진방향
	◦ 관아건물복원 및 성곽 시설물 복원 규모는 추후 별도 검토 - 관아복원 : 관아부지에 대한 발굴 등 조사를 먼저 시행하고 조사 결과에 따라 복원규모, 유구보존 대상 등 결정 - 성곽시설 복원 : 향후 별도의 관계전문가의 조사를 거쳐 적정수준의 복원규모 결정 ◦ 관아부지와 성곽 저촉지는 마을 원형보존 및 안전사고 예방에 필요하므로 지속 매입 추진

세부사업 추진계획

관아지 복원(‘04~’08) : 별도 검토

◦ 소요예산 : 4,090백만원 (국비 2,863, 지방비 1,227)

◦ 사업내용 : 관아부지 발굴조사, 일관헌, 향청, 작청, 옥터, 내아, 내․외대문 등 건물복원 21동

◦ 위    치 : 성읍민속마을 일관헌 주변

◦ 사업추진

- 발굴조사 결과에 따라 관계기관의 검토를 거쳐 건물 복원규모와 유구정비 전시대상 등을 결정한 후 복원 추진

성곽 정비(‘07~’10) : 별도 협의후 추진

◦ 소요예산 : 3,269백만원(국비 2,288, 지방비 981)

◦ 사업내용 : 성곽보수 600m, 치성복원 3개소, 여장/등성 계단복원 1,100m, 동문루 복원

◦ 사업추진 : 별도의 관계전문가 조사 등을 거쳐 복원 대상, 복원 규모 등을 결정한 후 사업추진

토지매입(‘03~’08)

◦ 소요예산 : 11,550백만원(국비 8,085, 지방비 3,465)

◦ 사업내용 : 관아부지 및 성곽저촉 건물지 매입

◦ 사업규모 : 30,805㎡(관아부지 21,063㎡, 성곽저촉 건물지 9,742㎡)

◦ 매입우선순위

- 관아지 : ⓛ 내아부지 ② 향청 ③ 작청 ④ 군기고 순으로 매입

(매입 순으로 발굴 등 조사 시행)

- 성벽저촉 건물지 : ① 성곽 붕괴 우려지역 ② 동․서․남문루 주변  ③ 성곽보수정비 대상지역 순으로 매입

기타유적정비(‘03~’04)

◦ 소요예산 : 300백만원(국비 210   지방비 90)

◦ 사업내용 : 방죽, 우물지, 신당 등 3개소, 원형대로 정비

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사엄명	사업 물량	총소요 예산		1 단계						2 단계
					소 계	03	04	05	06	07	소 계	08	09	10	11	12
관아복원및성곽보수정비	관아 건물 복원	일관헌 외 21동	계	3,390	2,011					2,011	1,379	1,379
			국 비	2,373	1,408					1,408	965	965
			지방비	1,017	603					603	414	414
		관아 부지매입 21,063㎡	계	6,200	6,200		1,285	1,500	1,715	1,700
			국 비	4,340	4,340		900	1,050	1,200	1,190
			지방비	1,860	1,860		385	450	515	510
		관아부지 발굴조사	계	700	700			350		350
			국 비	490	490			245		245
			지방비	210	210			105		105
	성곽 보수 정비	성곽보수 600m	계	1,569							1,569	523	523	523
			국 비	1,098							1,098	366	366	366
			지방비	471							471	157	157	157
		성곽저촉 건물지 매입 9,742㎡	계	5,350	5,004	2,228	222	584	970	1,000	346	346
			국 비	3,745	3,503	1,560	155	409	679	700	242	242
			지방비	1,605	1,501	668	67	175	291	300	104	104

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1 단계						2 단계
					소 계	03	04	05	06	07	소 계	08	09	10	11	12
관아복원및성곽보수정비	성곽 보수 정비	치성복원 3개소	계	500							500	200	300
			국 비	350							350	140	210
			지방비	150							150	60	90
		여장/ 옹성계단 복원 1,100m	계	900							900	300	400	200
			국 비	630							630	210	280	140
			지방비	270							270	90	120	60
		동문루 복원	계	300						300
			국 비	210						210
			지방비	90						90
		방죽 5개소, 우물지등 3개소 정비	계	300	300	90	210
			국 비	210	210	63	147
			지방비	90	90	27	63
합 계		9개 사업	계	19,209	14,515	2,318	1,717	2,434	2,685	5,361	4,694	2,748	1,223	723
			국 비	13,446	10,161	1,623	1,202	1,704	1,879	3,753	3,285	1,923	856	506
			지방비	5,763	4,354	695	515	730	806	993	1,409	825	367	217

다. 마을기반시설 정비

사업대상
	○ 마을공동주차장조성, 성곽순찰도로포장 609m, 오수처리장 1개소, 전기통신 지중화, 가로등 정비, 조경공사 등

추진방향		「마을내 시설 설치기준」(2004. 3. 2) 적용
	○ 성밖 지역에 마을주민 공용주차장을 조성, 성안으로의 차량진입을 통제하여 민속마을 경관유지 및 관람편의 조성 ○ 우수․오수관로는 분리, 오수관로는 지중화하여 정화시설로 연결 ○ 전기, 통신, 소방, 급․배수 시설 등 지하매설이 가능한 시설은 공동구를 설치, 지중화 ○ 가로등 등은 타시설물에 매입하는 방법 등을 활용, 노출부위 최소화

세부사업 추진계획

마을주민 공동주차장 조성(‘09~’10)

○ 소요예산 : 1,800백만원(국비 1,260, 지방비 540)

○ 사업내용 : 주차장 2개소(동․북문 인근지역) 각 4,000㎡,

성곽탐방로 정비(‘03, ‘07~’09)

○ 소요예산 : 1,362백만원(국비 953, 지방비 409)

○ 사업내용 : 미정비구간 L=609m, B=3.5m 칼라투스콘 포장

※ 포장구간(칼라투수콘) : 총 길이 1,331m 중 722m

오수․우수관로 분리 설치(‘08~’09)

○ 소요예산 : 1,651백만원(국비 826, 지방비 826)

○ 사업규모 : 2,573m

전기통신 지중화('05~'10)

○ 소요예산 : 4,293백만원(한전 사업비)

○ 사업규모 : 7,156m

○ 사업추진 : 한전과 협의, 추진

지중화 포장마감(‘03~‘09)

○ 소요예산 : 900백만원(국비 630, 지방비 270)

○ 사업규모 : 전기지중화 7,156m, 우․오수관 정비 2,753

○ 사업추진 : 포장시 도로가 높아져 주변 담장이 낮아지지 않도록 유의

가로등 정비(‘05~’07)

○ 소요예산 : 450백만원(국비 315, 지방비 135)

○ 사업규모 : 83개소

○ 사업추진 : 담장 등에 매입하거나 담장 높이 이하로 하여 노출부위를 최소화

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총사업비		1 단계						2 단계
					소 계	03	04	05	06	07	소 계	08	09	10	11	12
마을기반시설정비	성곽순찰 도로정비	L=609m B=3.5m	계	1,362	384	184				200	978	635	343
			국 비	953	269	129				140	685	445	240
			지방비	409	115	55				60	293	191	103
	마을공동 주차장 조성	8,000㎡ 2개소	계	1,800							1,800		900	900
			국 비	1,260							1,260		630	630
			지방비	540							540		270	270
	가로등 정비	83개소	계	450	450			150	150	150
			국 비	315	315			105	105	105
			지방비	135	135			45	45	45
	우수/ 오수관 분리	L=2,573m	계	1,651							1,651	825	826
			국 비	826							826	412	413
			지방비	826							826	413	413
	전선 지중화 (한전)	L=7,156m	계	4,293	1,503			150	663	690	2,790	1,089	693	1,008
			국 비	-	-			-	-	-	-	-	-	-
			지방비	4,293	1,503			150	663	690	2,790	1,089	693	1,008
	포장공사	전기지중화 L=7,156m 우오수관 정비 L=2,573m	계	900	340	84	64	66	63	63	560	280	280
			국 비	630	238	59	45	46	44	44	392	196	196
			지방비	270	102	25	19	20	19	19	168	84	84
합 계		6개 사업	계	10,456	2,677	268	64	366	876	1,103	7,779	2,829	3,042	1,908
			국 비	3,983	822	188	45	151	149	289	3,161	1,052	1,479	630
			지방비	6,473	1,855	80	19	215	727	814	4,618	1,777	1,563	1,278

라. 관람객 편의 시설 설치

사업대상
	○ 주차장조성 6,600㎡, 관리사무소, 매표안내소, 휴게소, 공중화장실, 음수대 등

추진방향		「마을내 시설 설치기준」(2004. 3. 2) 적용
	◦ 마을의 전통건축․경관과 주민들의 주거환경에 저해되지 않도록 설치 ◦ 각 시설들간의 이용 효율성과 관리측면을 고려하여 설치 ◦ 마을내 활용 가능한 공간을 경관에 맞게 정비하여 주민 및 관람객의 휴식공간으로 활용 ◦ 안내판, 가로등 등 관람객 편의시설은 마을 경관과 마을 특성에 맞는 재질과 형태로 제작․설치 ◦ 남문지역에 관광시설을 설치할 경우, 남문에서 바라보는 조망권이 훼손되지 않도록 유의

세부사업 추진계획

주차장 조성부지 매입(‘10~’11)

◦ 소요예산 : 1,980백만원(국비 1,386, 지방비 594)

◦ 사업내용 : 주차장조성부지 6,600㎡ 매입

◦ 위    치 : 성읍민속마을 남문지역

주차장 조성(‘11~’12)

◦ 소요예산 : 500백만원(지방비)

◦ 사업내용 : 주차장조성 6,600㎡

◦ 위    치 : 성읍민속마을 남문지역 매입부지

매표소 ․ 안내소 설치(’04년)

◦ 소요예산 : 200백만원(국비 140, 지방비 60)

◦ 사업규모 : 1동(60㎡)

◦ 위    치 : 성읍민속마을 남문지역

관리사무소 건립(‘08년)

◦ 소요예산 : 360백만원(국비 252, 지방비 108)

◦ 사업규모 : 1동(144㎡)

◦ 위    치 : 성읍민속마을 남문지역

편의시설 설치(‘04년)

◦ 소요예산 : 770백만원(지방비)

◦ 사업내용 : 휴게소 1동(150㎡), 공중화장실 2동(각 85㎡), 음수대 4개소

◦ 위    치 : 성읍민속마을 남문지역

※ 사업추진 시기는 지방비 확보상황에 따라 조정

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1 단계						2 단계
					소 계	03	04	05	06	07	소 계	08	09	10	11	12
관람객편의시설	관리 사무소	1동 144㎡	계	360							360	360
			국 비	252							252	252
			지방비	108							108	160
	매표소/ 안내소	1동 60㎡	계	200	200		200
			국 비	140	140		140
			지방비	60	60		60
	휴게소	1동 150㎡	계	300	300		300
			국 비	-	-		-
			지방비	300	300		300

(단위 : 백만원)

구분		사업 물량	총소요 예산		1 단계						2 단계
					소 계	03	04	05	06	07	소 계	08	09	10	11	12
관람객편의시설	공 중 화장실	2동 85㎡	계	450	450		450
			국 비	-	-		-
			지방비	450	450		450
	음수대	4개소	계	20	20		20
			국 비	-	-		-
			지방비	20	20		20
	주차장 조성	6,600㎡	계	500							500				200	300
			국 비	-							-				-	-
			지방비	500							500				200	300
	부지매입	6,600㎡	계	1,980							1,980			900	1,080
			국 비	1,386							1,386			630	756
			지방비	594							594			270	324
합 계		7개 사업	계	3,810	970		970				2,840	360		900	1.280	300
			국 비	1,778	140		140				1,638	252		630	756	-
			지방비	2,032	830		830				1,202	108		270	524	300

마. 관광시설 조성

사업대상
	○ 민속전시관, 전통공예․특산품판매장, 야외공연장, 숙박시설, 부지매입 34,955㎡ 등

추진방향		「마을내 시설 설치기준」(2004. 3. 2) 적용
	○ 기 조성된 남문외곽 상가지역을 관람객 편의시설과 연계하여 보존과 활용 측면을 조화시킬 수 있는 공간으로 조성 ○ 민속마을의 내부를 한 눈에 관람할 수 있도록 마을의 일상생활과 관련한 전시시설을 설치하여 관람객의 이해도모 - 전시공간 등의 시설은 마을내 공가 등 활용가능한 자원을 우선적으로 활용 ○ 남문지역에 관광시설을 설치할 경우, 남문에서 바라보는 조망권이 훼손되지 않도록 유의

세부사업 추진계획

관광지조성(기반시설 포함)

◦ 추진기간 : 2009 ～ 2012

◦ 소요예산 : 5,942백만원

◦ 위    치 : 성읍민속마을 남문지역

◦ 부지조성 : 34,955㎡

◦ 사업내용 : 전통민속행사 및 관광객의 볼거리를 제공할 수 있는 공간을 조성하여 민속마을의 풍물․민속놀이․연자마 재현, 오메기술 재현 등 지역주민 소득증대 방안 제고

전시관/전수관(‘10~’12) : 사업추진여부 별도 검토

◦ 소요예산 : 1,600백만원(국비 1,120, 지방비 480)

◦ 위    치 : 성읍민속마을 남문지역

◦ 사업규모 : 전시관/전수관 건립 1,873㎡

◦ 사업취지 : 고소리술제조, 오메기술제조, 제주민요 등 무형문화재의 보존과 후계자 양성 및 전시공간으로 활용

◦ 전시공간 또는 후계자 양성은 관아지 복원건물, 마을내 매입 공가 등을 활용하는 것이 더 효율적일 수 있음

전통공예․특산품 판매장(‘10~’11)

◦ 소요예산 : 800백만원(지방비)

◦ 위    치 : 성읍민속마을 남문지역

◦ 사업규모 : 민속공방 등 10동 설치

◦ 사업취지 : 전통공예품의 제작판매는 물론 지역특산물과 문화상품의 개발촉진으로 지역경제 활성화 제고

※ 사업추진 시기는 지방비 확보상황에 따라 조정

야외공연장 조성(‘08년)

◦ 소요예산 : 500백만원(국비 250, 지방비 250)

◦ 위    치 : 성읍민속마을 남문지역

◦ 사업내용 : 민속공연장 7,720㎡을 조성하여 전통민속놀이 및 풍물 등 체계적인 프로그램을 개발, 방문객 참여 유도 및 볼거리 제공

※ 사업추진 시기는 지방비 확보상황에 따라 조정

체험가옥 신축(‘11년) : 사업추진여부 별도 검토

◦ 소요예산 : 1,100백만원(지방비)

◦ 위    치 : 성읍민속마을 남문지역

◦ 사 업 량 : 전통가옥 15동(동당 66㎡)

◦ 사업취지 : 전통가옥에서의 민속마을의 생활을 체험 할 수 있는 기회 제공

◦ 마을의 공가를 활용하는 것이 더 효율적임

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1 단계						2 단계
					소 계	03	04	05	06	07	소 계	08	09	10	11	12
관광시설조성	관광지 조성	부지매입 및 조성 34,955㎡	계	5,942							5,942		1,256	1,289	1,386	2,011
			국 비	4,159							4,159		879	902	970	1408
			지방비	1,783							1,783		377	387	416	603
	전수관/ 전시관	건물신축 1,487㎡	계	1,600							1,600			760	840
			국 비	1,120							1,120			532	588
			지방비	480							480			228	252
	야외 공연장	공연장 7,729㎡	계	500							500	500
			국 비	-							-	-
			지방비	500							500	500
	전통공예 특산품 판매장	10동	계	800							800			400	400
			국 비	-							-			-	-
			지방비	800							800			400	400
	체험가옥 조성	체험가옥 10동	계	1,100							1,100				550	550
			국 비	-							-				-	-
			지방비	1,100							1,100				550	550
합 계		5개 사업	계	9,942							9,942	500	1,256	2,449	3,176	2,561
			국 비	6,079							5,279	-	879	1,434	1,558	1,408
			지방비	3,863							4,663	500	377	1,015	1,618	1,153

자료1		성읍민속마을 종합정비 소요예산

(단위 : 백만원)

사업명	사업물량	총사업비		1 단계						2 단계
				소 계	03	04	05	06	07	소 계	08	09	10	11	12
원형 보존	소 계 (4개 사업)	계	8,563	5,414	556	1,019	1,213	1,350	1,276	3,149	700	700	720	809	220
		국 비	5,993	3,789	389	713	849	945	893	2,204	490	490	504	566	154
		지방비	2,570	1,625	167	306	364	405	383	945	210	210	216	243	66
초가 이엉 잇기	연 415동	계	1,980	920	160	180	180	200	200	1,060	200	200	220	220	220
		국 비	1,386	644	112	126	126	140	140	742	140	140	154	154	154
		지방비	594	276	48	54	54	60	60	318	60	60	66	66	66
지정 초가 보수	5가구 10동	계	848	848		172	200	200	276
		국 비	594	594		120	140	140	193
		지방비	254	254		52	60	60	83
	건물및토지 매입 9동 2079㎡	계	650	650		180	220	250
		국 비	455	455		126	154	175
		지방비	195	195		54	66	75
퇴락/ 변형 가옥 정비	성안 279동 - 초가정비 - 담장보수 - 텃밭조성등	계	5,085	2,996	396	487	613	700	800	2,089	500	500	500	589
		국 비	3,560	2,097	277	341	429	490	560	1462	350	350	350	412
		지방비	1,526	899	119	146	184	210	240	627	150	150	150	177
관아지 성곽 복원	소 계 (9개 사업)	계	19,209	14,515	2,318	1,717	2,434	2,685	5,361	4,694	2,748	1,223	723
		국 비	13,446	10,161	1,623	1,202	1,704	1,879	3,753	3,285	1,923	856	506
		지방비	5,763	4,354	695	515	730	806	1,608	1,409	825	367	217
관아 건물 복원	일관헌 외 21동	계	3,390	2,011					2,011	1,379	1,379
		국 비	2,373	1,408					1,408	965	965
		지방비	1,017	603					603	414	414
	관아 부지매입 21,063㎡	계	6,200	6,200		1,285	1,500	1,715	1,700
		국 비	4,340	4,340		900	1,050	1,879	1,190
		지방비	1,860	1,860		385	450	515	510
	관아부지 발굴조사	계	700	700			350		350
		국 비	490	490			245		245
		지방비	210	210			105		105

(단위 : 백만원)

사업명	사업 물량	총사업비		1 단계						2 단계
				소 계	03	04	05	06	07	소 계	08	09	10	11	12
성곽정비	성곽보수 600m	계	1,569							1,569	523	523	523
		국 비	1,098							1,098	366	366	366
		지방비	471							471	157	157	157
	성곽저촉 건물지 매입 9,742㎡	계	5,350	5,004	2,228	222	584	970	1,000	346	346
		국 비	3,745	3,503	1,560	155	409	679	700	242	242
		지방비	1,605	1,501	668	67	175	291	300	104	104
	치성복원 3개소	계	500							500	200	300
		국 비	350							350	140	210
		지방비	150							150	60	90
	여장/ 옹성계단 복원 1,100m	계	900							900	300	400	200
		국 비	630							630	210	280	140
		지방비	270							270	90	120	60
	동문루 복원	계	300						300
		국 비	210						210
		지방비	90						90
	방죽 5개소, 우물지등 3개소	계	300	300	90	210
		국 비	210	210	63	147
		지방비	90	90	27	63
마을 기반 시설	소 계 (6개 사업)	계	10,456	2,677	268	64	366	876	1,103	7,779	2,829	3,042	1,908
		국 비	3,983	822	188	45	151	149	289	3,161	1,052	1,479	630
		지방비	6,473	1,855	80	19	215	727	814	4,618	1,777	1,563	1,278
성곽순찰 도로정비	L=609m B=3.5m	계	1,362	384	184				200	978	635	343
		국 비	953	269	129				140	685	445	240
		지방비	409	115	55				60	293	191	103
마을공동 주차장 조성	8,000㎡ 2개소	계	1,800							1,800		900	900
		국 비	1,260							1,260		630	630
		지방비	540							540		270	270
가로등 정비	83개소	계	450	450			150	150	150
		국 비	315	315			105	105	105
		지방비	135	135			45	45	45
우수/우수관로분리 시공	L=2,573m	계	1,651							1,651	825	826
		국 비	826							826	412	413
		지방비	826							826	413	413
전 기 지중화 (한전)	L=7,156m	계	4,293	1,503			150	663	690	2,790	1,089	693	1,008
		국 비	-	-			-	-	-	-	-	-	-
		지방비	4,293	1,503			150	663	690	2,790	1,089	693	1,008
포장마감	전기지중화 L=7,156m 우오수관 정비 L=2,573m	계	900	340	84	64	66	63	63	560	280	280
		국 비	630	238	59	45	46	44	44	392	196	196
		지방비	270	102	25	19	20	19	19	168	84	84

(단위 : 백만원)

사업명	사업 물량	총소요 예산		1 단계						2 단계
				소 계	03	04	05	06	07	소 계	08	09	10	11	12
관람 편의 시설	소 계 (7개 사업)	계	3,810	970		970				2,840	360		900	1.280	300
		국 비	1,778	140		140				1,638	252		630	756	-
		지방비	2,032	830		830				1,202	108		270	524	300
관 리 사무소	1동 144㎡	계	360							360	360
		국 비	252							252	252
		지방비	108							108	160
매표소/ 안내소	1동 60㎡	계	200	200		200
		국 비	140	140		140
		지방비	60	60		60
휴게소	1동 150㎡	계	300	300		300
		국 비	-	-		-
		지방비	300	300		300
공 중 화장실	2동 85㎡	계	450	450		450
		국 비	-	-		-
		지방비	450	450		450
음수대	4개소	계	20	20		20
		국 비	-	-		-
		지방비	20	20		20
주차장 조 성	6,600㎡	계	500							500				200	300
		국 비	-							-				-	-
		지방비	500							500				200	300
부지매입	6,600㎡	계	1,980							1,980			900	1,080
		국 비	1,386							1,386			630	756
		지방비	594							594			270	324
관광시설	소 계 (5개 사업)	계	9,942							9,942	500	1,256	2,449	3,176	2,561
		국 비	5,279							5,279	-	879	1,434	1,558	1,408
		지방비	4,663							4,663	500	377	1,015	1,618	1,153
관광지 조 성	부지매입 및 조성 34,955㎡	계	5,942							5,942		1,256	1,289	1,386	2,011
		국 비	4,159							4,159		879	902	970	1408
		지방비	1,783							1,783		377	387	416	603
전수관/ 전시관	건물신축 1,487㎡	계	1,600							1,600			760	840
		국 비	1,120							1,120			532	588
		지방비	480							480			228	252
야 외 공연장	공연장 7,729㎡	계	500							500	500
		국 비	-							-	-
		지방비	500							500	500
전통공예․ 특산품 판매장	10동	계	800							800			400	400
		국 비	-							-			-	-
		지방비	800							800			400	400
체험 가옥	체험가옥 10동	계	1,100							1,100				550	550
		국 비	-							-				-	-
		지방비	1,100							1,100				550	550
합계	31개 사업	계	51,980	23,576	3,142	3,770	4,013	4,911	7,740	28,404	7,137	6,221	6,700	5,265	3,081
		국 비	30,479	14,912	2,200	2,100	2,704	2,973	4,935	15,567	3,717	3,704	3,704	2,880	1,562
		지방비	21,501	8,664	942	1,670	1,309	1,938	2,805	12,837	3,420	2,517	2,996	2,385	1,519

자료2		가옥별 현황 및 정비계획

□ 성안지역 92가구

가옥명	현 황			정비소요예산 (천원)	우선 순위
	관리자	주 소	건물현황
강두석가옥	강두석	565	안(초), 모(초)	17,142	A
현봉규가옥	현봉규	567	안(초), 모(초)	6,075	A
이방율가옥	이방율	568-1	안(초), 밖(초/초)	9,279	B
허양숙B옥	허양숙	569	안(초), 밖(초), 모(초)	47,004	B
현봉규가옥	현봉규	570	안(슬레), 모(슬레)	160,230	D
홍기표가옥	홍기표	572	안(초), 밖(초), 모(초), 문(초)	63,008	A
이철규가옥	이철규	690	안(슬레)	84,637	E
이영자가옥	이영자	796	안(슬레), 모(슬레)	68,468	E
이무순가옥	이무순	797	안(슬레)	56,224	E
김정옥가옥	김정옥	800	안(슬레), 모(슬레)	141,004	E
홍달화가옥	홍달화	801	안(슬레), 밖(초), 모(초)	118,989	D
홍태휴가옥	홍태휴	803-1	안(초), 모(초)	50,380	A
김영훈가옥	김영훈	803-2	안(초), 모(슬라)	30,587	B
강봉기가옥	강봉기	804	안(초)	24,833	B
강봉기가옥	강봉기	806	안(초), 밖(슬레), 모(초)	69,780	C
남제주군	남제주군	808	안(기)	안할망당	A
허영희가옥	허영희	809-2	안(초), 모(초)	157,764	C
이상종가옥	이상종	809-3	안(슬레)	51,692	E
남제주군	남제주군	810 811	안(초)	31,168	B
현봉진 현희진가옥	현봉진 현희진	813-1 813-4	안(초), 밖(초), 모(초). 문(슬레)	131,289	C

가옥명	현 황			정비소요예산 (천원)	우선 순위
	관리자	주 소	건물현황
오정미가옥	오정미	818	안(초), 박(슬레)	59,755	C
김인식가옥	김인식	819	안(초), 모(슬레)	59,708	D
박봉준가옥	박봉준	822-2	안(슬레)	47,000	D
배기준가옥	배기준	823-1 824	안(초), 모(초)	18,662	C
김정옥가옥	김정옥	825	안(슬레), 모(슬레)	75,712	E
이순여가옥	이순여	826-1	안(초), 밖(초), 모(초/초)	26,759	B
송승언가옥	송승언	828-1	안(초), 밖(초), 모(초)	45,194	C
강만석가옥	강만석	828-2	안(슬레), 밖(초), 모(초)	100,630	C
이정웅 이호규가옥	이정웅 이호규	830 830-1	안(초), 밖(초)	175,330	D
정원필가옥	정원필	832-1	안(슬레), 밖(초)	46,760	D
정원보가옥	정원보	833-1	안(초), 밖(초)	32,248	B
한기생가옥	생가옥	834-1	안(초), 밖(초)	31,264	C
강희팔가옥	강희팔	836	안(초), 밖(초), 모(초)	26,150	B
강인필가옥	강인필	837-1	안(슬레), 밖(초), 모(초)	28,225	C
김춘일가옥	김춘일	838 839	안(초), 밖(초), 모(초)	28,740	A
강정표가옥	강정표	840	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레)	111,760	D
김관희가옥	김관희	841	안(초), 밖(슬레), 모(초/슬레)	66,916	C
송동근가옥	송동근	842-1	안(슬레), 밖(슬레)	51,349	D
송창근가옥	송창근	843-1	안(초), 밖(초)	59,730	D
송동근가옥	송동근	844-1	안(초)	19,356	B
강찬호가옥	강찬호	845-1	안(슬레), 밖(초), 모(슬레)	129,114	D
홍경율가옥	홍경율	846	안(초), 밖(초), 모(초)	27,879	A
강덕성가옥	강덕성	848	안(초), 모(초)	15,525	B
남제주군	남제주군	849	안(초), 밖(초), 모(초)	61,110	A

가옥명	현 황			정비소요예산 (천원)	우선 순위
	관리자	주 소	건물현황
김두옥가옥	김두옥	850-1	안(초), 모(초/슬레)	35,798	C
강희필가옥	강희필옥	851	안(초)	23,660	A
남제주군가옥	남제주군	852	안(초), 밖(초), 모(초)	28,600	A
이창규가옥	이창규	861-1	안(초), 모(슬레/슬레)	50,320	C
오국희가옥	오국희	864-1	안(초)	35,026	B
홍경순가옥	홍경순	865-1	안(슬레)	123,000	E
이방현가옥	이방현	865-4	안(초), 모(슬레)	28,630	B
문종칠가옥	문종칠	867	안(슬라), 모(슬레)	55,438	E
이인덕가옥	이인덕	868-1	안(슬레), 밖(초), 모(초/초)	66,338	C
고양원가옥	고양원	874	안(슬레)	43,762	D
현순옥가옥	현순옥	876-2	안(슬레), 모(슬레)	85,104	E
남제주군	남제주군	880-1	안(슬레)	82,614	E
박명숙가옥	박명숙	882-1	안(초), 밖(초), 모(초), 문(초)	-	A
강순심가옥	강순심	882-4	안(초)	5,610	B
송창현가옥	송창현	532-2	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레)	117,758	D
고상언가옥	고상언	536-1	안(슬레), 모(초)	100,390	D
현여옥가옥	현여옥	537	안(슬레), 모(슬레/슬레)	93,249	D
안방희가옥	안방희	541	안(슬레)	57,863	D
강영식가옥	강영식	541-1	안(슬레), 모(초)	71,848	C
김권원가옥	김권원	556-1	안(초), 모(초)	23,256	C
문금자가옥	문금자	557	안(슬레), 모(슬레/초)	85,035	C
이준호가옥	이준호	559	안(초), 모(초)	30,228	B
조인수가옥	조인수	560	안(슬레), 밖(초), 모(슬레)	88,627	C
강문숙가옥	강 문 숙	574-1	모(슬레)	39,732	D

가옥명	현 황			정비소요예산 (천원)	우선 순위
	관리자	주 소	건물현황
강문숙가옥	강 문 숙	575-1	안(초), 밖(초)	16,664	B
강두현가옥	강 두 현	577-1	안(초), 모(초)	36,285	B
표선단위 농 업 협동조합	표선단위 농 업 협동조합	577-3	창고(슬레)	152,250	D
변정식가옥	변 정 식	577-4	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레)	90,075	D
홍민자가옥	홍 민 자	578-1	안(초), 밖(초), 모(초), 문(초)	57,102	A
고명근가옥	고 명 근	578-2	안(초), 모(초)	51,345	C
정순종가옥	정 순 종	579	안(초)	9,596	B
송용근가옥	송 용 근	580	안(초), 식당,(초), 모(초)	70,320	B
홍환표가옥	홍 환 표	582	안(슬레), 밖(초), 모(슬레)	129,181	C
김춘생가옥	김 춘 생	583	안(슬레), 모(초)	103,539	D
홍복순가옥	홍 복 순	584	안(초), 밖(초), 모(초/초)	14,810	A
김규영가옥	김 규 영	585	안(초), 밖(초/초)	54,297	C
이경흠가옥	이 경 흠	586-1	안(슬레), 모(슬레/슬레)	148,544	D
강 철가옥	강 철	587-3	안(초), 모(슬라)	30,250	E
한관진가옥	한 관 진	587-4	안(슬레), 밖(슬레)	63,906	C
송문평가옥	송 문 평	589	안(슬레), 모(슬레)	90,850	D
문영옥가옥	문 영 옥	591	안(슬레), 모(초/초)	74,871	B
마 을 회 남제주군	마 을 회 남제주군	592 592-1	작업소(초), 보건진료소(초)	-	A
고정언가옥	고 정 언	594	안(초), 밖(초), 모(초)	29,259	B
고상호가옥	고 상 호	594-1	안(초), 모(초)	39,984	A
강태윤가옥	강 태 윤	597	안(초), 밖(슬레), 모(초)	55,024	B
현숙자가옥	현 숙 자	598-1	안(초), 모(초)	22,222	B

가옥명	현 황			정비소요예산 (천원)	우선 순위
	관리자	주 소	건물현황
강문호가옥	강 문 호	599-1	안(슬레), 모(초)	68,354	C
김규석가옥	김 규 석	600-1	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레/슬레)	86,111	C
강두영가옥	강 두 영	602	안(슬레), 밖(초)	57,488	C
이광자가옥	이 광 자	884	안(초), 밖(초), 모(슬레)	63,913	A
안방수가옥	안 방 수	886-1	안(초), 밖(초)	44,089	B
김박남가옥	김 박 남	887-1 888 893	안(슬레), 모(슬레)	88,212	B
남제주군	남제주군	890	안(초/슬레), 밖(초), 모(슬레)	187,254	C
고양원가옥	고 양 원	891	안(초), 모(슬레)	49,276	A
현화남가옥	현 화 남	892	안(초), 모(초/초)	23,610	C
우정자가옥	우 정 자	894 895	안(초), 모(초)	13,541	E
김순희가옥	김 순 희	896	안(초), 밖(초), 모(초)	25,500	B
고원준가옥	고 원 준	897	안(초)	18,600	C
이방헌가옥	이 방 헌	899-1	안(초), 모(초)	22,750	C
현동옥가옥	현 동 옥	899-1	안(초), 밖(초), 모(슬레)	21,025	D
현동옥가옥	현 동 옥	900	안(초)	27,316	D
제주노회 유지재단	제주노회 유지재단	901	교회(슬레), 밖(슬레)	134,000	C
양광호가옥	양 광 호	902	안(초), 밖(초), 모(초)	39,860	E
임홍익가옥	임 홍 익	904	안(슬레), 모(초/초)	62,777	B
이홍식가옥	이 홍 식	905	안(초)	22,953	C
임임생가옥	임 임 생	906	안(초), 모(초)	31,332	C
김재용가옥	김 재 용	908	안(초), 모(슬레)	56,562	D
조창범가옥	조 창 범	913	안(초), 모(초)	22,142	C
조창일가옥	조 창 일	917	안(슬레), 밖(초), 모(초/초)	84,627	D
조창의가옥	조 창 의	919	안(초), 모(초)	57,885	B
고유생가옥	고 유 생	920	안(초), 밖(초)	24,834	C
김천중가옥	김 천 중	923	안(초), 모(초)	89,330	B
김규남가옥	김 규 남	924	안(초), 모(초/초)	39,090	C
이철규가옥	이 철 규	925-1	안(초), 모(슬레)	13,960	A

가옥명	현황			정비소요예산 (천원)	우선 순위
	관리자	주 소	건물현황
홍인봉가옥	홍 인 봉	926-1	안(초)	-	D
홍인봉가옥	홍 인 봉	927	안(슬레), 밖(초/초), 모(초)	87,072	C
이계선가옥	이 계 선	929 930 934	안(초), 밖(슬레), 모(슬레/슬레), 문(초)	70,911	D
고상현가옥	고 상 현	932	안(초), 밖(초), 모(초)	19,229	D
송지용가옥	송 지 용	942	안(초), 모(초)	34,122	B
변경옥가옥	변 경 옥	943	안(초), 모(초)	16,377	D

※ 우선순위는 퇴락 및 변형 유지정도에 따라 “A, B, C, D, E" 등급으로 분류함

- 사업추진년도 : A등급(‘03～’04), B등급(‘05～’06), C등급(‘07～’08), D등급(‘09～’10), E등급(‘11～’12)으로 추진함.

- 예산사정 등으로 계획년도에 사업물량을 완료하지 못하는 경우 다음연도로 순연

□ 성밖지역 166가구 : 성안지역 정비완료 후 검토

가옥명	현 황			정비소요예산 (천원)	우선 순위
	관리자	주 소	건물현황
표선농협	표선농협	605-1	농협(슬라), 연쇄점(슬라)	-	A
홍영자가옥	홍 영 자	606	안(초)	34,952	B
홍탁표가옥	홍 탁 표	607-1	안(초), 밖(초)	-	A
홍상표가옥	홍 상 표	609-1	모(슬레)	74,536	D
홍성훈가옥	홍 성 훈	610 611	안(초), 밖(슬레), 모(슬레)	154,770	D
홍명호가옥	홍 명 호	612	안(초), 모(초/초)	-	A
강기숙가옥	강 기 숙	613-2	모(슬레)	86,632	D
강기숙가옥	강 기 숙	614-1	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레)	87,000	D
강창열가옥	강 창 열	618-1	안(초), 밖(초), 모(초)	15,105	A
정창민가옥	정 창 민	618-3	안(초), 밖(초), 모(슬레)	51,900	C
이창백가옥	이 창 백	619	안(슬레), 밖(초), 모(슬레)	108,273	D
강산옥가옥	강 산 옥	620-1	안(슬레), 모(초/초)	64,105	C
강임춘가옥	강 임 춘	622	안(초), 밖(초), 모(슬레)	40,104	B
강기숙가옥	강 기 숙	625	안(초)	164,890	C
강창호가옥	강 창 호	650-1	안(초), 밖(초), 모(슬레)	45,253	C
강 찬근가옥	강 찬 근	652-1	안(초), 모(초)	24,426	A
김천근가옥	김 천 근	652-2	안(초), 밖(초), 모(초/초)	-	A
이군지가옥	이 군 지	653-1	안(초), 모(초)	48,097	C
강 용가옥	강 원 용	656-1	안(초), 밖(초/초)	18,615	A
강종식가옥	강 종 식	656-2 656-3	안(초), 모(초/초)	34,946	A
강두식가옥	강 두 식	659	안(슬레), 밖(초), 모(초)	95,730	B
문순봉가옥	문 순 봉	660-1	안(초), 밖(슬레), 모(초)	78,676	C
양치현가옥	양 치 현	662-1	안(초), 밖(초)	32,564	C
고경부가옥	고 경 부	663-1	안(초), 모(슬레)	59,799	C
고경현가옥	고 경 현	663-3	안(초), 밖(초), 모(초)	26,007	B
김은식가옥	김 은 식	664	안(슬레), 밖(슬레)	127,994	E
강임용가옥	강 임 용	666-4	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레)	118,827	D
김윤중가옥	김 윤 중	666-5	안(슬레), 밖(슬레)	142,930	D

가옥명	현황			정비소요예산 (천원)	우선 순위
	관리자	주 소	건물현황
강찬근가옥	강 찬 근	666-6	안(슬레), 모(슬레)	147,875	E
이양우가옥	이 양 우	668-1	안(초), 모(초)	40,450	B
강두생가옥	강 두 생	668-6	안(슬레), 모(슬레/슬레)	105,290	E
이정일가옥	이 정 일	669-1	안(초), 밖(초), 모(슬레)	38,444	C
정명선가옥	정 명 선	670-1	안(초), 모(슬레)	58,954	D
김경태가옥	김 경 태	671	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레)	107,468	E
강태보가옥	강 태 보	673-1	안(초), 밖(초), 모(초/슬레)	51,487	B
정윤주가옥	정 윤 주	673	안(초)	50,091	C
강남옥가옥	강 남 식	674-3	안(슬레), 밖(슬레)	100,065	D
김정자가옥	김 정 자	676-1	안(초), 밖(슬레)	37,780	C
이봉주가옥	이 봉 주	677	안(초), 밖(초), 모(초)	48,768	A
이동백가옥	이 동 백	679	안(슬레), 밖(초), 모(슬레/슬레)	136,322	B
이정일가옥	이 정 일	680	안(초), 밖(초), 모(슬레/초)	83,738	A
이중석가옥	이 중 석	682-1	안(초), 밖(초), 모(초/초/초)	36,531	D
이동신가옥	이 동 신	683	안(슬레), 밖(초), 모(초)	65,451	D
이민호가옥	이 민 호	684	안(초), 밖(초), 모(초/초/초)	12,480	A
홍태승가옥	홍 태 승	685	안(슬레)	26,775	D
홍태승가옥	홍 태 승	686-1	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레/슬레/슬레)	97,314	D
홍태승가옥	홍 태 승	687-3	안(슬레), 모(슬레)	82,677	A
이군지가옥	이 군 지	689-1	모(초/초)	63,280	C
최정일가옥	최 정 일	692-1	안(초)	21,000	D
홍성우가옥	홍 성 우	693-1	안(초), 모(초)	22,494	C
홍점표가옥	홍 점 표	695-1	안(초), 모(초)	28,176	B
춘표가옥	홍 춘 표	695-9	안(초), 모(초)	15,030	C
고경환가옥	고 경 환	698-1	안(슬레), 모(슬레)	72,040	C
고경준가옥	고 경 준	698-5	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레)	110,435	A
표선농협 조 합	표선농협 조 합	698-6	모(슬레)	38,556	A

가옥명	현황			정비소요예산 (천원)	우선 순위
	관리자	주 소	건물현황
강인필가옥	강 인 필	699	안(슬레), 모(슬레)	64,965	C
고경헌가옥	고 경 헌	702	모(슬레)	36,410	A
김진희가옥	김 진 희	703	안(슬레), 모(초/초)	73,007	가
강문필가옥	강 문 필	704	안(슬레), 모(슬레)	58,334	B
변성옥가옥	변 성 옥	714	안(슬레), 밖(슬레), 모(초)	68,575	C
박병일가옥	박 병 일	722	안(초), 모(초)	11,544	C
현병립가옥	현 병 립	723	안(초), 모(초/초)	13,824	C
변성태가옥	변 성 태	724-1	안(초), 모(초)	12,946	B
변성옥가옥	변 성 옥	724-4	안(초), 모(초)	10,189	E
홍인표가옥	홍 인 표	726	안(초), 밖(초), 모(초)	42,216	D
고인화가옥	고 인 화	728-1	안(초)		D
고인화가옥	고 인 화	728-6	안(초)	14,250	E
송승보가옥	송 승 보	730-1	안(초)	11,866	B
오창림가옥	오 창 림	731-1	안(슬레), 밖(초), 모(슬레)	118,160	E
이춘자가옥	이 춘 자	731-2	안(초), 모(슬레/슬레)	28,210	C
송병주가옥	송 병 주	733	안(초), 모(초/초)	-	D
한석호가옥	한 석 호	734-1	안(초), 밖(초), 모(슬레)	85,074	E
한봉규가옥	한 봉 규	736	안(슬레), 모(초)	39,948	B
정춘자가옥	정 춘 자	740	안(슬레), 모(초)	38,487	C
윤혜숙가옥	윤 혜 숙	741-1	안(초), 밖(초), 모(초)	46,088	D
임창용가옥	임 창 용	741-3	안(초), 밖(초), 모(초)	15,632	C
강 완 호가옥	강 완 호	742 743-1	안(초), 모(초/초)	-	A
김 경 자가옥	김 경 자	744-1	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레)	72,985	D
고 두 천가옥	고 두 천	745	안(슬레), 모(슬레)	80,534	D
오 창 식가옥	오 창 식	745-2	안(슬레), 밖(초), 모(슬레)	101,550	D
홍 용 생가옥	홍 용 생	746	안(초)	30,870	B
홍 완 철가옥	홍 완 철	747-1	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레)	140,705	D
강 재 필가옥	강 재 필	747-3	안(초), 문(슬레)	78,120	D
고 평 호가옥	고 평 호	748-2	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레)	176,295	E
강 정 자가옥	강 정 자	752	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레/슬레)	121,402	D
현 석 봉가옥	현 석 봉	753	안(슬레)	48,180	D

가옥명	현 황			정비소요예산 (천원)	우선 순위
	관리자	주 소	건물현황
오 창 호가옥	오 창 호	754	안(초), 모(초)	12,931	B
송 봉 협가옥	송 봉 협	756	안(슬레), 모(슬레/슬레)	83,874	D
강 인 필가옥	강 인 필	757	모(초)	-	A
김 재 준가옥	김 재 준	758-1	안(슬레), 모(초)	63,010	C
현 석 관가옥	현 석 관	658-4	안(슬레), 밖(슬레)	77,879	D
김 권 엽가옥	김 권 엽	761	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레)	191,560	E
김 범 선가옥	김 범 선	762-1	안(초), 밖(초), 모(초/초)	59,606	B
제주전신 전 화 국	제주전신 전 화 국	762-4	전화국(기)	-	A
강 천 호가옥	강 천 호	765-2	안(초), 밖(초), 모(초)	96,391	A
강 성 하가옥	강 성 하	766-1	안(초), 모(초)	53,748	B
강 문 서가옥	강 문 서	766-5	안(초)	29,484	A
김 계 출가옥	김 계 출	767-4	안(슬레), 밖(초)	53,619	B
최 우 종가옥	최 우 종	768-2	안(초)	24,918	A
남제주군	남제주군	768-1	안(슬레), 밖(초), 모(초/초), 문(초)	82,980	B
강 관 필가옥	강 관 필	774-1	안(슬레), 밖(슬레), 모(슬레)	135,240	D
현 병 숙가옥	현 병 숙	788-1	안(초)	20,064	A
현 정 순가옥	현 정 순	789-2	안(초), 모(초)	40,392	A
강 영 자가옥	강 영 자	791-1	안(초), 모(초/초)	17,757	A
강 이 풍가옥	강 이 풍	792-1	안(슬레), 모(초)	42,392	D
김 만 준가옥	김 만 준	794	안(초), 모(초)	52,252	A
이 인 덕가옥	이 인 덕	959-1	안(초), 밖(초)	13,904	A
고 윤 환가옥	고 윤 환	962	안(초)	14,469	B
홍 화 옥가옥	홍 화 옥	963	안(슬레), 모(슬레)	90,622	C
강 춘 생가옥	강 춘 생	965-1	안(슬레)	60,656	C
홍 화 옥가옥	홍 화 옥	966-1	안(초)	20,905	A
김 희 자가옥	김 희 자	967-1	안(초), 모(슬레)	28,746	A
정 경 석가옥	정 경 석	969-2	안(초), 밖(슬레)	107,646	C
재단법인국 제도덕협회	재단법인국 제도덕협회	969-3	안(슬레)	90,920	D

가옥명	현 황			정비소요예산 (천원)	우선 순위
	관리자	주 소	건물현황
홍정표가옥	홍 정 표	969-4	안(슬레), 모(슬레)	77,530	D
정관민가옥	정 관 민	970-1	안(초), 밖(슬레), 모(초)	69,284	C
강인필가옥	강 인 필	1001	안(초), 모(초/초/초/초)	8,740	A
현동실가옥	현 동 실	1006	안(슬레), 모(슬레/슬레)	88,626	D
김성찬가옥	김 성 찬	1007	안(슬레), 밖(초), 모(초/초)	81,183	C
김지준가옥	김 지 준	1008	안(초)	34,756	B
김수자가옥	김 수 자	1435-5	안(슬레), 모(초)	91,492	C
현길화가옥	현 길 화	1435-6 1435-7	안(슬레), 밖(초)	62,272	C
양성수가옥	양 성 수	1467	안(초)	9,885	A
강용호가옥	강 용 호	1468-1	안(슬레), 모(슬레/슬레)	77,455	E
강은철가옥	강 은 철	1474-1	안(슬레), 모(슬레/슬레)	67,337	E
송만수가옥	송 만 수	1477-1	안(초), 밖(초), 모(초/초)	78,894	C
남제주군	남제주군	621	안(초)	7,676	B
홍성남가옥	홍 성 남	1618	안(초), 밖(초), 모(초)	21,232	A
이승호가옥	이 승 호	1618-1	안(초), 모(초/초)	91,356	C
고창준가옥	고 창 준	1620	안(초), 밖(초), 모(초)	86,543	B
홍성인가옥	홍 성 인	1621	안(초), 모(초)	68,075	B

※  우선순위는 퇴락 및 변형 유지정도에 따라 보수우선 순위를 정하여 시급한 것부터 “A, B, C, D, E" 등급으로 분류함

- 성안지역 가옥정비 완료후 정비 관련사항 검토

월성 양동(月城 良洞) 마을

Ⅰ. 문화재 현황

1. 지 정 별 : 중요민속자료 제189호(1984.12.24 지정)

2. 위    치 : 경상북도 경주시 양동리 일원

3. 연혁 및 특징

◦ 15～16C 경 이루어진 마을로서 월성손씨, 여주이씨가 대대로  살아온 지역

◦ 조선 18현 중의 한 분인 회재 이언적 선생의 출생지

◦ 국보, 보물 등 지정문화재 23점, 향토유적 9점 외 대소 고가가 잘  보존되어 있음

4. 일반현황(2003. 2. 28. 현재)

□ 지정면적 : 969,430㎡(293,252평)

□ 세 대 수 : 127 세대

□ 인    구 : 333명 (남164명, 여169명)

월성양동마을

□ 건물현황

(2001. 12 현재)

계	한식와가	초 가	스레이트지붕	양기와지붕	기 타
402동	119	79	121	73	10

□ 개별 문화재 지정현황

◦ 총 괄

계	국보	보물	중요민속 자료	지방 기념물	지방유형 문화재	지방민속 자료	문화재 자료
23점	1	4	13	1	2	1	1

◦ 세부내역

지정별 및 지정일	문화재명	수 량	소 재 지	비 고
계	23 건
국보 제283호 (95. 3. 10 지정)	통감속편	24권, 6책	경주시 강동면 양동리 223
보물 제411호 (65. 11. 14)	무첨당	1동	〃 181
보물 제412호 (65. 11. 14)	향 단	1동	〃 135
보물 제442호 (66. 4. 11)	관가정	1동	〃 150
보물 제1216호 (95. 3. 10지정)	손소영정	1폭	〃 223
중요민속자료 제23호 (70. 12. 29)	손동만씨가옥 (서백당)	1곽	〃 223
중요민속자료 제73호 (79. 1. 23)	양동낙선당	1곽	〃 225
중요민속자료 제74호 (79. 1. 23)	이원봉가옥 (사호당고택)	1곽	〃 217
중요민속자료 제75호 (79. 1. 23)	이원용가옥 (상춘헌고택)	1곽	〃 216
중요민속자료 제76호 (79. 1. 23)	이동기가옥 (근암재고택)	1곽	〃 214-1
중요민속자료 제77호 (79. 1. 23)	이희태가옥 (두곡고택)	1곽	〃 35
중요민속자료 제78호 (79. 1. 23)	양동수졸당	1곽	〃 212
중요민속자료 제79호 (79. 1. 23)	양동이향정	1곽	〃 89
중요민속자료 제80호 (79. 1. 23)	양동수운정	2동	〃 313
중요민속자료 제81호 (79. 1. 23)	양동심수정	2동	〃 98
중요민속자료 제82호 (79. 1. 23)	양동안락정	2동	〃 58
중요민속자료 제83호 (79. 1. 23)	양동강학당	2동	〃 94

지정별 및 지정일	문화재명	수 량	소 재 지	비 고
중요민속자료 제189호 (84. 12. 24)	월성양동마을	969,430㎡	경주시 강동면 양동리 6외 380필
유형문화제 제13호 (72. 12. 29)	적개공신 논상록권	1매	〃 223
유형문화재 제14호 (72. 12. 29)	손소선생 분재기	1매	〃 223
기념물 제8호 (74. 12. 10)	양동의 향나무	1주	〃 223
민속자료 제34호 (82. 2. 24)	양동대성헌	3동	〃 183
문화재자료 제261호 (92. 7. 18)	손종노 정충비각	2동	〃 84

Ⅱ. 정비실적

◦ 기    간 : ‘79～2002년

◦ 사업비 : 12,460백만원(국비 8,722, 지방비 3,738)

(단위 : 백만원)

구분	계	79-90	91-95	96	97	98	99	2000	2001	2002	비 고
금액	12,460	1,229	2,599	603	738	1,255	981	1,307	1,193	2,555

◦ 사업내용

- 퇴락가옥 정비ㆍ보수

- 무첨당, 향단, 관가정 등 지정문화재 정비ㆍ보수

- 양동마을 항공측량, 종합정비기본계획 수립용역

- 농기계 공동보관창고 건립(추진 중)

Ⅲ. 사업추진계획

1. 기본방침

◦ 사업추진은 ①문화재 원형보존 ②마을공동시설 ③ 마을기반시설 ④관람객 편의․관광시설 사업으로 구분하여 연차계획으로 추진함

2. 사업개요

□ 추진기간 : 2003 ～ 2012년(10개년)

□ 총사업비 : 54,513백만원 (국비 30,741, 지방비 23,771)

□ 사업내용

◦ 문화재원형정비 : 변형․퇴락가옥 보수, 초가이엉잇기, 지정문화재 보수

◦ 마을공동시설정비 : 농기계보관창고 건립(2002년도 국고보조사업)

◦ 마을기반시설정비 : 도로․하천․소하천․교량․배수로 정비, 공동구․소화전 설치, 급․배수시설, 조경 등

◦ 관람객편의․관광시설 조성 : 정보센터, 주차장, 휴게소, 안내소․매표소 등

3. 세부추진계획

가. 문화재 원형보존

사업대상
	◦ 변형․퇴락가옥 정비 142가옥, 초가이엉잇기 연 90동 ◦ 지정문화재보수 16개소

추진방향
	◦ 기존 가옥 보수정비는 퇴락 및 원형유지 정도에 따라 분류ㆍ정비 ◦ 개별 문화재로 지정된 가옥은 엄격한 원형보존차원에서 보수ㆍ정비 ◦ 비지정 가옥의 외부는 전통양식(가옥형태, 지붕, 담장)을 유지 - 내부는 「가옥내 주민편의시설 설치기준」(‘04. 2.28) 적용 ◦ 가옥 및 담장보수공사 등 사업추진시 설계․시공과정 등에 소유자․지역주민 등이 원형고증에 참여할 수 있도록 함 ◦ 장기적으로 방치되는 공가는 원형보존을 원칙으로 하여 매입 또는 소유자와 협의, 활용방안 강구

세부사업 추진계획

변형․퇴락가옥 보수(‘03~’12)

◦ 소요예산 : 18,502백만원(국 12,951, 지 5,551)

◦ 사업내용 : 퇴락가옥 보수, 변형가옥 원형․전통양식 복원

- 담장, 부속채 등 포함

◦ 사업물량 : 142가옥

◦ 사업추진 : 지역전문가의 자문을 받아 마을의 전통적인 담장형태, 높이, 곡선 등이 나타나도록 정비

지정문화재 보수(‘03~’12)

◦ 소요예산 : 2,388백만원(국 1,667, 지 721)

◦ 사업내용 : 퇴락가옥 보수, 변형건물을 원형대로 복원

◦ 사업물량 : 16가옥

초가이엉잇기(‘03～’12)

◦ 소요예산 : 1,000백만원(국 700, 지 300)

◦ 사업내용 : 이엉잇기 재료확보 및 이엉잇기

◦ 사업물량 : 연 90동

◦ 사업추진 : 현행 연간 1회 일괄 이엉잇기에서 점차적으로 연중 수시 이엉잇기 체제로 전환

◦ 볏짚확보방안

- 보존회 및 인근지역 농가와 협의하여 계약재배를 통해 볏짚의 안정적 확보방안 마련

- 마을내 및 인근 토지매입 가능지역을 매입, 볏짚 생산과 마을 체험프로그램에 활용

- 여분의 비축볏짚을 확보하여 긴급보수 필요시 사용하고, 전통적 방법의 보관방법을 사용하여 체험프로그램 소재로 활용

◦ 이엉잇기 기능인력 확보

- 보존회와 협의, 마을내 이엉잇기 기능을 보유한 기능인에 의한 마을주민 기능전수 기회 제공

․이엉잇기 기능을 지방무형문화재로 지정하는 방안 추진

공가현황 및 관리계획

◦ 장기적으로 주거에 불편함이 최소화 되도록 보수․정비하여 작은 미술관, 도예관, 전통생활문화전시관, 문학관, 서당 등으로 활용

가옥명	용 도, 구 조	규모 (㎡)	정 비 계 획
			사업내용(천원)	정비년도
계	11가구	529.84	804,080천원
이원춘가옥	안채, 블록조, 스레이트 곳간채, 블록조, 스레이트 곳간채, 블록조, 스레이트	25.97 17.75 9.16	안채, 목조, 초가보수 47,160 곳간채, 토벽, 초가보수 37,590 축사, 토벽, 초가보수 19,390 변소, 목조, 초가보수 30,000 담장, 토담, 이엉 19,000	03년
이원발가옥	안채, 목조, 초가 사랑채, 목조, 초가	35.89 30.48	안채, 목조, 초가보수 43,440 사랑채, 목조, 초가보수 36,880 변소, 목조, 초가보수 30,000	05년
이현동가옥	안채, 목조, 초가	33.31	안채, 목조, 초가보수 40,320 변소, 목조, 초가보수 30,000	05년
손수운가옥	안채, 목조, 양기와 사랑채, 블록조, 스레이트 변소, 블록조, 양기와	38.9 25.45 4.66	안채, 목조, 초가보수 47,080 사랑채, 목조, 초가보수 46,200 변소, 목조, 초가보수 30,000	06년
남석목가옥	안채, 목조, 초가	25.52	안채, 이엉보수, 부분보수 30,880 변소, 목조, 초가보수 30,000	06년
손달익가옥	안채, 목조, 초가	22.19	안채, 이엉보수, 부분보수 13,420 변소, 목조, 초가보수 30,000	09년
이홍식가옥	안채, 목조, 한와 변소, 블록조, 스레이트	67.24 2.6	안채, 목조, 한와, 지붕보수 81,360 변소, 목조, 기와보수 40,000	10년
이하우가옥	안채, 목조, 양기와 사랑채, 목조, 초가 변소, 블록조, 양기와	71.49 30.13 2.2	안채, 목조, 기와보수 139,680 변소, 목조, 초가보수 30,000 담장, 토담, 이엉보수 32,000	10년
정을두가옥	안채, 토벽, 초가	30.98	변소, 목조, 초가보수 30,000	11년
관가정관리사	안채, 목조, 초가	33.18	안채, 이엉보수, 부분보수 10,040	11년
서백당가랍집	안채, 목조, 초가	22.74	변소, 목조, 초가보수 30,000	12년

※ 정비사업비는 가옥보수비 총액에 포함되어 있음

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	03	04	05	06	07	계	08	09	10	11	12
문화재원형보존	퇴락가옥정비	142 가구	계	18,502	7,807	2,329	62	1,382	1,779	2,255	10,695	1,754	2,356	1,701	2,259	2,625
			국 비	12,951	5,466	1,630	44	968	1,245	1,579	7,485	1,228	1,649	1,191	1,581	1,836
			지방비	5,551	2,341	699	18	414	534	676	3,210	526	707	510	678	789
	초가이엉잇기	90동	계	1,000	500	100	100	100	100	100	500	100	100	100	100	100
			국 비	700	350	70	70	70	70	70	350	70	70	70	70	70
			지방비	300	150	30	30	30	30	30	150	30	30	30	30	30
	지정 문화재 보수	16 개소	계	2,388	1,480	48	57	511	514	350	908	300	196	324	62	26
			국 비	1,667	1,034	33	40	357	359	245	633	210	136	226	43	18
			지방비	721	446	15	17	154	155	105	275	90	60	98	19	8
합 계		3개 사업	계	21,890	9,787	2,477	219	1,993	2,393	2,705	12,103	2,154	2,652	2,125	2,421	2,751
			국 비	15,318	6,850	1,733	154	1,395	1,674	1,894	8,468	1,508	1,855	1,487	1,694	1,924
			지방비	6,572	2,937	744	65	598	719	811	3,635	646	797	638	727	827

※ 가옥별 현황 및 정비계획 : 별첨

나. 마을공동시설 정비

□ 마을공동 농기계보관창고 건립(‘02～‘04년)

◦ 소요예산 : 1,310백만원 (국비 917, 지방비 393)

◦ 건립위치 : 경주시 강동면 양동리 75601번지 외 4필지

◦ 건립규모 : 대지면적 7,177㎡, 건물면적 : 933.28㎡

- 농기계창고 414.2㎡(2동),  정비 및 관리소 104.88㎡

◦ 구 조 : 경량철골조, 샌드위치판넬

◦ 추진현황 : 설계승인(‘03년)

다. 마을기반시설 정비

사업대상
	◦ 마을진입로 확․포장 1식, 소교량 정비 11개소, 소하천 정비 1,080m, 배수로정비 1,800m, 조경 및 환경정비 1식, 공동구설치 1,970m, 가옥 급․배수시설 4,000m, 오폐수정화시설 1식, 배수펌프장 건립 1식 등

추진방향		「마을내 시설 설치기준」(2004. 2.29) 적용
	◦ 마을안길은 자연상태 유지를 원칙으로 하되, 필요시 주도로는 경화 포장하여 주민 및 관람객의 편의도모 ◦ 하천과 배수로는 마을경관에 어울리는 형태와 재질을 사용하고, 교량은 자연스러운 형태로 정비 ◦ 우ㆍ오수관로는 분리, 오수관로는 지중화하여 정화시설로 연결 ◦ 전기, 통신, 소방, 급․배수시설, 상하수도 등 지하 매설이 가능한 시설은 마을경관 유지를 위해 공동구 등을 설치, 지중화 ◦ 가로등 등은 타 시설물에 매입하는 방법 등을 활용, 경관에 어울리게 정비 ◦ 마을내 외래수종을 전통수종으로 교체, 마을 이미지에 맞는 조경상태 유지

세부사업 추진계획

마을 진입로 확․포장(‘03년) : ‘03년 지방비 사업으로 사업완료

◦ 소요예산 : 840백만원(시비사업)

◦ 재    질 : 아스팔트포장

◦ 사업내용 : L=1.2㎞ B=8m 토지매입 9,600㎡

도로정비(‘07～’12)

◦ 소요예산 : 8,349백만원(국 5,464, 지 2,885)

* 우회도로 1,905백만원(국 953, 지 952), 마을내도로 6,444백만원(국 4,511, 지 1,933)

◦ 사업규모

- 우회도로 아스팔트 포장 : 6,400㎡(L=800m, B=8m)

- 마을내도로 교반토 포장 : 21,480㎡(L=7,160m, B=3m)

※ 주도로 위주로 정비하고, 지대가 높은 경사지 포장은 공법문제(크랙 등)를 검토

주도로 포장은 현재까지 개발된 경화포장 공법 중 마을분위기에 가장 잘 어울리는 공법을 활용

소교량 정비(‘07~’11)

◦ 소요예산 : 660백만원(국460, 지 200)

◦ 사업규모 : 11개소

- 기존 콘크리트다리 해체, 돌다리 설치

◦ 사업추진

- 소하천 정비사업과 연계하여 추진

- 전통수법을 활용, 마을 경관에 맞는 소박한 형태의 교량으로 정비

소하천 정비(‘08~’09)

◦ 소요예산 : 1,080백만원(국 756, 지 324)

◦ 사업규모 : 1,080m

- 기존 견치석축 해체, 자연석 석축 설치

◦ 사업추진 : 자연적인 곡선을 살려 정비, 하천의 밑부분만 석축을 사용하고 그 위는 흙을 사용하여 경사 처리(필요시 자생식물 식재 등)

배수로 정비(‘08~’09)

◦ 소요예산 : 900백만원(국 630, 지 270)

◦ 사업규모 : 1,800m

◦ 사업추진

- 하상에서 한 두단 흙막이 정도만 석축을 설치하고 자연스럽게 정비

- 가옥내 오수 배수로는 환경․위생을 고려, 지중화하여 정화시설로 연결

조경․환경 정비(‘11~’12)

◦ 소요예산 : 1,000백만원(국 700, 지 300)

◦ 사업내용

- 외래수종 제거, 토착수종 식재,  마을내 외식조경(견치석축 등) 정비 등

공동구 설치(‘04~’06)

◦ 소요예산 : 3,940백만원(국 2,618, 지 1,122, 민 200)

◦ 사업규모 : 1,970m

- 전기, 통신, 급․배수, 소화시설 등 지중화

◦ 사업추진 : 공동구는 마을내 주로도에만 설치하고, 그 외 지역은 지선으로 연결

가옥 급․배수 등 시설 설치(‘05~’07)

◦ 소요예산 : 4,000백만원(지방비)

◦ 사업규모 : 4,000m, 159가구

◦ 사업추진 : 공동구 사업과 연계하여 추진

* 성격상 지방비 대상사업이므로 재원분담 관계는 별도 검토(소관 부서, 기관과 협의, 자체 사업비 확보 필요)

오․폐수 정화시설(‘06년)

◦ 소요예산 : 5,000백만원(지방비 사업)

◦ 사업규모 : 처리용량 300㎡/일 (처리인구 1,200인, 오수관거 5,800m, 연결관 7,200m, 맨홀 150개소, 오수받이 480개소)

배수펌프장 설치(‘05년)

◦ 소요예산 : 600백만원(국 420, 지 180)

◦ 사업규모 : ∮300m/m 펌프 2대, 비상발전기 1대, 펌프장건물 1동

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	03	04	05	06	07	계	08	09	10	11	12
마을기반시설	마을 진입로 확포장	L = 1.2㎞ B = 8m 토지매입 9,600㎡	계	840	840	840
			국 비	-	-	-
			지방비	840	840	840
	도로 정비	아스팔트 6,400㎡ 교반토 21,480㎡	계	8,349	905					905	7,444	1,300	1,300	1,300	1,300	2,244
			국 비	5,464	633					633	4,831	531	910	910	910	1,570
			지방비	2,885	272					272	2,613	697	390	390	390	674
	소교량 정비	11개소	계	660	132					132	528	132	132	132	132
			국 비	460	92					92	368	92	92	92	92
			지방비	200	40					40	160	40	40	40	40
	소하천 정비	1,080m	계	1,080							1,080	580	500
			국 비	756							756	406	350
			지방비	324							324	174	150

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	03	04	05	06	07	계	08	09	10	11	12
마을기반시설정비	배수로 정비	1,800m	계	900							900	900
			국 비	630							630	630
			지방비	270							270	270
	조경및 환경 정비	1 식	계	1,000							1,000				500	500
			국 비	700							700				350	350
			지방비	300							300				150	150
	공동구 설치	1,970m	계	3,940	3,940		1,137	1,300	1,503
			국 비	2,618	2,618		796	910	912
			지방비	1,322	1,322		341	390	591
	가옥 급배수 시설	4,000m	계	4,000	4,000			1,000	1,000	2,000
			국 비	-	-			-	-	-
			지방비	4,000	4,000			1,000	1,000	2,000
	오폐수 정화 시설	1 식	계	5,000	5,000				5,000
			국 비	-	-				-
			지방비	5,000	5,000				5,000
	배수 펌프장 건립	1 식	계	600	600			600
			국 비	420	420			420
			지방비	180	180			180
계		10건	계	26,369	15,417	840	1,137	2,900	7,503	3,037	10,952	2,912	1,932	1,432	1,932	2,744
			국 비	14,227	6,563	-	796	1,330	912	725	7,285	1,659	1,352	1,002	1,352	1,920
			지방비	12,142	8,854	840	341	1,570	6,591	2,312	3,667	1,253	580	430	580	824

라. 관람객 편의 ․ 관광시설 설치

사업대상
	◦ 토지매입(관광편의시설 설치지역, 동산조성지역, 연자방아터, 양동교회), 주차장 포장, 휴게소 건립, 화장실(주차장, 동산지역), 매표소건립, 동산 정자건립, 편의시설 설치, 동산정비

추진방향		「마을내 시설 설치기준」(2004. 3. 2) 적용
	◦ 마을의 전통건축․경관과 주민들의 주거환경에 저해되지 않도록 설치 ◦ 각 시설들간의 이용 효율성과 관리측면을 고려하여 설치 ◦ 마을내 활용 가능한 공간을 경관에 맞게 정비하여 주민 및 관람객의 휴식공간으로 활용 ◦ 안내판, 가로등 등 관람객 편의시설은 마을 경관과 마을 특성에 맞는 재질과 형태로 제작․설치 ◦ 신축시설은 최대한 복합기능으로 하여 신축시설물 수량 최소화

세부사업 추진계획

관광편의시설 토지매입(‘03년)

◦ 소요예산 : 668백만원(국 467, 지 201)

◦ 면    적 : 36,815㎡

◦ 사업내용 :  주차장, 휴게소, 정보센터, 안내소, 매표소, 화장실 등 건립예정지

※ 현재 계획된 위치는 지형여건 상 불가피한 면이 있으나, 마을경관에 중요한 역할을 하는 마을 진입부에 있으므로, 사업추진 전까지 최대한 대안지역을 모색할 필요성이 있음

관광편의시설 매입부지내 정비

주차장 포장(‘04～’06년)

- 소요예산 : 968백만원(국 677, 지 291)

- 대형 50대, 소형 200대

* 포장전까지 매입부지는 지반고르기 정도를 하여 임시주차장으로 활용

휴게소 건립(‘04년)

- 소요예산 : 1,040백만원(국 728, 지 312)

- 면    적 : 100평

- 편의점, 식당, 전통찻집, 토산품 판매점 등

주차장 화장실 건립(‘04년)

- 소요예산 : 400백만원(국 280, 지120)

- 면    적 : 20평, 1동

매표소 건립(‘05～’06년)

- 소요예산 : 260백만원(국 182, 지 78)

- 면    적 : 13평, 1동 (매표소, 숙직실)

동산 정비

예정지 토지매입(‘06～’07)

- 소요예산 : 312백만원(국 218, 지94)

- 면    적 : 6,250㎡

- 동산조성, 화장실, 음수대, 조경정비 등

정자건립(‘11～’12)

- 소요예산 : 120백만원(국 84, 지 36)

- 사업규모 : 4평, 1동

동산 화장실 건립(‘08년)

- 소요예산 : 200백만원(국 140, 지 60)

- 사업규모 : 3.5평, 각 2동

동산정비(‘09～’12)

- 소요예산 : 1,921백만원(국 1,344, 지 577)

- 정비대상 : 4개소

- 정비내용 : 외래수종 제거, 토착수종 식재, 잔디식재

양동교회 매입(‘04년)

- 소요예산 : 146백만원(국 102, 지 44)

- 사업규모 : 토지 850㎡, 건물 4동 224㎡

- 사업내용 : 동산조성, 화장실, 음수대, 조경정비 등

연자방아 정비(‘06년)

◦ 소요예산 : 19백만원(국 13, 지 6)

◦ 면    적 : 380㎡

◦ 사업내용 : 연자방아터 매입 및 설치

◦ 사업추진 : 무첨당에 있던 연자방아 원형을 찾아 복원․활용

홍보센터 건립(‘06~’07)

◦ 양동마을 동산문화재 보관․활용을 위해 건립을 추진중인 전시관 활용

편의시설 설치(‘05~’06)

◦ 소요예산 : 200백만원(국 140, 지 60)

◦ 사업내용 : 음수대, 관람의자, 입구차단시설 등

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	03	04	05	06	07	계	08	09	10	11	12
관 람 객 편 의 ․ 관 광 시 설	토지 매입	주차장, 휴게소 36,815㎡	계	668	668	668
			국 비	467	467	467
			지방비	201	201	201
	토지 매입	동산 2개소 6,250㎡	계	312	312				160	152
			국 비	218	218				112	106
			지방비	94	94				48	46
	토지 매입	연자방아 설치 380㎡	계	19	19				19
			국 비	13	13				13
			지방비	6	6				6
	토지 매입	양동교회 토지․건물 매입 850㎡	계	146	146		146
			국 비	102	102		102
			지방비	44	44		44
	전시 시설	홍보센터 건립
						동산문화재 전시관 활용
	주차장 포장	대형 50대 소형 200대	계	968			200	384	384
			국 비	677			140	269	268
			지방비	291			60	115	116

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	03	04	05	06	07	계	08	09	10	11	12
관 람 객 편 의 ․ 관 광 시 설	휴게소 건립	100평, 1동	계	1,040	1,040		1,040
			국 비	728	728		728
			지방비	312	312		312
	주차장 화장실 건립	20평, 1동	계	400			400
			국 비	280			280
			지방비	120			120
	동산 화장실 건립	3.5평, 2동	계	200							200	200
			국 비	140							140	140
			지방비	60							60	60
	안내소 매표소 건립	1동	계	260	260			130	130
			국 비	182	182			91	91
			지방비	78	78			39	39
	동산 정자 건립	1동	계	120							120				60	60
			국 비	84							84				42	42
			지방비	36							36				18	18
	편의 시설	음수대, 관람의자, 입구차단 시설 1식	계	200	200			100	100
			국 비	140	140			70	70
			지방비	60	60			30	30
	동산 정비	4개소	계	1,921							1,921		500	500	500	421
			국 비	1,344							1,344		350	350	350	294
			지방비	577							577		150	150	150	127
합 계		13건	계	6,254	4,013	668	1.786	614	793	152	2,241	200	500	500	560	813
			국 비	4,375	1,850	467	1,250	430	554	106	1,568	420	350	350	392	336
			지방비	1,879	795	201	536	184	239	46	673	60	150	150	168	145

자료1		월성양동마을 종합정비 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	03	04	05	06	07	계	08	09	10	11	12
문화재원형보존	소 계	3개 사업	계	21,890	9,787	2,477	219	1,993	2,393	2,705	12,103	2,154	2,652	2,125	2,421	2,751
			국 비	15,318	6,850	1,733	154	1,395	1,674	1,894	8,468	1,508	1,855	1,487	1,694	1,924
			지방비	6,572	2,937	744	65	598	719	811	3,635	646	797	638	727	827
	퇴락가옥 정비	142 가구	계	18,502	7,807	2,329	62	1,382	1,779	2,255	10,695	1,754	2,356	1,701	2,259	2,625
			국 비	12,951	5,466	1,630	44	968	1,245	1,579	7,485	1,228	1,649	1,191	1,581	1,836
			지방비	5,551	2,341	699	18	414	534	676	3,210	526	707	510	678	789
	초가이엉 잇기	90동	계	1,000	500	100	100	100	100	100	500	100	100	100	100	100
			국 비	700	350	70	70	70	70	70	350	70	70	70	70	70
			지방비	300	150	30	30	30	30	30	150	30	30	30	30	30
	지정 문화재 보수	16 개소	계	2,388	1,480	48	57	511	514	350	908	300	196	324	62	26
			국 비	1,667	1,034	33	40	357	359	245	633	210	136	226	43	18
			지방비	721	446	15	17	154	155	105	275	90	60	98	19	8
마을기반시설	소 계	10건	계	26,369	15,417	840	1,137	2,900	7,503	3,037	10,952	2,912	1,232	1,432	1,932	2744
			국 비	11,048	3,763		796	1,330	912	725	7,285	1,778	1,352	1,002	1,352	1,921
			지방비	15,231	11,654	840	341	1,570	6,591	2,312	3,667	1,134	700	430	580	823
	마을 진입로 확포장	L = 1.2㎞ B = 8m 토지매입 9,600㎡	계	840	840	840
			국 비	-	-	-
			지방비	840	840	840
	도로 정비	아스팔트 6,350㎡ 교반토 21,480㎡	계	8,349	905					905	7,444	1,300	1,300	1,300	1,300	2,244
			국 비	5,464	633					633	4,831	650	790	910	910	1,571
			지방비	2,885	272					272	2,613	650	510	390	390	673
	소교량 정비	11개소	계	660	132					132	528	132	132	132	132
			국 비	460	92					92	368	92	92	92	92
			지방비	200	40					40	160	40	40	40	40
	소하천 정비	1,080m	계	1,080							1,080	580	500
			국 비	756							756	406	350
			지방비	324							324	174	150
	배수로 정비	1,800m	계	900							900	900
			국 비	630							630	630
			지방비	270							270	270
	조경및 환경 정비	1 식	계	1,000							1,000				500	500
			국 비	700							700				350	350
			지방비	300							300				150	150

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	03	04	05	06	07	계	08	09	10	11	12
마을기반시설정비	공동구 설치	1,970m	계	3,940	3,940		1,137	1,300	1,503
			국 비	2,618	2,618		796	910	912
			지방비	1,322	1,322		341	390	591
	가옥 급배수 시설	4,000m	계	4,000	4,000			1,000	1,000	2,000
			국 비	-	-			-	-	-
			지방비	4,000	4,000			1,000	1,000	2,000
	오폐수 정화 시설	1 식	계	5,000	5,000				5,000
			국 비
			지방비	5,000	5,000				5,000
	배수 펌프장 건립	1 식	계	600	600			600
			국 비	420	420			420
			지방비	180	180			180
관 람 객 편 의 ․ 관 광 시 설	소 계	13건	계	6,254	4,013	668	1,786	614	793	152	2,241	200	500	500	560	481
			국 비	4,375	2,807	467	1,250	430	554	106	1,568	140	350	350	392	336
			지방비	1,879	1,206	201	536	184	239	46	673	60	150	150	168	145
	토지 매입	주차장, 휴게소 36,815㎡	계	668	668	668
			국 비	467	467	467
			지방비	201	201	201
	토지 매입	동산 2개소 6,250㎡	계	312	312				160	152
			국 비	218	218				112	106
			지방비	94	94				48	46
	토지 매입	연자방아 설치 380㎡	계	19	19				19
			국 비	13	13				13
			지방비	6	6				6
	토지 매입	양동교회 토지․건물 매입 850㎡	계	146	146		146
			국 비	102	102		102
			지방비	44	44		44
	전시 시설	홍보센터 건립 150평, 1동	계
			국 비		동산문화재 전시관 활용
			지방비
	주차장 포장	대형 50대 소형 200대	계	968			200	384	384
			국 비	677			140	269	268
			지방비	291			60	115	116

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요 예산		1단계						2단계
					계	03	04	05	06	07	계	08	09	10	11	12
관 람 객 편 의 ․ 관 광 시 설	휴게소 건립	100평, 1동	계	1,040	1,040		1,040
			국 비	728	728		728
			지방비	312	312		312
	주차장 화장실 건립	20평, 1동	계	400	400		400
			국 비	280	280		280
			지방비	120	120		120
	동산 화장실 건립	3.5평, 2동	계	200							200	200
			국 비	140							140	140
			지방비	60							60	60
	안내소 매표소 건립	1동	계	260	260			130	130
			국 비	182	182			91	91
			지방비	78	78			39	39
	동산 정자 건립	1동	계	120							120				60	60
			국 비	84							84				42	42
			지방비	36							36				18	18
	편의 시설	음수대, 관람의자, 입구차단 시설 1식	계	200	200			100	100
			국 비	140	140			70	70
			지방비	60	60			30	30
	동산 정비	4개소	계	1,921							1,921		500	500	500	421
			국 비	1,344							1,344		350	350	350	294
			지방비	577							577		150	150	150	127
합 계		26건	계	54,513	29,217	3,985	3,142	5,507	10,689	5,894	25,296	5,266	5,084	4,057	4,913	5,976
			국 비	30,741	13,420	2,200	2,200	3,155	3,140	2,725	17,321	3,426	3,437	2,839	3,438	4,181
			지방비	23,772	15,797	1,785	942	2,352	7,549	3,169	7,975	1,840	1,647	1,218	1,475	1,795

자료2		가옥별 현황 및 정비계획

개별가옥(비지정) 정비계획

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
이정남	안채	목조+블럭조,양와	좌측면 배면 블럭으로 증축	10.90	7.38	목조초가복원	29,520	A
	변소	블럭조,스레트		1.20	1.67	목조초가복원	30,000	A
이석곤	안채	합판마감,스레트		9.89	10.00	목조초가복원	60,000	A
	사랑채	합판마감,스레트		13.16	14.00	목조초가복원	84,000	A
	변소	블럭조,스레트		0.40	1.67	목조초가복원	30,000	A
이재구	안채	목조+블럭조,양와		14.33	11.26	목조초가복원	45,040	A
	사랑채	목조+블럭조,양와		6.74	5.57	목조초가복원	22,280	A
	곳간채	토벽,스레트		4.86	4.86	목조초가복원	19,440	A
	변소	블럭조,스레트		3.10	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	토담		30.00	30.00	이엉토담복원	30,000	A
구마을 회관	회관	조적조,슬라브		29.65		철거	2,965	A
	변소	블럭조,양와		0.74		철거	74	A
이석국	안채	블럭조,양와	전체블럭으로개조	9.75	10.10	목조초가로해체보수	60,600	A
	문간채	목조+블럭조,양와		9.58	10.78	목조초가로해체보수	64,680	A
	변소	블럭조,양와		1.02	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	블럭담장		18.00	18.00	이엉토담복원	18,000	A
이목원	안채	목조+블럭조,양와	좌측면 배면 블럭으로 증축	15.70	9.25	목조초가복원	37,000	A
	사랑채	목조+블럭조,양와	측면배면블럭증축	9.94	6.54	목조초가복원	26,160	A
	축사	블럭조,스레트		7.99		철거	799	A
	변소	블럭조,스레트		0.77	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	블럭담장		70.00	70.00	이엉토담복원	70,000	A
이석초	안채	블럭조,양와	상태불량	27.85	6.75	목조초가복원	40,500	A
	변소				1.67	목조초가신축	30,000	A
	담장	블럭담장		37.00	37.00	이엉토담복원	37,000	A
오병숙	안채	블럭조,양와	좌측면 배면 블럭으로 증축	11.21	6.42	목조초가복원	38,520	A
	변소	블럭조,스레트		0.47	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	블럭담장		21.00	21.00	이엉토담복원	21,000	A
이석용	안채	블럭조,양와	상태불량	11.40	11.40	목조초가로해체보수	68,400	A
	곳간채	흙벽돌,스레트	상태불량	2.99	3.68	목조초가로해체보수	22,080	A
	변소	블럭조,스레트		0.44	1.67	목조초가복원	30,000	A

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
김봉생	안채	목조+토벽,양와	우측면 배면 토벽으로 증축	15.35	6.96	목조초가복원	41,760	A
	곳간채	목조+토벽,스레트	좌측면 배면 토벽으로 증축	7.80	5.80	목조초가복원	34,800	A
	변소	토벽,스레트		0.59	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	토담		27.00	27.00	이엉토담복원	27,000	A
이명구	안채	블럭조,스레트	상태불량	16.17	16.17	목조초가복원	97,020	A
	사랑채	블럭조,스레트		8.39	8.39	목조초가복원	50,340	A
	축사	블럭조,스레트		1.37	1.37	철거	137	A
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	A
이명환	안채	블럭조,스레트	측면배면블럭증축	15.58	8.25	목조초가복원	49,500	A
	사랑채	블럭조,스레트		7.45	12.00	토벽초가복원	84,000	A
	곳간채	블럭조,스레트		2.17	3.58	토벽초가복원	25,060	A
	축사	블럭조,스레트		23.05	15.00	토벽초가복원	60,000	A
	변소	블럭조,스레트		0.52	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	블럭담장		15.00	15.00	이엉토담복원	15,000	A
이정생	안채	블럭조,스레트		9.82	9.82	철거	982	A
이순옥	안채	블럭조,스레트		15.20	9.93	목초초가복원	59,580	A
	곳간채	블럭조,스레트		1.65	1.65	철거	165	A
	변소	블럭조,스레트		0.82	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	블럭담장		23.00	23.00	이엉토담복원	23,000	A
손봉호	안채	블럭조,양와	측면배면블럭증축	24.31	14.00	목조초가복원	84,180	A
	곳간채	블럭조,초가		11.53	11.53	목조초가복원	69,180	A
	축사	강관파이프, 스레트블럭조		24.14	21.14	목조초가복원	2,414	A
	변소	블럭조,스레트		0.52	1.67	목조초가복원	30,000	A
손원익	안채	목조+블럭조,양와	측면배면블럭증축	18.23	12.55	목조초가복원	75,300	A
	곳간채	블럭조,스레트		9.50	9.50	목조초가복원	57,000	A
	변소	블럭조,스레트		0.76	1.67	목조초가복원	30,000	A
손연호	안채	목조+블럭조,양와	좌측면배면블럭 으로증축	18.49	14.73	목조한식기와복원	132,570	B
	사랑채	블럭조,양와	좌측면배면블럭 으로증축	12.66	12.50	목조초가복원	75,000	B
	곳간채	블럭조,스레트		11.27	8.00	목조초가복원	48,000	B
	축사	강관트러스 스레트		32.62	32.62	철거	3,262	B
	변소	블럭조,스레트		1.22	1.67	목조초가복원	30,000	B
김기남	안채	목조+블럭조,양와	좌측면배면블럭 으로증축	12.04	12.04	목조초가복원	72,240	B
	곳간채	블럭조,양와		2.21	4.40	목조초가복원	26,400	B
	변소	블럭조,스레트		0.82	1.67	목조초가복원	30,000	B

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
양동 교회	교회	조적조,양와		43.12	97.20	목조한식기와복원	1,458,000	A
	사택	블럭조,스레트		15.53	19.44	목조한식기와복원	194,400	A
	곳간채	블럭조,스레트		6.53	6.53	철거	653	A
	변소	조적조,슬라브		2.54	1.67	목조한식기와복원	40,000	B
이원춘	안채	블럭조,스레트	상태불량	7.86	7.86	목조초가복원	47,160	A
	곳간채	블럭조,스레트		2.77	2.77	토벽초가복원	37,590	A
	축사	블럭조,스레트		5.37	5.37	토벽초가복원	19,390	A
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	토담		19.00	19.00	이엉토담복원	19,000	A
이동병	안채	목조+블럭조,한와	측면배면블럭증축	14.76	14.76	번와보수및부분보수	59,040	B
	축사	블럭조,양와		18.01	18.01	토벽초가복원	72,040	B
		강관파이프,판넬		15.18	15.18	철거	1,518	B
	변소	블럭조,양와		1.12	1.67	목조초가복원	30,000	B
이석복	안채	목조+블럭조,양와	좌측면배면블럭으로증축	12.75	11.72	목조한식기와복원	105,480	B
	사랑채	목조+블럭조,양와	배면블럭증축	12.09	9.15	목조초가복원	54,900	B
	곳간채	블럭조,스레트		5.09	5.09	목조초가복원	30,540	B
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	블럭담장		57.00	57.00	이엉토담복원	57,000	B
한원숙	안채	목조+블럭,스레트	측면배면블럭증축	12.97	7.19	목조초가복원	43,140	B
	곳간채	토벽,스레트		9.91	9.91	토벽초가복원	39,640	B
	변소	블럭조,스레트		0.29	1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	토담		9.00	9.00	이엉토담복원	9,000	B
이원해	안채	목조+블럭조,양와	전체적개조증축	24.24	14.38	목조초가복원	86,280	B
	사랑채	목조+블럭조,양와	전체적개조증축	18.17	9.20	목조초가복원	55,200	A
	곳간채	블럭조,스레트		8.49	8.60	토벽초가복원	60,200	A
	변소	블럭조,스레트		0.97	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	토담		12.00	12.00	이엉토담복원	12,000	B
박철이	안채	토벽+블럭조,양와	배면블럭증축	12.43	10.91	목조초가복원	65,460	B
	곳간채	토벽+블럭,스레트		4.01	4.14	목조초가복원	24,840	B
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장		붕괴		30.00	이엉토담복원	30,000	B
이동원	안채	목조+블럭,스레트	방외블럭개조증축	28.31	11.51	목조초가복원	69,060	B
	곳간채	블럭조,스레트		13.72	7.95	토벽초가복원	47,700	A
	변소	블럭조,스레트		1.18	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	토담		24.00	24.00	이엉토담복원	24,000	B

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
이석해	심인당	조적조,양와		19.56	20.00	목조한식기와복원	300,000	B
	사택	조적조,양와		16.98	19.44	목조한식기와복원	194,400	B
	곳간채	블럭조,스레트		2.01	2.01	철거	201	B
	변소	블럭조,스레트		2.32	1.67	목조한식기와복원	40,000	B
	담장	블럭담장		40.00	40.00	토담 한식기와복원	40,000	B
이덕환	안채	목조+블럭조,양와	배면블럭증축	17.63	12.90	목조한식기와복원	116,100	B
	문간채	목조,초가	상태양호	4.90				B
	곳간채	블럭조,양와		1.23	3.00	토벽초가복원	21,000	B
	변소	블럭조,양와		1.34	1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	토담		16.00	16.00	이엉토담복원	16,000	B
이원발	안채	목조+블럭조,양와	측면배면블럭증축	14.88	6.15	목조초가복원	36,900	B
	사랑채	목조+블럭조,양와	벽체블럭으로개조	8.37	6.40	목조초가복원	38,400	B
	변소	블럭조,스레트		1.09	1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	토담		42.00	42.00	이엉토담복원	42,000	B
김조이	안채	목조+블럭조,양와	우측면블럭증축	12.43	9.26	목조초가복원	55,560	B
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	토담		20.00	20.00	이엉토담복원	20,000	B
사습농장	농장	강관파이프,스레트		43.65	43.65	철거	4,365	B
이강원	안채	목조+블럭조,양와	블럭으로개조증축	11.15	9.00	목조초가복원	54,000	B
	곳간채	블럭조,양와		8.15	8.15	목조초가복원	48,900	B
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	블럭담장		10.00	10.00	이엉토담복원	10,000	B
손붕익	안채	목조+블럭조,양와	좌측면배면블럭 으로증축	19.70	12.89	목조한식기와복원	116,010	B
	사랑채	목조+블럭조,양와		8.16	7.65	목조초가복원	45,900	B
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	블럭담장		71.00	71.00	이엉토담복원	71,000	B
이원룡	안채	목조+토벽,초가	상태불량	6.39	6.39	목조초가복원	38,340	B
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	B
손위진	안채	조적조,양와		10.15	10.15	목조초가복원	60,900	A
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	B
이석근	안채	목조+블럭,스레트	상태불량	16.73	8.22	목조초가해체보수	49,320	B
	변소	블럭조,스레트		3.10	1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	토담	상태양호					B
이원송	안채	목조,한와		16.00	16.00	번와보수	16,000	B
	사랑채	목조+블럭조,초가		8.10	8.10	이엉보수및 부분 보수	8,100	B
	곳간채	목조,양와	불타소실됨	3.81	3.81	목조초가해체보수	22,860	B
	변소	토벽,양와		1.09	1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	토담	근래보수					B

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
이호식	안채	목조+블럭조,한와	좌측면배면블럭 으로 증축	22.82	14.96	번와보수및부분보수	67,320	B
	사랑채	목조,블럭조,양와	블럭증축	8.49	8.49	목조초가복원	33,960	B
	축사	강관파이프 스레트		23.66	15.00	토벽초가복원	105,000	B
	변소	블럭조,스레트		3.31	1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	블럭담장		70.00	70.00	이엉토담복원	70,000	B
이원욱	안채	목조+블럭조,양와	좌측면 배면 블럭 으로 증축	19.66	12.11	목조초가복원	48,440	B
	사랑채	목조,초가		9.88	9.88	이엉보수및부분보수	9,880	B
	곳간채	블럭조,스레트		5.39	5.39	목조초가복원	37,730	B
		블럭조,스레트		3.95		철거	395	B
	축사	강관파이프,스레트		18.70		철거	1,870	B
	변소	블럭조,스레트		1.41	1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	블럭담장		50.00	50.00	이엉토담복원	50,000	B
이원발	안채	목조+토벽,초가		10.86	10.86	목조초가복원	43,440	A
	사랑채	목조+토벽,초가		9.22	9.22	목조초가복원	36,880	A
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	B
이석대	안채	블럭조,양와		21.90	15.16	목조한식기와복원	136,440	B
	곳간채	블럭조,스레트		2.84	6.48	목조한식기와복원	58,320	B
	변소	블럭조,슬라브		0.51	1.67	목조한식기와복원	40,000	B
	담장	블럭담장		56.00	56.00	토담 한식기와복원	56,000	B
이석룡	안채	목조+블럭조,양와	좌측면배면블럭 으로증축	12.12	18.97	목조초가복원	22,960	B
이석룡	변소	블럭조,스레트		0.62	1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	블럭담장		44.00	44.00	이엉토담복원	44,000	B
김태덕	안채	블럭조,스레트	상태불량	22.57	10.11	목조초가복원	60,660	B
	곳간채	토벽,초가		8.48	8.48	토담초가복원	33,920	B
	변소	토벽,초가		2.98	1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	토담및블럭담장		24.00	24.00	이엉토담복원	24,000	B
강태우	안채	목조+토벽,스레트	좌측면블럭증축 우측면토벽증축	12.70	6.04	목조초가복원	24,160	A
	곳간채	토벽,초가		3.58	3.58	토벽초가보수	14,320	B
	축사	블럭조,스레트		3.64	3.64	토벽초가복원	25,480	B
	변소	블럭조,스레트		1.09	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	토담		24.00	24.00	이엉토담복원	24,000	A
이원식	안채	목조+블럭조,한와	배면블럭증축	17.87	14.60	번와보수및 부분 보수	58,400	B
	사랑채	목조+블럭조,양와	배면블럭증축	7.33	6.21	목조한식기와복원	55,890	B
	곳간채	목조+블럭조,양와		4.19	4.19	목조초가복원	16,760	B
	변소	블럭조,양와		0.80	1.67	목조초가복원	30,000	B
	담장	토담	근래보수					B

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
이용석	안채	목조+블럭조,한와	배면블럭증축	12.23	11.38	번와보수및 부분보수	45,520	B
	사랑채	목조,초가		9.04	9.04	목조초가복원	54,240	B
	곳간채	목조,초가		3.84	3.84	목조초가복원	7,680	B
	변소	블럭조,스레트		0.64	1.67	목조초가복원	30,000	B
이동우	안채	목조+블럭조,양와	배면블럭증축	15.77	10.41	목조초가복원	41,640	B
	곳간채	블럭조,스레트		10.29	10.29	목조초가복원	61,740	B
	변소	블럭조,스레트		0.37	1.67	목조초가복원	30,000	B
이현동	안채	목조+토벽,초가		10.08	10.08	목조초가복원	40,320	B
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	B
심근식	안채	목조+블럭조,양와	측면배면블럭증축	15.59	10.09	목조한식기와복원	60,540	C
	사랑채	토벽+블럭,스레트		7.09	7.50	목조초가복원	45,000	C
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	토담		30.00	30.00	이엉토담복원	30,000	C
김석준	안채	목조+블럭,스레트	측면블럭증축	15.77	9.91	목조한식기와복원	89,190	C
	변소	블럭조,스레트		0.64	1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	토담		23.00	23.00	이엉토담복원	23,000	C
손수익	안채	블럭조,양와	전체적으로블럭 개조증축	24.87	13.81	목조한식기와복원	124,290	C
	곳간채	블럭조,스레트		3.69	3.69	목조초가복원	22,140	C
		블럭조,스레트		1.26		철거	126	C
	변소	블럭조,스레트		0.97	1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장		붕괴		30.00	이엉토담복원	30,000	C
손수운	안채	목조+블럭조,양와		11.77	11.77	목조초가복원	47,080	C
	사랑채	블럭조,스레트		7.70	7.70	목조초가복원	46,200	C
	변소	블럭조,양와		1.41	1.67	목조초가복원	30,000	C
손상호	안채	목조+블럭조,양와	측면배면블럭증축	14.92	13.17	목조초가복원	79,020	C
	곳간채	블럭조,스레트		3.68	3.68	목조초가복원	22,080	A
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	블럭담장		24.00	24.00	이엉토담복원	24,000	A
정창락	안채	목조+블럭,스레트		16.92	10.31	목조초가복원	61,860	C
	사랑채	블럭조,스레트		6.76	6.76	목조초가복원	40,560	C
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	C
이석윤	안채	블럭조,양와	측면배면블럭증축	20.82	12.32	목조초가복원	73,920	C
	사랑채	목조+블럭,스레트	배면블럭증축	10.90	5.45	목조초가복원	32,700	C
	곳간채	블럭조,스레트		8.29	8.29	목조초가복원	25,480	C
		블럭조,스레트		1.09		철거	109	C
	변소	블럭조,스레트		0.59	1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	블럭담장		70.00	70.00	이엉토담복원	70,000	C

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
남정락	안채	목조+블럭,스레트	측면배면블럭증축	11.23	11.23	목조초가복원	67,380	A
	곳간채	토벽+블럭,스레트		9.02	9.87	토벽초가복원	39,480	A
	변소	블럭조,스레트		0.94	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	토담		15.00	15.00	이엉토담복원	15,000	A
남석목	안채	목조+토벽,초가		7.72	7.72	이엉보수및 부분보수	30,880	C
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	C
이원진	안채	목조+토벽,한와		13.77	13.77	번와보수및 부분보수	55,080	C
	사랑채	목조+블럭조,초가		16.93	16.93	이엉보수및 부분보수	33,860	C
	문간채	목조+토벽,초가	상태불량	6.36	6.36	목조 초가 해체보수	38,160	C
	변소	토벽,초가		1.66	1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	토담	근래보수					C
이동주	안채	목조+블럭조,한와	안채익사배면 블럭증축	25.07	21.14	번와보수및 부분보수	84,560	C
	곳간채	블럭조,양와		3.06	7.53	목조초가복원	45,180	C
	변소	블럭조,스레트		1.69	1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	토담	상태양호					C
이원우	안채	목조+블럭조,양와	측면배면블럭증축	13.10	10.54	목조초가복원	63,240	A
	곳간채	블럭조,양와		4.91	4.91	목조초가복원	29,460	A
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장		붕괴		25.00	이엉토담복원	25,000	A
이규원	안채	블럭조,스레트	측면배면블럭증축	20.13	16.98	목조초가복원	101,880	A
	곳간채	블럭조,스레트		5.90	6.17	목조초가복원	37,020	A
	변소	블럭조,스레트		1.14	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	이엉토담복원		15.00	15.00	이엉토담복원	15,000	A
권중봉	안채	목조+토벽,초가		9.33	9.33	목조초가복원	37,320	C
	사랑채	목조,초가		6.13	6.13	이엉보수및부분보수	12,260	C
	변소	블럭조,스레트		1.03	1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	이엉토담복원	붕괴		33.00	이엉토담복원	33,000	C
이원특	안채	목조+블럭조,양와	우측면배면블럭 으로 증축	7.71	7.17	목조초가복원	28,680	C
	곳간채	토벽,초가		4.97	4.97	이엉보수및 부분보수	4,970	C
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	C
이원진	안채	조적조,양와		14.10	8.98	목조초가복원	53,880	C
	사랑채	목조+토벽,초가		9.21	9.21	이엉보수및 부분보수	9,210	A
	변소	조적조,한와		2.40	1.67	목조초가복원	30,000	C
경로당	안채	목조,초가		5.09	5.09	이엉보수및 부분보수	20,360	C
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	C

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
이석호	안채	목조+블럭조,초가	배면블럭증축	15.81	11.01	이엉보수및부분보수	11,010	C
	사랑채	목조+토벽,초가		7.72	7.72	이엉보수및부분보수	7,720	C
	곳간채	토벽,스레트		10.57	10.28	토벽초가복원	71,960	C
	변소	블럭조,양와		0.73	1.67	목조초가복원	30,000	C
이동진	안채	목조,초가		9.70	9.70	이엉보수및부분보수	9,700	C
	곳간채	목조,초가	상태양호	6.86				C
	변소	블럭조,스레트		1.39	1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	블럭담장		55.00	55.00	이엉토담복원	55,000	C
손덕익	안채	블럭조,스레트	측면배면블럭증축	21.93	10.34	목조한식기와복원	93,060	C
	곳간채	목조,초가		9.08	9.08	이엉보수및부분보수	9,080	C
	변소	블럭조,스레트		0.82	1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	블럭담장		72.00	72.00	이엉토담복원	72,000	C
손진오	안채	블럭조,스레트		17.55	17.55	목조한식기와복원	157,950	C
	곳간채				8.81	목조초가복원	52,860	C
	변소	블럭조,스레트		0.54	1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	블럭담장		34.00	34.00	이엉토담복원	34,000	C
장만귀	안채	목조,초가		6.99	6.99	이엉보수및부분보수	13,980	C
	사랑채	목조,초가		4.04	4.04	이엉보수및부분보수	8,080	C
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	토담		15.00	15.00	이엉토담복원	15,000	C
손진동	안채	목조+블럭조,초가	좌측면배면블럭 으로 증축	11.48	7.56	이엉보수및부분보수	7,560	C
	사랑채	목조,초가		6.53	6.53	이엉보수및부분보수	6,530	C
	변소	블럭조,양와		0.47	1.67	목조초가복원	30,000	C
최영환	안채	목조+블럭조,한와	좌측면배면블럭 으로 증축	13.53	8.79	번와보수및부분보수	13,980	C
	사랑채	목조,초가		6.93	6.93	이엉보수및부분보수	8,080	C
	변소	블럭조,스레트		0.83	1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	토담		65.00	65.00	이엉토담복원	65,000	C
손원락	안채	목조+블럭조,한와	배면블럭증축	14.17	12.40	번와보수및부분보수	49,600	C
	사랑채	목조,한와	블럭증축	8.59	9.25	번와보수및부분보수	37,000	C
	곳간채	목조,초가	블럭증축	9.45	5.95	이엉보수및부분보수	11,900	C
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	블럭담장		39.00	39.00	이엉토담복원	39,000	C
이태원	안채	목조+블럭조,한와	좌측면배면블럭 으로 증축	11.78	7.49	번와보수및부분보수	29,960	C
	사랑채	목조,초가		4.19	4.19	이엉보수및부분보수	4,190	C
	변소	블럭조,스레트		0.54	1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	토담		7.00	7.00	이엉토담복원	7,000	C

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
이무남	안채	목조+블럭조,초가	블럭증축	11.45	11.45	이엉보수및부분보수	29,960	C
	사랑채	목조+블럭조,초가		6.43	6.43	이엉보수및부분보수	4,190	C
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	C
임광수	안채	목조,초가	상태양호	9.70				C
	곳간채	블럭조,양와		15.50		철거	1,550	C
		블럭조,스레트		3.75	4.82	목조초가복원	28,920	C
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	C
이석근	안채	목조+블럭조,양와	좌측면배면블럭으로증축	17.72	11.72	목조한식기와복원	70,320	C
	사랑채	목조+토벽,초가		8.52	8.52	이엉보수및부분보수	8,520	C
	변소	블럭조,스레트		0.79	1.67	목조초가복원	30,000	C
	담장	블럭담장		47.00	47.00	이엉토담복원	47,000	C
이세동	안채	목조+블럭조,한와	우측면배면블럭 으로증축	15.94	13.50	번와보수및부분보수	54,000	C
	사랑채	목조+블럭조,한와	상태양호	10.42				C
	변소				1.67	목조한식기와복원	40,000	C
	담장	토담		65.00	65.00	토담한식기와복원	65,000	C
이종환	안채	목조,한와		8.34	8.34	번와보수및부분보수	33,360	A
	사랑채	목조,한와		9.43	9.43	번와보수및부분보수	37,720	D
	변소				1.67	목조한식기와복원	40,000	D
	담장	토담		51.00	51.00	토담한식기와복원	51,000	D
이정우	안채	목조,양와		13.24	13.24	목조한식기와복원	52,960	D
	사랑채	목조+블럭조 +토벽초가		9.74	6.54	이엉잇기 및 부분보수	13,080	D
	변소	블럭조,양와		0.48	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	블럭담장		75.00	75.00	이엉토담복원	75,000	A
이시환	안채	목조+한와		21.53	21.53	번와보수및부분보수	86,120	D
	사랑채	목조,초가		8.81	8.81	이엉보수및부분보수	17,620	D
	변소	블럭조,스레트		1.58	1.67	목조초가복원	30,000	D
손수락	안채	목조+토벽,양와	근래보수	9.49				D
	곳간채	토벽+블럭,스레트		18.17	7.02	목조초가복원	42,120	D
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	D
이승찬	안채	블럭조,양와	전체적으로블럭 개조증축	29.24	16.00	목조한식기와복원	144,000	D
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	D
손휘익	안채	블럭조,양와	전체적으로블럭 개조증축	25.99	25.99	목조한식기와복원	233,910	D
	곳간채	블럭조,스레트		10.87	10.87	목조초가복원	65,220	D
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	블럭담장		25.00	25.00	이엉토담복원	25,000	D

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
안강 정수장	기계실	조적조,슬라브		18.40	18.40	목조한식기와복원	156,600	D
	사택	조적조,슬라브		15.27	15.27	목조한식기와복원	137,430	D
		조적조,슬라브		15.27	15.27	목조한식기와복원	137,430	D
	창고	조적조,슬라브		12.73	12.73	목조한식기와복원	114,570	D
		조적조,슬라브		4.64	4.64	목조한식기와복원	41,760	D
이동건	안채	목조+블럭조,양와	좌측면배면블럭으로증축	22.24	12.90	목조한식기와복원	116,100	D
	곳간채	블럭조,양와		2.50		철거	250	D
	변소			0.87	1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	토담	근래보수					D
이희동	안채	목조,한와	우측면배면목조로증축	16.41	16.41	번와보수및부분보수	65,640	D
	사랑채	목조,한와		11.48	11.48	번와보수및부분보수	44,920	D
	변소	블럭조,한와		1.12	1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	토담						D
김석준	안채	목조,초가	근래보수	7.37
	사랑채	목조+토벽,초가		4.73	4.73	토벽초가복원	33,110	D
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	토담						D
이원극	안채	목조,한와		21.63	21.63	번와보수및부분보수	86,520	D
	사랑채	목조,한와		12.29	12.29	번와보수및부분보수	49,160	D
	변소				1.67	목조한식기와복원	40,000	D
	담장	토담						D
이형동	안채	목조,한와		16.84	16.84	번와보수및부분보수	67,360	D
	사랑채	목조,한와		12.02	12.02	번와보수및부분보수	48,080	D
	문간채	목조,초가		4.37	4.37	이엉보수및부분보수	4,370	D
	변소	토벽,초가		1.81	1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	토담	근래보수
이양길	안채	목조+조적조,한와	근래보수	15.55
	사랑채	목조,한와		7.07	7.07	번와보수및부분보수	28,280	D
	곳간채	목조,초가		4.74	4.74	이엉보수및부분보수	9,480	D
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	토담		77.00	77.00	토담한식기와복원	77,000	D
이경산	안채	목조+토벽,초가		5.38	5.38	이엉보수및부분보수	16,140	D
	곳간채	합판,스레트		2.38	3.00	목조초가복원	18,000	D
	변소	블럭조,스레트		0.43	1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	토담

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
이석민	안채	목조+블럭조,한와		19.53	14.40	번와보수및부분보수	57,600	D
	사랑채	목조,양와		5.94	5.94	목조한식기와복원	53,460	D
	곳간채	블럭조,스레트		12.18		철거	1,218	D
	변소	블럭조,스레트		0.63	1.67	목조한식기와복원	40,000	D
	담장	토담	근래보수
이은구	안채	목조,한와		17.81	17.81	번와보수및부분보수	71,240	D
	곳간채	블럭조,스레트		2.80	2.80	토벽초가복원	19,600	D
		합판,스레트		0.82		철거	82	D
	변소	블럭조,스레트		0.61	1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	토담		11.00	11.00	이엉토담복원	11,000	D
이진원	안채	목조,한와		27.36	27.36	번와보수및부분보수	123,120	D
	사랑채	목조,한와		17.09	17.09	번와보수및부분보수	76,905	D
	문간채	목조,한와		10.64	10.64	번와보수및부분보수	47,880	D
	곳간채	목조,한와		9.33	9.33	번와보수및부분보수	41,985	D
	변소				1.67	목조한식기와복원	40,000	D
	담장	토담		30.00	30.00	토담한식기와복원	30,000	D
이석범	안채	목조+블럭조,초가	좌측면배면블럭 으로 증축	14.05	8.47	이엉보수및부분보수	8,470	D
	사랑채	목조,초가		9.85	9.85	이엉보수및부분보수	9,850	D
	곳간채	스레트		3.81		철거	381	D
	변소	블럭조,스레트		0.44	1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	토담		80.00	80.00	이엉토담복원	80,000	D
손병익	안채	목조+블럭조,한와	배면블럭증축	19.45	13.04	번와보수및부분보수	58,680	D
	사랑채	목조,한와		15.52	15.52	번와보수및부분보수	69,840	D
	곳간채	목조,초가		7.70	7.70	번와보수및부분보수	34,650	D
	변소			1.78	1.67	목조한식기와복원	40,000	D
	담장	토담	근래보수
이종환	안채	목조,한와		16.81	16.81	번와보수및부분보수	75,645	D
	사랑채	목조,한와		9.24	9.24	번와보수및부분보수	41,580	D
	변소				1.67	목조한식기와복원	40,000	D
	영당	목조,한와		6.90	6.90	번와보수및부분보수	31,050	D
	삼문	목조,한와		3.00	3.00	번와보수및부분보수	13,500	D
	담장	토담		20.00	20.00	토담한식기와복원	20,000	D
이석해	안채	목조,한와		13.19	13.19	번와보수및부분보수	30,000	D
	사주문 일각문	목조,한와				목조한식기와보수	30,000	D
	변소	목조,양와		0.62	1.67	목조한식기와복원	40,000	D
	담장	토담		20.00	20.00	토담한식기와복원	20,000	D

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
이원대	안채	목조,초가		7.36	7.36	이엉보수및부분보수	7,360	D
	사랑채	목조,초가		5.88	5.88	이엉보수및부분보수	5,880	D
	곳간채	블럭조,스레트		13.55	6.99	목조초가복원	41,940	D
	변소	토벽,초가	근래보수	1.61
손수암	안채	블럭조,초가	좌측면배면블럭으로증축	12.22	9.25	이엉보수및부분보수	18,500	D
	곳간채	블럭조,양와		2.45	2.45	목조초가복원	14,700	D
	변소	블럭조,양와		2.17	1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	블럭담장및토담		47.00	47.00	이엉토담복원	47,000	D
이지휴	안채	목조,한와		14.31	10.04	번와보수및부분보수	20,080	D
	사랑채	목조,초가		4.81	4.81	이엉보수및부분보수	9,620	D
	곳간채	토벽,초가	상태양호 내부좌측면변소	3.92				D
	담장	토담		20.00	20.00	이엉토담복원	20,000	D
이원만	안채	목조+토벽,초가	상태양호	14.69				D
	곳간채	토벽,스레트		8.02	8.02	토벽초가복원	32,080	D
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	D
이석중	안채	목조+블럭조,한와	배면블럭증축	12.99	11.20	번와보수및부분보수	22,400	D
	사랑채	목조,초가	상태양호	5.76
	곳간채	목조,초가	상태양호	4.90
	변소	블럭조,스레트		0.68	1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	토담		15.00	15.00	이엉토담복원	15,000	D
이준동	안채	목조+토벽,초가	상태양호	12.05
	사랑채	목조,초가	상태양호	7.56
	곳간채	블럭조,양와		12.04		철거	1,204	D
	변소	블럭조,양와		3.34	1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	토담
이석정	안채	목조,한와		11.59	11.59	번와보수및부분보수	46,360	D
	사랑채	목조,초가		7.34	7.34	이엉보수및부분보수	14,860	D
	변소	블럭조,스레트		1.06	1.67	목조초가복원	30,000	D
	담장	블럭담장		40.00	40.00	이엉토담복원	40,000	D
이중동	안채	목조,한와		8.83	8.83	번와보수및부분보수	33,320	D
	사랑채	목조,한와		12.83	12.83	번와보수및부분보수	51,320	D
	문간채	목조,한와		8.94	8.94	번와보수및부분보수	35,760	D
	변소	블럭조,양와		1.37	1.67	목조한식기와복원	40,000	D
	담장	토담	근래보수
김수철	안채	목조+블럭조,한와	배면블럭증축	16.01	14.32	번와보수및부분보수	57,280	E
	변소	블럭조,스레트		0.73	1.67	목조한식기와복원	40,000	E

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
남풍원	안채	목조+토벽,초가		7.80	7.80	이엉보수및부분보수	15,600	E
	사랑채	목조+토벽,초가		4.97	4.97	이엉보수및부분보수	9,940	E
	변소	합판,스레트		0.70	1.67	목조초가복원	30,000	E
	담장	토담		45.00	45.00	이엉토담복원	45,000	E
이인식	안채	목조+블럭조,한와	배면블럭증축	14.25	8.89	수장재및구들보수	17,780	E
	변소	블럭조,한와		0.77	1.67	목조한식기와복원	40,000	E
	담장	토담		42.00	42.00	토담한식기와복원	42,000	E
이홍식	안채	목조,한와		20.34	20.34	번와보수및부분보수	81,360	E
	변소	블럭조,스레트		0.79	1.67	목조한식기와복원	40,000	E
최차분	안채	목조,한와		18.71	18.71	번와보수및부분보수	74,840	E
	사랑채	목조+토벽,초가		9.19	9.19	이엉보수및부분보수	18,380	E
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	E
김기욱	안채	목조+토벽,초가		6.06	6.06	이엉보수및부분보수	6,060	E
	곳간채	토벽,초가		3.19	3.19	이엉보수및부분보수	3,190	E
	변소	토벽,초가		0.96	1.67	목조초가복원	30,000	E
	담장		붕괴		41.00	이엉토담복원	41,000	E
이하우	안채	목조+블럭조,양와	배면블럭증축	21.63	15.52	목조한식기와복원	139,680	E
	사랑채	목조,초가	근래보수	9.11
	변소	블럭조,양와		0.67	1.67	목조초가복원	30,000	E
	담장	토담		32.00	32.00	이엉토담복원	32,000	E
손국익	안채	목조+블럭조,초가	좌측면배면블럭 으로 증축	10.34	6.74	이엉보수및부분보수	13,480	E
	사랑채	목조+토벽,한와		7.51	7.51	번와보수및부분보수	30,040	E
	변소				1.67	목조초가복원	3,000	E
	담장	토담		43.00	43.00	이엉토담복원	43,000	E
이두원	안채	목조+블럭조,한와	우측면배면블럭으로증축	17.06	12.00	번와보수및부분보수	48,000	E
	사랑채	목조,초가		7.28	7.28	이엉보수	7,280	E
	곳간채	블럭조,스레트		10.71	10.71	토벽초가복원	74,970	A
	변소	블럭조,한와		2.48	1.67	목조초가복원	30,000	A
	담장	토담	근래보수					E
손명호	안채	목조+토벽+블럭조, 초가	배면블럭증축	9.36	7.36	이엉보수및부분보수	14,720	E
	변소	블럭조,스레트		0.53	1.67	목조초가복원	30,000	E
이원창	안채	목조,한와		34.42	34.42	번와보수및부분보수	137,680	E
	사랑채	목조,한와		11.71	11.71	번와보수및부분보수	46,840	E
	문간채	목조,한와		7.35	7.35	번와보수및부분보수	29,400	E
	변소				1.67	목조한식기와복원	40,000	E

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			보수 연도	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
이순석	안채	목조+토벽,초가		7.07	7.07	이엉보수및부분보수	14,140	E
	곳간채	토벽,초가	근래보수	4.20
		합판,스레트		1.80		철거	180	E
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	E
	담장	토담		5.00	5.00	이엉토담복원	5,000	E
이석명	안채	목조+블럭조,한와		14.79	14.79	번와보수및부분보수	59,160	E
	사랑	목조,한와		7.49	7.49	번와보수및부분보수	29,960	E
	문간채	목조,한와		6.03	6.03	번와보수및부분보수	24,120	E
	서당	목조,한와		18.57	18.57	번와보수및부분보수	74,280	E
	곳간채	목조,한와	근래보수	4.50
	변소				1.67	목조한식기와복원	40,000	E
	담장	토담
새마을 회관	회관	목조+조적조,한와	상태양호	33.60
	사무실	목조+조적조,한와		12.06	12.06	번와보수및부분보수	54,270	E
	변소	목조+조적조,한와	상태양호	7.47
이외후	안채	토벽,초가	근래보수	4.74				E
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	E
정을두	안채	토벽,초가	상태양호	9.37
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	E
손사용	안채	목조+블럭조,초가		14.52	10.71	이엉보수및부분보수	10,710	E
	아래채	목조+블럭조,초가		5.49	5.49	이엉보수및부분보수	5,490	E
	축사	목조,스레트		5.45	5.45	토벽초가복원	38,150	E
	변소	블럭조,스레트		1.06	1.67	목조초가복원	30,000	E
	담장	토담		58.00	58.00	이엉토담복원	58,000	E
손동만	안채	목조+블럭조,초가	상태양호	10.04	10.04	이엉보수및부분보수	10,040	E
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	E
이정생	안채	목조,한와		11.20	11.20	번와보수및부분보수	22,400	E
	변소				1.67	목조한식기와복원	40,000	E
	담장	토담						E
이일동	안채	목조,초가	상태양호	11.77
	곳간채	토벽,초가	상태양호	3.24
	담장	토담
이원길	안채	목조+토벽,한와	상태양호	6.38
	사랑채	목조,초가	상태양호	10.31
	곳간채	블럭조,스레트		1.55	4.00	목조초가복원	24,000	E
	변소	블럭조,스레트		0.50	1.67	목조초가복원	30,000	E
	담장	토담		10.00	10.00	이엉토담복원	10,000	E

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
이동건	안채	목조,한와	상태양호	29.82	29.82
	사랑채	목조,한와	상태양호	10.02	10.02
	곳간채	목조,한와	상태양호	9.65	9.65
	변소				1.67	목조한식기와복원	40,000	E
	담장	토담
이인식	안채	목조,한와	상태양호	12.53
	문간채	목조,한와	근래보수	5.71
	담장	토담
이현동	안채	목조,한와	상태양호	10.91
	담장	토담
이동헌	안채	목조,초가	상태양호	10.00
	사랑채	목조,초가	상태양호	6.30
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	E
이대식	안채	목조+블럭조,한와	상태양호	25.07
	사랑채	목조+블럭조,한와	상태양호	13.44
	담장	토담
손국익	안채	목조+토벽,초가	근래보수	7.84
	사랑채	목조,초가	근래보수	6.87
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	E
	담장	토담		23.00	23.00	이엉토담복원	23,000	E
손수원	안채	목조,초가	근래보수	7.88
	사랑채	토벽,초가	근래보수	5.29
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	E
이기원	사랑채	목조,초가	근래보수	7.67
	문간채	목조,초가	근래보수	5.96
	변소	블럭조,스레트		0.72	1.67	목조초가복원	30,000	E
	담장	토담		50.00	50.00	이엉토담복원	50,000	E
이성원	안채	목조,한와	근래보수	17.75
	사랑채	목조,한와	상태양호	11.44
	곳간채	목조,초가		8.02	8.02	이엉보수및부분보수	16,040	E
	변소	샌드위치판넬		0.55	1.67	목조초가복원	30,000	E
	담장	토담
손기락	안채	목조+토벽,초가	근래보수	6.88
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	E

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정 비 계 획			우선 순위	비 고
	구 분	구 조	특 기 사 항	규 모	규 모	정 비 내 용	소요예산
이석준	안채	목조,한와		11.67	11.67	번와보수및부분보수	46,680	E
	담장	토담
이동열	안채	목조,한와	근래보수	11.98		번와보수및부분보수	51,840	E
	사랑채	목조,한와	근래보수	9.50		번와보수및부분보수	36,160	E
	변소				1.67	목조초가복원	30,000	E
	담장	토담		6.00	6.00	토담한식기와복원	6,000	E
이원길	안채	목조+블럭조,한와		12.96	12.96	번와보수및부분보수	51,840	E
	사랑채	목조,한와		9.04	9.04	번와보수및부분보수	36,160	E
	변소	블럭조,한와		1.36	1.67	목조한식기와복원	40,000	E
	담장	토담		18.00	18.00	토담한식기와복원	10,800	E

※ 우선순위는 퇴락 및 변형 유지정도에 따라 “A, B, C, D, E" 등급으로 분류함

- 사업추진년도 : A등급(‘03～’04), B등급(‘05～’06), C등급(‘07～’08), D등급(‘09～’10), E등급(‘11～’12)으로 추진함.

- 예산사정 등으로 계획년도에 사업물량을 완료하지 못하는 경우 다음연도로 순연

개별지정가옥 정비계획

문화재명	사업물량	총소요 예산		1단계(백만원)						2단계(백만원)
				계	03	04	05	06	07	계	08	09	10	11	12
계	15건	계	2,388	1,480	54	53	509	514	350	908	300	196	324	62	26
		국 비	1,667	1,034	37	37	356	359	245	633	210	136	226	43	18
		지방비	721	446	17	16	153	155	105	275	90	60	98	19	8
무첨당	변소정비	계	40	40			40
		국 비	28	28			28
		지방비	12	12			12
향단	문간채보수	계	64	64				64
		국 비	44	44				44
		지방비	20	20				20
손소영정	보존처리 모사제작	계	200							200			200
		국 비	140							140			140
		지방비	60							60			60
손동만가옥	안채, 문간채,사당, 곳간채 보수	계	268	200			100		100	68		68
		국 비	187	140			70		70	47		47
		지방비	81	60			30		30	21		21
양동낙선당	안채, 사랑채, 문간채, 사당, 곳간채보수	계	326	100				100		226	100		100		26
		국 비	228	70				70		158	70		70		18
		지방비	98	30				30		68	30		30		8
이원봉가옥	안채, 사랑채 문간채, 담장 보수	계	250	250			100	150
		국 비	175	175			70	105
		지방비	75	75			30	45
이원용가옥	안채, 사당보수	계	128	100					100	28		28
		국 비	89	70					70	19		19
		지방비	39	30					30	9		9
이동기가옥	안채, 사랑채 문간채, 곳간채 변소보수	계	254	154	54			100		100	100
		국 비	177	107	37			70		70	70
		지방비	77	47	17			30		30	30
이희태가옥	안채, 곳간채 방앗간채, 축사 변소, 담장보수	계	262	100					100	162		100		62
		국 비	183	70					70	113		70		43
양동이향정	관리사복원	계	80	80			80
		국 비	56	56			56
		지방비	24	24			24
양동수운정	변소보수	계	40	40			40
		국 비	28	28			28
		지방비	12	12			12
양동심수정	안채, 사랑채, 변소, 담장보수	계	224	100				100		124	100		24
		국 비	156	70				70		86	70		16
		지방비	68	30				30		38	30		8

문화재명	사업물량	총소요 예산		1단계						2단계
				계	03	04	05	06	07	계	08	09	10	11	12
양동안락정	변소, 담장보수	계	53	53		53
		국 비	37	37		37
		지방비	16	16		16
양동강학당	안채, 변소보수	계	82	82			82
		국 비	57	57			57
		지방비	25	25			25
양동의 향나무	영양공급 주변정비	계	50	50					50
		국 비	35	35					35
		지방비	15	15					15

고성 왕곡(高城 旺谷) 마을

Ⅰ. 문화재 현황

1. 지정별 : 중요민속자료 제235호(2000. 1. 7.지정)

2. 위  치 : 강원도 고성군 죽왕면 오봉1리

3. 연혁 및 특징

◦ 고려말 두문동 72인 중의 한 분인 홍문박사 함부열(咸富悅)이 조선왕조 건국에 반대하여 일족을 이끌고 이곳으로 은거하면서 마을이 형성

◦ 강원도 전통민가와 북방식 전통가옥의 원형이 고루 잘 보존되어 있어 학술적 보존 가치가 크고, 옛 생활모습을 비교할 수 있는 중요한 자료로 평가됨

◦ 전통건조물보존법에 의해 '88년8월18일 전통건조물 보존지구 제1호로 지정되었으며 2000. 1. 7일자로 국가 중요민속자료로 지정

4. 일반 현황(2003. 2. 28.현재)

□ 지정면적 : 182.112.7㎡ (55,089평)

□ 가    구 : 48가구

고성왕곡마을

□ 인    구 : 119명(남 61 , 여 58 )

□ 건물 현황

(단위: 동)

구분	계	한식 기와	초가	스레트 지붕	스라브 지붕	함석 지붕	기타	비 고
계	161	35	41	73	-	1	12
본채	55	28	9	11	-	-	7	회관, 효자각, 교회
부속채	106	7	32	62	-	-	5	창고, 콘테이너, 건조기

□ 개별 문화재 지정 현황

◦ 총  괄

(단위: 건)

국보	보물	사적	천연기념물	지방기념물	지방유형문화재	지방민속자료	문화재자료	계
							1	1

◦ 세부내역

지정별 및 지정일	문화재명	수량	소재지	비고
강원도지정 ('85.1. 17)	함정균가옥	1동	강원도 고성군 죽왕면 오봉1리	문화재자료

Ⅱ. 정비실적

◦ 기    간 : ‘89 ～ ‘02년

◦ 사 업 비 : 6,993백만원(국비 4,097,지방비 2,896)

◦ 사업내용

- 가옥보수(안체) 37동 (와가 28동, 초가 9동), 부속체 39동(와가 7동, 초가 32동), 담장보수 19개소,

- 마을회관 개축 1동, 효자각 2동(와가), 전시가옥 매입 4동(와가 3동, 초가 1동), 토지매입(주차장 및 전시가옥) 16,789㎡

- 소하천 정비 1식, 민속마을 종합정비계획 용역 1식

- 디딜방앗간 복원 1동(추진중), 정미소(방앗간)보수 1동(추진중), 소하천 정비 1식(추진중)

Ⅲ. 사업추진계획

1. 기본방침

◦ 사업추진은 ①문화재원형보존 ②마을공동시설 ③ 마을기반시설 ④관람객 편의․관광시설 사업으로 구분하여 연차계획으로 추진함

2. 사업개요

◦ 추진기간 : 2003 ～ 2012년(10개년)

◦ 총사업비 : 23,099백만원(국비 15,681백만원,지방비 7,418백만원)

◦ 사업내용

- 문화재 원형보존 관리 : 퇴락가옥정비(안채․부속채․담장보수), 초가이엉잇기

- 마을공동시설 : 농기계보관창고, 공동창고, 집단축사시설 등

- 마을기반시설 : 소화전 설치, 소하천정비, 상수도확장, 교량개보수.

- 관람객 편의시설 : 전시가옥 조성, 집단상가 조성, 안내시설, 공중화장실 등

3. 세부추진계획

가. 문화재 원형보존

사업대상
	◦ 변형․퇴락가옥 정비 83가옥(안채, 부속채, 방앗간, 효자각 등), 담장보수 20가옥, 초가이엉잇기 연 73가옥, 공가관리(전시가옥 등) 활용

추진방향
	◦ 기존 가옥 보수정비는 퇴락 및 원형유지 정도에 따라 분류ㆍ정비 ◦ 개별 문화재로 지정된 가옥은 엄격한 원형보존차원에서 보수ㆍ정비 ◦ 비지정 가옥은 외부는 전통양식(가옥형태, 지붕, 담장)을 유지 - 내부는 「가옥내 주민편의시설 설치기준」(‘04. 2.28) 적용 ◦ 가옥 및 담장보수공사 등 사업추진시 설계․시공과정 등에 소유자․지역주민 등이 원형고증에 참여할 수 있도록 함 ◦ 장기적으로 방치되는 공가는 원형보존을 원칙으로 하여 매입 또는 소유자와 협의, 활용방안 강구

세부사업 추진계획

변형․퇴락가옥 보수(‘03～’12)

◦ 소요예산 : 3,122백만원(국 2,187, 지 935)

◦ 사업내용 : 퇴락가옥 보수, 변형가옥 원형․전통양식 복원

◦ 사업물량 : 160동

담장보수(‘03, ’07～’12)

◦ 소요예산 : 735백만원(국 515, 지 220)

◦ 사업내용 : 퇴락․변형 담장 원형보수 및 복원

◦ 사업물량 : 20가옥

◦ 사업추진 : 지역전문가의 자문을 받아 왕곡의 전통적인 담장형태, 높이, 곡선 등이 나타나도록 정비

초가이엉잇기(‘03～’12)

◦ 소요예산 : 3,927백만원(국 2,748, 지 1,179)

◦ 사업내용 : 이엉잇기 재료확보 및 이엉잇기

◦ 사업물량 : 124동(향후 복원예정 초가 포함)

◦ 사업추진 : 현행 연간 1회 일괄 이엉잇기에서 점차적으로 연중 수시 이엉잇기 체제로 전환

◦ 볏짚확보방안

- 보존회 및 인근지역 농가와 협의하여 계약재배를 통해 볏짚의 안정적 확보방안 마련

- 마을내 및 인근 토지매입 가능지역을 매입, 볏짚 생산과 마을 체험프로그램에 활용

- 여분의 비축볏짚을 확보하여 긴급보수 필요시 사용하고, 전통적 방법의 보관방법을 사용하여 체험프로그램 소재로 활용

- 이엉잇기 기능인력 확보

- 보존회와 협의, 마을내 이엉잇기 기능을 보유한 기능인에 의한 마을주민 기능전수 기회 제공

․이엉잇기 기능을 지방무형문화재로 지정하는 방안 추진

공가관리(‘04～'12)

◦ 소요예산 : 100백만원(국 70, 지 30)

◦ 사업내용 : 매입 또는 소유자와 협의, 공가를 전통문화체험공간으로 활용

※ 공가현황 및 관리계획

가 옥 명	구 조	규모(㎡)	관리 계획
고성군 (김유집)	목조(와가)	69.28	ㅇ찾아오는 관광객이 내부구조를 볼 수 있도록 하기 위하여 전시가옥으로 활용 ㅇ마을보존회에서 마을 주민으로 관리인 채용 관리
고성군 (함석영)	목조(와가)	83.74	"
송월봉	목조(초가)	55.20	ㅇ가옥주로부터 위탁받아 전시가옥 활용
고성군 (이금남)	목조(초가)	38.67	ㅇ전시가옥 활용
고성군 (박선종)	목조(와가)	58.06	ㅇ전시가옥 활용
이수업	목조(초가)	25.68	ㅇ가옥주로 부터 위탁받아 전시가옥 활용
김세정	목조(초가)	62.18	ㅇ가옥주로 부터 위탁받아 전시가옥 활용

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

사업량	사업물량	총소요 예산액		1단계						2단계
				계	'03	'04	'05	'06	'07	계	'08	'09	'10	'11	'12
퇴락가옥 정비	- 안채 - 부속채 - 방아간 - 효자각	계	3,122	1,819	1,069		150	300	300	1,303	500	340	263	100	100
		국비	2,187	1,274	749		105	210	210	913	350	238	185	70	70
		지방비	935	545	320		45	90	90	390	150	102	78	30	30
담장보수	20가옥	계	735	470	400				70	265	100	70	35	30	30
		국비	515	329	280				49	186	70	49	25	21	21
		지방비	220	141	120				21	79	30	21	10	9	9
초가이엉 잇기	이엉잇기	계	3,927	2,347	323	527	677	504	316	1,580	316	316	316	316	316
		국비	2,748	1,643	226	369	474	353	221	1,105	221	221	221	221	221
		지방비	1,179	704	97	158	203	151	95	475	95	95	95	95	95
공가관리	전시시설 설치운영	계	100	40		10	10	10	10	60	12	12	12	12	12
		국비
		지방비	100	40		10	10	10	10	60	12	12	12	12	12
소 계	4개 사업	계	7,884	4,676	1,792	537	837	814	696	3,208	928	738	626	458	458
		국 비	5,450	3,246	1,255	369	579	563	480	2,204	641	508	431	312	312
		지방비	2,434	1,430	537	168	258	251	216	1,004	287	230	195	146	146

※ 가옥별 현황 및 정비계획 : 별첨

나. 마을공동시설 정비

사업대상
	◦ 농기계보관창고․마을공동창고․축사 집단시설 조성

세부사업 추진계획

농기계 보관창고('08년)

◦ 소요예산 : 360백만원(국 252, 지 108)

◦ 규    모 : 2동 120평

◦ 위    치 : 고성군 죽왕면 오봉리 322-2외1필지 일원

◦ 형    태 : 철골조

- 위치조정, 조경 등을 통해 차폐하여 마을경관을 해치지 않도록 함

마을 공동창고(‘04년)

◦ 소요예산 : 400백만원(국 280, 지 120)

◦ 규    모 : 2동 100평

◦ 위    치 : 고성군 죽왕면 오봉리 322-2외1필지 일원

◦ 형    태 : 철골조

- 위치조정, 조경 등을 통해 차폐하여 마을경관을 해치지 않도록 함

축사 집단시설(‘09년)

◦ 소요예산 : 480백만원(국 336, 지 144)

◦ 사업규모 : 부지 1000평, 건평 300평

◦ 위    치 : 추후선정(마을 외곽지역)

- 각 가옥에서 수용하는 것을 원칙으로 하되, 가축수가 많을 경우 마을 외곽에 규모를 작게하여 분산하여 배치

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

사업명	사업물량	총소요예산		1단계						2단계
				계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
농기계보관 창고	2동 120평	계	360							360	360
		국비	252							252	252
		지방비	108							108	108
마을창고 건립	2동 100평	계	400			400
		국비	280			280
		지방비	120			120
축사집단 시설	300평	계	480							480		480
		국비	336							336		336
		지방비	144							144		144
합 계	3개사업	계	1,240	460		400				840	360	480
		국비	868	280		280				588	252	336
		지방비	372	120		120				252	108	144

다. 마을기반시설 정비

사업대상
	◦마을안길 포장, 소하천․하수도 정비, 전기통신 지중화, 소화전 설치, 교량 개․보수, 상수도 확장, 오․폐수 처리시설, 방축 및 수로설치

추진방향		「마을내 시설 설치기준」(2004. 3. 2) 적용
	◦ 마을안길은 자연상태 유지를 원칙으로 하되, 필요시 주도로는 경화 포장하여 주민 및 관람객의 편의도모 ◦ 우ㆍ오수관로는 분리하여 오수관로는 지중화하여 정화시설로 연결하여 악취 및 수질오염 방지 ◦ 전기, 통신, 소방, 급․배수시설, 상하수도 등 지하 매설이 가능한 시설은 마을경관 유지를 위해 공동구 등을 설치, 지중화 함 ◦ 소화시설, 가로등 등은 타 시설물에 매입하는 방법 등을 활용, 경관에 어울리게 정비

세부사업 추진계획

마을안길 포장(‘04~'06년)

◦ 소요예산 : 550백만원(국 385, 지 165)

◦ 사업규모 : 6,800㎡

◦ 재    질 : 흙포장 포장(c.s.c)

소하천 정비(‘03, 05~'06년)

◦ 소요예산 : 800백만원(국560, 지 240)

◦ 사업규모 : 1,000m

◦ 위    치 : 마을내 중심 소하천(견치석 쌓기 개축)

◦ 사업추진

- 일정한 높이까지만 석축을 쌓고, 상부는 흙으로 경사처리

- 석축높이 : 상부의 흙이 흘러내리지 않도록 하는 정도의 높이

하수도 정비 (‘05~'06년)

◦ 소요예산 : 700백만원(국490, 지 210)

◦ 사업규모 : 500m

◦ 위    치 : 마을내 하수도(1반 - 2반사이)

전기 통신 지중화 사업 (‘05~'06년)

◦ 소요예산 : 1,680백만원(국 1,176, 지 504)

◦ 사업규모 : 3.0km

소화전 설치 (‘04년)

◦ 소요예산 : 645백만원(국451, 지 194)

◦ 사업규모 : 저수조 설치․설비공사 1.5km(*전기 통신 관로매설 병행 추진)

교량개보수 (‘05~'06년)

◦ 소요예산 : 240백만원(국 168, 지 72)

◦ 사업규모 : 6개소 60m

◦ 위    치 : 마을내 중심 소하천(시멘트다리 철거개축)

상수도 확장 (‘04~'05년)

◦ 소요예산 : 300백만원(국 210, 지 90)

◦ 사업규모 : 3.5km(75mm ⇒ 100mm 확장)

◦ 위    치 : 죽왕면 공현진리 ↔ 왕곡마을

오․폐수 처리시설 (‘03년)

◦ 소요예산 : 600백만원(지방비)

◦ 사업규모 : 오수처리시설 및 유입관로 매설

◦ 위    치 : 고성군 죽왕면 오봉리 458 번지

방축 및 수로 설치 (‘09년)

◦ 소요예산 : 300백만원(국 210, 지 90)

◦ 사 업 량 : 마을안 수로1.5 km, 방축1개소

◦ 위    치 : 고성군 죽왕면 오봉리 마을안

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

사업명	사업물량	총소요예산		1단계						2단계
				계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
마을안길 포장	흙포장 6,800㎡	계	550	550		200	175	175
		국비	385	385		140	123	122
		지방비	165	165		60	52	53
소하천정비	석축 1.0㎞	계	800	800	100		350	350
		국비	560	560	70		245	245
		지방비	240	240	30		105	105
하수도정비	하수도 500m	계	700	700			350	350
		국비	490	490			245	245
		지방비	210	210			105	105
전기통신 지중화사업	지하매설 3㎞	계	1,680	1,680			840	840
		국비	1,176	1,176			588	588
		지방비	504	504			252	252

(단위 : 백만원)

사업명	사업물량	총소요예산		1단계						2단계
				계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
소화전설치	저수조 및 소화전 시설	계	645	645		645
		국비	452	452		452
		지방비	193	193		193
교량개보수	교량6개소 60m	계	240	240			120	120
		국비	168	168			84	84
		지방비	72	72			36	36
상수도확장	관로확장 75⇒ 100mm	계	300	300		170	130
		국비	210	210		119	91
		지방비	90	90		51	39
오폐수시설	오폐수 처리장 외 1개 사업	계	600	600	600
		국비
		지방비	600	600	600
방축.수로 시설	방축1개소 수로1.5km	계	300							300		300
		국비	210							210		210
		지방비	90							90		90
합 계	9개사업	계	5,815	5,515	700	1,015	1,965	1,835		300		300
		국비	3,651	3,441	70	711	1,376	1,285		210		210
		지방비	2,164	2,074	630	304	586	550		90		90

라. 관람객 편의․관광시설 설치

사업대상
	◦ 전시가옥 조성(6동), 공중화장실 신축(1동, 30평), 전통공예생활용품전시관(1동, 200평), 주차장조성(5,000평), 관리사 신축(1동, 20평), 공중화장실 신축(1동, 30평), 집단상가 및 먹거리타운 조성,

추진방향		「마을내 시설 설치기준」(2004. 3. 2) 적용
	◦ 관람객이 보고 느끼고 체험할 수 있는 공간조성과 각종 편의시설을 쉽게 이용할 수 있는 시설확충 ◦ 옛 정취가 풍겨나는 전시, 놀이시설 등 관람장소 제공 ◦ 송지호 관광지 개발사업과 연계사업으로 추진하여 관광벨트화 유도 ◦ 7번 국도에서 접근이 가능토록 편의시설 동선 구축

세부사업 추진계획

전시가옥 조성(‘03년, ’07년)

◦ 소요예산 : 500백만원(국 350, 지 150)

◦ 사업규모 : 6동(가옥매입 1동 포함)

◦ 내    용 : 전시가옥 조성 및 전시품 자료구입 전시 등

전통 공예생활용품 전시관 건립 (‘10~’11)

◦ 위    치 : 고성군 죽왕면 오봉리 339-2번지

◦ 소요예산 : 2,580백만원(국 1,806, 지 774)

◦ 사업규모 : 1동 200평(한옥)

◦ 내    용 : 전통 공예품 350여점

◦추진여부 : 별도 검토

- 전통생활소박물관은 마을내 공가를 활용하고

- 고성군에서 수집한 민속공예품을 전시하기 위한 동 전시관은 향후 방문객 증가추세, 활용도 등을 종합적으로 고려하여 추진여부를 별도로 검토함

주차장 조성 및 관리사 신축 (‘04~’07)

◦ 소요예산 : 2,600백만원(국 1,820, 지 780)

◦ 사업규모 : 5,000평(관리사 1동 20평)

◦ 위    치 : 고성군 죽왕면 오봉리 532-2번지일원

◦ 구    조 : 아스콘 포장 및 경량 철골조

◦ 사업추진

- 부지는 먼저 연차적으로 계획대로 확보하되, 확보된 부지부터 마을 방문객 증가 추이를 고려하여 알맞은 규모의 주차장을 단계적으로 조성

공중화장실 신축 (‘08년)

◦ 소요예산 : 480백만원(국 336, 지144)

◦ 사업규모량 : 1동 30평

◦ 위    치 : 고성군 죽왕면 오봉리 308번지(주차장내)

◦ 구    조 : 철근 콘크리트조

집단상가 및 먹거리 타운조성(‘10~’11)

◦ 소요예산 : 2,000백만원(국 1,400, 지 600)

◦ 사업규모 : 토산품 판매장 1식, 먹거리타운 1식

◦ 위    치 : 고성군 죽왕면 오봉리 304번지 일원

◦ 구    조 : 경량 철골조

◦ 사업추진

- 송지호 관광개발사업과 연계하여 신중히 계획

- 사업추진의 효율성을 기하기 위해 먼저 부지선정 및 시설배치계획 등에 관한 계획을 자체적으로 수립

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

사업명	사업 물량	총소요예산		1단계						2단계
				계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
전시가옥 조성	6동 전시물 구입등	계	500	500	250				250
		국비	350	350	175				175
		지방비	150	150	75				75
전통공에 생활용품 전시관조성	1동 200평	계	2,580							2,580			1,290	1,290
		국비	1,806							1,806			903	903
		지방비	774							774			387	387
주차장조성 및관리사 신축	주차장 5,000평 관리사 1동	계	2,600	2,600		200	500	832	1,068
		국비	1,820	1,820		140	350	582	748
		지방비	780	780		60	250	250	320
공중화장실 신축	1동/ 30평	계	480							480	480
		국비	336							336	336
		지방비	144							144	144
집단상가 조성 먹거리촌	토산품 판매장 먹거리촌	계	2,000							2,000			1,000	1,000
		국비	1,400							1,400			700	700
		지방비	600							600			300	300
합 계	5개 사업	계	8,160	3,100	250	200	500	832	1,318	5,060	480		2,290	2,290
		국비	5,712	2,170	175	140	350	582	923	3,542	336		1,603	1,603
		지방비	2,448	930	175	60	250	250	395	1,518	144		687	687

자료1		고성왕곡마을 종합정비 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업량	사업물량	총소요 예산액		1단계						2단계
					계	'03	'04	'05	'06	'07	계	'08	'09	'10	'11	'12
문화재원형보존	퇴락가옥 정비	- 안채 - 부속채 - 방아간 - 효자각	계	3,122	1,819	1,069		150	300	300	1,303	500	340	263	100	100
			국비	2,187	1,274	749		105	210	210	913	350	238	185	70	70
			지방비	935	545	320		45	90	90	390	150	102	78	30	30
	담장보수	20가옥	계	735	470	400				70	265	100	70	35	30	30
			국비	515	329	280				49	186	70	49	25	21	21
			지방비	220	141	120				21	79	30	21	10	9	9
	초가 이엉잇기	이엉잇기	계	3,927	2,347	323	527	677	504	316	1,580	316	316	316	316	316
			국비	2,748	1,643	226	369	474	353	221	1,105	221	221	221	221	221
			지방비	1,179	704	97	158	203	151	95	475	95	95	95	95	95
	공가관리	전시시설 설치운영	계	100	40		10	10	10	10	60	12	12	12	12	12
			국비
			지방비	100	40		10	10	10	10	60	12	12	12	12	12
소 계		4개 사업	계	7,884	4,676	1,792	537	837	814	696	3,208	928	738	626	458	458
			국 비	5,450	3,246	1,255	369	579	563	480	2,204	641	508	431	312	312
			지방비	2,434	1,430	537	168	258	251	216	1,004	287	230	195	146	146
마을공동시설	농기계 보관창고	2동 120평	계	360							360	360
			국비	252							252	252
			지방비	108							180	108
	마을창고 건립	2동 100평	계	400	400		400
			국비	280	280		280
			지방비	120	120		120
	집단 축사 시설	1동 300평	계	480							480		480
			국비	336							336		336
			지방비	144							144		144
소 계		3개사업	계	1,240	400		400				840	360	480
			국비	868	280		280				588	252	336
			지방비	372	108		120				252	108	144

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
마을기반시설	마을안길 포장	흙포장 6,800㎡	계	550	550		200	175	175
			국비	385	385		140	123	122
			지방비	165	165		60	52	53
	소하천 정비	석축 1.0㎞	계	800	800	100		350	350
			국비	560	560	70		245	245
			지방비	240	240	30		105	105
	하수도 정비	하수도 500m	계	700	700			350	350
			국비	490	490			245	245
			지방비	210	210			105	105
	전기통신 지중화	지하매설 3㎞	계	1,680	1,680			840	840
			국비	1,176	1,176			588	588
			지방비	504	504			252	252
	소화전 설치	저수조 및 소화전 시설	계	645	645		645
			국비	452	452		452
			지방비	193	193		193
	교량 개보수	교량6개소 60m	계	240	240			120	120
			국비	168	168			84	84
			지방비	72	72			36	36
	상수도 확장	관로확장 75⇒100 mm	계	300	300		170	130
			국비	210	210		119	91
			지방비	90	90		51	39
	오폐수 시설	오폐수처리장 외1개 사업	계	600	600	600
			국비
			지방비	600	600	600
	방축 수로 시설	방축1개소 수로 1.5km	계	300							300		300
			국비	210							210		210
			지방비	90							90		90
소 계		9개사업	계	5,815	5,515	700	1,015	1,965	1,835		300		300
			국비	3,651	3,441	70	711	1,376	1,284		210		210
			지방비	2,164	2,074	630	304	589	551		90		90

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
관람객 편의 ․ 관광시설	전시가옥 구입	6동	계	500	500	250				250
			국비	350	350	175				175
			지방비	150	150	75				75
	전통공예 생활용품 전시관	1동 200평	계	2,580							2,580			1,290	1,290
			국비	1,806							1,806			903	903
			지방비	774							774			387	387
	주차장 및 관리사	주차장 5,000평 관리사 1동	계	2,600	2,600		200	500	832	1,068
			국비	1,820	1,820		140	350	582	748
			지방비	780	780		60	150	250	320
	공중 화장실	1동/ 30평	계	480							480	480
			국비	336							336	336
			지방비	144							144	144
	집단상가 먹거리촌 조성	토산품 판매장 먹거리촌	계	2,000							2,000			1,000	1,000
			국비	1,400							1,400			700	700
			지방비	600							600			300	300
소 계		3개 사업	계	8,160	3,100	250	200	500	832	1,318	5,060	480		2,290	2,290
			국비	5,712	2,170	175	140	350	582	923	3,542	336		1,603	1,603
			지방비	2,448	930	175	60	250	250	395	1,518	144		687	687
합 계		21개 사업	계	23,099	13,691	2,742	2,152	3,302	3,481	2,014	9,408	1,768	1,518	2,916	2,748	458
			국비	15,681	9,137	1,500	1,500	2,305	2,429	1,403	6,544	1,229	1,054	2,034	1,915	312
			지방비	7,418	4,554	1,242	652	997	1,052	611	2,864	539	464	882	833	146

자료2		가옥별 현황 및 정비계획

□ 단위가옥별 정비계획

○ 본체, 부속사(창고,변소,잠사,우사,건조기,콘데이너)

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정비계획('03년 이후)				우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모(㎡)	규모(㎡)	정비내용	소요예산
함용균가옥	안채	목조	와가	64.78	64.78	기와고르기	4,860		D
	고방채	목조	스레트	16.19	16.19	목조개축초가
	창고	블럭	스레트	7.65	7.65	"	13,837		A
	기타		주변정비	1식	1식	장독대 등정비	15,000		D
김유집가옥	안채	목조	와가	69.28	69.28	기와고르기	5,196		D
	창고	목조	스레트	5.87	5.87	해체이전개축	10,617		A
	기타		주변정비	1식	1식	장독대 뒤란정비	15,000		D
함형진가옥 (함명근)	안채	목조	외가	75.39	75.39	기와고르기	5,700	D
	창고	목조	스레트	15..95	15.95	목조개축초가
	변소	블럭	스라브	11.53	11.53	목조개축초가	20,854	A
	기타		뒤란정비	1식	1식	장독대뒤란정비	15,000	D
이수업가옥	안채	목조	초가	25.68	25.68	초가이엉잇기
	창고	변소	초가	5.75	5.75	초가이엉잇기
	기타		뒤란제비	1식	1식	장독대정비	15,000	E
함형율가옥	안채	목조	초가	37.92	37.92	초가이엉잇기
	창고	블럭	스레트	11.52	11.52	초가이엉잇기
김세정가옥	안채	목조	초가	32.18	62.18	초가이엉잇기
	변소	목조	초가	5.75	5.75	초가이엉잇기
	기타		뒤란정비	1식	1식	장독대정비	15,000	E
함형갑가옥	안채	목조	와가	46.06	46.06	기와고르기	3,500	C
	외양간	목조	와가	12.94	12.94	기와고르기	1,000	C
	창고	블럭	스레트	16.34	16.34	보수	29,554	A
	기타		뒤란정비	1식	1식	장독대뒤란정비	15,000	B

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정비계획('03년 이후)				우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모(㎡)		규모(㎡)	정비내용	소요예산
함석원가옥 (함세균)	안채	목조	기와	54.68		54.68	기와고르기	4.100	D
	행랑채	목조	스레트	12.96		12.96	기와고르기	9.800	D
	화장실	목조	스레트	18.00		18.00	초가이엉잇기
	창고	블럭	스레트	11.20		11.20	보수	20.000	C
	기타		뒤란정비				장독대석촉정비	15.000	C
함정균가옥	안채	목조	기와	90.56		90.56	기와고르기	6.800	C
	행랑채	목조	기와	32.19		32.19	기와고르기	2.500	C
	헛간채	벽돌	스레트	18.0		18.0	초가이엉잇기
	기타		뒤란정비				장독대뒤란정비	15.000	D
고성군 (함석영)	안채	목조	기와	83.74		83.74	기와고르기	6.300	D
	행랑채	목조	기와	29.47		29.47	기와고르기	2.300	D
	고방채	목조	스레트	11.69		11.69	초가이엉잇기
	욕탕	목조	스레트	6.03		6.03	보수
	창고	목조	초가	33.01		33.01	초가이엉잇기
	기타		뒤란정비				장독대석축정비	15,000	C
함탁영가옥	안채	목조	기와	68.15		68.15	기와고르기	5.200	D
	광채	목조	초가	5.54		5.54	초강엉잇기
	변소	블럭	스라브	5.75		5.75	목조채축초가	10.400	A
	기타		뒤란정비				석축장독대정비	15.000	D
함문식가옥 (황성랑)	안채	목조	와가	61.36	61.36		기와고르기	4.600	E
	행랑채	목조	와가	21.45	21.45		기와고르기	1.600	E
	고방채	목조	처가	18.90	18.90		초가이엉잇기
	창고변소	목조	초가	18.00	18.00		초가이엉잇기
	기타		뒤란정비	1식	1식		장독대정비	15.000	C
함병식가옥	안채	목조	와가	64.14	64.14		기와고르기	4.900	E
	창고	목조	스레트	18.00	18.00		초가이엉잇기
	변소창고	목조	스레트	11.58	11.58		초가이엉잇기
	기타		뒤란정비	1식	1식		장독대뒤란정비	15.000	C

(단위 : 천원)

가옥명	현황				정비계획('03년 이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모(㎡)	규모(㎡)	정비내용	소요예산
함형찬가옥	안채	목조	와가	85.52	85.52	기와고르기	6.400	B
	고방채	목조	와가	22.58	22.58	기와고르기	1.700	D
	창고	벽돌	스레트	30.25	30.25	아전개축	54.713	A
	변소	벽돌	스라브	6.25	6.25	목조개축초가	11.304	A
	기타		뒤란정비			장옥대석축정비	15.000	B
함호근가옥	안채	목조	몇일	46.39	46.39	초가이엉잇기
	창고	목조	함석	26.69	26.69	목조개축초가	46.274	A
	변소	벽돌	스라브	2.48	2.48	목조개축초가	4.486	A
함대균가옥	안채	목조	와가	74.94	74.94	기와고르기	5.600	C
	행랑채	목조	와가	29.05	29.05	목조개축초가	52.543	B
	헛간채	목조	스레트	29.05	29.05	초가이엉잇기
	변소	벽돌	스레트	5.75	5.75	초가이엉잇기	10.400		A
함전평가옥	안채	목조	와가	76.80	76.80	기와고르기	5.800		C
	창고	목조	스레트	15.14	15.14	목조개축초가	27.384		C
	변소	벽돌	스라브	5.75	5.75	목조개축초가			B
	기타		뒤란정비			석축장독대정비	15.000		B
박두현가옥	안채	목조	와가	53.88	53.88	기와고르기	4,040		E
	외양간	블럭	스레트	22.6	21.60	목조개축초가
	창고	브럭	스레트	26.4	21.60	목조개축초가	33,800		C
	기타		뒤란정비	1식	1식	장독대.석축정비	15,000		C
효자각	요자각	목조	와가	2동	2동	기와고르기	1,600		B
함범균가옥	안채	목조	와가	58.84	58.84	기와고르기	4.500		D
	창고	벽돌	스레트	19.80	19.80	목조개축초가	35,812		A
	변소	벽돌	스라브	5.75	5.75	목조개축초가	10,400		B
	건조기			1기	1기	이전			D
마을회관	마을회관	목조	와가	198	198	기와고르기	14.900	D
김기학가옥 (김종석)	안채	벽돌	스레트	43.68	43.68	목조개축초가	79.000	B
	창고	블럭	스레트	31.00	31.00	목조개축초가	56.000	B
	창고	블럭	스레트	11.358	11.358	목조개축초가	21.000	B

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정비계획('03년 이후)				우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모(㎡)		규모(㎡)	정비내용	소요예산
최현철	안채	목조	스레트	43.71		43.71	목조개축초가	79.000	B
	부속채	시멘트	스레트	12.48		12.48	목조개축초가	23.000	B
	가게	시멘트	스레트	10.16		10.16	목조개축초가	18.000	B
	기타		뒤란정비	1식		1식	장독대정비	15.00	B
최무성가옥	안채	목조	와가	65.50		65.50	기와고르기	5.000	D
	고방채	목조	함석	19.50		19.50	개축초가	35.000	A
	창고	목조	시멘트몰탈	36.96		36.96	개축초가	67.000	B
	외양간	벽돌	시멘트	38.40		38.40	개축초가	40.000	E
	창고변소	벽됼	시멭느	19.94		19.94	개축초가	36.000	E
	기타		뒤란정비	1식		1식	장독대등정비	15.000	C
전윤덕가옥	안채	목조	와가	71.82		71.82	기와고르기	5.400	D
	행랑채	목조	초가	34.02		34.02	초가이엉잇기
	창고변소	벽돌	스라브	21.48		21.48	목조개축초가	38.000	A
	기타		뒤란정비				장독대등정비	15.000	C
최대희가옥	안채	목조	와가	85.94		85.94	기와고르기	6.500	E
	고방채	블럭	스레트	14.9		14.9	목조개축초가
	창고	블럭	스레트	21.59		21.59	목조개축초가	39.000	B
	기타	블럭	스레트	1식		1식	장독대정비	15.000	B
김갑연가옥	안채	목조	와가	54.0		54.0	기와고르기	4.050	E
	창고	블럭	스레트	5.75		5.75	목조개축초가	10.000	B
	기타		뒤란정비	1식		1식	장독대정비	15.000	B
윤종덕가옥 (최무수)	안채	조적	시멘트몰탈	43.74		43.74	목조개축초가	79.000	B
	창고	블럭	시멘트몰탈	11.1		11.1	목조개축초가	20.000	B
	농기구창고	블럭	스레트	15.20		15.20	목조개축초가	15.000	C
	기타		뒤란정비				장독대정비	15.000	B
함석주가옥 (최용일)	안채	목조	암기와	52.0		52.0	재축초가	94.000	B
	창고	블럭	스레트	9.03		9.03	목조개축초가	16.000	B
	창고	블럭	뒤란정비	26.24		26.24	목조개축초가	47.000	B
	기타		스레트				장독대뒤란정비	15.000	B
함성식가옥	안채	목조	스레트	64.30		64.30	기와고르기	4.900	E
	창고	블럭	스레트	5.75		5.75	초가이엉잇기	10.000	A
	기타		뒤란정비	1식		1식	장독대정비	15.000	B
최민가옥	안채	목조	와가	60.19		60.19	기와고르기	4.500	D
	잠사	목조	초가	21.60		21.60	목재개축초가	39.000	C
	창고	벽돌	스레트	10.46		10.46	초가이엉잇기
	변소	벽돌	스라브	3.19		3.19	목재개축초가	5.760	A

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정비계획('03년 이후)			우선 순위
		구조	특기사항	규모(㎡)	규모(㎡)	정비내용	소요예산
함형산가옥	안채	목조	초가	38.22	38.22	목재개축초가
	외양간	블럭	스레트	24.64	24.64	목재개축초가
	창고	블럭	스레트	21.30	21.30	목재개축초기	38.500	B
	기타		뒤란정비	1식	1식	장독대정비	15.000	B
함승본가옥	안채	목조	와가	53.50	53.50	기와고르기	4.100	A
	고방채	목조	와가	18.20	18.20	기와고르기	1.400	E
	외양간․변소	목조	스레트	15.50	15.50	목재개축초가	22.600	A
	잠사	블럭	스레트	22.63	22.63	목재개축초가	40.900	D
	건조기		건조기			이전
방앗간	방앗간	목조	함석	80.30	80.30	보수	1.300	A
함성균가옥	안채	목조	초가	53.28	53.28	초가이엉잇기
	창고	벽돌	스레트	18.00	18.00	초가이엉잇기
	변소	벽돌	스라브	5.75	5.75	목재개축초가	10.000	B
	기타		뒤란정비	1식	1식	장독대정비	15.000	B
송원봉가옥 (송월백)	안채	목조	초가	55.20	55.20	초가이엉잇기
	창고․변소	목조	초가	9.31	9.31	초가이엉잇기
	기타		뒤란정비	1식	1식	장독대정비	15.000	E
함형필가옥	안채	목조	와가	51.10	51.10	기와고르기	3.800	E
	창고	목조	블럭스레트	26.74	26.74	목재개축초가	48.000	B
	기타		장독대정비	1식	1식	뒤란정독대정비	15.000	B
방앗간	방앗간	목조	함석	84.25	84.25	함석지붕보수
함형준가옥 (함계식)	안채	목조	스라브	45.68	45.68	목조개축초가	82.600	B
	창고	블럭	스레트	29.92	29.92	목조개축초가	54.100	B
	기타		뒤란정비	1식	1식	장독대등설치	15.000	B
신춘매가옥	안채	목조	초가	49.86	49.86	초가이엉이기
	변소	목조	초가	5.75	5.75	초가이엉잇기
	기타		뒤란정비	1식	1식	장독대등설치	15.000	E
함치균가옥	안채	목조	판석	45.57	45.57	기와고르기
	기타		뒤란정비			장독대등정비	15.000	B
	창고1	블럭	tm레트	19.72	19.72	목조개축초가	35.600	A
	창고2	블럭	스레트	11.52	11.52	초가이엉잇기	3,420	E
	창고3	블럭	스레트	13.92	13.92	목조개축초가	25.000	B
함상균가옥	안채	목조	스레트	47.53	47.53	목조개축초가	85.900	B
	창고	블럭	스레트	27.13	27.13	목조개축초가	49.000	B
	변소	블럭	스레트	5.75	5.75	목조개축초가	10.000	B
김세준가옥	안채	목조	와가	53.63	53.63	기와고르기	4.100	E
	창고1	조립식		24.69	24.69	목조개축초가	44.700	C
	창고2	콘테이너		3동	3동
	창고3	창고		7.56	7.56	목조개축초가	13.600	C

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정비계획('03년 이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모(㎡)	규모(㎡)	정비내용	소요예산
함호식가옥	안채	목조	와가	80.05	80.05	기와기르기	6.100	D
	고방채	목조	스레트	20.49	20.49	목조개축초가	37.000	A
	창고	블럭	스레트	8.86	8.86	목조개축초가	16.000	C
	변소	블럭	스라브	5.75	5.75	목조개축초가	10.000	A
전인택가옥	안채	목조	스레트	47.0	47.0	목조개축초가	85.000	B
	외양간	블럭	스레트	19.2	19.2	목조개축초가	20.800	B
	변소	블럭	슬트	5.75	5.75	목조개축초가	10.000	B
	기타		뒤란정비	1식	1식	장독대등정비	15.000	B
최창손가옥	안채	목조	와가	79.10	79.10	기와고르기	6.000	E
	창고	블럭	스레트	9.03	9.03	목조개축초가	16.300	A
	참사	블럭	스레트	46.9	46.9	목조개축초가	84.800	D
	창고	블럭	스레트	11.93	11.93	목조개축초가	21.600	A
	기타		뒤란정비	1식	1식	장독대등정비	15.000	C
한경자가옥	안채	목조	와가	53.92	53.92	기와고르기	4.100	C
	광채	목조	초가	16.10	16.10	초가이엉잇기
	창고	목조	초가	20.31	20.31	초가이엉잇기
	기타		뒤란정비			장독대배수로정비	15.000	C
고성군가옥 (박선종)	안채	목조	와가	58.06	58.06	기와고르기	4.400	B
	행랑채	목조	초가	18.5	18.5	초가이엉잇기
	변소	멸실		9.25	9.25	개축	16.700	B
최종복가옥	안채	목조	초가	38.86	38.86	초가이엉잇기
	고방채	목조	초가	7.99	7.99	초가이엉잇기
	창고	목조	초가	11.86	11.86	초가이엉잇기
	기타		뒤란정비			뒤란정비	15.000	B
고성군 (이금남)	안채	목조	초가	38.67	38.67	초가이엉잇기
	창고	블럭	스레트	11.52	11.52	초가이엉잇기
최성희가옥	안채	조적조	스레트	35.28	35.28	목조개축초가	63.800	A
	창고	블럭	스레트	5.75	5.75	목조개축초가	10.000	B
교회사택	안채	조적조	스레트	31.047	31.047	목조개축초가	56.100	C
	부속채	조적조	스레트	31.047	31.047	목조개축초가	56.100	C
	교회	조적조	스레트	110	110	시멘트기와	198.950	D

○ 담장보수, 초가이엉잇기

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정비계획('03년 이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (동/식)	규모 (동/식)	정비내용	소요예산
함용균가옥	담장	돌담	뒷면유실	1식	1식	돌담보수	30,600	A
	부속사	목조	초가2동	29.25	29.25	초가이엉잇기	3,482	B.C
김유집가옥	부속사	목조	초가	5.87	5.75	초가이엉잇기	3,482	B
함형진가옥	담장	흙담	일부훼손	1식	1식	보수	45,900	A
	부속사	목조	초가2동	27.48	16.13	초가이엉잇기	14,650	A
함형갑가옥	담장	돌담	부분훼손	1식	1식	보수	39,780	A
	부속사	목조	초가1동	19.04	21.60	초가이엉잇기	13,080	A
함형찬가옥	담장	돌담	부분훼손	1식	1식	보수	45,900	A
	부속사	목조	초가2동	36.25	27.35	초가이엉잇기	16,562	B
함호근가옥	담장	흙담	멸실	1식	1식	보수	45,000	A
	안채	목조	초가1동	46.39	46.39	초가이엉잇기	10,598	A.B
	부속사	목조	초가2동	29.11	27.35	초가이엉잇기	16,562
함대균가옥	부속사	목조	초가3동	46.32	37.61	초가이엉잇기	22,780	A.B.C
							10,598
							16,562
박두현가옥	담장	벽돌	벽돌	1식	1식	토담개축	30,600	C
	부속사	목조	초가 2동	49	43.20	초가이엉잇기	26,160	B.C
함범균가옥	담장	흙담	부분훼손	1식	1식	보수	34,425	A
	부속사	목조	초가2동	24.06	27.35	초가이엉잇기	16,562	A.B
함탁영가옥	부속사	목조	초가 2동	11.08	11.08	초가이엉잇기	6,964	A
전윤덕가옥	부속사	목조	초가2동	27.23	27.23	초가이엉잇기	26,000	A.B
최민희가옥	담장	벽돌	벽돌	1식	1식	토탐개축	34,425	B
	부속사	목조	초가2동	24.79	27.35	초가이엉잇기	16,562	A.E
함성식가옥	부속사	목조	초가	24.64	21.60	초가이엉잇기	13,080	B
	담장	돌담	부분훼손	1식	1식	부분보수	30,600	B

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정비계획('03년 이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (동/식)	규모 (동/식)	정비내용	소요예산
김갑연가옥	담장	흙담	부분훼손	1식	1식	보수	26,775	B
	부속사	목조	초가 1동	10.26	10.26	초가이엉잇기	6,213	B
윤종덕가옥	안채	목조	초가1동	43.74	43.74	초가이엉잇기	26,489	C
	부속사	목조	초가1동	24.36	21.60	초가이엉잇기	13,080	C
	부속사	목조	초가2동	26.3	26.3	초가이엉잇기	6,213	B.D
	담장	흙담	부분훼손	1식	1식	보수	34,425	B
함석주가옥	안채	목조	초가1동	52.0	52.0	초가이엉잇기	31,491	C
	부속사	목조	초가2동	35.27	31.86	초가이엉잇기	19,293	C
	담장	흙담	부분훼손	1시	1식	보수	34,425	B
함형산가옥	담장	벽돌	벽돌	1식	1식	토담개축	30,600	B
	부속사	목조	초가1동	24.64	21.60	초가이엉잇기	13,080	C
함승본가옥	부속사	목조	초가2동	38.03	43.20	초가이엉잇기	26,160	A.E
	담장	흙담	부분훼손	1식	1식	보수	34,425	A
함성균가옥	안채	목조	초가1동	53.28	53.28	초가이엉잇기	12,172	A
	부속사	목조	초가2동	35.39	27.35	초가이엉잇기	13,080	C
함형필가옥	부속사	목조	초가1동	34.1	21.60	초가이엉잇기	16,562	C
함형준가옥	담장	흙담	부분훼손	1식	1식	보수	30,600	A
	안채	목조	초가	45.68	45.68	초가이엉잇기	27,664	C
	부속사	목조	초가	13.97	10.26	초가이엉잇기	6,213	C
함호식가옥	담장	돌담	부분훼손	1식	1식	보수	35,190	A
	부속사	목조	초가1동	13.97	10.26	초가이엉잇기	6,213	B
	부속사	목조	초가2동	14.61	14.61	초가이엉잇기	8,850	C
함치균가옥	부속채	목조	초가3동	35.16	35.16	초가이엉잇기	8,030	B.C
최창손가옥	잠사	목조	초가1동	46.9	46.9	초가이엉잇기	28,403	D
	부속채	목조	초가2동	20.52	20.52	초가이엉잇기	12,426	B
	담장	돌담	부분훼손	1식	1식	부분보수	30,600	A
김기학가옥	담장	블럭	블럭	1식	1식	토담개축	39,780	B
	안채	목조	초가1동	43.68	43.68	초가이엉잇기	26,453	C
	부속사	목조	초가1동	31.00	21.60	초가이엉잇기	13,080	C
	부속사	목조	초가1동	11.35	10.26	초가이엉잇기	6213	C
최현철가옥	안채	목조	초가1동	43.71	43.71	초가이엉잇기	26,471	C
	부속사	목조	초가2동	12.48	21.26	초가이엉잇기	13,080	C

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정비계획('03년 이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (동/식)	규모 (동/식)	정비내용	소요예산
최무성가옥	우사	철골조	스레트	2동	2동	적정장소 이전	60,000	E
	부속사	목조	초가1동	19.50	19.50	초가이엉잇기	13,080	A
	부속사	목조	초가2동	36.96	36.96	초가이엉잇기	22,380	C
	담장	흙담	부분훼손	1식	1식	보수	34,425	A
함상균가옥	담장	흙담	부분훼손	1식	1식	보수	38,250	C
	안채	목조	초가1동	47.53	47.53	초가이엉잇기	28,784	C
	부속사	목조	초가2동	32.88	32.88	초가이엉잇기	19,900	C
김세준가옥	부속사	콘데이	3동
	부속사	목조	초가2동	24.69	21.60	초가이엉잇기	13,080	B
전인택가옥	담장	토담	부분훼손	1식	1식	보수	34,425	B
	안채	목조	초가1동	47	47	초가이엉잇기	28,463	B
	부속사	목조	초가1동	4.16	5.75	초가이엉잇기	3,482	C
고성군가옥	안채	목조	초가1동	58.06	58.06	초가이엉잇기	35,161	A
	부속채	목조	초가4동	68.73	68.73	초가이엉잇기	15,700	B
최성희가옥	안채	목조	초가1동	35.28	35.28	초가이엉잇기	26,453	B
	부속사	목조	초가1동	31.00	10.26	초가이엉잇기	13,080	B
교회(장석근)	안채	목조	초가1동	31.04	31.04	초가이엉잇기	18,798	C
	부속사	목조	초가1동	20.48	20.48	초가이엉잇기	12,403	C
이수업가옥	안채	목조	초가 1동	25.68	25.68	초가이엉잇기	3,910	A
	부속사	목조	초가2동	11.5	11.5	초가이엉잇기	1,751	A
함형율가옥	안채	목조	초가 1동	37.92	37.92	초가이엉잇기	8,660	A
	부속사	목조	초가1동	11.52	11.52	초가이엉잇기	2,630	A
김세정가옥	안채	목조	초가 2동	67.93	67.93	초가이엉잇기	10,346	A
	부속사	목조	초가1동	5.75	5.75	초가이엉잇기	1,310	A
함석원가옥	부속사	목조	초가 1동	21.60	18.00	초가이엉잇기	3,290	B
	부속사	목조	초가 1동	21.60	18.00	초가이엉잇기	2,560	D
함정균가옥	부속사	목조	초가 1동	16.01	16.01	초가이엉잇기	2,438	B
함전평가옥	부속사	목조	초가 2동	20.89	20.89	초가이엉잇기	3.660	B.C

(단위 : 천원)

가옥명	현 황				정비계획('03년이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (동/식)	규모 (동/식)	정비내용	소요예산
함문식가옥	부속사	목조	초가 2동	27.35	27.35	초가이엉잇기	4,165	B
함병식가옥	부속사	목조	초가 2동	43.20	43.20	초가이엉잇기	6,579	B
송월봉가옥	안 채	목조	초가 1동	55.20	55.20	초가이엉잇기	12,610	A
	부속사	목조	초가1동	18.00	18.00	초가이엉잇기	4,110	A
신춘매가옥	안 채	목조	초가 1동	49,86	49,86	초가이엉잇기	11,390	A
	부속사	목조	초가1동	5.75	5.75	초가이엉잇기	1,310	A
한경자가옥	부속사	목조	초가 2동	37.7	37.7	초가이엉잇기	5,742	A
고성군가옥	부속사	목조	초가 1동	18.5	18.5	초가이엉잇기	2,818	A
고성군가옥	안 채	목조	초가 1동	38.67	38.67	초가이엉잇기	8,830	A
	부속사	목조	초가1동	11.52	11.52	초가이어잇기	2,630	A
최종복가옥	안채	목조	초가 1동	38.86	38.86	초가이엉잇기	8,880	A
	부속사	목조	초가2동	19.85	19.85	초가이엉잇기	4,530	A
최대희가옥	부속사	목조	초가2동	36.20	32.68	초가이엉잇기	7,470	B.C

※ 우선순위는 퇴락 및 변형 유지정도에 따라 “A, B, C, D, E" 등급으로 분류함

- 사업추진년도 : A등급(‘03～’04), B등급(‘05～’06), C등급(‘07～’08), D등급(‘09～’10), E등급(‘11～’12)으로 추진함.

- 예산사정 등으로 계획년도에 사업물량을 완료하지 못하는 경우 다음연도로 순연

아산 외암(牙山 外巖) 마을

Ⅰ. 문화재 현황

1. 지 정 별 : 중요민속자료 제236호(2000. 1. 7 지정)

2. 위    치 : 충청남도 아산시 송악면 외암리

3. 연혁 및 특징

○ 약 500년전 강씨, 육씨 등이 정착하여 부락을 형성하였고 400여년전에 예안이씨 일가가 이주하여 집성촌을 형성

○ 1998. 8. 18 전통건조물보존지구 제2호로 지정

4. 일반현황(2003. 2. 28. 현재)

아산외암마을

□ 지정면적 : 207,847㎡(62,873평)

□ 가구(호) : 54세대

□ 인구 : 177명(남 103, 여74)

□ 건물현황

(단위 : 동)

계	와가	초가	너와	기타
223	46	81	2	94

□ 개별문화재 지정현황

○ 총괄

(단위 : 건)

계	국보	보물	사적	중요민속자료	지방무형문화재
3				2	1

○ 세부내역

지정별 및지정일	문화재명	수량	소재지	비고
중민 195호(‘84.12.24)	참판택	6	충남 아산시 송악면
중민 233호(‘98. 1. 5)	건재고댁	6	충남 아산시 송악면
무형 11호(‘90.12.31)	연엽주	1	충남 아산시 송악면

Ⅱ. 정비실적

○ 기    간 : ‘84～2002년

○ 사업비 : 7,551백만원(국비 4,376. 지방비 3,175)

○ 사업내용

- 한와가 보수 23동, 초가보수 75동, 너와집 보수 2동

- 화장실 신축 1동, 마을안길 정비 2,000m, 마을회관 건립 1동

Ⅲ. 사업추진계획

1. 기본방침

◦ 사업추진은 ①문화재원형보존 ②마을공동시설 ③ 마을기반시설 ④관람객 편의시설 ⑤관광시설 사업으로 구분하여 연차계획으로 추진함

2. 사업개요

□ 추진기간 : 2003 ～ 1012년(10개년)

□ 총사업비 : 37,162백만원 (국비 24,077 지방비 13,085)

□ 사업내용

◦ 문화재원형정비 : 변형․퇴락가옥 보수, 초가이엉잇기, 지정문화재 보수

◦ 마을공동시설정비 : 농기계보관창고 건립, 마을회관 건립, 주민공용주차장 조성, 공동작업장 및 창고 건립 등

◦ 마을기반시설정비 : 마을안길 보수, 오․폐수 정화시설 설치, 전기․통신시설 지중화, 소화시설 설치 등

◦ 관람객편의시설 설치 : 공중화장실 설치, 관람객주차장 설치, 기타 편의시설 등

◦ 관광시설 조성 : 관광단지․집단상가 조성, 종합주차장 설치 등

3. 세부추진계획

가. 문화재 원형보존

사업대상
	◦ 변형․퇴락가옥 정비 61가옥, 화장실 정비 18개소, 대문정비 8개소, 부속사 정비 57동. 초가이엉잇기 연 90～130동 ◦ 지정문화재 보수 2가옥, 화장실 정비 18개소, 대문정비 8개소,

추진방향
	◦ 기존 가옥 보수정비는 퇴락 및 원형유지 정도에 따라 분류ㆍ정비 ◦ 개별 문화재로 지정된 가옥은 엄격한 원형보존차원에서 보수ㆍ정비 ◦ 비지정 가옥의 외부는 전통양식(가옥형태, 지붕, 담장)을 유지 - 내부는 「가옥내 주민편의시설 설치기준」(‘04. 2.28) 적용 ◦ 가옥 및 담장보수공사 등 사업추진시 설계․시공과정 등에 소유자․지역주민 등이 원형고증에 참여할 수 있도록 함 ◦ 마을내 무너진 돌담은 마을 인근 지역에서 채취하여 원형대로 보수하고 변형된 담장은 복원함 ◦ 장기적으로 방치되는 공가는 원형보존을 원칙으로 하여 매입 또는 소유자와 협의, 활용방안 강구

세부사업 추진계획

변형․퇴락가옥 보수(‘03～’12)

◦ 소요예산 : 3,486백만원(국 2,440, 지 1,046)

◦ 사업내용 : 퇴락가옥 보수, 변형가옥 원형․전통양식 복원

◦ 사업물량 : 43동

담장보수(‘03～’12)

◦ 소요예산 : 150백만원(국 105, 지 45)

◦ 사업내용 : 퇴락․변형 담장 원형보수 및 복원

◦ 사업물량 : 3,000m

◦ 사업추진 : 지역전문가의 자문을 받아 마을의 전통적인 담장형태, 높이, 곡선 등이 나타나도록 정비

초가이엉잇기 및 토지매입(‘03～’12)

◦ 소요예산 : 2,228백만원(국 1,560, 지 668)

◦ 사업내용 : 이엉잇기 볏짚생산 토지매입(428백만원) 및 이엉잇기 130동(1,800백만원, 향후 복원예정 초가 포함)

◦ 사업추진 : 현행 연간 1회 일괄 이엉잇기에서 점차적으로 연중 수시 이엉잇기 체제로 전환

◦ 볏짚확보방안

- 보존회 및 인근지역 농가와 협의하여 계약재배를 통해 볏짚의 안정적 확보방안 마련

- 마을내 및 인근 토지매입 가능지역을 매입, 볏짚 생산과 마을 체험프로그램에 활용

- 여분의 비축볏짚을 확보하여 긴급보수 필요시 사용하고, 전통적 방법의 보관방법을 사용하여 체험프로그램 소재로 활용

◦ 이엉잇기 기능인력 확보

- 보존회와 협의, 마을내 이엉잇기 기능을 보유한 기능인에 의한 마을주민 기능전수 기회 제공

․이엉잇기 기능을 지방무형문화재로 지정하는 방안 추진

기타 가옥정비(‘03～’12)

◦ 소요예산 : 1,416백만원(국 991, 지 555)

◦ 사업내용 : 가옥내 변형․퇴락 화장실․대문․부속사․마루․차양 정비 및 주택내 설치물함 차페시설

◦ 사업물량 : 화장실 18개소, 대문 8개소, 부속사 57동, 마루 25동, 차양 7개소, 설치물함 차폐시설 200개

공가관리(‘03～'12)

◦ 소요예산 : 750백만원(국 525, 지 225)

◦ 사업내용 : 5가구

- 매입 또는 소유자와 협의, 공가를 전통문화체험공간으로 활용

※ 공가현황 및 관리계획

가옥명	구조	규모 (㎡)	관리계획
이효숙 가옥(1)	목조 한식 와가 및 초가	197	소유자 관리(관리인 고용)
이효숙 가옥 (2)	목조 한식 초가	81	소유자 관리(관리인 고용)
김영태 가옥	토벽 목조 초가	67	소유자 관리(관리인 고용)
이남직 가옥	목조 한식 초가 슬레이트(화장실)	98	마을 청년회 위탁관리
이준창 가옥	목조 한식 와가 및 초가	114	소유자에게 관리토록 권고
장윤환 가옥	목조 시멘트기와(안채) 시멘트블럭 시멘트기와(부속채)	64	매입후 공개가옥으로 활용
옛 새마을회관 및 창고	시멘트블럭 슬레이트	138	철거예정
김광겸 가옥	목조 한식 와가	124	보수후 소유자 관리예정

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
문화재원형보존	퇴락ㆍ변형 가옥 정비	43동	계	3,486	2,166	795	696	166	166	343	1,320	343	71	72	417	417
			국비	2,440	1,516	557	487	116	116	240	924	240	50	50	292	292
			지방비	1,046	650	238	209	50	50	103	396	103	21	22	125	125
	담장보수	3,000m	계	150	75	15	15	15	15	15	75	15	15	15	15	15
			국비	105	52.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	52.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
			지방비	45	22.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	22.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	초가이엉잇기 및 토지매입	90동 →130동	계	2,200	1,220	480	170	180	190	200	1,000	200	200	200	200	200
			국비	1,554	854	336	119	126	133	140	700	140	140	140	140	140
			지방비	666	336	144	51	54	57	60	300	60	60	60	60	60
	공가관리	5가구	계	750	450	150		150		150	300			150		150
			국비	525	315	105		105		105	210			105		105
			지방비	225	135	45		45		45	90			45		45
	화장실 정비	18개소	계	193	138	45	44	16	16	17	55	16	12	12	7	8
			국비	137	99	33	32	11	11	12	38	12	8	8	5	5
			지방비	56	39	12	12	5	5	5	17	4	4	4	2	3
	기타 가옥정비 (5개사업)	대문,마루,부속채,차양,가옥내 시설물 차폐시설	계	1,223	998	262	338	129	126	143	225	98	29	28	35	35
			국비	854	697	183	236	90	88	100	157	68	20	20	25	24
			지방비	369	301	79	102	39	38	43	68	30	9	8	10	11
소 계		10개 사업	계	8,022	5,047	1,747	1,263	656	513	868	2,975	672	327	477	674	825
			국비	5,651	3,534	1,225	884	459	358	608	2,081	470	229	334	472	576
			지방비	2,407	1,513	522	379	197	155	260	894	202	98	143	202	249

※ 가옥별 현황 및 정비계획 : 별첨

나. 마을공동시설 정비

사업대상
	◦ 농기계 보관창고 건립, 집단축사시설 건립, 서당복원 등

추진방향
	◦ 주민공동 시설물은 향후의 이용도․주민의 편리성 등을 종합적으로 고려하여 필요시 마을 경관을 해치지 않는 범위 내에서 설치 - 시설 설치시 「마을내 시설 설치기준」(‘04. 2.28)을 적용

세부사업 추진계획

농기계 보관창고(‘08~'09)

◦ 소요예산 : 3,600백만원(국 2,520, 지 1,080)

◦ 규    모 : 부지 500평, 연건평 300평

◦ 위    치 : 송악면 외암리 (추후 협의)

◦ 형    태 : 전통 한식와가(부지위치에 따라 현대식 건물 등으로 조정)

- 위치조정, 조경 등을 통해 차폐하여 마을경관을 해치지 않도록 함

집단 축사시설(‘05, ’09)

◦ 소요예산 : 1,000백만원(국 700, 지 300)

- 건물이전비 700백만원, 집단폐수처리시설 300백만원, 부지는 개인부담

◦ 규    모 : 부지 500평, 연건평 500평

- 건물동수를 나누어서 한 동의 규모가 크지 않게 조정

◦ 위    치 : 추후 결정

서당복원<백산처사>(‘11년)

◦ 소요예산 : 330백만원(국 213, 지 99)

◦ 규    모 : 원위치에 당초 크기를 고려하여 형태와 규모 결정

◦ 위    치 : 당초 건물 소재위치

◦ 활    용 : 서당 등 체험학습장으로 활용

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
마을공동시설	농기계 보관창고	토지매입 500평 건물신축 300평	계	3,600							3,600	1,500	2,100
			국비	2,520							2,520	1,050	1,470
			지방비	1,080							1,080	450	630
	축사집단 시설	건물신축 500평	계	1,000	500			500			500		500
			국비	700	350			350			350		350
			지방비	300	150			150			150		150
	서당 (백산처사) 복원	부지매입 300평 건물보수 ․신축 30평	계	330							330				330
			국비	231							321				321
			지방비	99							99				99
소 계		3개 사업	계	4,930	500			500			4,430	1,500	2,600		330
			국비	3,451	350			350			3,101	1,050	1,800		321
			지방비	1,479	150			150			1,329	450	780		99

다. 마을기반시설 정비

사업대상
	◦ 마을안길포장, 마을우회도로 개설, 우․오수관로매설, 소화전 설치, 교량개량, 공동구 설치, 상수도시설, 마을입구 전선 지중화사업 등

추진방향		「마을내 시설 설치기준」(2004. 3. 2) 적용
	◦ 도로와 교량은 경관에 어울리고, 주민과 관람객의 이용이 편리하게 정비 ◦ 우ㆍ오수관로는 분리, 오수관로는 지중화하여 정화시설로 연결 ◦ 전기, 통신, 소방, 급․배수시설, 상하수도 등 지하 매설이 가능한 시설은 마을경관 유지를 위해 공동구 등을 설치, 지중화 함 ◦ 소화시설은 타 시설물에 매입하는 방법 등을 활용, 경관에 어울리게 정비 ◦ 교량개량공사는 고증을 받아 전통기법 및 양식으로 축조하되 유수에 지장이 없는 구조로 시공

세부사업 추진계획

마을안길 포장(‘11~'12)

◦ 소요예산 : 1,300백만원(국 910, 지 390)

◦ 사업규모 : 포장 5,85a, 측구 456m, 흄관매설 14m

◦ 재    질 : 현재까지 개발된 포장공법 중 마을경관에 가장 잘 어울리는 공법을 활용

오수관로 매설공사(‘05~’06)

◦ 소요예산 : 850백만원(국 595, 지 255)

◦ 사업규모 : D600=700m, D500=2,000m, 오수받이 54개소

◦ 사업추진

- 마을입구․저자거리조성 예정지에서 마을외곽(서남대학교 오수관로)로 연결

소화전 설치(‘06년)

◦ 소요예산 : 1,000백만원(국 700, 지 300)

◦ 사업규모 : 소화전 10개소

※ 현재 송악면 의용소방대에 소방차 1대(중형), 소방관 2～3명이 배치되어 마을내 화재시 1～2분내 화재현장 도착가능

상수도 시설(‘05년)

◦ 소요예산 : 300백만원(국 210, 지방비 90)

◦ 사업규모 : D150=850m, D60=945m, D20=1,200m

교량개량 공사(‘10~’12)

◦ 소요예산 : 1,700백만원(국 1,190, 지 510)

◦ 사업규모 : 기존교량 철거후 신설 4개소, 기존교량 마감재 교체 1개소

◦ 사업추진 : 전통기법에 따른 마을경관에 어울리는 단순한 형태로서

유수에 지장이 없는 구조로 설치

우회도로 개설(‘07~’09)

◦ 사업예산 : 5,130백만원(국 2,565, 지2,565)

- 보상비 2,750백만원, 공사비 2,380백만원

◦ 사업규모 : 토지보상 11,000평, 도로개설 B=17m, L=2,000m

◦ 위    치 : 마을입구에서 저자거리내 주차장 예정지

※ 현재의 마을앞 진입도로는 현상태로 보존(마을 경관 유지)

공동구 설치 (‘10~’11)

◦ 소요예산 : 1,000백만원(국 700, 지 300)

◦ 사업규모 : 2,000m

마을입구 전선 지중화사업 (‘08년)

◦ 소요예산 : 200백만원(국 140, 지 60)

◦ 사업개요 : 1,000m

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
마을기반시설정비	마을안길 포장	투수콘 포장 5.85a	계	1,300							1,300				500	800
			국비	910							910				350	560
			지방비	390							390				150	240
	오수관로 매설	L= 3,500m	계	850	450			450	400
			국비	595	315			315	280
			지방비	255	135			135	120
	소화전 설치	소화전 10개소	계	1,000	1,000				1,000
			국비	700	700				700
			지방비	300	300				300
	교량개량 공사	5개소	계	1,700							1,700			700	500	500
			국비	1,190							1,190			490	350	350
			지방비	510							510			210	150	150

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
	우회도로 개설공사	2,000m	계	5,130	1,375					1,375	3,755	2,380	1,375
			국비	2,565	688					688	1,877	1,190	687
			지방비	2,565	687					687	1,878	1,190	688
	상수도 시설	2,995m	계	300	300			300
			국비	210	210			210
			지방비	90	90			90
	마을입구 전선 지중화	1,000m	계	200							200	200
			국비	140							140	140
			지방비	60							60	60
	공동구 설치	2,000m	계	1,000							1,000			500	500
			국비	700							700			350	350
			지방비	300							300			150	150
소 계		8개 사업	계	11,480	3,525			750	1,400	1,375	7,955	2,580	1,375	1,200	1,500	1,300
			국비	7,010	2,193			525	980	688	4,817	1,330	687	840	1,050	910
			지방비	4,470	1,332			225	420	687	3,138	1,250	688	360	450	390

라. 관람객 편의시설 설치

사업대상
	◦ 마을입구 정자 및 주변 정비, 디딜방아 주변정비, 개천 옆 정자주변 정비 ◦ 정려각 주변 쉼터조성, 마을안길 느티나무 주변정비 및 쉼터조성, 개천옆 느티나무 주변정비 및 쉼터조성 ◦ 가로등 교체 및 시설, 변압기 및 전화단자함 이설 및 차폐시설, 마을 내 관광안내로 공사, 공시청시설공사, 각종 안내판 이전 및 정비 ◦ 전통수 및 초화류 식재

추진방향		「마을내 시설 설치기준」(2004. 3. 2) 적용
	◦ 문화재의 가치가 훼손되지 않도록 친환경적으로 설치 ◦ 사용되지 않거나 멸실된 시설물 중 원형이 확인될 수 있는 것에 대해서는 고증을 거친 후 정비 및 관광자원으로 활용 ◦ 마을내 활용 가능한 공간을 경관에 맞게 정비하여 주민 및 관람객의 휴식공간으로 활용 ◦ 안내판, 가로등 등 관람객 편의시설은 마을 경관과 마을 특성에 맞는 재질과 형태로 제작․설치

세부사업 추진계획

‘03년도 추진사업

마을입구 정자 및 주변정비공사 (‘03년)

- 소요예산 : 50백만원(국 35, 지 15)

- 사업내용 : 반석정 보수, 계단정비, 조경공사

마을안길 느티나무 주변정비 및 쉼터조성공사 (‘03년)

- 소요예산 : 30백만원(국 21, 지 9)

- 사업내용 : 보호수보호시설, 의자설치

변압기 및 전화단자함 이설 및 차폐시설 (‘03년)

- 소요예산 : 100백만원(국 70, 지 30)

- 사업내용 : 변압기 및 전화단자함 차폐 50개소

각종 안내판 이전 및 정비공사 (‘03～’04년)

- 소요예산 : 30백만원(국 21, 지 9)

- 사업내용 : 종합안내판 신설 1개소, 경고판 및 기타 안내판 이전보수 4개소

전통수 및 초화류 식재 (‘03~’12)

◦ 소요예산 : 300백만원(국 210, 지 90)

◦ 사업내용 : 마을경관보호수 식재 1식, 전통화훼류 식재(매년)

◦ 사업추진 : 너무 큰 나무는 응당이 생겨 습도․통풍 등에 문제가 발생하므로 너무 크지 않은 마을 토종수종을 찾아 식재

개천옆 느티나무 주변정비 및 쉼터조성공사 (‘05년)

◦ 소요예산 : 30백만원(국 21, 지 9)

◦ 사업내용 : 관광객 휴식공간조성, 의자설치, 주변정리

◦ 사업추진 : 생육에 지장을 주는 시설물은 철거하고 주변을 넓게 정비하여 장승제 및 느티나무제 행사 및 관람객 휴식공간을 조성

개천 옆 정자주변정비공사 (‘05년)

◦ 소요예산 : 30백만원(국 21, 지 9)

◦ 사업내용 : 정자보수, 조경공사

마을내 관광안내로 시설공사 (‘05년)

◦ 소요예산 : 20백만원(국 14, 지 6)

◦ 사업내용 : 마을내 이정표 45개소

정려각주변 쉼터조성공사 (‘09~’10)

◦ 소요예산 : 600백만원(국 420, 지 180)

◦ 사업내용 : 정려각 보수, 주변 건물 및 토지매입(350평), 조경

가로등 교체 및 시설공사 (‘10년)

◦ 소요예산 : 150백만원(국 105, 지 45)

◦ 사업내용 : 가로등 교체 31개소

◦ 사업추진 : 가능한 담장 속 매입 또는 담장높이 이하로 설치, 노출부위를 최소화 함

디딜방아 주변정비공사 (‘12년)

◦ 소요예산 : 50백만원(국 35, 지 15)

◦ 사업내용 : 벤취설치, 조경

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
관람객편의시설설치	마을입구 반석정 및 주변정비	반석정보수 계단보수 조경공사 1식	계	50	50	50
			국비	35	35	35
			지방비	15	15	15
	디딜방아 주변정비	조경 쉼터조성	계	50							50					50
			국비	35							35					35
			지방비	15							15					15
	정려각 주변 정비	정려각보수 토지매입 : 350평 조경공사	계	600							600		525	75
			국비	420							420		367	53
			지방비	180							180		158	22
	마을안길 느티나무 주변정비	보호수보호 시설	계	30	30	30
			국비	21	21	21
			지방비	9	9	9
	개천옆 느티나무 주변정비	의자설치 주변정리	계	30	30			30
			국비	21	21			21
			지방비	9	9			9
	개천 옆 정자주변 정비	정자보수 조경공사	계	30	30			30
			국비	21	21			21
			지방비	9	9			9
	가로등 교체	가로등 교체 : 31개소	계	150							150			150
			국비	105							105			105
			지방비	45							45			45
	변압기 및 전화단자함 이설 및 차폐시설	차폐시설 : 50개소	계	100	100	100
			국비	70	70	70
			지방비	30	30	30
	마을 관광 안내로시설	안내표지 : 45개소	계	20	20			20
			국비	14	14			14
			지방비	6	6			6
	각종 안내판 이전 및 정비공사	종합안내판신설:1개소 이전보수 : 4개소	계	30	30	20	10
			국비	21	21	14	7
			지방비	9	9	6	3
	전통수 및 초화류 식재	조경수식재 화훼류 식재1식	계	300	200	20	70	70	20	20	100	20	20	20	20	20
			국비	210	140	14	49	49	14	14	70	14	14	14	14	14
			지방비	90	60	6	21	21	6	6	30	6	6	6	6	6
소 계		11개 사업	계	1,480	580	250	80	210	20	20	900	20	545	245	20	70
			국비	1,036	406	175	56	147	14	14	630	14	381	172	14	49
			지방비	444	174	75	24	63	6	6	270	6	164	73	6	21

마. 관광시설 조성

사업대상
	◦ 저자거리 조성, 정미소 부지 및 건물매입 복원, 잔디광장 조성 ◦ 마을안내소 설치, 공중화장실 신축, 종합 주차장 설치, 관리사무소 신축, 등산 및 산책로 조성(3개 코스) ◦ 마을전망대 설치, 마을상징 장승설치(2개소) ◦ 마을입구 현대식 주택 및 부지 매입

추진방향		「마을내 시설 설치기준」(2004. 3. 2) 적용
	◦ 주차장, 관리사무소, 안내소, 전통상가, 관람객용 화장실 등은 마을의 경관을 훼손하지 않는 범위내에서 관람객 이용이 용이하게 집합적으로 설치 ◦ 저자거리, 관광단지내 집단상가는 최대한 민자를 유치하여 조성 ◦ 마을의 경관을 해치는 시설물은 철거․정비 (필요시 매입) ◦ 인근 유적지와 연계되는 산책로 등을 조성하여 관광자원을 다양화 함

세부사업 추진계획

외암소하천 정비 (‘03, ’11년)

◦ 소요예산 : 600백만원(지방비)

◦ 사 업 량 : 하천 호안정비 410m

◦ 사업추진 : 하천정비사업으로 추진

저자거리조성 (‘05~’07)

◦ 소요예산 : 5,000백만원(국 3,500, 지 1,500)

◦ 사업규모 : 부지 15,000평, 건물 20동

◦ 위    치 : 아산시 송악면 역촌리 일원

◦ 활    용 : 조선시대 주막, 객주, 공방, 놀이마당 등 재현

◦ 사업추진 : 계획수립시 마을 보존회 의견 수렴

마을안내소 설치 (‘05년)

◦ 소요예산 : 100백만원(국 70, 지 30)

◦ 사업규모 : 건물 1동 7평

◦ 위    치 : 아산시 송악면 역촌리 주차장 인근

◦ 형    태 : 목조 한와가

종합주차장 설치 (‘10년)

◦ 소요예산 : 1,200백만원

◦ 사업규모 : 4,000평(기존 2,000평, 추가 2,000평)

◦ 위    치 : 아산시 송악면 외암마을 입구

◦ 형    태 : 투수콘 포장 및 조경

공중화장실 신축 (‘04, ’07, ‘11년)

◦ 소요예산 : 1,400백만원(국 980, 지 420)

◦ 사업규모 : 60평(각 20평 3개소)

◦ 위    치 : 주차장 내 1개소, 마을내 2개소

◦ 형    태 : 전통 한식와가 또는 초가

※ 신축 화장실 외 마을내 마을회관, 공가 및 민가 화장실 적극 활용

관리사무소 신축 (‘04년)

◦ 소요예산 : 400백만원(국 280, 지 120)

- 토지매입비 100백만원, 건물 300백만원

◦ 사업규모 : 부지 300평, 건물 40평

◦ 위    치 : 외암마을 입구(주차장 인접지 등 적정위치 별도 협의)

◦ 형 태 : 전통 한식와가

마을상징 장승설치 (‘05년)

◦ 소요예산 : 100백만원(국 70, 지 30)

◦ 사업규모 : 장승 2기, 2개소

◦ 위    치 : 주도로에서 마을로 진입하는 마을입구 도로 부근

◦ 형    태 : 전통 양식의 장승

등산로 및 산책로 조성 (‘05년)

◦ 소요예산 : 300백만원(지방비)

◦ 사업내용 : 등산로 3개 노선 10Km신설

◦ 추진방법 : 임도사업으로 추진

잔디광장 조성 (‘06~’07년)

◦ 소요예산 : 400백만원(지방비)

◦ 사업규모 : 2,000평

◦ 위    치 : 추후 결정(마을 인근)

◦ 용    도 : 관광객 쉼터(주로 단체 관람객)

마을전망시설 설치 (‘08년)

◦ 소요예산 : 500백만원(국 350, 지 150)

◦ 위    치 : 설화산, 면잠산

◦ 사업추진 : 건물이 없는 쉼터 형식으로 조성

마을입구 현대식 주택매입 및 정비 (‘08~’09)

◦ 소요예산 : 850백만원(국 595, 지 255)

- 보상비 750, 건물철거 및 조경공사 100

◦ 사업규모 : 부지 500평, 건물철거

◦ 위    치 : 아산시 송악면 역촌리 마을입구

정미소 보수․복원 (‘09~’10)

◦ 소요예산 : 400백만원(국 280, 지 120)

- 보상비 300, 복원공사비 100

◦ 사업규모 : 부지 200평, 건물 2동

◦ 위    치 : 아산시 송악면 역촌리 마을입구

◦ 사업추진 : 근대 정미소로 복원

- 옛날에 사용하던 발동기는 기회 있을 때 미리 확보 추진

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
관 광 시설 조 성 사 업	저자거리 조성	부지15,000평 건물 20동	계	5,000	5,000			1,000	2,000	2,000
			국비	3,500	3,500			700	1,400	1,400
			지방비	1,500	1,500			300	600	600
	정미소 정비 복원	부지 200평 건물복원 2동	계	400							400		300	100
			국비	280							280		210	70
			지방비	120							120		90	30
	마을입구 현대식 주택매입 및 정비	부지매입 500평 건물철거 1동	계	850							850	750	100
			국비	595							595	525	70
			지방비	255							255	225	30
	마을안내소 설치	건물1동 7평	계	100	100			100
			국비	70	70			70
			지방비	30	30			30
	공중화장실 신축	30평*3개소	계	1,400	1,100		400			700	300				300
			국비	980	770		280			490	210				210
			지방비	420	330		120			210	90				90
	종합주차장 설치	4,000평	계	1,200							1,200			1,200
			국비	840							840			840
			지방비	360							360			360
	관리 사무소 신축	부지300평 건물 40평	계	400	400		400
			국비	280	280		280
			지방비	120	120		120
	잔디광장 조성	2,000평	계	400	400				200	200
			국비
			지방비	400	400				200	200
	등산로 및 산책로 조성	3개소 10Km	계	300	300			300
			국비
			지방비	300	300			300
	마을 전망시설설치	쉼터조성	계	500							500	500
			국비	350							350	350
			지방비	150							150	150

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
	외암 소하천 정비	호안정비 410m	계	600	400	400					200				200
			국비
			지방비	600	400	400					200				200
	마을입구 상징장승 설치	1개소	계	100	150			100
			국비	70	105			70
			지방비	30	45			30
소 계		12개 사업	계	11,250	7,850	400	800	1,500	2,200	2,900	3,450	1,250	400	1,300	500
			국비	6,965	4,725		560	840	1,400	1,890	2,275	875	280	910	210
			지방비	4,285	3,125	400	240	660	800	1,010	1,175	375	120	390	290

자료1		아산외암마을 종합정비 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
문화재원형보존	퇴락ㆍ변형 가옥 정비	43동	계	3,486	2,166	795	696	166	166	343	1,320	343	71	72	417	417
			국비	2,440	1,516	557	487	116	116	240	924	240	50	50	292	292
			지방비	1,046	650	238	209	50	50	103	396	103	21	22	125	125
	담장보수	3,000m	계	150	75	15	15	15	15	15	75	15	15	15	15	15
			국비	105	52.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	52.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
			지방비	45	22.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	22.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	초가이엉잇기 및 토지매입	90동 →130동	계	2,220	1,220	480	170	180	190	200	1,000	200	200	200	200	200
			국비	1,554	854	336	119	126	133	140	700	140	140	140	140	140
			지방비	666	366	144	51	54	57	60	300	60	60	60	60	60
	공가관리	5가구	계	750	450	150		150		150	300			150		150
			국비	525	315	105		105		105	210			105		105
			지방비	225	135	45		45		45	90			45		45
	화장실 정비	18개소	계	193	138	45	44	16	16	17	55	16	12	12	7	8
			국비	137	99	33	32	11	11	12	38	12	8	8	5	5
			지방비	56	39	12	12	5	5	5	17	4	4	4	2	3
	기타 가옥정비 (5개사업)	대문,마루,부속채,차양,가옥내 시설물 차폐시설	계	1,223	998	262	338	129	126	143	225	98	29	28	35	35
			국비	854	697	183	236	90	88	100	157	68	20	20	25	24
			지방비	369	301	79	102	39	38	43	68	30	9	8	10	11
소 계		10개 사업	계	8,022	5,047	1,747	1,263	656	513	868	2,975	672	327	477	674	825
			국비	5,615	3,534	1,225	884	459	358	608	2,081	470	229	334	472	576
			지방비	2,407	1,513	522	379	197	155	260	894	202	98	143	202	249
마을공동시설	농기계 보관창고	토지매입 500평 건물신축 300평	계	3,600							3,600	1,500	2,100
			국비	2,520							2,520	1,050	1,470
			지방비	1,080							1,080	450	630
	축사집단 시설	부지매입 3,000평 건물신축 500평	계	1,000	500			500			500		500
			국비	700	350			350			350		350
			지방비	300	150			150			150		150

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
	서당 (백산처사) 복원	부지매입 300평 건물보수 또는신축 30평	계	330							330				330
			국비	231							231				231
			지방비	99							99				99
소 계		3개 사업	계	4,930	500			500			4,430	1,500	2,600		330
			국비	3,451	350			350			3,101	1,050	1,820		231
			지방비	1,479	150			150			1,329	450	780		99
마을기반시설정비	마을안길 포장	투수콘 포장 5.85a	계	1,300							1,300				500	800
			국비	910							910				350	560
			지방비	390							390				150	240
	오수관로 매설	L= 3,500m	계	850	850			450	400
			국비	595	595			315	280
			지방비	255	255			135	120
	소화전 설치	소화전 10개소	계	1,000	1,000				1,000
			국비	700	700				700
			지방비	300	300				300
	교량개량 공사	5개소	계	1,700							1,700			700	500	500
			국비	1,190							1,190			490	350	350
			지방비	510							510			210	150	150
마을기반시설정비	우회도로 개설공사	2,000m	계	5,130	1,375					1,375	3,755	2,380	1,375
			국비	2,565	688					688	1,877	1,190	687
			지방비	2,565	687					687	1,878	1,190	688
	상수도 시설	2,995m	계	300	300			300
			국비	210	210			210
			지방비	90	90			90
	마을입구 전선 지중화	1,000m	계	200							200	200
			국비	140							140	140
			지방비	60							60	60
	공동구 설치	2,000m	계	1,000							1,000			500	500
			국비	700							700			350	350
			지방비	300							300			150	150
소 계		8개 사업	계	11,480	3.525			750	1,400	1,375	7,955	2,580	1,375	1,200	1,500	1,300
			국비	7,010	2,193			525	980	688	4,817	1,330	687	840	1,050	910
			지방비	4,470	1,332			225	420	687	3,138	1,250	688	360	450	390

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
관람객편의시설설치	마을입구 반석정 및 주변정비 (초정)	반석정 보수 계단보수 조경공사 1식	계	50	50	50
			국비	35	35	35
			지방비	15	15	15
	디딜방아 주변정비	조경 쉼터조성	계	50							50					50
			국비	35							35					35
			지방비	15							15					15
	정려각 주변 정비	정려각 보수 토지매입 : 350평 조경공사	계	600							600		525	75
			국비	420							420		367	53
			지방비	180							180		158	22
	마을안길 느티나무 주변정비	보호수 보호시설	계	30	30	30
			국비	21	21	21
			지방비	9	9	9
	개천옆 느티나무 주변정비	의자설치 주변정리	계	30	30			30
			국비	21	21			21
			지방비	9	9			9
	개천 옆 정자주변 정비	정자보수 조경공사	계	30	30			30
			국비	21	21			21
			지방비	9	9			9
관람객편의시설설치	가로등 교체	가로등 교체 : 31개소	계	150							150			150
			국비	105							105			105
			지방비	45							45			45
	변압기 및 전화단자함 이설 및 차폐시설	차폐시설 : 50개소	계	100	100	100
			국비	70	70	70
			지방비	30	30	30
	마을 관광 안내로시설	안내표지 : 45개소	계	20	20			20
			국비	14	14			14
			지방비	6	6			6

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업 물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
	각종 안내판 이전 및 정비공사	종합안내판신설:1개소 이전보수 : 4개소	계	30	30	20	10
			국비	21	21	14	7
			지방비	9	9	6	3
	전통수 및 초화류 식재	조경수식재 화훼류 식재1식	계	300	200	20	70	70	20	20	100	20	20	20	20	20
			국비	210	140	14	49	49	14	14	70	14	14	14	14	14
			지방비	90	60	6	21	21	6	6	30	6	6	6	6	6
소 계		11개 사업	계	1,480	580	250	80	210	20	20	900	20	545	245	20	70
			국비	1,036	406	175	56	147	14	14	630	14	381	172	14	49
			지방비	444	174	75	24	63	6	6	270	6	164	73	6	21
관광시설조성사업	저자거리 조성	부지15,000평 건물 20동	계	5,000	5,000			1,000	2,000	2,000
			국비	3,500	3,500			700	1,400	1,400
			지방비	1,500	1,500			300	600	600
	정미소 정비 복원	부지 200평 건물복원 2동	계	400							400		300	100
			국비	280							280		210	70
			지방비	120							120		90	30
	마을입구 현대식 주택매입 및 정비	부지매입 500평 건물철거 1동	계	850							850	750	100
			국비	595							595	525	70
			지방비	255							255	225	30
	마을안내소 설치	건물1동7평	계	100	100			100
			국비	70	70			70
			지방비	30	30			30
	공중화장실 신축	30평*3개소	계	1,400	1,100		400			700	300				300
			국비	980	770		280			490	210				210
			지방비	420	330		120			210	90				90
	종합주차장 설치	4,000평	계	1,200							1,200			1,200
			국비	840							840			840
			지방비	360							360			360
관광시설조성사업	관리 사무소 신축	부지300평 건물 40평	계	400	400		400
			국비	280	280		280
			지방비	120	120		120
	잔디광장 조성	2,000평	계	400	400				200	200
			국비
			지방비	400	400				200	200

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업물량	총소요예산		1단계						2단계
					계	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
	등산로 및 산책로 조성	3개소 10Km	계	300	300			300
			국비
			지방비	300	300			300
	마을 전망대 설치	쉼터조성	계	500							500	500
			국비	350							350	350
			지방비	150							150	150
	외암 소하천 정비	호안정비 410m	계	600	400	400					200				200
			국비
			지방비	600	400	400					200				200
	마을입구 상징장승 설치	1개소	계	100	150			100
			국비	70	70			70
			지방비	30	30			30
소 계		12개 사업	계	11,250	7,800	400	800	1,500	2,200	2,900	3,450	1,250	400	1,300	500
			국비	6,965	4,690		560	840	1,400	1,890	2,275	875	280	910	210
			지방비	4,285	3,110	400	240	660	800	1,010	1,175	375	120	390	290
합 계		44개 사업	계	37,162	17,452	2,397	2,143	3,616	4,133	5,163	19,710	6,022	5,247	3,222	3,024	2,195
			국비	24,077	11,173	1,400	1,500	2,321	2,752	3,200	12,904	3,739	3,397	2,256	1,977	1,535
			지방비	13,085	6,279	997	643	1,295	1,381	1,963	6,806	2,283	1,850	966	1,047	660

자료2		가옥별 현황 및 정비계획

가옥명	현 황				정비계획(‘03년이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (㎡)	규모 (㎡)	정비내용	소요예산
이전선가옥	안채	벽돌한와가	보일러 노출	79	7	보일러실 증축	10,000	A
	문간채	목조한와가	지붕퇴락	46	46	지붕해체 보수	90,000	B
	변소	목조 초가	정비완료	12
	창고	목조 초가	정비완료	15
이복만가옥	안채	목조 초가	보일러 노출	63	7	보일러실 증축	10,000	A
	부속채	목조 초가	정비완료	15
	변소	목조 초가	퇴락이심함	5	5	해체 보수	10,000	A
	대문	목조	변형			싸리문 복원	3,000	A
김광태가옥	안채	목조양기와	변형가옥 (퇴락이심함)	58	58	철거후 복원(초가)	87,500	A
	창고	시멘트 양기와	변형가옥 (퇴락이심함)	26	26	철거후 복원(초가)	40,000	A
	축사	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥 (퇴락이심함)	12	12	철거후 복원(초가)	17,500	A
	대문	목조	변형설치			싸리문 복원	3,000	A
신창댁	안채	목조한와가	보일러방치	83	7	보일러실 증축	10,000	A
	문간채	목조 너와	정비완료	31
	창고1	목조 초가	정비완료	13
	창고2	목조 초가	정비완료	12
이자영가옥	안채	목조 초가	보일러방치 비닐덧문설치	45	7	보일러실 증축	10,000	B
	창고	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	5	5	철거후 복원(초가)	6,750	B
이홍직가옥	안채	시멘트벽돌 한와가	변형가옥	76	79	해체후 보수	161,000	A
	문간채	목조한와가	지붕퇴락	50	50	지붕해체 보수	105,000	A
	창고	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	10	3	철거후 복원(초가)	13,500	A
	축사	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	23	7	철거후 복원(초가)	31,500	A

가옥명	현 황				정비계획(‘03년이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (㎡)	규모 (㎡)	정비내용	소요예산
이동현가옥	안채	목조 슬레이트	변형가옥	40	40	해체후 복원(초가)	60,000	B
	사랑채	목조 슬레이트	변형가옥	30	30	해체후 복원(초가)	45,000	B
	변소	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	4	4	철거후 복원(초가)	4,500	B
이효숙가옥 -1	안채	목조한와가	지붕퇴락	83	83	지붕해체 보수	150,000	C
	사랑채	목조한와가	지붕퇴락	66	66	지붕해체 보수	120,000	C
	문간채	목조 초가		33
이효숙가옥 -2	안채	목조 초가	정비완료	66
	부속채	목조 초가	정비완료	25
윤수봉가옥	안채	목조 초가	보일러방치 유리창설치	55	7	보일러실 증축	10,000	A
	문간채	목조 초가	정비완료	60
감찰댁	안채	목조한와가	지붕퇴락	88	88	지붕해체 보수	156,000	A
	가묘	목조한와가	지붕퇴락	12	12	지붕해체 보수	21,000	A
	정자	목조한와가	지붕퇴락	13	13	지붕해체 보수	21,000	A
건재고택 가랍집	안채	목조 초가	정비완료	43
	변소	목조 초가	정비완료	7
건재고택	안채	목조한와가	정비완료	69
	사랑채	목조한와가	정비완료	112
	문간채	목조한와가	보일러 노출	50	14	화장실 및 보일러실 증축	20,000	A
	부속채	목조한와가	정비완료	33
	가묘	목조한와가	정비완료	10
	창고	목조한와가	정비완료	17
	정자1	목조 초가	정비완료	10
	정자2	목조 초가	정비완료	5
최장근가옥	안채	목조 슬레이트	변형가옥	43	43	해체후 복원(초가)	65,000	B
	창고	목조 슬레이트	변형가옥	12	12	해체후 복원(초가)	15,750	B
	변소	목조 슬레이트	변형가옥	10	10	해체후 복원(초가)	13,500	B
김점동가옥	안채	목조한와가	지붕퇴락	43	43	지붕해체 보수	78,000	C
	문간채	목조한와가	지붕퇴락	5	5	지붕해제 보수	9,000	C

가옥명	현황				정비계획(‘03년이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (㎡)	규모 (㎡)	정비내용	소요예산
김영태가옥	안채	목조 초가	정비완료	50
	변소	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	10	7	철거후 복원(초가)	13,500	C
	대문	철망	변형설치			싸리문 복원	3,000	A
성주화가옥	안채	목조한와가	지붕퇴락	43	43	지붕보수	91,000	A
	부속채	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	28	28	철거후 복원(초가)	51,000	A
	변소	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	4	4	철거후 복원(초가)	4,500	A
	대문	함석	변형설치			싸리문 복원	3,000	A
이남직가옥	안채	목조 초가	변소증축	69	4	변소 증축	10,000	A
	문간채	목조 초가	상태양호	26
김관식가옥	안채	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	86	86	철거후 복원(초가)	130,000	D
	문간채	목조 초가		12
	변소	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	4	4	철거후 복원(초가)	4,500	A
김종학가옥	안채	목조 초가	지붕누수 유리창설치	69	69	지붕 보수	150,000	C
	문간채	목조 초가	정비완료	33
이준원가옥	안채	목조 초가	보일러 노출 유리창설치	43	7	보일러실 증축	10,000	A
			차양설치			전통차양 설치	4,300	A
	부속채	목조 초가	보일러실, 창고증축	46	7	보일러실 증축	10,000	A
이준창가옥	안채	목조한와가	지붕퇴락	86	86	지붕해체 보수	182,000	E
	문간채	목조 초가	정비완료	23
김동환가옥	안채	목조 슬레이트	변형가옥	50	50	해체 복원(초가)	75,000	E
	부속채	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	26	26	철거후 복원(초가)	40,000	E
이길선거옥	안채	목조 초가	보일러실	60	7	보일러실 증축	10,000	A
	부속채	목조 초가		23
	대문	함석	변형설치			싸리문 복원	3,000	A
윤순철가옥	안채	목조 초가	보일러실 유리창설치	60	7	보일러실 증축	10,000	A
	문간채	목조 초가	보일러실	36	7	보일러실 증축	10,000	A

가옥명	현 황				정비계획(‘03년이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (㎡)	규모 (㎡)	정비내용	소요예산
김호진가옥	안채	시멘트벽돌 시멘트와가	변형가옥	76	76	철거후 복원	161,000	E
	부속채	시멘트블럭 양식기와	변형가옥	17	17	철거후 복원	22,500	E
	창고	시멘트블럭 양식기와	변형가옥	7	7	철거후 복원	9,000	E
신동주가옥	안채	목조 초가	보일러실, 욕실,창고 증축. 유리창설치	60	20	보일러실,욕실, 창고증축	30,000	E
	문간채	목조 초가	정비완료	43
	농기계창고	철골 슬레이트	무단증축	17		철거후 복원	21,000	E
	변소	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	4	4	증축(초가)	4,500	E
이우선가옥	안채	목조한와가	정비완료	76
	문간채	목조한와가	정비완료	58
	창고	목조 초가	정비완료	36
이문선가옥	안채	목조 초가	보일러실 개조	93	7	보일러실 증축	10,000	A
	부속채	목조 초가	정비완료	10
강희춘가옥	안채	목조 초가	보일러실, 유리창설치	40	7	보일러실 증축	10,000	A
	사랑채	목조 초가	보일러방치	33	7	보일러실 증축	10,000	A
	문간채	목조 초가	정비완료	33
장영주가옥	안채	목조 초가	보일러방치	69	7	보일러실 증축	10,000	B
	부속채	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	53	53	철거후 복원(초가)	72,000	B
이은선가옥	안채	목조 초가	정비완료 유리창설치	83
	사랑채	목조 초가	정비완료	53
	부속채1	목조 초가	정비완료	36
	부속채2	목조 초가	정비완료	26
이관직가옥	안채	목조 초가	유리창설치	69
	부속채	목조 초가		33
	대문	함석	변형설치			싸리문 복원	3,000	A

가옥명	현 황				정비계획(‘03년이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (㎡)	규모 (㎡)	정비내용	소요예산
백순례가옥	안채	목조한와가	보일러실ㆍ 욕실 증축. 유리창설치	61	7	보일러실,욕실증축	10,000	C
			빗물받이설치			전통차양설치	6,100	C
	문간채	목조 초가	보일러실 증축	55	7	보일러실 증축	10,000	C
	부속채	목조 초가	정비완료	20
	창고	경량철골조	무단증축	20
장윤환가옥	안채	목조양기와	변형가옥	43	43	철거후 복원(초가)	90,000	A
	부속채	시멘트블럭 양기와	변형가옥	8	8	척거후 복원(초가)	24,750	A
새마을창고	창고1	시멘트블럭 슬레이트	철거대상	83	83	철거	15,000	A
	창고2	시멘트블럭 슬레이트	철거대상	56	56	철거	10,000	A
김광겸가옥	안채	목조한와가	붕괘됨	58	58	복원	122,500	A
	부속채	목조한와가	퇴락심함	30	30	해체후 복원	63,000	A
	정자	목조 초가	퇴락심함	4	4	해체후 복원	7,000	D
교수댁	안채	목조한와가	보일러실	112	7	보일러실 증축	10,000	A
	문간채	목조한와가	정비완료	43
	가묘	목조한와가	정비완료	10
신수남가옥	안채	목조 초가	보일러실, 욕실 증축. 유리창설치	56	7	보일러실 증축	10,000	A
	부속채	목조 초가	보일러실	20		보일러실 증축	10,000	A
	창고	철골슬레이트	무단증축			철거		E
	건조장	철골슬레이트	무단증축		4	철거		E
김영구가옥	안채	목조 초가	보일러실, 욕실 증축	55	7	보일러실 증축	10,000	D
	부속채	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	10	10	철거후 복원(초가)	13,500	D
조실댁	안채	목조한와가	정비완료	69
	부속채	목조 초가	정비완료	30
이풍세가옥 -1	안채	목조 초가	빗물받이설치	19		전통차양설치	1,900	A
	부속채	목조 초가	정비완료	26
	대문	철제	변형설치			싸리문 설치	3,000	A

가옥명	현 황				정비계획(‘03년이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (㎡)	규모 (㎡)	정비내용	소요예산
조현직가옥	안채	목조 초가	보일러방치	69	7	보일러실 증축	10,000	E
	부속채	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	53	53	철거후 복원(초가)	72,000	E
윤태성가옥	안채	목조 초가	보일러실	50	4	보일러실 증축	10,000	A
	부속채	목조 초가	정비완료	17
안영석가옥	안채	시멘트벽돌 한와가	보일러실	112	14	보일러실 증축	20,000	C
	문간채	목조한와가	정비완료	43
	가묘	목조한와가	정비완료	10
이풍세가옥 -2	안채	목조 초가	보일러실, 창고 증축 유리창설치	66	14	보일러실 증축	20,000	A
			빗물받이설치			전통차양설치	6,600	A
	문간채	목조 초가	정비완료	17
참봉댁	안채	목조한와가	보일러실 증축	60	7	보일러실 증축	10,000	A
	문간채	목조한와가	정비완료	40
	변소	목조 초가	정비완료	10
작은참판댁	안채	목조한와가	지붕퇴락	74	74	지붕해체 보수	157,500	C
	가묘	목조한와가	지붕퇴락	10	10	지붕해체보수	21,000	C
	사랑채	목조 초가	욕실개조	73	7	욕실증축	10,000	C
	문간채	목조 초가	정비완료	36
	부속채	목조한와가	정비완료	20
	변소	FRP이동식	무단증축	2	4	변소증축	10,000	C
참판댁	안채	목조한와가	보일러실	94	7	보일러실 증축	10,000	A
	사랑채	목조한와가	정비완료	50
	곳간채	목조한와가	정비완료	28
	문간채	목조한와가	정비완료	74
	가묘	목조한와가	정비완료	10
	창고	시멘트블럭 슬레이트	무단증축	10		철거		C

가옥명	현 황				정비계획(‘03년이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (㎡)	규모 (㎡)	정비내용	소요예산
참판댁 가랍집	안채	목조 초가	정비완료	36
	창고	목조 초가	정비완료	10
	변소	목조 슬레이트	무단증축	4		철거		E
윤흥섭가옥	안채	시멘트벽돌 양기와	변형가옥	66	66	철거후 복원(초가)	140,000	E
	창고	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	13	13	철거후 복원(초가)	28,000	E
송화댁	안채	목조한와가	정비완료	53
	사랑채	목조한와가	정비완료	46
	문간채	목조한와가	정비완료	20
	중문간채	목조 초가	정비완료	26
	부속채	목조 초가	정비완료	20
송화댁 가랍집	안채	목조 초가	보일러노출	40	7	보일러실 증축	10,000	A
	부속채	목조 초가	정비완료	40
종손댁	안채	목조한와가	보일러실증축 유리창설치	89	7	보일러실 증축	10,000	A
	문간채	시멘트벽돌 와가	변형가옥	69	69	철거후 복원	147,000	A
	정자	목조 슬레이트	변형설치	4	4	철거후 복원	7,000	A
	축사	목조 슬레이트	무단증축	13		철거		A
	사당채	목조한와가	정비완료	17
오병석가옥	안채	목조 초가	보일러실	89	7	보일러실 증축	10,000	A
	부속채	목조 초가	정비완료	20
	변소	철골 슬레이트	무단증축	10	10	철거후 복원(와가)	13,500	B
이준광가옥	안채	시멘트벽돌 한와가	변형가옥	76	76	해체후 복원(초가)	161,000	A
	부속채	목조 함석	변형가옥	26	26	해체후 복원(초가)	40,000	A
	부속채	목조 함석	변형가옥	13	13	해체후 복원(초가)	20,000	A
	변소	목제 함석	변형가옥	13	13	해체후 복원(초가)	20,000	A
	창고	목제 함석	변형가옥	23	23	해체후 복원(초가)	35,000	A

가옥명	현 황				정비계획(‘03년이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (㎡)	규모 (㎡)	정비내용	소요예산
양재원가옥	안채	목조양기와	변형가옥	66	66	철거후 복원(초가)	100,000	E
	부속채	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	33	33	철거후 복원(초가)	13,500	E
	변소	목조 슬레이트	변형가옥	7	7	철거후 복원(초가)	10,000	E
이대선가옥	안채	목조 초가	보일러실, 창고증축	76	7	보일러실 증축	10,000	A
			빗물받이			전통차양설치	7,600	A
	부속채	목조 초가	보일러실증축	50	7	보일러실 증축	10,000	A
조봉환가옥	안채	목조 초가	보일러실 욕실 증축	40	7	전통차양설치	10,000	A
	문간채	목조 초가	창고 증축	33	7	창고 증축	10,000	D
	축사	시멘트블럭 슬레이트	무단증축	13	13	철거후 복원	20,000	D
이준하가옥	안채	목조 초가	보일러노출	46	7	보일러실 증축	10,000	D
	부속채	목조 초가	정비완료	13
	변소	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	7	7	철거후 복원	10,000	D
이준규가옥	안채	목조 슬레이트	변형가옥	63	63	해체후 복원(초가)	95,000	A
	변소	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	7	7	철거후 복원(초가)	10,000	A
양철언가옥	안채	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	36	36	철거후 복원(초가)	55,000	D
	사랑채	목조 초가	변소,창고증축	20	7	변소,창고 증축	10,000	D
	대문	함석	변형설치			싸리문 복원	3,000	A
방상훈가옥	안채	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	40	40	철거후 복원(초가)	60,000	A
	창고	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	10	10	철거후 복원(초가)	15,000	A
	변소	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	7	7	철거후 복원	10,000	A
이종관가옥	안채	목조 초가	보일러방치 빗물받이설치	26	7	보일러실 증축 전통차양설치	10,000 2,600	B
	사랑채	목조 초가	정비완료	73
	변소	목조 초가	정비완료	20
	축사	시멘트블럭 슬레이트	무단증축	66	66	철거		E

가옥명	현 황				정비계획(‘03년이후)			우선 순위
	구분	구조	특기사항	규모 (㎡)	규모 (㎡)	정비내용	소요예산
주막집	안채	목조 초가	보일러,욕실,창고 증축	40	7	보일러실 증축	10,000	C
	변소	시멘트블럭 한와가	변형가옥	7		철거후 복원(초가)	14,000	C
이태우가옥	안채	목조한와가	정비완료	46
	부속채	목조 초가	정비완료	10
이성선가옥	안채	목조 초가	보일러실, 욕실 증축	73	7	보일러실 증축	10,000	A
	문간채	목조 초가	창고증축	40	7	창고증축	10,000	A
	부속채	목조 초가	정비완료	36
이준록가옥	안채	목조한와가	정비완료	83
	문간채	목조한와가	창고증축	26	7	창고증축	10,000	C
	창고	시멘트블럭 슬레이트	변형가옥	10	10	철거후 복원	15,000	C
이한숙가옥	안채	목조 초가	보일러실, 창고,욕실증축	60	7	보일러실 증축	10,000	A
	부속채	목조 초가	정비완료	36

※ 우선순위는 퇴락 및 변형 유지정도에 따라 “A, B, C, D, E" 등급으로 분류함

- 사업추진년도 : A등급(‘03～’04), B등급(‘05～’06), C등급(‘07～’08), D등급(‘09～’10), E등급(‘11～’12)으로 추진함.

- 예산사정 등으로 계획년도에 사업물량을 완료하지 못하는 경우 다음연도로 순연

민속마을 보존․정비 및 종합정비 세부실천계획

전통민속마을 활용기본계획

전통민속마을 활용 기본계획

목  적

○ 마을별 고유한 활용자원 발굴․개선을 통하여 지속 가능한 민속마을 자립기반 구축

○ 주민 스스로의 마을보존 역량 강화를 통한 민속마을 원형보존 기반조성

○ 다양하고 수준 높은 대국민 서비스 제공으로 국민들의 건전한 여가활용기회 제공 확대

현황 및 문제점

○ 시설물 보수정비 등 하드웨어 위주의 사업추진으로, 전통문화의 전승 및 체험 등 소프트웨어적 프로그램과 이를 위한 지원 및 투자 미흡

○ 마을주민의 고령화, 출향 등으로 전승 세시풍습․민속행사, 생활문화의 단절현상이 발생하여 민속마을 보존기반 약화

○ 마을주민에 의한 무분별한 상행위로 인한 문화재 원형․경관 훼손 및 이에 따른 문화재정책에 대한 국민의 불만 비등

○ 소득 없는 규제로 인한 주민들의 마을 보존의지 약화 가속화

민속마을 활용 기본계획

가. 기본방향

○ 문화유산으로서 원형보존과 이에 기반을 둔 질 높은 활용방안 마련

○ 주민의 소득기반을 조성하여 젊은 층의 귀향을 유도하고 주민 스스로 마을을 유지․관리할 수 있는 체제 구축

○ 마을별 특성에 맞는 수준 높은 전통문화생활 체험프로그램을 개발․운영하여 대국민 서비스 강화

○ 운영조직 구성, 활용기반시설 조성, 활용사업 개발 부분으로 구분하여 방안 마련

○ 활용자원은 독특한 마을별 전승 소재 활용

○ 활용을 통해 조성된 수익금 중 일부는 반드시 마을보존회 기금으로 조성하여 마을 공동의 목적에 맞도록 사용

나. 활용방안 개요

(1)		운영조직 구성

○ 마을보존회 법인화

- 마을운영의 공정성과 객관성 확보를 위해 기 조성된 마을보존회를 법인화 유도 (※ 기 법인화 조직 : 안동하회마을, 아산외암마을)

- 마을보존회에서 민속마을의 자원을 활용한 수익사업 운영, 기금 조성 및 운영 담당

- 법인화된 보존회에는 민속마을의 활용뿐만 아니라 장기적으로 보존측면에서도 주체적인 활동을 하도록 육성 지원

○ 민속마을별 보존․활용 자문단 구성

- 활용자원의 발굴․개발․운영에 대한 전문적 지식과 기술 등에 대한 자문을 위해 마을별 보존․활용 자문단을 조직, 보존회 지원

- 자문단은 문화재․민속․관광․조경분야 등의 전문가, 마을보존회․지자체 공무원 등으로 구성

(2)		활용 기반시설 조성

○ 마을내 자원정비

- 기 추진중인 민속마을 보존정비사업을 통한 마을의 원형보존

(가옥, 시설물, 조경 등 환경정비)

- 사용되지 않거나 없어진 시설물의 고증을 통한 복원

- 마을내 공가(空家)를 정비, 전통가옥박물관 또는 공방 등으로 조성

○ 숙박시설 개선

- 전통생활을 체험할 수 있는 수준 높은 민박시설 마련

- 공가 또는 마을내 희망 가옥 활용

- 숙박시설의 운영은 마을보존회에서 일괄하여 운영, 일정 수준의 질 유지

※ 민박과 각종 체험프로그램, 관광투어 활동과 연계운영

(3)		활용사업 개발

○ 체험프로그램

- 마을별 특징을 살린 다양한 시기별, 방문기간별 프로그램 개발

- 공가 등을 활용한 공방․서당․전통문화강좌․전통혼례․관례(冠禮)․농촌생활 (작물재배 등) 체험, 전통음식만들기 등

○ 방문객 지향형 이벤트

- 기존에 마을주민 중심으로 개최하던 전통행사를 보완하여 일반에게 공개하는 이벤트 개발

- 전통축제(세시풍속, 민속놀이 등 포함), 전승 민속공연, 유적탐방 프로그램 (마을내, 마을인근지역) 등

- 각 지자체에서 운영중인 문화유산 해설사 등을 각 마을에 배치, 각종 체험활동과 유적탐방시 안내․해설 서비스 제공

○ 전통상품개발 등

- 각 민속마을에서만 구입할 수 있는, 마을의 특성이 반영되어 차별화된 상품을 개발․판매(전통음식, 이미테이션 등)

- 문화예술인 창작활동 공간 제공 등 마을을 홍보할 수 있는 사업개발

소요재원 조달방안

○ 기반시설 조성․정비사업은 국고보조사업으로 추진

○ 활용과 관련한 소요재원은 국고지원이 어려우므로 각 마을별 운영수익을 통해 조성한 기금 등으로 자체적으로 조달하는 것을 원칙으로 함

○ 단 현재 각 마을별로 조성된 기금이 없으므로 복권기금사업 등에 반영, 지원 추진

- 지원기간 : 2004～2013년 (민속마을별 종합정비계획이 완료되는 2012년을 기준으로 2013년까지 지원)

- 지원내용 : 활용사업 운영비용

【붙임 1】

마을별 보존․활용 자문단 구성․운영방안

□ 구 성

○ 주체 : 관할 시․군에서 주관하여 운영 (필요시 문화재청과 협의)

○ 인원 : 20명 내외(마을별 특성을 감안하여 결정)

○ 대상 : 문화재 전문가, 민속학자, 관광전문가, 조경전문가, 도시계획 전문가, 지방자치단체공무원, 마을주민(보존회) 등

○ 선정방법

- 마을이나 지역출신 관계 인사를 적극 발굴하여 선정

- 문화재전문가는 문화재청과 도 문화재위원회 소속 문화재위원 또는 전문위원 중에서 2인 이상 선정

- 민속마을의 보존이나 활용 관련 연구실적이 있는 자 우선 선정

□ 운 영

○ 마을별 : 지자체 또는 마을단위 자체 운영

○ 문화재청 : 자문단간 활동 조정 및 국내․외 사례연구 활동

□ 활동내용

○ 마을 원형보존에 관한 사항 자문

- 민속마을 주민편의시설 설치기준 시행에 따른 구체적 적용방법 자문 및 지도

- 마을종합정비계획 추진에 따른 시행계획수립, 설계, 시공 과정에서의 자문 및 지도

- 마을의 원형보존을 위한 자율규제사항 발굴 및 마을보존 활동

○ 마을의 보존과 활용이 조화될 수 있는 전통문화체험 자원화 사업 지원

- 자원화 가능 전통민속 및 시설물 발굴 지원

- 프로그램 개발 및 운영의 기술적 사항 지원

- 프로그램 홍보자료 제작에 관한 사항 지원

- 운영하는 프로그램의 지속적인 모니터링 및 환류 지원

- 기타 마을별 자원화 사업에 필요한 사항 자문 등

○ 국내․외 민속마을 문화관광체험 자원화 활용사례 연구 (벤치마킹 등) 및 자료발간

○ 민속마을 주변지역을 마을과 어울리게 조성할 수 있는 방안마련 (특정 지구지정 및 법령에 근거한 합리적 건축․개발 규제방안 마련 등)

□ 활동내용 보고서 발간

○ 각 마을별 자문단 활동 중 성공적인 사례를 일정기간을 주기로 발간

○ 발간주체 : 문화재청

【붙임 2】

마을별 활용기반시설 마련 방안

□ 마을 내 자원정비

○ 마을 활용의 기본적 자산은 원형대로 유지되는 민속마을 자체이므로 기 추진 중인 국고보조 민속마을 보수․정비사업을 지속적으로 추진

- 가옥정비, 마을내 전통시설물 정비, 변형․불량 가옥 및 시설물 정비, 조경정비, 관람객 편의시설 조성 등 환경정비

○ 생활․산업환경의 변화에 따라 현재는 사용되지 않거나 없어진 시설물을 고증을 통해 원형대로 복원하여 교육․관광자원으로 활용

○ 마을내 공가(空家) 정비․활용 등

- 마을내 공가는 매입․활용을 원칙으로 하고, 매입이 어려운 공가는 소유자와 협의를 거쳐 마을보존회에서 활용 (활용주체: 마을보존회)

- 공가는 전통가옥박물관, 각종 공방, 전통문화강좌공간, 전통생활체험공간 (민박시설), 전통혼례 등 각종 행사공간, 예술인 창작활동 대여공간 등으로 활용

- 민속마을별로 매년 추진되는 초가이엉잇기에 필요한 볏짚 등은 논․밭을 매입하여 확보하는 것을 원칙으로 하고, 매입된 논․밭은 방문객의 체험활동 공간으로 활용

※ 공가․볏짚생산토지 매입비용 : 기존의 문화재보수정비사업비로 지원

□ 숙박시설 개선

○ 숙박시설 운영 방향

- 마을내 숙박시설을 원형유지 가옥과 현대식 설비가옥으로 구분하여, 방문객의 기호에 따른 선택적 숙박기회 제공

․원형유지 가옥 : 매입 공가, 소유자가 활용에 동의한 공가 등을 대상으로 전통방식 그대로의 숙박체험을 할 수 있는 공간으로 활용

․현대식 설비가옥 : 마을내 현대적 생활편의시설이 갖추어진 비지정 가옥 중 민박시설 제공에 동의하는 가옥

○ 숙박시설 운영

- 숙박시설은 마을보존회에서 일괄하여 운영하여 일정 수준의 서비스 유지

- 민속마을 방문자를 위한 이용편의 제공

⇨ 방문객이 인터넷을 보고 숙박장소와 마을에서 참여할 행사 등 프로그램을 미리 정하고, 비용 등에 대해 알 수 있도록 상세한 내용 게시

○ 숙박시설 확대 : 각종 사용가능한 시설을 활용하여 민속마을내 숙박할 수 있는 공간 확대

- 공가활용

․마을 내 공가를 최대한 매입하여 전통생활소박물관, 공방, 서당, 예술인 창작활동 대여공간 뿐만 아니라 민박시설로도 활용

․공가를 활용한 민박시설은 가옥 원형을 그대로 유지하여 전형적인 전통 생활방식을 체험할 수 있도록 운영

- 마을내 원형보존 가옥 활용

․마을 내 지정 또는 비지정가옥 중 원형을 유지하고 있는 가옥에 대해 소유자의 동의를 거쳐 가옥내 원형을 유지하고 있는 방을 공가와 같은 방식의 전통 생활방식 체험 공간으로 활용

- 마을내 비지정 가옥 활용

․기 시행중인 민속마을내 주민편의시설 설치기준에 따라 내부시설을 현대식으로 개조한 마을내 비지정 가옥 중 민박에 동의하는 가옥을 민박공간으로 활용, 전통생활에 거부감을 보이는 층에게 제공

※ 숙박시설의 운영은 체험프로그램 등 마을의 전통문화 체험관광 활용사업과 연계하고, 특히 외국인도 숙박하면서 각종 체험 및 유적답사 프로그램에 참여할 수 있도록 운영

- 방문객의 다양한 수요를 수용할 수 있도록 숙박시설과 각종 체험프로그램의 연계를 다양하게 구성․운영(고급형과 일반형 등)

○ 수익금 사용

- 민박사업이 마을 전체 주민에게 혜택이 갈 수 있게 수익금의 일정액을 마을공동 기금으로 활용

【붙임 3】

민속마을 자원 활용사업 개발방안

□ 기본방향

○ 다양한 프로그램을 개발, 방문객이 일정별로 선택적으로 활용할 수 있도록 운영(※ 상세한 사항을 인터넷에 게재, 예약접수제 운영)

○ 숙박시설 운영과 연계하여 운영

○ 마을보존회에서 보존․활용 자문단과 협력하여 프로그램 개발․운영

- 모든 활용사업은 지속적인 모니터링을 통해 미비점을 보완

□ 체험프로그램

○ 마을별로 전승민속, 전통 시설물 등을 활용한 시기별, 체류기간별로  다양한 장․단기 프로그램 개발

○ 가족이 함께 체험할 수 있는 프로그램 중점 개발

○ 체험프로그램 예

- 공가 등을 활용한 공방․서당․전통문화강좌․전통혼례․관례(冠禮)․농촌생활(작물재배 등) 체험, 전통음식만들기 등

- 연례적으로 추진되는 국고보조 정비사업 활용

․초가이엉잇기 사업중 이엉잇기, 재료확보를 위한 논(畓)의 모내기․메뚜기잡기․벼베기 등 농촌활동 체험

□ 방문객 지향형 이벤트

○ 마을 내부행사로 개최하던 기존 전통행사를 보완하여 공개하는 이벤트 개발

- 민속명절 행사, 마을별 당제, 각 절기별 행사 등

○ 전통축제 (세시풍속, 민속놀이 등 포함), 전승 민속공연, 유적탐방 프로그램 (마을 내, 마을인근지역) 등

○ 마을별 운영가능 행사 예

마을명	운영대상 프로그램
	마을공통	종합축제프로그램	특화프로그램
안동하회	정월대보름 동제 전통작물재배 체험	하회마을 물돌이축제	선유(船遊) 줄불놀이 별신굿 탈춤공연(상설)
성읍민속	정월민속행사 전통작물재배 체험	정의골 민속축제	갈옷짓기 체험행사
월성양동	정월대보름 민속행사 전통작물재배 체험	양동마을 호미씻기축제	선비문화체험행사 - 양로(養老)행사 - 충효문화체험교실
고성왕곡	왕곡 서낭제 전통작물재배 체험	송지호 마당극 축제	소나무 건강체험행사 소나무심기 참여행사
아산외암	외암장승제․대보름행사 전통작물재배 체험	외암마을 짚풀문화제	추사체 모사경연대회 전통먹거리․공방체험

○ 유적탐방 프로그램

- 민속마을내 개별 문화재, 민속자료에 대한 탐방코스 개발․운영

- 마을인근 문화유적지에 대해서도 테마별, 코스별 탐방코스 개발․운영

- 유적탐방 프로그램은 유적안내․해설사가 동행하면서 안내 설명

※ 특히, 주민이 거주하는 중요가옥의 경우에는 일정시간을 정하여 가옥을 개방하되, 관람시 안내․해설사가 동행하도록 하여 무분별한 방문객 관람으로 인한 사생활 및 가옥시설물 훼손 방지

민속마을 초가이엉잇기사업 개선방안

민속마을 초가이엉잇기사업 개선방안

목  적

○ 농업의 기계화, 품종개량으로 인한 볏짚길이 축소 및 사업화․도시화에 따른 이농현상 등으로 초가 이엉잇기 재료 확보의 곤란과 기능인력의 고령화 등이 발생, 해가 갈수록 사업추진이 어려워지는 등 초가이엉잇기 사업의 문제점이 대두되어 이를 개선하고자 함

현황 및 문제점

○ 초가이엉잇기 재료확보 곤란

- 농민들이 다수확 품종이면서 도복(倒伏)의 위험성이 적은 개량벼 재배로 이엉잇기 재료로 사용되는 키가 큰 일반벼의 볏짚확보 곤란

- 기계화된 벼베기로 볏짚 길이가 짧아지고, 볏짚의 손상으로 좋은 볏짚 확보 곤란

- 제주 성읍마을의 경우 띠밭이 부족하여 띠 확보 곤란

○ 이엉잇기 기능인력 확보의 어려움

- 농촌인구의 고령화와 이농현상으로 기능인력이 부족하고, 기능을 전수할 젊은 층 부재로 기능인력 양성 곤란

○ 사업추진 방법의 문제

- 매년 가을 한번 일괄 이엉잇기를 실시하고 있어, 다음 해 장마․태풍 등으로 초가 지붕의 훼손 및 누수발생시 신속한 조치 곤란

- 일부 보수업체의 획일적 시공으로 마을 고유의 전통수법과 경관에 어울리지 않는 경우 발생

개선방안

○ 안정적인 양질의 재료확보 : 계약재배, 재료생산토지 매입․활용 병행 추진

- 초가 소유자 또는 지역 농가와 볏짚 길이가 긴 일반벼 재배 계약을 하되, 수확량 감소 등에 따른 차액을 반영하여 재료 구입비 지급

- 마을 인근 토지(논, 띠밭)를 매입, 이엉잇기에 적합한 벼(띠)를 보존회에서 직접 재배하여 좋은 재료를 안정적으로 확보 (매입주체 : 지자체)

․매입비용은 종합정비계획에 반영하여 연차적으로 확보

․매입된 논은 민속마을의 농촌활동 체험프로그램과 연계하여 활용(모내기, 벼베기, 메뚜기잡기 등)

※ 단위 면적당 이엉잇기 물량 : 2동/1마지기 (1동 20평 기준)

○ 이엉잇기 기능전수 및 인력확보 : 지방무형문화재로 지정

- 이엉잇기 기능자를 도지정 무형문화재(단체)로 지정하고 기능을 전수

○ 사업추진방법 개선 : 보존회 주관 시행, 여유 볏짚확보, 이엉잇기 연중 시행

- 마을보존회를 조속히 법인화하여 사업시행 주체가 되도록 함

(법인화된 마을보존회 : 안동하회마을, 아산외암마을)

․주민들 스스로 전래의 수법으로 이엉잇기를 실시하여 마을 경관에 어울리는 초가지붕이 되도록함

- 이엉잇기 재료는 이엉 훼손시 수시로 보수할 수 있는 여분의 볏짚까지 확보 (1년 물량의 20% 내외, 마을별 실정에 맞게 규모 결정)

․여분 볏짚은 전통적인 방법으로(야적 등) 보존하여 볼거리로 활용

- 매년 가을 일괄 사업시행 방법을 지양하고, 점차 연중 수시 시행하는 방법으로 전환

․연중 실시로 인력부족 문제를 어느 정도 해소하면서 주민들에게는 연중 일거리 창출로 소득증대에 기여

․연중 실시하되 주말을 이용하여 이엉엮기, 용고새틀기 등을 실시하여 관광객에게 볼거리와 체험기회를 제공

마을주민이 시행할 수 있는 경미한 수리행위 확대

경미한 수리행위 확대

문화재청고시제2004-28호

문화재보호법시행규칙 제7조의2제16호의 규정에 의하여 문화재청장이 인정하는 기타 경미한 수리 행위를 다음과 같이 고시합니다.

2004.  5. 24.

문  화  재  청  장

문화재청장이인정하는경미한수리행위

1. 민속마을 및 전통가옥의 수리를 위하여 당해 마을주민이 자체적으로 훼손된 부분을 원형대로 수리하는 다음 각호의 행위

가. 초가지붕 이엉잇기 및 너와․굴피잇기

나. 담장(울타리 포함) 및 출입문의 부분 보수

다. 기와고르기

라. 단청 및 벽화가 없는 벽체의 보수

마. 기단 부분보수

바. 배수로·석축의 부분보수

사. 온돌보수

2. 민속마을내 주민편의시설 설치기준(2004. 3. 2 시행)에 의한 개․보수 중 가옥 외형의 변화가 없는 가옥 내부의 부엌, 화장실, 욕실, 보일러, 이중창호를 설치하는 행위

부  칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

민속마을 보존활동에 대한 주민참여 권고

민속마을 보존활동에 대한 주민참여 권고

○ 진정한 민속마을의 보존은 마을주민의 화합과 자율적인 참여를 기반으로 하므로 각 민속마을별 주민들이 자율적인 협의를 통하여 자체 주민규약을 제정․운영할 것을 권고함

민속마을 보존 주민자치규약(안)

주민자치규약 내용 권고안

< 전 문 (前文) >

○ 민속마을의 개념 및 의의

○ 멸실, 훼손되어 가는 민속마을의 현황

○ 민속마을 보존의 목적, 필요성 등 자치규약 제정의 배경

- 소유자, 거주자, 지역사회, 국가 등의 협력 필요성 인식

- 민속마을 보존의 경제적 실익에 대한 인식

- 민속마을 보존이 갖는 후세의 정체성 형성에 대한 기여도

- 자치규약의 주민 자발적 참여에 의한 제정

< 자치규약 내용 >

○ 단위 가옥, 시설을 포함한 경관 전체 보존 노력에 관한 사항

○ 원형보존을 위한 일정 부분의 생활불편사항 감수에 관한 사항

○ 건축물 보수, 신축시 원형 및 경관 고려에 관한 사항

○ 간판 등 경관과 이미지를 저해하는 시설물 설치 자제에 관한 사항

○ 주변 자연한경 보존에 관한 사항

○ 오물의 무단투기, 방치 등 방지에 관한 사항

○ 화재 유의 및 각종 소방시설 사용법 숙지에 관항 사항

○ 무형의 전승 민속 보존․계승에 관한 사항

○ 기타 마을별로 필요한 사항

주민자치규약 내용 권고안에 따른 예시

우리가 살고 있는 ○○민속마을은 우리 조상이 오랫동안 살아오면서 자연환경과 더불어 형성된 의․식․주의 문화와 삶의 숨결이 살아 숨쉬고 있는 우리만이 아닌 국민 모두의 소중한 문화유산이다.

불과 몇 십년 전만 하더라도 우리 주변에서 흔히 볼 수 있었던 전통마을의 모습은 농촌인구의 고령화와 이농 등으로 인한 공가의 증가, 전기통신과 시멘트, 철골 등의 현대 문명의 이기 등으로 인해 마을과 가옥의 전통적 모습이 안타깝게도 조금씩 변형과 훼손이 되고 있다.

이에 따라 우리 주민 일동은, 이제 몇 남지 않은 전통이 숨쉬는 민속마을의 보존이 생활의 불편함을 감수하는 가옥의 소유자와 거주자뿐만 아니라 지역사회, 국가 모두의 협력과 노력이 없이는 이루어질 수 없다는 점을 자각하고,

사회의 문화․경제적 수준이 향상됨에 따라 민속마을을 원형대로 지키는 것은 유용한 문화관광자원으로서 지역 경제 활성화에 기여하는 것임을 인식하며,

유․무형의 원형이 보존된 민속마을은 자라나는 후대의 정체성 형성에 필요한 주요한 자원임을 확신하면서

조상에게서 물려받아 우리가 지켜온 우리 마을의 원형을 온전히 후대에게 물려주기 위해 주민의 자발적 참여에 근거해 이 자치규약을 제정한다.

1. 마을내 개개 건축물뿐만 아니라 주변 자연환경 등이 포함된 경관 전체가 함께 보존되도록 노력한다.

1. 가옥 소유자 또는 거주자는 가옥 자체가 소중한 문화유산임을 인식하고 생활의 불편함을 감수하면서 원형의 보존에 노력한다.

1. 건물과 시설물을 보수하거나 신축할 때에는 그 원형대로 하거나 경관에 어울리도록 한다.

1. 경관에 어울리지 않는 간판, 광고판 등은 설치하지 않는다.

1. 주변의 자연환경이 전통적인 모습대로 유지되도록 노력한다.

1. 쓰레기 등 오물이 무단 투기, 방치되지 않는 마을을 조성하여 아름다운 마을로 가꾸도록 노력한다.

1. 전통가옥 등은 화재에 극히 취약하므로 화재예방에 각별히 유의하고,

소화전, 소화기 등 각종 소화시설의 사용법을 숙지한다.

1. 마을에 전승되어 내려온 동제, 민속놀이, 풍습 등의 무형의 민속자산이 원형대로 보존․계승되도록 노력한다.