정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-31

담당부서

작성자

(문화재청 / 궁능문화재과)

(장승호/korea999@korea.kr)

정 책 명

덕수궁 석조전(본관) 보수 복원공사

사업개요

및

추진경과

□ 추진 배경

ㅇ 고종황제의 집무실 등 역사적인 의미를 간직한 대한제국기의 대표적인 근대건축물로, 일제강점기에 미술관으로 변형, 훼손된 석조전(본관)을 복원․정비하여 왜곡 및 단절된 역사 회복

□ 추진 경과

ㅇ 2009.  2 : 덕수궁 석조전 복원설계 착수

ㅇ 2009.  8 : 덕수궁 석조전 복원설계 완수

ㅇ 2009.  8 : 덕수궁 석조전 복원공사 시행(내부결제)

ㅇ 2009. 10 : 덕수궁 석조전 복원공사 착공

- 공사금액 : 4,690,415천원

- 공사기간 : 2009. 10. 29 ~ 2012. 10. 27

ㅇ 2009. 11 : 석조전 복원공사 제1차 자문회의 개최

- 복원추진경과 및 향후 복원계획 검토

ㅇ 2009. 12 : 석조전 복원공사 제1차 설계변경

- 공사금액 : 변경없음

- 변경내용 : 덕수궁 사무소 이전 및 공사물량 증감조정

ㅇ 2009. 12: 석조전 복원공사 제2차 자문회의 개최

- 향후복원공사 추진과정 보고 및 검토 자문

ㅇ 2010.  2 : 덕수궁 석조전 복원공사 기자브리핑 개최

- 참석자 : 문화재담당 언론사 기자, 문화재청장등 60여명

- 내 용 : 복원사업 추진현황 및 현장실측조사 중간보고

ㅇ 2010. 3: 석조전 복원공사 제3차 자문회의 개최

- 1층 창호 복원여부

- 2층 기둥복원 및 이동설치, 3층 바닥 레벨조정여부

- 건물주변 및 1층 바닥방수여부, 철골부재 보강여부 등

ㅇ 2010.  6 : 석조전 복원공사 제4차 자문회의 개최

- 벽체 벽돌쌓기 적정성 검토

- 옥상굴뚝 설치방안 및 연도 연결 여부 등

ㅇ 2010.  8 : 석조전 복원공사 전기․소방, 통신공사 착공

ㅇ 2010. 12 : 석조전 복원공사 제2차 설계변경 시행

- 공사금액 : 5,778,730천원(증 1,088,315천원)

- 주요내용

․ 벽체쌓기(고벽돌) 범위 및 물량 증가에 따른 변경

․ 철골 및 철판, 균열부 등 보강 및 녹막이칠 추가

․ 알현실(3층) 바닥 목상설치, 실측조사 보완 등

ㅇ 2011.  5 : 석조전 복원공사 제5차 자문회의 개최

- 석조전 복원 및 활용방안 검토

- 고증자료에 따른 마감재 변경적용 여부

- 각종 설비공사 및 지붕 슬라브 방수 방안 등

ㅇ 2011.  7 : 석조전 복원공사 제6차 자문회의 개최

- 석조전 각 층의 실별 용도 및 명칭

- 각 실별 벽체 및 천정 마감(몰딩, 조각 등)

- 벽난로 형태 및 복원 방안 등

ㅇ 2011.  8: 석조전 복원공사 제7차 자문회의 개최

- 석조전 건립 당시 설계도면 발견되었다는 일부 언론 보도 관련 복원방안 검토 등

ㅇ 2011.  9 : 석조전 복원공사 제8차 자문회의 개최

- 석조전 관련 언론발표 설계도면 및 복원방향 검토 등

ㅇ 2011.10 : 석조전 관련 설계도면 자료조사(일본, 하마마츠)

- 나카무라 요시헤이 석조전 본관 및 서관 설계도면 수집

ㅇ 2011. 11 : 석조전 복원공사 제3차 설계변경 시행

- 공사금액 : 10,766,520천원(증 4,953,738천원)

- 공사기간 : 09.10.29~‘13.10.22(증 360일)

- 주요내용

․ 고증자료 및 관계전문가 자문회의 결과 반영에 따른 변경

․ 마루, 벽체, 천정, 벽난로 등 시공방법 및 재료 변경

․ 옥상 방수공사 추가 등 공사물량 증가

․ 공사물량 변경 및 기타사항

․ 석조전 공조설비 변경 및 소화전 노후배관 교체 등

ㅇ 2011. 12 : 석조전 복원공사 제9차 자문회의 개최

- 덕수궁 석조전 벽난로 제작설치 적정성 검토 등

ㅇ 2012.  2 : 석조전 복원공사 제10차 자문회의 개최

- 덕수궁 석조전 복원계획 및 하마마츠 설계도면 검토 등

ㅇ 2012.  5 : 석조전 복원공사 제11차 자문회의 개최

- 석조전 내부 마감 방안 검토 등

ㅇ 2012.  7 : 석조전 ‘대한제국 역사관’전시공사 설계용역 시행

ㅇ 2012.  7 : 석조전 복원공사 제12차 자문회의 개최

- 각 실별 벽체 마감 색상 선정

- 각 실별 가구 및 전등 배치

- 카페트 제작 및 1층 전시공간 창호 설치 방안

- 2층 대식당 벽체 전시구간 조정

ㅇ 2012.  9 : 석조전 복원공사 제4차 설계변경 시행

- 공사금액 : 변경없음

- 주요내용

․ 고증자료 및 관계전문가 자문회의 결과 반영에 따른 변경

․ 석조전 외부 보존처리 및 세척공사 추가

ㅇ 2012. 10 : 석조전 복원공사 제13차 자문회의 개최

- 알현실, 황제․황후 침실 도배지 선정

- 각 실별 도장 색상 선정 등

ㅇ 2012. 12 : 석조전 복원공사 언론공개 행사 개최

- 장  소 : 덕수궁 강당 및 석조전 공사 현장

- 대  상 : 방송사 및 신문사 관계자 약 30여명

ㅇ 2012. 12 : 석조전 복원공사 제14차 자문회의 개최

- 석조전 내부 가구배치 및 제작방안 검토 등

ㅇ 2013.  2 : 석조전 복원공사 제15차 자문회의 개최

- 내부 카페트 및 커텐 제작 설치방안 검토

ㅇ 2013.  4 : 석조전 복원공사 제5차 설계변경 시행

- 공사금액 : 11,630,543천원(증 864,023천원)

- 주요내용

․ 석조전 실내 가구 수리(44점) 및 해외 가구 수입(106점) 추가

․ 카페트 및 커텐 설치 물량 증감

․ 석조전 1층 화장실 1개소 추가 설치

ㅇ 2013.  6 : 석조전 복원공사 제16차 자문회의 개최

- 고가구, 욕조, 세면기, 변기 구입 및 카페트, 제작․ 설치방안

ㅇ 2013.  8 : 석조전 ‘대한제국 역사관(가칭)’ 전시공사 시행

- 공사금액 : 532,289,950원(금차 275,000,000원)

- 공사기간 : ‘13. 8 ~ ’14. 5

ㅇ 2013.  9 : 석조전 복원공사 제17차 자문회의 개최

- 석조전 고가구 구입 및 주변정비 방안 검토 등

ㅇ 2013.  9 : 석조전 복원공사 제6차 설계변경 시행

- 공사금액 : 11,911,387천원(증 280,844천원)

- 공사기간 : ‘09. 10. 29 ~ ’14. 5. 30(증 220일)

- 주요내용

․ 석조전 주변 배수로 및 포장 추가

․ 선홈통 누수 부위 방수 및 오염물질 세척 물량 증가

□ 주요 내용

ㅇ 공 사 명 : 덕수궁 석조전(본관) 보수ㆍ복원공사

ㅇ 총사업비 : 141억원

(‘09년 : 20억, ’10년 : 20억, ‘11년 : 25억, ’12년 : 30억,

‘13년 : 32억, ’14년 14억)

ㅇ 공사기간 : 2009. 10. 29 ～ 2014. 05. 30

ㅇ 공 사 비 : 12,431,970,000원

(건축 : 11,050,946천원 / 기계 : 860,441천원 /

전기․소방․통신 520,583천원)

구분	도 급 액	공사기간	사업내용
2009년도 (1차 완료)	〈1,990,000천원〉 -건축:1,886,787/기계:103,213	2009. 10. 29 ~ 12. 28	-벽체, 천장, 바닥 철거 등
2010년도 (2차 완료)	〈1,877,600천원〉 -건축:1,235,630/기계:264,370 -전기․소방․통신 : 377,600	2010. 03. 29 ~ 12. 24	-벽체 철거 및 복원 -전기,통신,기계설비등
2011년도 (3차 완료)	<2,476,783천원> -건축:2,292,905/기계:183,878	2011. 03. 21 ~12. 15	-목공사, 창호․수장공사 -기계설비공사 등
2012년 (4차 완료)	<2,970,000천원> -건축:2,763,374/기계:206,626	2012. 01. 30 ~ 12.20	-벽체 및 천정 장식 설치 -벽난로 및 굴뚝 복원, 등
2013년 (5차 완료)	<2,835,857천원> -건축:2,591,405/기계:102,354 -전기․소방․통신 : 142,098	2013. 01.28 ~ 12.10	-고전전등, 카페트, 커텐설치 -공조설비, 화재감지기 설치
2014년 (6차 완료)	<280,844천원> -건축:280,844	2014. 01월 ~ 5.30	-외관 세척, 배수로 정비, 조경정비 등

ㅇ 공사내용 : 내부 원형복원, 냉․난방 및 환기시설 설치, 통신 및 소방설비 등

ㅇ 계약자 : 건축 - 선혜종합건설(주), 기계 - 이호건설(주),

전기 - 광성전기, 소방 - 한영소방, 통신 - 한국씨텍

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 궁능문화재과   김태영

- 최종 결재자 : 문화재청장     변영섭

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
청장	나선화	청 장	'13.12.27～	문화재 업무 총괄
과장	나명하	과 장	'14.03.27 ～	궁능문화재과 총괄
담당	이성희	사무관	'12.09.16～	공사진행 총괄
담당	장승호	주무관	'14.03.10 ～	공사감독

다른기관 또는

민간인 관련자

< 석조전 복원공사 자문위원 명단 >

성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
김정동	문화재위원	‘09.11.～현재	석조전 자문위원
김종헌	문화재전문위원	〃	〃
안창모	경기대교수	〃	〃
김란기	한국역사문화정책연구원장	〃	〃
우동선	한국예술종합학교 교수	〃	〃
권기혁	서울시립대 교수	〃	〃
이민원	원광대 교수	〃	〃
강성원	석조전 관련 연구	〃	〃