경복궁 복원 정비 사업현황

1.		사업목적

□ 일제 강점기에 변형 및 훼손된 경복궁을 원형대로 복원ㆍ정비하여 민족정기를 회복하고 문화민족의 장긍심을 고취

□ 우리문화의 우수성과 역사성을 널리 알리고 세계적인 문화유산으로 조성하여 역사교육 및 문화관광자원으로 활용

2.		추진경과

□ 경복궁 1차 복원정비사업 추진

ㅇ 소요예산 : 1,571억원 / 사업기간 1990년 ~ 2010년

ㅇ 광화문 등 전각 89동 복원, 어구 및 궁장정비, 지형복구 등

고종 당시	기존 건물 (1990년)	1차 사업 (1990 ~ 2010년)	1차 복원 완료	비 고
500여동	36동	89동 복원	총 125동	고종 당시의 약 25%

구 분	기간	사 업 내 용
1단계 침전 권역	1990 ∼1995	복원 및 보수	․강녕전 등 침전일곽 12동 794평 복원 ․근정전 행각 등 2동 1,084평 복원 등
2단계 동궁 권역	1990∼ 1995	복원 및 보수	․동궁 일곽 자선당, 비현각 등 18동 352평 복원 ․건춘문 등 고건물 5동 239평 보수 등
3단계 흥례문 권역	1996∼ 2001	복원 및 보수	․흥례문 등 6동 517평, 영제교 복원 ․수정전 91평 보수 등
4단계 태원전 권역	1997∼ 2004	복원 및 보수	․태원전 등 주변 행각 25동 496평 ․경회루 등 고건물 3동 94평 보수 등
5단계 광화문ㆍ기타 권역	2003∼ 2010	복원 및 보수	․광화문 등 28동 560평 복원 ․집옥재 등 고건물 12동 777평 보수 등

□ 복원 : 조선 정궁의 기본 궁제 완비

ㅇ 구 조선총독부 청사 등 네거티브 문화재의 철거 및 광화문 이전 복원 등을 통해 민족 자긍심을 고취

ㅇ 경복궁의 기본 궁제 정비를 위해 일제강점기에 훼손된 전각 복원

- 정전(正殿), 편전(便殿), 침전(寢殿), 동궁(東宮), 빈전(殯殿) 등

□ 보수･정비: 문화재의 보존

ㅇ 경내 중요 문화재(근정전, 근정문, 수정전, 집옥재 등)의 보존을 위한 보수ㆍ정비 완료

ㅇ 실측설계, 구조안전진단, 고궁 건물막새 문양조사, 등의 다양한 연구 용역을 토대로 건물의 원형복원과 연구 성과의 축적

3.		추진계획

□ 경복궁 2차 복원정비사업 계획

ㅇ 사업기간 : 2011 ～ 2030년(20개년)

ㅇ 총사업비 : 5,400억(추정) / 건물복원(254동), 초석복원(102동) 등

□ 단계별 사업계획안

영역별	사업기간	소요예산	사업내용
궁중생활 권역 (1단계)	2011～2016년	1,038억	․소주방 등 56동(5,991㎡) 복원
궁중통치 권역 (2단계)	2013～2020년	1,201억	․선전관청 등 66동(5,372㎡) 복원 ․국별장직소 등 9동 기단 및 초석 복원
제왕교육 권역 (3단계)	2019～2022년	652억	․춘방 등 21동(1,515㎡) 복원 ․근정전․흥례문 행각 내부 원형 복원
궁중의례 권역 (4단계)	2021～2025년	759억	․문경전 등 42동(3,589㎡) 복원 ․회안전 수궁 1동 기단 및 초석복원
궁중의례 권역 (5단계)	2022～2027년	1,164억	․선원전 등 45동(3,730㎡) 복원 ․영보당 등 73동 기단 및 초석복원 ․민속박물관 철거
궁중군사 권역 (6단계)	2026～2030년	581억	․오위도총부, 내사복 등 24동(1,856㎡) 복원 ․별군직청 등 14동 기단 및 초석 복원 ․고궁박물관 철거 또는 리모델링
		약 5,400억	총 254동 복원

※ 2차 복원 완료시 비교 현황

고종 당시	1990년 (1차 복원 전)	2010년 (1차 복원 완료)	2030년 (2차 복원 완료)
500여동	36동	89동 복원 총 125동	254동 복원 총 379동
고종당시의	7.2%	25%	75.8%

4.		기대효과

ㅇ 경복궁의 상징 공간 회복을 통해 역사적 정통성 등 역사의식 고양 및 민족문화 자긍심 고취

ㅇ 일제에 의해 훼손․왜곡된 조선왕조 법궁의 궁제와 왕실생활 및 주요 건물 복원으로 살아있는 역사현장으로서 보존․활용 도모

ㅇ 역사문화 현장 체험기회 확대와 관람환경 개선 등을 통해 국민 문화 향유권 신장 및 고도 서울의 전통문화 관광자원 창출 기여

【단계별 배치도】