숭례문 복구

□ 추진배경 (목적)

ㅇ ‘08.2.10 방화로 훼손된 국보 제1호 숭례문을 완벽하게 복구하여 국민의 상실감 치유와 자긍심 회복 도모

□ 기본원칙

ㅇ 기존 부재는 최대한 재사용하여 역사적 건물로서의 가치 유지

ㅇ 일제강점기 철거ㆍ변형된 좌우측 성곽과 지반도 원형대로 복원

ㅇ 중요무형문화재 등 전통기술자들이 참여, 전통기법을 적용

ㅇ 문화재위원, 학계 등 원로 전문가로「숭례문복구자문단」을 구성ㆍ운영

□ 복구범위

ㅇ 문루 보수 : 1965년「수리보고서」및 2006년「정밀실측도면」참조

ㅇ 육축 보수 : 소방수 유입에 따른 안전문제를 정밀진단 후 해체 보수

ㅇ 성곽 및 지반 복원 : 좌우성곽 및 조선중후기 지반 복원

- 좌우 성곽복원 총69m(동53m/서16m)

- 조선중후기 지반 복원은 현지반에서 30cm 내려감

ㅇ 방재시스템 구축 : 첨단감지장치, 스프링클러 등 적용

□ 추진일정 (총 5년/ 3단계)

ㅇ 현장 수습 및 준비 단계 : ’08. 2월 ~ 5월 (4개월, 완료)

- 현장 안전조치, 수습부재 반출(5.8~5.30), 피해보고서 발간(5월말)

ㅇ조사ㆍ발굴ㆍ고증ㆍ설계 단계 : ‘08. 6월 ~ ‘09.12월 (1년 7개월)

- 부재 정밀분류(재사용 등), 발굴조사, 고증조사 등

- 소요부재 물량 산출, 방재설비방안 검토, 실시설계 검토

- 복구현장 공개프로그램 운영, 복구사업 종합 마스터플랜 발표

ㅇ 복구공사 단계 : ‘10. 1월 ~ ’12.12월 (3년)

- 가림막 등 가설공사 → 문루 해체 → 성곽 및 문루 복구 → 단청 → 가설덧집 해체 → 주변정비 → 준공

- 수리보고서 발간, 전시관 건립 등

□ 추진경과('08. 2 ～ '10.12)

ㅇ 숭례문 화재수습 완료 : ‘08.2 ~ ’08.5

ㅇ 숭례문 복구 기본계획 발표 : ‘08.5.20

ㅇ 숭례문 복구 및 성곽 복원설계 : '08.11~'09.11

ㅇ 숭례문 복구 참여 장인 선정 발표 (5개 종목 6명) : ‘09.12.7

ㅇ 발굴조사 실시('08년～‘10년, 총 3차, 발굴면적 5,500㎡)

ㅇ 숭례문 전통기와가마 제작 등 12개 연구용역 추진('08.6 ～'10.12)

ㅇ 숭례문 복구공사 및 성곽 복원 공사(1,2차) 추진(‘09.12~’10.12)

- 문루해체, 실측조사, 동측 성곽 53m 성곽쌓기 등 전체공정 40% 완료

ㅇ 숭례문 복구현장 공개관람 : ‘08.8 ~ '11.7(총 관람객 17,979명)

□ 2011년 사업내용

ㅇ 좌우 성곽 복원, 배면 계단 및 등성계단 해체 복원, 강화박석 수급 등

ㅇ 목재 치목 및 훼손 부재 보강, 문루 조립 등

ㅇ 기와가마 설치 및 기와제작, 철물 제작 등

ㅇ 숭례문 복구 관련 행사 및 연구용역 추진

□ 2011년 추진계획

ㅇ 숭례문 복구 및 성곽 복원공사 (3차) : 1~12월

ㅇ 숭례문 석재 및 목재 보존처리 : 3~10월

ㅇ 숭례문 복구 관련 부대공사(지하철 보강, 박석 채취장 복구 등) : 9~10월

ㅇ 숭례문 소방전기 및 경관조명공사(2차) : 3~12월

ㅇ 숭례문 폐기물처리(3차) : 1~12월

ㅇ 숭례문 복구공사 전면책임감리 (3차) : 1~12월

ㅇ 숭례문 영상자료 수집 및 기록물 제작 : 1~12월

ㅇ 숭례문 단청용 교착제 연구 : 8~11월

ㅇ 숭례문 목재 연륜연대 분석 : 4~10월

ㅇ 전시관 건립(설계) 지원(서울시) : 6～ 12월

ㅇ 기타 행사(3주기, 상량식) 및 자문회의 개최 등

□ 기대효과

ㅇ 숭례문 복구 추진을 통해 문화유산에 대한 애호의식을 고취시키고 잃어버린 자존감 회복

ㅇ 복구과정 중 전통방식을 재현하고 투명하게 공사를 진행하여 향후 문화재 수리․복구의 패러다임 제시

붙임  숭례문 복구 추진현황 사진 1부.  끝.

숭례문 복구 추진현황

<화재 수습 >                   <가설덧집 설치>

<발굴조사>                          <문루해체>

<동측 성곽복원>                    <목재 치목>

<기와 제작>                      <복구 조감도>