월정교 복원공사 추진 현황

□ 공사개요

ㅇ 공사내용

- 누각(정면 21칸 × 측면 3칸 / 길이 66.15m, 너비 9m, 높이 8.25m)

- 교각 4기(높이 9m)

ㅇ 사업기간 : '08.4월～‘14.6월

ㅇ 총공사비 : 281억원

□ 추진경과

ㅇ 복원 기본계획 수립 및 타당성 조사 : 05.10~'06.8

ㅇ 복원 세부계획 및 기본설계 : '06.12~'07.7

ㅇ 복원 실행계획 및 실시설계 : '07.9 ~ '08. 2

ㅇ 실시설계 문화재위원회심의 : '07.12. 20 ～ 12. 21

ㅇ 월정교 복원공사 착공 및 공사 추진

- 월정교 복원공사 착공(‘08.4.30) / 석재성분 및 유구비교 시험(‘08.7～9)

- 기존 하상 퇴적토 제거(‘08.8～10) / 지반조사 : 탄성파 및 관입시험(‘08.8)

ㅇ 복원공사 추진 : ‘08. 6 ~

- ‘09. 3월~10. 12월  교각쌓기 완료

- ‘10.11월~11. 5월 교량상부 목공사 완료

- ‘11. 5월~12. 12월 교량 지붕잇기 및 단청 완료

- ‘12. 12월~13. 6월 교량난간 및 경관조명 완료 (현재 누교 완료/총공정률 75%)

□ 향후 추진계획(～2014. 6월까지)

ㅇ 교량 교대 상부 석공사

ㅇ 광장조성 등 부대공사