(붙임 1)

「울산 경상좌도병영성」 축성 600주년 기념

중장기 정비 계획

Ⅰ		추진 배경

□ 사적 제320호 ‘울산 경상좌도병영성’ 축성 600주년이 되는 2017년을 목표로,

□ 그간 진행되어온 문화재 보존정비사업의 가시적 성과 도출과 활성화 계기 마련

※ 울산 경상좌도병영성: 1417년(태종 17)에 경상좌도 병마절도사가 있던 영성(營城)으로 축성, 1894년(고종 31)까지 존속, 조선시대 성곽 연구에 중요한 유적

Ⅱ		계획의 주요 내용 (‘14~’17년 / 133억 원)

□ 병영성 보수‧복원을 통한 제 모습 찾기(‘14~’17년 / 118억 원)

ㅇ 병영성 주요 구간에 대한 보수‧정비를 완료하여 병영성 역사성 회복

ㅇ 세부내용: 서문지～북문지～동문지 성벽(약 1km) 정비, 동문 복원

※ 남문지 주변은 ‘17년 이후 정비

※ 최근 발굴조사를 통해 동문지 전체 유구 확인

□ 병영성 주변 관리 체계 합리화(‘14~’15년 / 3.3억 원)

ㅇ 문화재와 역사문화환경 보호를 위한 구역 확대와 기준 세부화

ㅇ 세부내용: 문화재 보호구역 추가 지정 추진(예: 홍일아파트 축대벽(옹벽), 연못지, 북문지 앞 소광장), 현상변경 허용기준 고시

□ 병영성 관리의 안정성 확보(‘15년 / 7억 원)

ㅇ 병영성 주변 위험구간에 대한 정비를 통해 주민 안전을 높임

ㅇ 세부내용: 홍일아파트 주변 축대벽(옹벽, 민원 집중지역) 보강 조치

□ 주민과 함께하는 병영성 활용(‘16년 / 5.1억 원)  ※ 중구청 자체 사업

ㅇ 병영성을 모티브로 한, 다양한 관광 활성화‧문화재 활용

ㅇ 세부내용: 600주년 기념 상징(엠블럼) 개발, 병영성 축제 활성화

Ⅲ		향후 계획

□ 중장기 정비계획에 따라 보수‧정비 실시(‘14.7월~)

※ 세부사업별 필요한 절차 이행(보호구역 지정, 현상변경 허가, 보수정비사업 예산 확보 등)

참고자료 1		주요 사업내용

□ 병영성 보수‧복원을 통한 제 모습 찾기

ㅇ 서문지～북문지～동문지 성벽 정비 - 세부내용 ‧ 대상구간에 대한 시발굴조사는 완료단계에 있으며, 일부 구간(백색)은 정비공사가 완료되었으므로 잔여구간에 대한 정비가 필요함

ㅇ 동문 복원

- 세부내용

‧ 사업완료 후 가시적 성과가 가장 클 것으로 기대되는 동문 지역을 우선 복원

‧ 최근 발굴조사를 통해 옹성과 개구부, 양측 체성, 주변 해자 등 동문지의 전체 유구가 확인되어 복원의 기초자료와 타당성 확보

□ 병영성 주변 관리 체계 합리화

ㅇ 문화재 보호구역 추가 지정

- 지정 대상(안)

‧ 홍일아파트 옹벽: 동동 116-1번지

‧ 연못지: 서동 253번지 외 2필지

‧ 북문지 앞 소광장 동동 51-7번지 외 1필지

ㅇ 현상변경 허용기준 고시

- 세부내용

‧ 병영성 주변 200m 범위 내에서 각종 건설행위 시 행위 기준 수립

‧ 건축물 높이에 색채, 외관, 재질 등을 추가, 문화재에 어울리는 역사․문화 환경 조성을 위한 기준 마련

□ 병영성 관리의 안정성 확보

ㅇ 홍일아파트 주변 옹벽 보강

- 세부내용

‧ 어스앵커 시공 후 옹벽 상부의 기존 경사면에 숏크리트 타설

‧ 코아네트와 시드 스프레이로 사면 안전화

<어스 앵커의 구성>	<어스 앵커 시공>
<숏크리트 타설>	<코아네트와 시드 스프레이>

□ 주민과 함께하는 병영성 활용

ㅇ 600주년 기념 상징(엠블럼) 개발

- 세부내용

‧ 병영성 축성 600주년 기념사업의 효과적인 홍보와 병영성의 시각적 아이덴티티 확보

ㅇ 병영성 축제 활성화

- 세부내용

‧ 기존의 병영성 관련 축제를 통합, 운영

참고자료 2		추진 일정

구 분	세부사업	2014년	2015년			2016년	2017년
병영성 보수‧복원을 통한 제모습 찾기	서문지-북문지-동문지 성벽 정비	제1구간 (서문지~133미터지점) 정비	제2구간 (133미터~북문지, 동문지~개나리아파트) 실시설계			제2구간 (133미터~북문지, 동문지~개나리아파트) 정비공사
	동문 복원	부지매입, 발굴조사 기본계획 수립, 현상변경 심의	실시설계 정비공사			정비공사
병영성 주변 관리체계 합리화	문화재 보호구역 추가 지정	보호구역 추가지정
	현상변경 허용기준 고시		용역 시행, 기준 고시
병영성 관리의 안전성 확보	홍일아파트 주변 옹벽 보강			보강 공사
주민과 함께 하는 병영성 활용	600주년 기념 엠블럼 개발					엠블럼 개발, 보급
	병영성 축제 활성화					축제 운영	축제 운영

참고자료 3		소요 예산

구 분	세부사업	소요예산
		계	국비	지방비
병영성 보수‧복원을 통한 제모습 찾기	서문지-북문지- 동문지 성벽 정비	7,000	4,900	2,100
	동문 복원	4,832	3,382	1,450
병영성 주변 관리체계 합리화	문화재 보호구역 추가 지정	300	210	90
	현상변경 허용기준 고시	30	-	30
병영성 관리의 안전성 확보	홍일아파트 주변 옹벽 보강	700	490	210
주민과 함께 하는 병영성 활용	600주년 기념 엠블럼 개발	280	-	280
	병영성 축제 활성화	230	-	230
합 계		13,372	8,982	4,390

(단위: 백만 원)

※ 성벽 정비 예산 중 30억 원은 이미 확보되었음