	「문화재청(www.cha.go.kr) 새소식, 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr) 정책뉴스」 동시 게재

보 도 자 료 [2015. 1. 27.]	보도시점	배포 시점부터 보도해 주시기 바랍니다.
	담당부서	궁능문화재과	전화번호	042-481-4773 042-481-4774
	담 당 자	김재길 사무관 전원일 주무관	F A X	042-481-4709

문화재청, ‘사직단’ 본모습 되살린다

- 2027년까지 핵심영역(제례공간) 대상 주요 전각․지형 복원 -

문화재청(청장 나선화)은 21세기 문화융성 시대를 맞아, 조선 시대 왕실 사당인 종묘(宗廟)와 함께 국가 최고 의례시설이었던 사직단(社稷壇)의 상징성과 역사성 회복을 위해 사직단 복원정비계획을 마련하여 올해부터 복원에 나선다.

* 사직단(社稷壇): 토지의 신(社)과 곡식의 신(稷)에게 제사를 지내는 제단

종묘는 본래의 자리에 옛 모습 그대로 보존되어 1995년도에 유네스코 세계유산에 등재․관리되고 있는 반면, 사직단은 일제강점기에 사직대제(社稷大祭) 폐지(1911년), 공원 조성(1922년) 등으로 역사적 가치가 크게 훼손되었으며, 광복 이후에도 경제개발 논리에 밀려 부지가 축소되고 각종 근대 시설물이 들어서는 등 본연의 모습을 잃었다.

그동안 서울특별시(1985년)와 종로구(2008년)에서 복원계획을 마련하여 추진하였으나 담장 설치 등 일부분에 그쳤다. 이에, 문화재청은 2012년 1월 종로구로부터 사직단 관리권한을 인계받은 후 종합적이고 체계적인 복원을 위하여 복원정비 연구용역을 새롭게 추진하였으며, 이 과정에서 국회의 사직단 복원촉구 결의(2014년), 관계 전문가 자문, 공청회, 관계 기관 간담회 등 의견 수렴을 통해 복원정비 계획을 마련하였다.

사직단 복원정비는 2015년도 제례공간인 전사청 권역 등 핵심영역(Ⅰ영역)에 대한 발굴조사를 시작으로, 2027년까지 주요 전각(13동 복원, 3동 보수)과 지형 등을 복원해 나갈 예정이다.

복원정비 기본방향은 ▲ 복원정비 기준시점은 20세기 초반으로 설정(숙종 연간 정비 이후 1911년 제례의 폐지 이전까지 건축·시설의 큰 변화 미확인) ▲ 지역주민과의 상생 도모를 위하여 제사 및 준비영역, 제례동선 등 핵심영역 중심으로 복원․정비 ▲ 인왕산과의 경관을 고려한 지형과 수림 복원 ▲ 변형․멸실된 건축물은 발굴조사와 고증을 토대로 원형으로 복원․보수 ▲ 문화재 보존관리와 관람객 편의, 문화재 활용 등을 고려한 영역별 정비계획 수립 추진 ▲ 장기(Ⅱ∼Ⅲ 영역) 복원정비사업은 단기·중기(Ⅰ영역) 복원정비사업 완료 후 협의체(지역주민, 관계기관, 관계전문가, 문화재청 등으로 구성) 운영을 통해 충분한 의견 수렴과 공론화 과정을 거쳐 사업추진 여부 결정 등이다.

* Ⅰ영역(제례공간/ 안향청, 전사청 권역 등), Ⅱ영역(후원공간/ 어린이도서관,
종로도서관, 단군성전 등), Ⅲ영역(진입공간/ 사진단 대문, 전면 도로 등)

문화재청은 사직단 복원정비를 통하여 국민의 문화향유권 신장과 함께 서울의 4대궁, 종묘와 같이 전 국민의 역사교육공간이자 관광자원으로 거듭날 수 있기를 기대한다.

붙임 1. 사직단 영역별 복원정비 계획.

2. 사직단 주변 현황 및 복원 조감도.  끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 상업적, 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

(붙임 1)

사직단 영역별 복원정비 계획

□ 주요 사업내용

ㅇ 사업기간/총사업비: 2015～2027년(13개년)/ 164.8억 원(추정)

ㅇ 사업내용: 핵심영역 주요전각 및 지형 복원, 전시 및 활용연구

영 역 별		사업기간	소요예산	사 업 내 용
단기	Ⅰ-3∼4영역	2015～2017년	50.1억원	ㅇⅠ-3∼4영역 시·발굴조사 ㅇ동상이전, 관리사무소 건립 ㅇ부대시설정비(수목정비 등) ㅇ전사청 권역 복원 설계
중기	Ⅰ-2∼4영역 (1차)	2018～2020년	42.1억원	ㅇ전사청 권역 복원 ㅇ제례동선 정비 ㅇⅠ-2영역 시·발굴조사
	Ⅰ-1∼2영역 (2차)	2021～2024년	55.1억원	ㅇ안향청 권역 복원․정비 ㅇ외장 확장 ㅇⅠ-1영역 시·발굴조사
	Ⅰ-1영역 (3차)	2025～2027년	17.5억원	ㅇ단유(시설물)·신실 보수·정비 ㅇ편의시설 정비 ㅇ전시 및 콘텐츠 개발, 제례 복원 연구
계		13년	약 164.8억원	총 13동 복원, 3동 보수

※ 사직단 장기(Ⅱ∼Ⅲ 영역) 정비사업은 협의체(주민, 관계기관, 관계전문가, 문화재청) 운영을 통한 협의를 거쳐 사업추진 여부 결정

□ 사직단 경역 및 영역별 배치도

※ Ⅰ영역(제례공간/안향청, 전사청 권역 등), Ⅱ영역(후원공간/어린이도서관, 종로도서관, 단군성전 등), Ⅲ 영역(진입공간/사진단 대문, 전면 도로 등)

(붙임 2)

사직단 주변 현황 및 복원 조감도

사직단 주변 시설 현황(전경, 핵심영역    )

핵심영역(Ⅰ영역) 복원정비 조감도