	보 도 자 료 [2015. 12. 14.]	배포 시점부터 보도해 주시기 바랍니다.
담당부서: 궁능문화재과 담 당 자: 김재길 사무관(042-481-4773), 전원일 주무관(042-481-4774)

경복궁 2차 복원사업 계획, 규모는 줄이고 기간은 늘린다

- 방재 여건과 관람환경 고려한 복원 규모 축소와 복원 기간 연장 -

문화재청(청장 나선화)은 일제강점기 당시 훼손된 경복궁 위상과 민족 역사성 회복을 위하여 추진하고 있는 경복궁 2차 복원 사업에 대하여 복원 규모를 축소하고 복원 기간을 연장하는 방향으로 조정하기로 하였다.

* 경복궁 1차 복원사업(1990∼2010) 완료: 광화문, 흥례문, 강녕전, 태원전 등 89동 복원(경회루,

근정전 등 1차 복원사업 이전 기존건물 36동 포함 시 고종 당시 500여 동 중 25% 완료

기존 경복궁 2차 복원 기본계획은 경복궁의 기본 궁제(宮制)를 충실하게 복원하는 방향으로 계획하였다. 그러나 복원을 추진하는 과정에서 문화재에 대한 방재여건과, 급증하는 관광객으로 인한 관람환경 개선, 복원 후 어떻게 활용할 것인가에 대한 문제점이 제기됨에 따라 복원대상 건물을 축소 조정(254동→ 80동)하였다.

아울러 경복궁 원형 복원에 더욱 충실하기 위하여 발굴조사와 문헌 등 고증자료를 확보하고 경복궁내 동시다발적인 공사로 인한 관람객 불편을 최소화하기 위해 사업기간을 기존 20년간에서 35년간으로 15년 늘려 조정하였다.

문화재청은 이번 복원 규모 축소, 복원 기간 연장을 통해 복원된 경복궁에 대한 국민의 기대감이 저하되지 않도록 노력할 것이다. 또한, 복원사업 완료 후, 온 국민이 공감하고 민족의 자긍심을 고취시킬 수 있는 명실상부한 고품격의 우리나라 대표 궁궐, 경복궁으로 거듭날 수 있도록 남은 복원 사업에 최선을 다할 계획이다.

붙임 1. 경복궁 2차 복원 세부계획(조정 후).

2. 경복궁 2차 복원 세부계획(조정 전).  끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 상업적, 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

	「문화재청(www.cha.go.kr) 새소식, 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr) 정책뉴스」 동시 게재

(붙임 1)

경복궁 2차 복원 세부계획(조정 후)

1		단계별 사업 계획

ㅇ 총 사업 기간: 2011~2045(35개년)

ㅇ 총 사업 예산: 3,000억원, 80동 건물복원, 223동 기단·초석복원 및 유구정비

사 업 순 서		사 업 내 용
1 단계 궁중생활 권역 복원	소주방 및 흥복전 영역 등 (2011~2021년)	복원내용 (건물 28동)	소주방 영역: 내․외소주방 등 17동 흥복전 영역: 흥복전, 영훈당 등 11동 기단, 초석복원 및 유구정비 21동
		소요예산	약 584억원
2 단계 제왕교육 및 궁중군사권역 복원	동궁 및 오위도총부 영역 등 (2019~2028년)	복원내용 (건물 14동)	동궁영역: 계조당 등 2동 복원 건춘문영역: 수문장청 등 2동 복원 오위도총부 영역: 오위도총부, 상의원 등 10동 기단, 초석복원 및 유구정비: 별감방 등 37동
		소요예산	약 502억원
3 단계 궁중통치권역 복원	궐내각사 영역 등 (2026~2034년)	복원내용 (건물 14동)	영추문 영역: 영추문 및 수문장청 등 2동 궐내각사 영역: 정원, 의약청, 빈궁 등 12동 어구 복원 및 주변 정비 기단, 초석 복원 및 유구정비: 국별장직소 등 27동
		소요예산	약 529억원
4 단계 궁중의례권역 복원	선원전 및 혼전 영역 (2031~2042년)	복원내용 (건물 23동)	신무문 영역: 수문장청 등 2동 문경전, 회안전 영역: 문경전 7동 선원전 영역 : 국립민속박물관 철거, 선원전 등 8동 만경전 영역: 만경전 등 6동 기단, 초석복원 및 유구정비: 회안전 수궁 138동
		소요예산	약 1,304억원
5 단계 궁중방어권역 복원	동·서십자각 및 내사복 영역 (2040~2045년)	복원내용 (건물 1동)	서십자각 영역: 서십자각 1동, 궁장복원
		소요예산	약 81억원

2		단계별 배치도

3		건물 복원 범위 배치도

(붙임 2)

경복궁 2차 복원 세부계획(조정 전)

1		단계별 사업 계획

ㅇ 총 사업 기간: 2011~2030(20개년)

ㅇ 총 사업 예산: 5,400억원, 254동 건물복원, 102동 초석복원

사 업 순 서		사 업 내 용
1 단계 궁중생활 권역 복원	소주방 및 흥복전 권역 등 (2011년～2016년)	복원내용 (건물 56동)	소주방 영역: 내․외소주방 등 18동 흥복전 영역: 흥복전, 영훈당, 다경합 등 31동 자미당․인지당 영역: 자미당, 인지당 등 7동
		소요예산	약 1,038억 5천만원
2 단계 궁중통치권역 복원	궐내각사 권역 등 (2013년～2020년)	복원내용 (건물 66동)	영추문 영역: 영추문 및 수문장청 복원 수정전 영역: 수정전 행각 등 14동 궐내각사 영역: 선전관청, 빈청, 정원 등 50동 경회루 남측 및 서측 담장 복원 어구 복원 및 주변 정비 기단, 초석 복원: 국별장직소 등 9동
		소요예산	약 1,201억 3천만원
3 단계 제왕교육권역 복원	동궁 권역 등 (2019년～2022년)	복원내용 (건물 21동)	동궁영역: 춘방, 계방, 계조당 등 19동 건춘문영역: 수문장청 등 2동 복원 기단, 초석복원: 별감방 등 5동 훼손된 근정전, 흥례문 행각 내부 원형 복원
		소요예산	약 651억 9천만원
4 단계 궁중의례권역 복원	혼전 권역 (2021년～2025년)	복원내용 (건물 42동)	문경전 및 회안전 영역: 문경전, 회안전 등 29동 보현당 영역: 보현당, 각감청 등 9동 신무문 영역: 수문장청 등 3동, 측간 1동 기단, 초석복원: 회안전 수궁 1동
		소요예산	약 759억 5천만원
5 단계 궁중의례 권역 복원	선원전 권역 (2022년～2027년)	복원내용 (건물 45동)	선원전 영역: 국립민속박물관 철거, 선원전 등 10동 만경전 및 만화당 영역: 만경전 등 20동 상궁 및 나인처소 영역: 제수합 행각 등 15동 기단, 초석복원: 영보당 등 73동
		소요예산	약 1,163억 7천만원
6 단계 궁중군사권역 복원	군사관청 및 내사복 권역 (2026년～2030년)	복원내용 (건물 24동)	오위도총부 영역: 오위도총부, 상의원 등 10동 내사복 영역: 내사복 등 13동 복원 서십자각 영역: 서십자각 1동, 궁장복원 기단, 초석복원: 별군직청 등 14동 고궁박물관 철거 또는 리모델링
		소요예산	약 580억 5천만원

2		단계별 배치도

3		건물 복원 범위 배치도