영․영릉(英․寧陵)유적 종합정비 사업 개요

1		사업목적

ㅇ 변형․훼손된 영․영릉(英․寧陵)의 능제 및 주변경관을 체계적으로 복원․정비하여 조선왕릉의 진정성 회복

ㅇ 역사문화공간 확충 및 관람환경 개선으로 역사교육 및 문화관광자원으로 활용

2		그동안 추진경과

ㅇ 英陵 (구)재실유적 발굴조사 (2006~2007)

ㅇ 영․영릉(英․寧陵)조성 및 관리에 관한 조사연구 용역 (2008)

ㅇ 영․영릉(英․寧陵) 종합정비 기본계획 용역 (2009. 5)

ㅇ 조선왕릉(英․寧陵) 능제복원 기본계획 연구 (2010, 궁능문화재과)

ㅇ 영․영릉(英․寧陵) 능제발굴 조사 (2011)

- 참도, 어구, 홍살문, 금천교, 연지, 원지반 및 지형 등 확인

3		주요 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2012 ～ 2016년(5개년)

ㅇ 사 업 비 : 253억 원(추정)

ㅇ 사업내용

- 능제복원․정비 115,200㎡

․능침 원지형 복구, 능제시설 복원(참도, 어구, 홍살문, 금천교, 연지 등), (구)재실복원 7동, 세종전, 훈민문 등 변형시설물 철거 7동

- 복합문화 공간 및 관리기반 시설 건립

․세종대왕역사전시관(가칭, 1,650㎡) 1동, 과학기구 재정비 야외전시 1,500㎡, 세종대왕 동상 이전 1기, 관리사무소(600㎡) 1동

- 조경정비 1식

․연지복원, 어정 및 제정복원, 신성림 조성, 관람로 및 탐방로 정비, 주차장 정비, 소하천 및 배수시설 정비, 산림 내 수목정비 등

- 관람편의 시설 및 환경개선 1식

․화장실 건립 6동, 휴게지역 및 쉼터조성 3개소, 매․수표소 3개소, 안내판, 방향표지판 등

- 소방, 전기, 통신, 경비, 상․하수도 부대시설 1식

4		연도별 세부추진 계획(안)

연 도	사업비	사 업 내 용
‘12년	600백만원	영․영릉(英 ․寧陵) 유적 종합정비 실시 설계용역
‘13년	3,823백만원	ㆍ英陵 부지정비 840㎡, 寧陵 부지정비 1,980㎡ ㆍ英陵 어구복원 3,600㎡, 英陵 참도복원 203㎡, 홍살문 이전 복원 1식 ㆍ영릉 재실터 유적 발굴조사 및 재실 복원 7동
‘14년	7,945백만원	ㆍ관리사무소, 세종대왕역사전시관 건립 2,250㎡ ㆍ英陵 주차장 정비, 英陵 주변 콘크리트 및 블록 철거 ㆍ금천교 이전복원, 英陵 재실 복원
‘15년	8,094백만원	ㆍ훈민문, 세종전, 관리소, 휴게소 등 철거 ㆍ신성림 복원 및 쉼터공사 ㆍ英陵 연못(외연지)복원 741㎡, 寧陵 연못(연지)복원 494㎡ ㆍ어정 및 제정복원 2식
‘16년	4,829백만원	ㆍ경내 화장실 정비 6동 ㆍ야외 유물전시장 정비 설계, 시공 1식 ㆍ경내 배수시설 철거, 英陵 능침탐방로 철거 ㆍ편의시설, 안내판 정비, 조명 등 설계 시공 1식 ㆍ정문 및 매․수표소 설치 등
계	25,291백만원

5		종합정비 현황배치 조감도