칠백의총 기념관 전시시설 제작설치 제안요청서

2019. 7.

칠백의총 기념관 전시시설 제작설치 제안요청서

1

과업 목적

❍ 칠백의총의 기념관의 전시 시설물 설계 및 제작․설치

❍ 칠백의총과 관련한 전시 콘텐츠 개발 및 설치

❍	전시관 운영에 따른 세부 계획안 작성

2

과업 개요

❍ 사업명 : 칠백의총 기념관 전시시설 제작설치

❍ 과업기간 : 계약 후 360일 이내

※ 하자보수보증기간은 납품일(시운전조건부계약인 경우 시운전이 완료된날)로부터 2년 후까지

❍ 사업장소 : 칠백의총 기념관 (충남 금산 소재)

❍ 사업대상 및 규모 : 지하1층과 지상1층의 전시관련공간 총1,511.68㎡

층별	실명	면적(㎡)	비 고
지하1층	수장고	177.40	항온항습실, 수장대, 조습패널 설치 등
	교육실	124.88	영상, 음향설비, 주제영상 제작
	상설전시실	297.54	금산전투와 순의정신을 주제로한 전시공간 조성
지상1층	기획전시실	126.41	다양한 기획전시에 대응
공용공간	홀, 램프 등	785.45	전시주제와 연계한 관람환경 조성
합계		1,511.68

※ 상기 면적은 변동될 수 있으며 전시관의 용도와 명칭은 협상에 의하여 결정.

❍ 사업비 : 3,310,000,000원(부가세 포함)

❍ 계약방법 : 협상에 의한 계약

※ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 및 동법 시행령 43조, 기획재정부 계약예규 제409호 「협상에 의한 계약체결 기준」에 의함

❍ 추진일정

구 분	추진일정	내 용
제안공모 공고	2019. 7.(예정)	조달청 나라장터(G2B), 문화재청 홈페이지(새소식-입찰정보)
현장설명회	공고문 참조	장소 : 충북 금산군 금성면 의총길 50 칠백의총 신축 기념관 ※ 현장설명회 불참 시 입찰참가자격 없음
질의접수	현장설명 후 3일 이내	칠백의총 이메일 clfqor700@korea.kr로 신청 ※해당일(9:00~18:00)까지 접수분에 한함
질의회신	질의접수 후 5일 이내	제안사 이메일로 일괄회신
제안서 접수	공고문 참조	나라장터(e-발주시스템)를 통하여 전자적으로 제출
제안서평가	제안서 접수 후 5일이내	장소 : 추후 통보 (개별 또는 홈페이지) 시간 : 추후 통보 (개별 또는 홈페이지)

※ 현장설명회에 참석한 업체에 한하여 질의 기회 부여 및 입찰참여 가능

- 현장설명회 준비를 위해 참석규모를 사전 파악하고자 하니 참석 희망업체는 <붙임5>를 작성하시어 현장설명회 전일까지 이메일( clfqor700@korea.kr ) 또는 FAX(041-753-5700)로 보내주시기 바랍니다.

- 공동수급체 대표사는 반드시 참석하여야 함

※ 질의서 등재 후 전화(041-753-8701)로 접수여부를 확인하여야 함. 공동수급 대표자만 질의할 수 있음 (답변내용은 본 지침서에 대한 추가 또는 수정으로 간주함)

※ 추진일정은 사업계획의 변경이나 기타 사정에 의거 변동될 수 있음

3

계약방법 및 참가자격

❍ 계약방법 : 협상에 의한 계약

※ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 및 동법 시행령 43조, 기획재정부 계약예규 제409호 「협상에 의한 계약체결 기준」에 의함

❍ 입찰참가 자격

- ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제12조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 유자격자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 개찰일 전일까지 나라장터(G2B시스템)에 아래의 자격을 갖추어 등록한 업체

① 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 입찰참가자격등록 마감일시까지 실물모형(세부품명번호 10자리 6010989901)을 제조물품으로 입찰참가 등록한 자

② 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업확인서를 소지한 자

* 중소기업확인서는 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

③ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서[세부품명 : 실물모형, 세부품명번호 10자리 : 6010989901]를 소지한 자

* 직접생산확인증명서는 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

<계약체결 후 하청생산 납품, 다른 회사 완제품 구매 납품 등 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제11조의 ‘직접생산 확인 취소’ 사유에 해당하는 경우 계약 해제․해지 처리 및 ‘부정당업자 입찰참가자격 제한 처분'을 받을 수 있습니다.>

④ 건설산업기본법 제9조에 의한 실내건축공사업[업종코드 0006]으로 입찰참가 등록한 자

⑤ 산업디자인진흥법 제9조에 의한 산업디자인전문회사(종합디자인분야)[업종코드 4444] 또는 산업디자인전문회사(환경디자인분야)[업종코드 4442] 또는 산업디자인전문회사(시각디자인분야)[업종코드 4440] 또는 산업디자인전문회사(제품디자인분야)[업종코드 4441]로 입찰참가 등록한 자

⑥ 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 제57조에 의한 비디오물제작업[업종코드 3244](허용업종코드 : 음반·음악영상물제작업[업종코드 3243] 또는 문화산업전문회사[업종코드 3276]) 또는 소프트웨어산업 진흥법 제24조에 의한 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)[업종코드 1469]로 입찰참가 등록한 자

⑦ 제안요청서(사업) 설명회에 참석한 자

- 공동수급에 관한 사항

ㆍ 본 사업은 공동계약(공동․분담이행방식)이 가능하며 분담이행의 경우 면허를 보완하는 형식으로 참석 가능함

ㆍ 공동수급기관의 수는 대표업체를 포함, 3개 업체 이내로 하고 공동수급협정서를 제출하여야 하며, 공동이행방식의 경우 기관별 지분율은 최소 10% 이상이어야 함

ㆍ 공동수급체 구성원은 ｢독점규제 및 공정거래에 관한 법률｣에 의한 계열사가 아니어야 함

ㆍ 공동수급체의 구성원은 본 입찰 외 다른 공동수급체에 중복으로 참가할 수 없고, 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없음

※ 세부사항은 “공동계약 운용요령(기획재정부계약예규 제410호)” 참조

- 참가 제한 사항

ㆍ 입찰등록일 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제76조에서 정한 부정당업체로 지정받은 사실이 있거나, 폐업신고 수리를 받은 업체는 단독입찰 또는 공동수급체의 구성원으로 참가할 수 없음

ㆍ 현장설명회에 참가한 업체만 입찰참가 등록 가능

- 기타 사항

ㆍ 입찰 참가자는 본 입찰공고와 제안요청서에서 적용하는 법령 및 규정을 숙지하여야 하며, 미숙지로 인한 책임은 입찰참가자에게 있다.

4

현장설명회

※ 현장설명회 준비를 위해 참석규모를 사전 파악하고자 하니 참석 희망업체는 <서식1-1>을 작성하시어 (현장설명회 전일)까지 이메일( clfqor700@korea.kr ) 또는 FAX(041-753-5700)로 보내주시기 바랍니다.

❍ 등록일시 : 공고문 참조

- 등록시간: 14:00 ~ 14:30

- 설명시간: 14:30 ~ 16:00

※  등록시간 내 등록장소에 도착하지 못한 사업자는 등록 및 설명회 참석을 할 수 없으며, 설명시간은 변동가능

❍ 등록장소 : 칠백의총 관리사무소 회의실

※ 일시 및 장소는 참석예정 인원에 따라 변경될수 있음.

❍ 등록방법 : 직접제출 (우편접수 불가)

❍ 현장설명회 참가 구비서류 (신분증 필히 지참)

- 현장설명회 참가 신청서(응모 신청서) <서식1호>  ························   1부

- 사업자등록증 사본                 ·························································  1부

- 위임장(대리인참석시 위임장, 신분증, 재직증명서 지참)  ···········   1부

- 법인등기부등본 및 법인인감증명서(사용인감계)   ·····················  각 1부

※ 모든 사본에는 “사실과 상위없음” 명기 후 인감날인

※ 공동수급체의 경우 대표업체의 대표자 또는 대리인이 반드시 참석하여야 한다.

❍ 참석대상 : 대표자 또는 위임장을 소지한 대리인 또는 공동참여 대표사의 대표자 또는 위임장을 소지한 대리인 (2인이내)

❍ 유의사항 : 현장설명회 시 기존도면 등 설계참고 자료를 제공할 예정이며, 설명회 미참석 시 입찰참가자격 없음

5

질의 접수 및 회신

❍ 질의접수 : 현장설명회 후 3일 이내 9:00~18:00

❍ 질의방법 : 대표자에 한하여 칠백의총관리소 이메일( clfqor700@korea.kr )로 질의

❍ 회신기간 : 질의접수 후 5일 이내 9:00~18:00

❍ 회신방법 : 참가업체 모두에게 이메일로 일괄 회신

※ 서면 질의에 대한 답변내용은 본 제안요청서에 대한 추가 또는 수정으로  간주한다.

6

제안 지침

❍ 전시 설계

- 전시구성(안)에 따른 전시연출계획 마련

- 전시연출계획에 따른 전시실 내부 마감, 설비(전기, 통신, 소방, 공조, 보안 등 전시실 조성 관련 일체), 전시연출물 실시설계도면(시공상세도면 포함)과 산출내역서 작성

- 전시유물 배치 계획 수립 및 배치 상세도면(유물사진과 유물번호, 네임카드 배치 계획) 작성

- 전시 조명 계획 및 조명 설치 상세도면(조명 방식 및 조명 설비, 등기구, 필터 종류, 효과 기재)

- 전시공간 및 건물 사인물 디자인 및 제작설치 계획

- 수장고 설계: 항온항습실, 조습패널, 수장대, 출입문등 마감일체

- 교육실 설계: 영상, 음향장비, 관람석, 주제영상, 내부마감 일체

❍ 전시실 인테리어

- 전시연출 실시설계도면에 따른 전시실 내부 마감 및 구조물의 제작ㆍ 설치, 도색 등 전시실 인테리어

- 전시연출 실시설계도면에 따른 전시실 내 설비(전기, 통신, 소방, 공조, 보안 등) 공사

- 복도, 홀, 램프등 전시관련 공용공간 환경조성

- 기타 전시실 조성을 위한 일체의 제반 작업(폐기물 처리 포함)

❍ 전시물 제작․설치

- 상기 ‘전시 설계’에 따른 전시물 제작 및 설치 일체

- 전시연출 실시설계도면에 따른 연출물의 제작․설치 등 전시연출 관련 일체

- 모형, 영상 등 연출요소 일체 제작ㆍ설치

- 전시 그래픽 디자인 및 제작․설치(이미지월, 패널, 설명카드 등)

- 전시물 진열장 및 전시 보조물 제작․설치(전시물 받침대, 연출보조물 등)

- 전시실 내 동선 방향 표시 및 관람객 안내 사인물 디자인 및 제작․설치

- 수장고, 교육실 조성

❍ ‘장애물 없는 생활환경 인증’ 등 법적 인증을 받을 수 있는 설계 및 시공이 이루어져야 하며, 용역기간 내 인증을 받을 수 있도록 적극 협조한다. 단 사업자의 책임 없는 사유(전시시설에서 인증 보완사항 미발생)로 인한 인증 지연 시에는 인증서 발급과 관계없이 용역을 완료 할 수 있다.

❍ 계약 후 제출서류(착수 및 완료)

일정	추진내용
착수 시	착수보고서(각 2부)
	착수계, 용역총괄책임자계(재직증명서 포함), 현장대리인계(재직증명서 포함), 예정공정표, 산출내역서, 보안각서, 과업수행참여자 명단(재직증명서 포함), 사업수행계획서(시공계획서 및 도면 포함), 청렴서약서, 인감증명서, 사용인감계, 사업관련 등록 및 면허증 사본, 저작재산권 전부에 대한 양도계약서, 저작권 독점적 이용허락계약서
계약기간 중	설계도서
	설계단계: 실시설계 완료 시 제출서류 -도면, 원가계산서, 일위대가, 단가조사표, 수량산출서, 견적서 등 공사단계 : 용역 진행 내용, 관련기관 업무협의 내용, 업무일지(투입인력 현황, 진척사항, 장비반입 상황, 기타 특기사항 기록)
계약완료 시	완료보고서(각 2부)
	완료계, 검사검수요청서, 준공대가정산서류(국민연금, 건강보험료, 퇴직공제부금비 납부 확인서 등) 완료보고서(준공설계도면, 진행과정 기록 및 사진, 완료사진, 공정표, 정산내역서 포함 제본) ※정산내역서는 원가계산서, 일위대가, 단가조사표, 수량산출서, 견적서 등 포함 외장하드(완료보고서 내용 및 그래픽디자인 파일 원본, 영상완성본, 편집사진 등 산출물 일체 수록) 유지보수 계획서 및 기술 지원 확약서(품질인증서류 포함), 사용자 및 관리자 매뉴얼(메뉴별 기능설명서) 제본본 * 대금지급서류 : 대금청구서, 세금계산서(G2B), 하자보수보증증권(2%), 국세지방세 완납 증명서

7

제안서 접수

❍ 나라장터(e-발주시스템)를 통하여 전자적으로 제출하며, 제안서류 일체(제안서, 사업수행능력평가서)는 PDF 파일 형식으로 제출(총200MB를 초과할 수 없음)

- 제출서류

① 기술제안서

ㆍ총30페이지(단면) 이내, A3용지 인쇄를 고려하여 작성

※ 기술제안서 내용, 파일명, 표지에 업체명 표기 금지

② 사업수행능력 평가서

ㆍ제안사 일반현황  : 대표업체 및 공동수급업체

ㆍ수행경험(실적)    : 실적평가 자료

※ 용도(문화 및 집회시설) 확인을 위해 건축물대장 제출한 실적만 인정

ㆍ기술인력보유상태 : 보유현황 자료

ㆍ경영상태 건전성  : 경영상태평가용 확인서

ㆍ신     인     도 : 관련 자료(행정처분 사실 확인서)

ㆍ사업수행능력자기평가표

③ 가격제안서: 조달청 시스템을 통한 투찰(지문투찰)

❍ 유의사항

- 제안서는 제안사 별로 한 건에 한하며, 추가로 제출하거나 수정, 변경, 보완할 수 없다.

- 제안사는 제출도서에 제출자를 인지할 수 있는 표기를 할 수 없으며, 위반시에는 평가에서 제외될 수 있다.

- 제출한 입찰서류 및 제안서는 일체 반환하지 않고, 제안서 작성 및 제출 성과물과 관련된 일체의 비용은 제안사가 부담한다.

- 제안서 제출은 기술제안서, 사업수행능력평가서(정량적 평가)를 각각 분리하여 제출한다.

- 제출한 서류에 위·변조나 허위사실이 발견된 경우 낙찰자로 선정된 이후라도 낙찰을 취소할 수 있다.

- 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설할 수 없으며, 이를 위반하여 발생한 문제는 제안사가 책임진다.

- 입찰에 제출하는 서류가 사본일 경우에는 “사실과 상위없음”을 확인･날인하여 제출한다.

8

제안서 작성요령 및 유의사항

❍ 제출도서의 종류 및 규격

도서명	수량	규격 및 양식
기술제안서	파일 1개	▪ PDF 파일형식으로 제출 ※ 제출한 파일로 발표(PPT등 변환 불가) ▪ A3(420mm×297mm)규격 ‘횡’으로 작성 ▪ 제공된 표지(서식)와 용지서식을 사용하여 총 30매 이내 ※ 기준 매수 엄수 / 표지, 배면지 제외
사업수행능력 평가서	파일 1개	▪ PDF 파일형식으로 제출 ▪ A4규격 ‘종’으로 작성
가격제안서		▪ 조달청 시스템을 통한 투찰(지문투찰)

❍ 제출도서의 작성방법 및 작성목차

- 공통사항

ㆍ 제출도서에는 내용과 관련 없는 업체명, 기타 이와 유사한 표기를 금한다.

- 기술제안서

ㆍ 1개 파일 제출

ㆍ 총30페이지(단면인쇄) 이내로 작성

ㆍ 인쇄 규격은 A3(420㎜X297㎜)이며, 가로로 작성

ㆍ 칼라의 사용은 제한하지 않으며 자유롭게 배치하도록 한다.

ㆍ 제안서 페이지 제한에 있어 표지, 배면지는 제외한다.

- 사업수행능력 평가서

ㆍ 쪽 번호는 하단 중앙에 표기하고 전체 쪽수는 표지와 목차를 포함하여 30페이지(단면인쇄) 이내로 제작하되, 증빙서류는 쪽수에서 제외한다.

ㆍ 사업수행능력 평가서에 기입된 일반현황 및 연혁, 기술능력, 최근 3년간 사업수행실적, 근무인력 현황 등을 아래 목차에 따라 간략히 정리하여 기입한다.

ㆍ 공동수급체의 경우 회사소개서는 대표업체와 공동업체가 1개 단일본으로 통합 작성하여 1부 제출한다.

9

제안요청서 효력 및 제안서 작성시 유의사항

❍ 제안요청서의 성격

-  본 제안요청서의 내용은 발주기관과 제안사(계약체결 이후에는 ‘사업자’)간의 적법한 협의 또는 발주기관의 내부사정에 따라 수정･변경될 수 있다.

-  본 제안요청서의 내용은 사업자 선정에 필요한 최소한의 요구사항을 기술한 것이며, 제안서 작성 및 사업추진에 따른 제반사항 모두 상세히 기술한 것은 아니다.

-  비록 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업에 반드시 필요하다고 인정되는 사항은 과업범위에 포함된 것으로 본다.

-  제안요청서에 대한 질의·답변사항은 모든 제안사에게 동일한 효력을 갖는다.

❍ 제안요청서의 효력

-  제안요청서에 명시된 내용과 협상시 발주기관의 요구에 의하여 수정·보완·변경된 내용을 포함한 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며(기술능력평가를 위한 제안  설명 및 답변자료 포함), 본 제안요청서의 일부 또는 전부가 변경 되거나 취소되는 경우라도 제안사는 이의를 제기하지 못한다.

-  발주기관은 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을  갖는다.

-  제출서류가 미비하거나, 심사에 필요한 내용항목의 누락 등 구비서류가 불충분한 경우에는 심사대상에서 제외될 수 있다.

-  제출된 제안서의 내용은 발주처가 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체할 수 없으며 사실과 일치하여야 한다.

-  기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의해야 하며 제안서, 제안요청서, 계약서에 명시된 내용의 해석에 있어 그 뜻이 모호하여 의견을 달리할 경우 발주기관의 해석에 따른다.

❍ 작성시 유의사항

-  모든 제안사항은 현실적으로 제작·설치 및 실행 가능해야 한다.

-  제안서 내용은 명확한 용어를 사용하여야 하며, ‘～를 제공할 수도 있다’, ‘～이 가능하다’, ‘～를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가시 이행 불가능한 것으로 간주한다.

-  제안사는 제안내용에 대한 모든 책임을 지며, 발주기관은 제안내용에 대한 확인을 위해 추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있다. 이 경우 제안사는 이에 적극 응해야 한다.

-  제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로는 사용할 수 없다.

-  제안서 작성과 관련된 질의는 지정기일까지에 한하여 가능하며, 답변은 참가업체 모두에게 회신된 이메일을 유효한 것으로 한다.(전화문의 불가)

-  모든 제안서류의 작성은 한글표기를 원칙으로 하며, 부득이 전문 용어를 사용하는 경우 한글로 용어 해설을 표기한다.

10

사업자 선정 방법 및 제안서 평가

❍ 사업자 선정방법

- 입찰 방법 : 제한경쟁입찰

※ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제7조(계약의 방법)

- 계약 방법 : 협상에 의한 계약

※ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 및 동법 시행령 43조, 기획재정부 계약예규 제409호 「협상에 의한 계약체결 기준」

- 선정절차

ㆍ 사업공고 → 현장설명회 → 제안서 접수 → 제안서 평가(PT) → 협상 → 계약

- 선정방법

ㆍ 제안서 평가는「문화재청 협상에 의한 제안서 평가 업무처리 규정」(문화재청 예규 202호)에 따라 총7인의 평가위원회를 구성하여 <붙임5>의 「기술제안서 평가표」 평가 기준 및 배점에 따라 평가

ㆍ 제안서 기술능력평가 90%와 입찰가격평가 10% 적용

※ <별표1>기술제안서 평가항목 정량적 평가 기준 및 가격평가 기준

ㆍ 기술능력평가는 제안서평가 시 PT발표로 진행하며, 제안사 당 15분(참여 제안사 수에 따라 조정 가능), 제안서에 명시된 사업책임자 또는 입찰참가업체 대표가 발표하는 것을 원칙으로 하고,  2인 이내에서 보조자가 배석하여 평가위원의 질의에 응답 가능

ㆍ 기술능력평가분야 배점한도의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정

ㆍ 협상적격자 중 기술능력평가와 입찰가격평가 합산점수 고득점 순에 따라 결정

ㆍ 합산점수가 동일한 경우 기술능력 평가점수 고득점자, 기술능력평가점수도 동일한 경우 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선순위자로 함

ㆍ 협상은 협상개시 통보일로부터 15일 이내에 하며, 필요시 10일 범위에서 연장 가능

ㆍ 협상은 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 예산이하로서 협상대상자가 제안한 가격을 기준으로 함

ㆍ 우선협상대상자가 협상내용에 대하여 합의할 경우, 차순위 협상대상자와 협상을 생략함

ㆍ 우선협상대상자와 협상이 결렬되거나 우선협상대상자가 협상을 포기하는 경우 또는 실격이나 선정무효 사유가 발생하는 경우 동일한 기준과 절차에 따라 차순위 협상대상자와 협상을 실시

❍ 계약 체결

- 낙찰자가 선정되면 10일 이내에 계약을 체결하며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 동법 기술계약 특수조건 등 일반원칙에 따름

❍ 제안자의 실격․선정무효

- 익명성 유지의 원칙 위배 등 제안자가 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우

- 제출된 서류에 중대한 허위사실이 별견된 경우

- 제안업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 여건 변화로 필요한 법적 요건이 미비하게 된 경우

❍ 기타

- 상기 기술한 내용 외 평가 관련 사항은 공개하지 않으며, 입찰참가자는 심사위원의 구성, 심사기준, 심사결과에 대해 일체 이의를 제기할 수 없음

- 제안요청서나 과업내용서 등에 명시되지 않은 일반적 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「협상에 의한 계약 체결 기준」에 따름

붙임 :	【붙임 1】 기술제안서 작성 양식(표지) 【붙임 2】 기술제안서 작성 지침 【붙임 3】 사업수행능력평가서 작성 양식(표지) 【붙임 4】 사업수행능력평가서 작성 지침 <서식 1> 요약문 <서식 2> 사용인감 <서식 3> 일반현황 <서식 4> 사업수행조직표 <서식 5> 참여인력 이력사항 <서식 6> 신용평가등급확인서 <서식 7> 유사분야 사업수행 실적 <서식 8> 확약서 <서식 9> 청렴계약이행각서 <서식10> 보안서약서 <서식11> 행정처분내용 <서식12> 공동수급현황 <서식13> 공동수급표준협정서 사본 <서식14> 제안서 공모 대표자 선임계 【붙임 5】 현장설명회 참가 사전 신청서 【붙임 6】 현장설명회 참가 신청서 【붙임 7】 위임장 [별표 1] 평가항목 및 배점기준

【붙임 1】 기술제안서 작성 양식(표지 / 가로형)

제   안   서

(가운데 정렬, 48p)

건명	칠백의총 기념관 전시시설 제작설치 (가운데 정렬, 22p)

2019.  .

(가운데 정렬, 32p, 장평95)

【붙임 2】 기술제안서 작성 지침

기술제안서 작성 지침

※ 본 사업에 적용하는 것만 작성하여야 함

작 성 항 목	작 성 방 법	비고
Ⅰ. 제안 개요	1. 사업 개요 2. 전시 주제 3. 전시 스토리 라인
Ⅱ. 공간 구성 계획	1. 전시 공간 기획 의도 및 방향 2. 전시 공간구성 세부계획 - 동선계획 - 배치도(평면도, 입면도) - 실내조감도 ※ 필요한 경우 각종 단면도 및 상세도 포함할 수 있음
Ⅲ. 전시 연출 계획	1. 전시 연출 기획 의도 및 방향 2. 전시 연출 세부계획 - 전시 연출 개요, 항목, 방법, 세부연출 상세도 제시
Ⅳ. 전시 세부 계획	1. 전시 디자인 및 색채 계획 2. 전시 연출 매체 계획 - 전시물 배치, 사인, 영상, 음향, 기기 등 3. 조명 계획 - 전시 연출과 유물전시장 내외·부 조명 계획 4. 실명패·마감재·안전환경 계획 - 실명패, 입간판 등 건물과 통합된 CI 구축 계획 - 친환경 마감재 및 재료 사용 계획 - 관람동선과 CCTV, 소방, 보안, 안전환경 구축 계획 5. 추가 제안 사항 - 본 사업과 관련하여 추가 제안할 내용
Ⅴ. 추진 일정 계획	1. 사업 추진 일정 계획 2. 사업 수행조직 및 업무 분장
Ⅵ. 관리 및 운영 계획	1. 사후관리 계획 2. 완공 후 시험운영 및 기술이전, 유지보수 등 지원 방안 3. 각 주제별 세부 운영프로그램

【붙임 3】 사업수행능력평가서 작성 양식(표지)

「칠백의총 기념관 전시시설 제작설치」

사업수행능력 평가서

2019.    .     .

업 체 명 :  (대표사)

대 표 자 :

주    소 :

전화번호 :            (FAX :              )

작 성 자 :            (연락처 : 휴대폰 / 이메일 기재)

【붙임 4】 사업수행능력평가서 작성 지침

사업수행능력평가서 작성 지침

작 성 항 목	작 성 방 법	비고
1. 요약문	제안사는 해당사업의 제안내용(사업대상·범위)을 명확히 이해하고 추진목표 및 전략을 요약·작성한다.	【서식1】
2. 사용인감	사용인감계	【서식2】
3. 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요연혁을 명료하게 작성한다	【서식3】
4. 사업수행조직표	제안사의 조직현황과 기술인력현황을 작성한다.	【서식4】
5. 참여인력 이력사항	본 사업을 수행할 투입인력의 이력사항을 작성한다. 단 사업책임자는 임원급으로 하며, 실무책임자는 사업기간 중 100% 투입가능한 자로 하며 겸임 가능하다.	【서식5】
6. 신용평가등급확인서	제안사의 재정상황을 작성한다.	【서식6】
7. 유사분야 사업수행 실적	최근 3년 간의 유사분야 사업실적을 작성하고, 실적증명서를 첨부한다.	【서식7】
8. 확약서	사업자 선정 절차에 동의하는 확약서를 제출한다.	【서식8】
9. 청렴계약이행각서	입찰 참여 및 사업수행의 모든 과정을 정당하게 진행할 것에 동의하는 각서를 제출한다.	【서식9】
10. 보안서약서	제안과 관련되는 사항에 대한 보안서약서를 제출한다.	【서식10】
11. 행정처분내용	최근 3년간 제안사가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실이 있는 경우 작성하여 제출한다.	【서식11】
12. 공동수급현황 (공동수급체 구성시 포함)	공동수급체결현황 공동수급표준협정서 사본 제안서 공모 대표자 선임계	【서식12】 【서식13】 【서식14】

【서식 1】

요   약   문

1. 개  요

사 업 명	칠백의총 기념관 전시시설 제작설치
사업수행 책 임 자	소 속		부 서		직 위
	성 명		전화번호

2. 주요제안내용

3. 추진목표·전략

【서식 2】

사 용 인 감 계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 칠백의총관리소에서 시행하는 칠백의총 기념관 전시시설 제작설치를 위한 제안의 입찰 ․ 계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민 ․ 형사상의 문제가 발생할 경우는 상기인이 책임질 것을 확약하고, 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙임 : 인감(법인)증명서 1부.   끝.

2019년    월    일

주  소 :

업체명 :

대표자 :

칠백의총관리소장 귀하

【서식 3】

회 사 명			대 표 자
사 업 분 야			사업자번호
주 소
전 화 번 호			FAX 번호
홈페이지 주소			E-mail
회사설립연도		년 월	자 본 금
부채비율(%) (타인자본/자기자본×100)
유동비율(%) (유동자산/유동부채×100)
면허/허가/ 등록증 보유현황
인력구성현황		총 명
해당부문 사업기간		년 월 ～ 2019년 월 현재 ( 년 개월)
주 요 연 혁(요약)
연월일	내 용				비 고

일반현황

【서식 4】

사업 수행 조직표

1. 조직현황

				사업총괄 책임자
oo 분야			oo 분야				oo 분야			oo 분야
책임자 :			책임자 :				책임자 :			책임자 :

2. 기술인력 현황

분야별	성 명	연령 (세)	직위	경력기간	자격증	비고

주) 분야별 란에는 기술 분야(기획, 제작, 디자인 등)을 표기

【서식 5】

참여인력 이력사항

성 명				소 속		직 책
기술등급					생년월일
해당분야경력		년 개월
기술 자격	자격증 급				취 득 년 월	년 월
본 사업 참여임무				상주구분	□상주□비상주	참여기간	개월

경 력
사 업 명	참여기간 (년월~년월)	담당업무	발주처	비고

【서식 6】

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (생년월일)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보합니다.

교부일  2019 .   .   .

신용평가기관 :                           인

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

【서식 7】

유사분야 사업수행 실적 집계표(최근 3년)

구 분	사업명	계약기간	계약금액 (천원)	발 주 처	실적 확인이 가능한 발주 기관의 전화	비 고
사업 수행 실 적
합 계

※ 최근 3년간(공고일 기준) 국공립 박물관․미술관․전시관 등의 전시 관련 용역 수행 실적 인정

- 공고일 기준 기 완료된 수행실적만 인정

- 실적은 입찰공고일 기준 1년 이내에 발행받은 실적증명서 원본이 첨부되어야 하고(단, 실적증명발급이 불가능한 경우 계약서 사본을 첨부) 증명서 미제출시 실적 미 인정

- 준공금액은 세금을 포함한다.

- 수행한 건물의 건축물대장 기재된 용도가 ‘문화및집회시설’만 인정

【서식 8】

확   약   서

칠백의총관리소가 발주하는 「칠백의총 기념관 전시시설 제작설치」건의 입찰에 참여한 당 업체는 귀관의 공정한 규격 심사와 객관적인 내부절차에 의한 입찰 진행상의 제반 결정에 아무런 이의를 제기하지 않고 계약체결에 따른 증빙서류 제출 등 제반 유의사항을 준수할 것을 확약합니다.

2019년  월   일

※ 공동수급 참여사의 대표자 모두

입찰참가 신청자  상 호 :

주 소 :

사업자등록번호 :

대표자 :                (인)

입찰참가 신청자  상 호 :

주 소 :

사업자등록번호 :

대표자 :                (인)

입찰참가 신청자  상 호 :

주 소 :

사업자등록번호 :

대표자 :                (인)

칠백의총관리소장 귀하

【서식 9】

문화재청 청렴계약이행 서약서

계 약 명 : 칠백의총 기념관 전시시설 제작설치

「국가를당사자로하는계약에관한법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)제5조의2에 따라 본 입찰에 참여한 당사 대리인과 임직원은 입찰․낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공․납품 이후를 포함한다)에서 아래 각 호의 청렴계약 조건을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 낙찰취소 등을 당하거나 계약의 해제ㆍ해지를 당하는 등의 불이익을 감수하고, 이에 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 약정합니다.

1. 금품․향응 등(친·인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구 또는 약속하거나 수수(授受)하지 않을 것이며, 관계공무원에게 금품·향응 등(친·인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 경우에는「국가계약법 시행령」제76조제1항제10호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.

2. 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위 시에는「국가계약법 시행령」제76조제1항제7호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.

3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.

2019.    .    .

서약자 ○○○회사 대표 ○○○(인)

문화재청장 귀하

【서식 10】

보 안 서 약 서
제안자	상호또는법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생년월일
본인은 귀 관에서 시행하는 「칠백의총 기념관 전시시설 제작설치」사업에 제안서를 제출함에 있어 본 제안과 관련된 제반사항을 반드시 준수하고 보안유지에 최선을 다할 것이며, 만일 이를 소홀히 하여 발생되는 모든 사항에 대하여 귀 관의 어떤 조치에도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다. 2019. . . 서 약 자 인(사용인감) 칠백의총관리소장 귀하

【서식 11】

행정처분내용

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

※ 최근 3년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실기재

【서식 12】

공동수급협정 체결 현황

구 분	업체명	주 소	대표자	전화	출자비율 (%)	비고
계

주1) 공동수급협정서 사본 첨부

【서식 13】

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

② 공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ① 당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ :    %

2. ㅇㅇㅇ :    %

② 제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ① 본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④ 분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

② 제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서를 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2019년      월      일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

칠백의총관리소장 귀하

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․시공 등을 위하여 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

② 공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음 예시와 같이 정한다.

[예시]

가) ㅇㅇㅇ주식회사 : 실물모형, 산업디자인전문회사, 비디오물제작업 (   %)

나) ㅇㅇㅇ주식회사 : 실내건축공사업(   %)

※ %의 합계가 100이 되도록 작성

② 제1항의 분담내용은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조(공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담공사금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조(구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조(중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우에는 제11조제2항을 준용한다.

제14조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발행하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조(운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2019년      월      일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

칠백의총관리소장 귀하

【서식 14】

제안서 공모 대표자 선임계

응모자 (대표자)	업체명	(인)	법인등록번호 (사업자등록번호)
	대표자명		연 락 처	회 사 휴대폰
	소재지

상기인을 「칠백의총 기념관 전시시설 제작설치」 제안서 공모에 대한 대표자로

선임합니다.

□ 참여회사 명단

회사명	대표자 성 명	분 야	주 소	연락처	날 인

※ 공동수급 참여사의 대표자 모두

칠백의총관리소장 귀하

<붙임 5>

칠백의총 기념관 전시시설 제작설치 현장설명회 참가 사전 신청서
제 출 자	회 사 명
	대 표 자
	주 소
	전화/FAX
칠백의총 기념관 전시시설 제작설치 제안공모의 현장설명회 참가를 희망합니다. 2019. . . 제출자 : (인) 칠백의총관리소장 귀하

<붙임 6>

칠백의총 기념관 전시시설 제작설치 현장설명회 참가 신청서
접 수 번 호
접 수 일 자		2019년 월 일
제 출 자	회 사 명
	대 표 자		주민등록번호
			법 인 번 호
	주 소
	전화/FAX
칠백의총 기념관 전시시설 제작설치 제안공모의 현장설명회에 참가하고자 붙임과 같이 확인서류를 제출합니다. 붙 임 : 1. 사업자등록증사본(법인인 경우 법인등기부등본) - 각 1부 2. 위임장 및 재직증명서 - 1부 3. 인감증명서(법인은 법인인감) - 1부 2019. . . 제출자 : (인) 칠백의총관리소장 귀하

-------------(인)------------ 절  취  선 --------------(인)-----------

현장설명회 참가 확인서

접수번호		접수일자	2019년 월 일
회 사 명
대 표 자
접 수 자	칠백의총관리소 직위 : 성명 : (인)
확 인 자	칠백의총관리소 직위 : 성명 : (인)

<붙임7>

위   임  장

대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	업체명		연락처
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 칠백의총 관리사업소에서 시행하는 칠백의총 전시시설 제작설치를 위한 제안공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2019. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : 칠백의총관리소장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				주민등록번호
소 속				직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직중임을 증명합니다 2019. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 :

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부.

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐.

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

【별표 1】 평가항목 및 배점기준

구 분		평가항목	배점 한도	비고
계			100
기술능력 평 가 (90점)	소계		90
	정량적평가 (20점)	◦ 사업수행실적	5	20
		◦ 경영상태	5
		◦ 기술인력 보유상태	5
		◦ 전문기술 보유상태	3
		◦ 신인도	2
	정성적평가 (70점)	사업의 이해	10	70
		◦ 사업목적 및 내용의 이해도 ◦ 제안요청서와의 부합성 및 실현가능성 ◦ 전시주제 및 스토리라인의 창의성
		기술·지식능력	15
		◦ 자료조사 및 내용의 적정성 ◦ 계획의 전문성 및 우수성 ◦ 수장고 항온항습, 조습방안 등 제안의 전문성
		공간구성계획	15
		◦ 전시물의 배치 및 동선계획의 적정성 ◦ 평면계획의 적정성 및 독창성 ◦ 공간별 색채구성 및 재료 사용계획 ◦ 조명, 음향 및 설비시스템 적정성
		전시기획 및 연출기법	15
		◦ 전시 구성물 간의 조화 및 연계성 ◦ 전시물 연출의 창의성, 우수성, 차별성 ◦ 연출기법의 다양성 및 흥미성 ◦ 첨단 전시매체 사용의 적합성, 안정성, 내구성
		설치물 구상 및 디자인	10
		◦ 제안목적에 부합하는 설치물 구상 ◦ 디자인의 독창성 및 상징성 ◦ 설치물의 전체적인 안정감과 편의성
		사후관리 및 지원	5
		◦ 사후관리 및 운영의 용이성 및 경제성 ◦ 교육훈련, 유지보수, 기술이전 등 지원계획의 적정성
입찰가격평가 (10점)		◦ 조달청 평가	10	10

1-1. 정성평가항목 점수 부여 방법

등급별 환산 점수

등 급	A(매우우수)	B(우수)	C(보통)	D(미흡)	E(매우미흡)
환산율	100%	90%	80%	70%	60%
배점 15점	15	13.5	12	10.5	9
배점 10점	10	9	8	7	6
배점 5점	5	4.5	4	3.5	3

1-2. 재무 구조 및 경영의 안정성

신용등급에 의한 경영상태 평가기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용 평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.75
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.5
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	3.5

1. 위 기준은 ｢조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준｣에 의한다.

2.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급을 기준으로 평가하되 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.

3. ‘신용평가등급 확인서’가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

4. 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

5. 제안사가 공동수급체인 경우 구성업체별로 각각 평점을 산정한 후 해당하는 평점에 각각의 출자비율을 곱하여 산정된 평점을 합산하여 산정하며, 소수점 다섯째 자리에서 반올림 한다.

1-3. 사업 수행 실적

사업수행실적에 의한 평가기준

평가항목	평 가 요 소	배점	평가방법		평가근거
			기준	평점
사업 수행 실적	3년 이내 유사과업 수행 실적의 누계	5.0	100% 이상 70%이상 ~ 100%미만 40%이상 ~ 70% 미만 40%미만	5 4.5 4.0 3.5	조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준 [별표14]

1. 수행실적은 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 국가, 지방자치단체, 정부투자기관, 공공기관과 민간에서 발주한 「건축법시행령」 제3조의5 【별표1】제5항 “문화 및 집회시설(‘건축물대장’으로 증빙)”의 ‘라’목(전시장)의 박물관, 미술관, 과학관, 기념관, 산업전시장, 박람회장 제작·설치 준공실적(부가세 포함)만 인정 한다.

※ 단, 민간거래 실적은 실적증명서, 계약서사본, 세금계산서 사본을 첨부하여야만 인정하며, 국가, 지방자치단체, 정부투자기관, 공공기관 실적의 경우에는 실적증명으로만으로도 인정이 가능하다.

2. 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)…}에 대한 점수

3. 실적증명서(발주기관 확인), 건축물대장 첨부

1-4. 개발 참여인력의 전문성 및 적절성

자격 및 등급 배점 기준

평가항목	평가요소	배점	평가방법				비고
			특급	고급	중급	초급
참여	등급 및 인원	5	0.8	0.6	0.5	0.3
			평점 = (기술인력등급별 점수)×해당등급인원의 단순합계 최저점 : 3.5점

1. 기술자에 대한 등급은 ｢엔지니어링산업 진흥법｣ 제2조 제6호 및 동법 시행령 제4조의 <별표2>에 의함

2. 최저점 명시 기준은 「조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준」를 따름

3. 기술인력 자격 및 배점기준 중 기술계 엔지니어링 기술자 중 고급⋅중급⋅초급기능사(’11.4.30일까지) 및 숙련기술계 엔지니어링 기술자(’11.5.1일 이후)는 점수 미반영

4. 공고일 기준 2개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당(재직증명서, 공인기관 인증 자격증(해당자), 국민연금관리공단 확인서 첨부)

5. 공동수급체의 경우 구성업체별 점수에 지분율을 곱한 후 이를 합산한 점수로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예시) ABC사 공동수급체의 평점=(A사 평점×A지분율)+(B사 평점×B지분율)+(C사 평점×C지분율)

※ 대상기술인력 전문분야 : 실내건축, 산업디자인, 시각디자인, 실물모형 제작, 영상

1-5. 전문기술 보유상태

평가항목	평가요소		배점	비고
전문기술보유	특허등록보유	실용신안등록 또는 디자인등록 보유	3
	1.0	0.5
	※ 평점 = 기술수 × 기술별 점수 ⇒ 평점의 합이 최종점수 (최고 3점, 최저 2.1점)
※ 전문기술은 증명사본 첨부(입찰공고일 이전에 등록된 기술만 인정함) ※ 전문기술 인정범위는 전시관련, 실내건축관련, 디자인관련, 영상, 디지털콘텐츠제작 관련 기술만 인정함. ※ 공동수급시 공동수급비율대로 평가, 분담수급 시 대표사만 평가 {공동수급체일 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가 예) (A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)}

1-6. 신인도

평가항목

배 점

평     가     기     준

신인도

2

◦최근 3년 내 부정당업자 제재를 받은 사실

-입찰참가제한 및 영업정지 처분기간을 합산

구 분	제재사실 없음	3개월 미만	3개월 이상 ~6개월 미만	6개월 이상
점 수	2	1.8	1.6	1.4

※ 공동수급시 공동수급비율대로 평가, 분담수급 시 대표사만 평가

{공동수급체일 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가

예) (A사 제재기간×A사 지분율)+(B사 제재기간×B사 지분율)}