태릉 수영장 철거공사 설계설명 및 시방서

1. 공사명 : 태릉 수영장 철거공사

2. 지정별 : 사적 제201호

3. 소재지 : 서울 노원구 화랑로 681

4. 예  산 : 160,000천원

5. 연  혁

태릉 : 조선 제11대 왕 중종(中宗  재위 1506∼1544)의 두 번째 계비인 문정왕후(文定王后) 윤씨(1501~1565)의 무덤이다. 명종과 인순왕후 심씨의 무덤인 강릉(康陵)과 함께 1970년 5월 26일 사적 제201호로 지정되었다.

문정왕후는 자신이 중종 옆에 묻힐 요량으로 장경왕후의 능 옆에 있었던 중종의 정릉(靖陵)을 풍수지리가 안 좋다 하여 선릉(宣陵) 옆으로 옮겼다. 하지만 새로 옮긴 정릉의 지대가 낮아 홍수 피해가 자주 일어나자 결국 그 자리에 묻히지 못하고 현재의 위치에 예장되어 중종 옆에 묻히려던 소망을 이루지 못했다. 태릉은 왕비의 단릉(單陵)이라 믿기 힘들만큼 웅장한 능으로, 조성 당시 문정왕후의 세력이 얼마나 컸는지를 짐작케 한다. 봉분을 감싼 12면 병풍석에는 12지신상과 구름 문양을 새겼고, 병풍석 위의 만석(滿石) 중앙에 12간지를 문자로 새겼다. 봉분 바깥쪽으로는 12칸의 난간석을 둘렀으며, 봉분 앞에 상석과 망주석 1쌍을 세웠다. 봉분 주위로 석양(石羊)·석호(石虎) 각 2쌍을 교대로 배치시켰으며, 뒤쪽으로는 곡장(曲墻; 나지막한 담)을 쌓았다. 봉분 아랫단에 문인석과 석마(石馬) 각 1쌍, 팔각 장명등이 있고, 가장 아랫단에 무인석과 석마 각 1쌍이 있다. 능원 밑에는 정자각·비각·수직방(守直房)·홍살문이 있다.

태릉 국제 종합 사격장 : 대한 사격 연맹이 서울 성북구 공릉동(孔陵洞) 223의 19 일대 264,000㎡ 대지에 1970년 7월에 착공, 건립한 동양 최대 규모의 국제 수준급 종합 사격장. 라이플 사격(300m•50m•25m•10m, 이동 표적 사격, 러닝 보어 사격 등 여섯 종류 코스), 소총 사격장(50표적), 소구경총 사격장(50m), 공기총 사격장, 양궁 사장(30표적) 등의 사격 시설과 5,000명 수용의 관람석, 500명 수용의 선수 휴게소 등 부대 시설, 그 밖에 각종 레크리에이션 시설도 병설했다. 1971년도 아시아 사격 선수권 대회 및 1978년(제42회) 세계 사격 선수권 대회가 개최된 곳이다.

6. 주변현황

- 수영장은 태릉국제사격장 전면에 위치하며, 주변에는 태릉과 태릉 선수촌이 위치한다.

- 수영장에는 식당과 예식당의 주변시설물이 위치하나, 본 철거에서는 제외한다.

7. 철거대상현황

철거대상 건축물은 노후된 상태이며 식당과 맞닿아 있다. 수영장은 3개소이며 기계실과 워터슬라이드(미끄럼틀), 대기 스텐드, 기타 컨테이너 박스 등의 지상구조물을 금회 철거한다.

8. 사업지침

- 수영장 철거 후 주변과 바닥 정지작업 및 부분 메쉬 휀스 설치.

- 설계 범위는 수영장으로 하되, 필요시 현지 조사결과에 따라 감독관과 협의하여 결정하도록 한다.

9. 공사개요 및 설계 설명서

철거공사

1. 대상지 면적 =14,409.48㎡(녹지지역 제외)

2. 철거구조물

- 구역내 지상, 지하구조물 전체.

- 제외구조물 : 탈의실, 화장실

- 구조=철근,무근콘크리트, 콘크리트포장, 블록포장, 자연석석축.

부지정지

1. 철거후 대지를 정리한다.

- 대지고르기=14,409.48㎡

- 대지평탄화 후 배수구배설치

설치공사

1. 메쉬휀스 설치

- 메쉬휀스=115.5m

- H=1.8M, 출입구 1개소

폐기물처리공사

1. 철거부산물을 폐기물처리한다.-별도공사

*. 공사개요

- . 수영장 전체 구조물 (14,409.48㎡)을 철거한다.

- . 발생되는 폐재류, 폐콘크리트와 혼합폐기물은 철거후 상차한다.(폐기물운반/처리-별도)

- . 철거부지는 절성토를 하여 부지를 정리한다.

- . 전체대지의 절성토는 최소화 하며, 원지반으로 복구하고, 배수구배를 형성한다.

- . 제외구조물(화장실, 탈의실) 외의 부지내 지장물 전체를 철거한다.(기존 철망 휀스, 지하구조물포함)

- . 상부 사격장에 면하는 면은 메쉬휀스를 설치한다.

- . 발생되는 건설폐기물은 폐기물처리하며, 100% 반출한다.

- . 공사 중 특이사항이 발생하면, 반드시 공사를 중단하고 감독관에게 알려야한다.

*. 특기시방 일반사항

- . 본 시방서는 문화재청의 문화재 표준시방서와 국토해양부의 건설표준시방서를 기준으로 한다.

- . 현장여건상 상이한 부분은 감독관의 허가를 득함이 원칙이다.

- . 철거와 폐기는 관련법규에 의거하여 시행된다.

- . 철거후 문화재 구역내 특이사항이 발견될 경우 즉시 공사를 중단하고, 이를 감독관에게 알려 협의한다.

- . 본 설계도서는 문화재청의 문화재수리원칙에 따라 문화재표준품셈, 건설표준품셈에의해 작성되었다.

- . 성토시 반입토사는 기존 크레이 사격장의 토사를 운반하여 사용하며, 성상이 다른 현장토사를 혼합하여 사용한다. 이는 감독관의 지시에 의한다.

*. 철거시 특기사항

- . 건축물이 연결된 상태이므로 전기,수도,하수 등의 지하연결부분을 확인후 시행하며, 공사범위외 타 건물의 이용에 영항이 없도록 선조치후 시행한다.

- . 일부 지하실은 침수구간이 있으므로 배수후 작업하며 이때 안전사고에 유의한다.

- . 철거시 보존 건물에 구조적 영향이 없도록 유의하여 철거한다.

- . 폐기물은 반출시 반드시 감독관의 허가를 득하여야한다.

- . 폐철물(고철)의 반출은 무게 측정 후 허가를 득하여 반출한다.

- . 태릉은 문화재보호구역으로 폐기물 반출로는 감독관이 지정한 통로만을 이용하여야하며, 반출·반입시 기록되어야한다.

- . 수영장은 특성상 배관이 매립되어 있으나, 해체전 확인이 불가능하므로 철거시 반드시 감독관의 지시에 의해 시행되어야한다.

- . 철거대상은 다음과 같다-수영장 구조물 전체(내부포함), 대지내 외부폐기물전체, 폐토사, 지하구조물, 기존 휀스, 철거바닥포장재, 그 외 감독관이 지정하는 사항

- . 기존 건축물의 폐기량은 철거전에는 정확히 계량할 수 없으므로 시행시 반출량을 정확히 계량하여야하며 이는 감독관의 지시에 의한다.(폐콘크리트,혼합폐기물,고철 등 발생물)

- . 철거시 발생되는 고철은 일정장소에 적치 후 일괄 반출하며, 공인계량소에서 계량을 실시하고, 추가정산을 실시하여야한다.(고철 반출 시 반드시 감독관 입회를 요청한다.)

- . 고철의 반출시에는 반출일지(대장)를 작성하고 계근과 계량 증명서를 첨부하여 감독관에게 제출한다. 반드시 반출차량에 대해서는 대관촬영(전,후)를 실시하여 첨부한다.

- . 폐기대상은 감독관 지시에 따라 가감될수 있으며, 이는 설계변경을 요한다.

*. 설치시 특기사항

- . 부지정지는 부지를 평탄화 한후 표토를 갈기와 바수기를 하여 향후 식재시 원활한 배수와 식생이 가능토록 한다.

- . 전체대지에는 토사를 다지고, 배수구배를 형성한다.

- . 대상지 북측면에 메쉬휀스를 설치한다.(H=1.8M)

▣ 공사개요의 항목 중 시행시 현지여건과 상이한 부분은 감독관과 협의하여 시행한다.

1). 주변정비공사

①. 가설공사

*. 현장은 매일 청소를 하고 자재와 공구는 항상 정리 정돈을 한다.

*. 현장에는 경고판을 설치하여 사고를 미연에 방지하도록 한다.

*. 철거현장에는 EGI휀스를 설치한다.

*. 비산먼지 발생억제를 위한 살수에 대한 사용일지(대장-사진포함)를 작성하여 제출한다.

조립식가설울타리(E.G.I 철판)	3개월, H=2.4m	115.5	M
콘테이너가설사무소	6×2.4×2.6m, 3개월	1	동
비산먼지 발생 억제를위한 살수		7204.74	100M2
공사안내판(경고표시판)	1.2*1.5	1	개소

②. 철거공사

*. 수영장과 주변지장물을 철거한다.

*. 고철 반출시 반출일지(대장)을 작성하여 제출한다(반출차량의 계량 전,후 사진촬영포함)

*. 비산먼지 발생억제를 위한 살수에대한 사용일지(대장-사진포함)를 작성하여 제출한다.

무근콘크리트 철거	백호0.7M3＋대형브레이커	516.4	M3
철근콘크리트 철거	백호0.7M3＋대형브레이커	746.49	M3
철물/철골재 철거	LPG사용	71.65	톤
문 철거		2.94	M2
창 철거		0.67	M2
보차도경계블럭철거	CON'C/18×20.5×25	349.15	M
보도블럭철거	30*30*0.06	55.04	100M2
자연석석축 철거	백호0.7M3＋대형브레이커	54.32	M3
콘테이너철거		3	동

③. 부지정지

*. 현재대지는 원래부터 존치된 것으로 보이는 수령이 오래된 나무들이 존재하며, 부분적으로 옹벽구조물이 설치되어 있으므로 이를 절성토하여 기존 대지의 원형으로 복원한다.

*. 배수는 대지가 구릉지이므로 자연스럽게 원지형을 복원하여, 배수가 되도록한다.

*. 성토 토사의 반입은 기존 크레이사격장 부지에서 반입하며, 반입시 감독관의 지시에 의한다.

*. 표토는 향후 식재를 위해 갈이와 바수기를 한다.

*. 대상지 북측면에는 메쉬휀스를 설치하여 외부인의 접근을 차단한다.

절토/터파기	기계80%,인력20%/백호0.7M3	286.59	M3
성토/되메우고다지기	기계80%,인력20%/백호0.7M3	3836.96	M3
토사운반	야적장~현장/1km	3550.37	M3

④. 운반공사

*. 발생된 폐기물은 폐기물처리를 위해 상차한다.

건설폐기물상차비 - 불연성	15톤덤프트럭(10m3)	3363.32	TON

2). 견적공사

*. 매쉬휀스를 설치한다(도면참조)

메쉬휀스	경간2m, h=1.8	58	경간

3). 고재대

*. 철거시 발생된 고철은 고재대 처리한다.

*. 고철의 반출시에는 반출일지(대장)를 작성하고 계근과 계량 증명서를 첨부하여 감독관에게 제출한다. 반드시 반출차량에 대해서는 대관촬영(전,후)를 실시하여 첨부한다.

강설	고철, 작업설부산물	-88.62	톤

4). 폐기물처리공사-별도발주

*. 발생된 폐기물은 성상별로 분리하여 폐기처리한다.

10.  공사수리보고서 작성

1). 일반사항

*. 본 공사를 시행함에 있어 태릉 수영장 철거공사의 공사전반에 관한 사항을 기록, 보존함을 목적으로 한다.

2). 공사개요

*. 공사의 개괄적인 사항 기록

*. 공사명, 공사기간, 시행청, 시공자, 공사금액, 설계자, 공사내용 등

3). 태릉 수영장 철거공사

*. 태릉 수영장 철거공사 현황 및 공사 시 특이사항을 기록한다.

4). 도면작성사항

*. 태릉 수영장 철거공사 = 배치도, 평면도, 구조물도

5). 시험에 관한 사항 기록

*. 담당원이 지정하는 재료의 시험

*. 해당공종에서 지정하는 재료의 시험에 관한 사항 기록

6). 사진자료수록

*. 태릉 수영장의 전경

*. 태릉 수영장 철거공사의 각 공종 촬영

*. 현황의 사진과 공사 후 보수된 부분 사진촬영

*. 사진촬영은 같은 장소에서 촬영하여 대비될 수 있도록 한다.

7). 보고서 규격 : A4용지(도면포함 : A3)

8). 보고서 수량 : 5부

9). 수리보고서 목차(예시)

*. 추진경위

*. 연혁 및 배치

*. 공사개요

*. 도면

*. 자재시험

*. 사진자료

10). 수리보고서는 사전에 담당원과 충분한 협의를 하여야 한다.

11. 기타사항.

1). 태릉은 문화재보존지역으로 중요한 문화재가 많이 산재하여 있는데 유사시에 대비하여 방화설비를 하여야하며 작업장마다 각종 소화기를 비치하여 사용방법을 숙지하여야 한다.

2). 태릉수영장 및 태릉에는 관람객이 많으므로 현장 종사원은 항상 품위 유지하도록 하여야 한다.

3). 현장에는 흡연구역을 정하여 흡연 구역에는 재떨이와 소화기 등을 비치하고 금연과 금주를 하여 사고를 미연에 방지하도록 하여야 한다.

4). 공사 중 고증과 연구조사를 위하여 공사를 중지 시켰을 때에는 이를 즉시 응해야 하며 경미한 발굴이나 조사비용은 도급자가 부담한다.

5). 도급자는 일일 작업결과는 서면으로 작성하여 통보하여야 하며 다음날 작업은 전날 감독관에게 통보하여 지시를 받아야 한다.

6). 도급자는 각 공정마다 기록 촬영을 하여 필요시에 제출하도록 하여야한다.

7). 기공식과 상량식, 낙성식 등 각종행사는 감독관과 협의하여 시행한다.

8). 본 공사의 기간은 착공일로부터 3개월로 한다.

9). 본 설명에 누락이나 잘못 표기된 부분은 문화재청의 문화재보수공사 표준 시방서에 준하여 감독관과 협의하여 처리한다.