「국립고궁박물관 문화재[사각유리등]활용 조명등기구 제작·설치」 위탁사업 공모

과 업 내 용 서

2022.   .

전시홍보과

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명 : 「국립고궁박물관 문화재 활용 조명등기구 제작·설치」위탁사업

2. 추진목적

❍ 사각유리등은 조선왕실 밤 잔치때 사용했던 등으로써 의미와 활용 목적이 뚜렷한 중요 문화재이며, 이를 현대의 기술과 접목하여 적극 활용하고자 함

❍ 문화유산이 있는 거리 주변을 조성하여 디자인 거리로 활성화하여 우리문화재의 아름다움을 널리 알리고, 조선왕실에서 사용했던 등을 국민들과 함께 향유

3. 추진방향

❍ 종로구 일대 경복궁 주변(효자로·삼청로), 인사동 거리 일부, 청와대로변 일대에 신규 야외 조명등으로 설치

❍ 국립고궁박물관의 소장품인 사각유리등을 활용하여 추진했던 결과물을 토대로 종로구일대에 사각유리등 가로등으로 제작·설치

4. 과업 추진 장소

❍ 장소 : 종로구 일대(경복궁 주변, 청와대 일부)(붙임 3. 참조)

- 세부위치 : 경복궁 주변 효자로·삼청로·청와대로, 창의문로, 인사동 일부외 기타 ※ 위치는 종로구 협의로 변동 될 수 있음

5. 과업 주요 내용

- 내용: 조선왕실 사각유리등을 활용한 야외조명등(보안·가로등) 개발 제작

※ ‘가로등’은 도로의 등, ‘보안등’은 보행로의 등을 지칭(붙임 1. 설계 참조)

표 1. 국립고궁박물관 사각유리등 설치 모습 및 설계도 참고

천장등 야외조명	보안등 야외조명	사각유리등 설계도

- 내용: 조선왕실 사각유리등을 활용한 야외조명등(가로등) 개발 제작·설치

*기본 설계도 제공(국립고궁박물관 전시홍보과)

- 위치: 종로구 내 문화거리 예정(경복궁 주변 효자로·삼청로, 남인사 마당)

- 수량: 최소 350개 이상(확정 구간 4곳)

* 1등용 조명 등기구 : 경복궁 주변 청와대 일대(효자로, 삼청로, 의문로)

* 2등용 조명 등기구 : 청와대로

* 별도: 인사동 일대, 경복궁 내 박물관 주변 또는 기타 공간

※ 설치 수량과 설치 위치에 대한 최종 선정은 예산 범위 안에서 종로구청과 협의 하에 변경될 수 있음

- 업무 추진 총괄 담당자 선정

· 총괄 기획자를 통하여 추진계획·설계 및 제작 설치·운영 관리 등을 총괄 담담하여 사업진행과 결과 등 업무보고·협의(문화재청, 종로구청)

- 사각유리등의 디자인(설계)

· 박물관 소장유물을 활용한 설계

· 기본 설계도 반영, 또는 새로운 방향성 제시(*환경, 예산, 효율성 등 반영)

※ 단, 발주처와 종로구의 협의에 의해 진행되어야 함

- 사업 운영 방안 보고

· 안전하고 편리한 방향으로 설치 및 관리 운영하기 위한 방안 제시

※ 원활한 수급과 유지보수를 위한 나라장터 제품 등록(보류)

6. 과업 기간 : 착수일[또는 약정(계약) 체결] ~ ‘22년 12월 7일

❍ 세부계획 및 일정

- 세부계획

※ 추진과정에 따라 일정 변동 가능

일정	야외 조명기구 제작·설치
8월 2~5주	계획보고 및 일상감사(10일)
8월 5주 ~ 9월 3주	공개경쟁 입찰 공고기간(14일)
9월 3,4주	업체 선정 · 업무 협의
9월 4주 ~ 10월 4주	개발 및 제작
10월 4주 ~ 12월 1주	설치 완료

- 완료: (12월 1주) 준공완료 및 홍보게시

- 결과보고: (12월 3주) 업무추진 결과보고

7. 과업예산 : 금 250,000,000원(금이억오천만원정)*부가세 포함

❍ 예산 세부내역(예정)

- 설치비용 :　55,000천원

- 자재비 및 제작비용 : 193,000천원

- 기타잡비 : 2,000천원(제작설치에 필요한 부자재 비용)

※ 사업 추진시 발주처와 협의에 의해 조정(필요에 따라 조절)

Ⅱ. 과업 세부내용

1. 총괄 담당자 선임

❍ 선임된 총괄 담당자는 사업과 관련한 모든 업무에 대하여 위탁사업이 잘 진행되도록 관리하여야 함.

❍ 총괄 담당자는 모든 업무에 대하여 발주처와 사전 협의·선정하여야 하며, 이후 의사결정에 있어서도 반드시 발주처의 사전 승인을 받고 업무를 진행하여야 함.

주 요 할 일
주요업무	야외조명등 설치 기획
세부업무	· 야외조명등 설치 계획과 등 개발을 위한 설계도 작성 · 설계도에 따른 제품 제작과 현장 도로에 설치 · 설치에 따른 운영과 관리 및 유지 등을 추진 ※ 완료 및 필요에 따라 발주처와 종로구청과의 지속적 업무 협의
기타업무	발주처의 필요에 의한 지출, 예산 등 관련 내역, 증빙 및 각종 필요 서류 작성

<개발(설계) 및 설치>

- 발주처에서 설계 완료한 사각유리등 활용 야외 조명등 설계도를 참조하여 기초 설계

- 조선왕실 유물인 사각유리등의 특성을 강조하여 설계(형태, 크기, 무늬, 등)

※ 왕실유물을 활용한 조명이므로 필히, 설계변경 시 발주처와 협의하여 설계에 반영할 것

- 제품 설계 시 전기 자재·부품의 교체가 편리하도록 설계에 반영

<운영 및 관리>

- 설계된 조명등이 원활히 생산될 수 있도록 소재부터 제작과정 기록

- 설치 장소의 특성을 고려하여 고장은 최소화하도록 주기적 관리

- 조명등의 노후로 인한 교체시 수급이 편리하도록 제품 등록

※ 완료된 조명등은 국가 또는 공공기관에서 구매하여 관리할 수 있도록 나라장터에 제품을 등록

2. 야외 조명등기구 제작 · 설치

가. 제작방향 : 붙임2 참조

❍ 설계 : 다양한 측면을 고려한 방안 선정(1~3안 중 선택하여 개발)

- 1안 : 국립고궁박물관이 제공하는 설계도와 동일한 방식의 설계

- 2안 : 환경과 시설 및 운영 등을 고려하여 새로운 아이디어 제시

- 3안 : 제공하는 도면과 새로운 아이디어 접목하여 설계

※단, 방안 선택시 발주처와 협의하여 선정할 것

❍ 설치위치 : 종로일대 5곳 기타

※설치 전 종로구청과 협의된 장소로 선정, 예산에 따라 추가 위치 선정

3. 조명 설계·제작

가. 제작 내용

- 설계도 : 조선왕실 사각유리등 형태의 보안·가로등 설계도 작성(CAD, PDF, JPEG) *등의 형태·구조의 현장 상황에 따라 기둥(암대)도 설계 포함

- 제작 : 지정된 거리에 설계 완료한 조명등을 기한에 맞춰 제작·설치

※설계도 작성과 설치시 종로구청 도로과와 협의 후 진행

나. 조명등기구 제작 기준 : 아래의 기준을 모두 충족하거나 협의하여 조정

- 「도시·군 계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제 2장 제 1절 제 9항 제 2호에 따라 중로(12m이상 ~ 25m 미만 도로) 또는 소로(12m미만 도로)로 기준

- 「인공조명에 의한 빛공해 방지법에 관한 법률」 시행령 제2조 가, 나에 의거, 조명기구의 범위를 적용(빛공해를 최소화)

[디자인 원칙(권장사항)]

	가로등기구(KS C 3701)		보안등기구(KS C 7658)
노면 휘도	KS C 3701도로조명 기준 적용
노면 조도	서울시 보안등 설계 관리 기술기준 수립용역 결과 반영		KS C 7658 LED 가로등 및 보안등에 대한 기준 적용
무게(kg)	10이하(종로구 기준)/12(KS기준)		6이하(종로구 기준)/12(KS기준)
색온도(K)	서울시 기준	3,000~4,000	사대문안 3,000~3,500
	종로구 기준	3,000~3,500	2,700~3,500
빛 공해 방지	등기구 형태(컷 오프형) / 상향광 등급(U2(3종지역))
	-		침입광(HFBS코드) / 차단막 설치가능
연색지수	고효율에너지 기자재 인증 기준 적용 75Ra 이상(서울시, KS 기준)
등기구 효율	고효율에너지 기자재 인증 기준 적용 115lm/W 이상(서울시 95/KS85~100)
IP등급 / 역률	IP등급 66이상(KS기준 65이상) / 0.95이상(종로구 기준)
<도로 조명등 기준> - LED 가로등기구(KS C 7658): 차량이 이용하는 도로에 설치하는 등기구(기존 가로등을 교체 설치) - LED 보안등기구(KS C 7658): 사람이 이용하는 보행자 도로의 등기구(기존 보안등을 교체 설치) ※ 빛공해 방지기준 부합여부 및 상향광 발생 정도를 확인하기 위해 공인시험기관 배관 측정데이터를 적용하여 조도계산 및 HFBS코드를 사전검토 한다.(*발주처와의 협의에 의해 변동될 수 있음)

- 「서울시 야간 경관가이드」(2014년, 2017년 개정)에 의해 서울시 도로 실외 조명 가이드라인은 다음과 같다.

-「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리 조례」제 7조 2항에 의거하여 통행안전 및 빛공해 방지를 최소화 하여야 함

다. LED조명 보급기준 : 아래의 기준을 모두 충족하거나 협의하여 조정

- 조명기구 안전 및 성능에 관하여 KS·고효율 에너지 기자재 인증제품으로 제작 및 구매, 공공기관 녹색제품 구매의무에 따라 환경표지 인증 및 우수재활용 인증제품을 적용

- 도로조명 제작시 서울특별시 LED 가로등, 보안등, 터널등의 LED 모듈·커넥터·컨버터 표준을 적용(서울특별시 고시 제2016-230호)

- 조명기구를 관리·운영하기 편리하고, 품질유지 및 향상을 위해 다음과 같은 기준을 제시 ※세부사항은「서울시 야간 경관가이드(2020년)」의 제 4장, 3. 도로조명 가이드라인

[휘도, 조도 시뮬레이션 측정값 기준]

종류	항 목	종로구 기준(M3)	서울시 기준	KS 기준
가로등	평균 휘도(cd/㎡)	1 이상	1	1
	종합균제도	0.4 이상	0.4	0.4
	차선축균제도	0.6 이상	0.6	0.6
	눈부심	15 이하	15	15
보안등	평균 조도(lx:룩스)	3 이상	3	3
	균제도	0.15 이상	0.15	0.15
	눈부심	15 이하	15	15
등 배열: 1등용의 경우 한쪽배열 방식으로 설치, 2등용의 경우 중앙배열 방식으로 설치 * 설치 전 현장의 상황에 따라 별도 제작운영 예정

참조

라. 공공기관 녹색제품 구매의무에 따른 요구사항

- 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」에 제6조(공공기관의 녹색제품 구매의무), (개정 2011. 4. 5) 에 의거 환경표지 인증 및 우수재활용 인증을 취득한 제품을 적용 *예외의 경우:「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」에 제6조 예외사항 참조

4. 설치 및 운영

가. 각 현장에 맞는 전기설비 등 설치

- 전기안전과 관련하여 사전점검 등 철저, 조명과 관련한 장비 등을 안전하게 사용 및 설치

나. 운영

- 용역 수행 기간 중 추진 계획(상세한 계획 및 스케줄 등) 수립 후 문화재청의 검수 받아야 함.

- 설계 완료 후 설치 전 종로구청과 문화재청의 승인을 얻어야 함

- 용역 완료 전 2회 이상(2일 이상)의 시범 운영기간을 통한 문제점 및 안전점검 필수

- 하자보수기간 내 문제점 발생시 상시보고 체계 구축하여 대비

- 운영시 필요한 각종 부품과 자재들은 충분히 구비하여 보수시에 적용

- 추진을 위한 모든 시설물과 준비사항은 계약 완료일에 준함.

- 과업수행자는 제안내용에 명기되지 않은 사항이라 할지라고 사업의 중요성을 감안하여 필요하다고 인정되는 사항은 문화재청과 협의 후 시행함.

Ⅲ. 과업 수행지침

1. 일반사항

가. 과업 진행 보고 등

- 과업수행자(수탁자)는 계약체결 후 7일 이내 과업을 착수해야 하며, 착수계, 일정표, 참여인력명단, 장비투입내역, 보안서약서 등이 포함된 계획서를 제출하여야 한다.

- 본 과업내용서는 해당 용역을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 본 과업내용서에 의하여 수행한다. 다만, 여기에 규정되지 아니한 사항은 문화재청과 합의하여 수행한다.

- 이 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 관행에 따라 당연히 수행하여야 할 경미한 사항은 상호 협의 하에 추진하며, 중대한 상황의 변경으로 계약의 변경이 불가피한 경우에는 문화재청과 협의하여 과업의 범위, 내용, 비용 및 기간 등을 변경할 수 있다.

- 모든 주요 과업에 대하여는 문화재청과 사전 협의 및 승인을 얻어야 한다.

- 과업수행자는 과업내용을 수행할 수 없거나 업무방법을 변경하는 경우 반드시 문화재청과 협의해야 한다.

- 과업수행자는 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요사항은 필요한 서류를 작성 제출하여 문화재청과 협의 결정하여야 한다.

- 과업수행 중에 문화재청이 요구하는 내용은 과업에 추가로 반영토록 하며, 특히 의견이 상충된 부분에 대하여는 문화재청의 의견을 따름.

- 모든 과업은 해당분야 전문가가 수행하여야 하며, 문화재청은 과업수행자의 고용인이(파견인 등) 해당분야의 전문성이 부족하거나 과업수행에 부적당하다고 판단될 경우에는 즉시 교체를 요구할 수 있다. 이 경우 과업수행자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

- 본 과업 수행 과정상 발생된 문제에 대한 책임은 과업수행자 부담으로 손실을 보상하여야 한다. 또한 저작권, 특허권 등의 타인의 권리를 사용할 경우 과업수행자가 그 권리의 사용에 대한 일체의 책임을 진다.

- 과업수행자의 불완전한 계획이나 업무 미이행 등의 과실로 인하여 문화재청에게 피해가 있을 때 또는 과업수행자로서의 의무와 필요한 조치를 이행하지 않음으로 인하여 발생하는 민․ 형사상의 모든 책임은 과업수행자가 진다.

나. 보안사항

- 보안대책을 수립하고 착수계와 함께 보안각서를 제출하여야 한다.

- 과업 수행 중 자료 등의 보안관리를 철저히 하여야 한다.

- 과업 수행 중에 취득한 보안사항 등에 대하여 문화재청과 사전 협의 없이 대외에 발표하거나 자료를 유출하여서는 아니 되며, 사적인 목적으로 이용할 수 없다.

- 이 용역의 중요 사안이나 민감한 사안에 대한 언론취재에 대하여는 문화재청과 사전에 협의하여야 한다.

- 본 과업과 관련한 저작권은 문화재청이 소유하며, 과업수행자가 소유 또는 임의로 복사하거나 외부로 유출하여서는 안 된다.

- 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 과업수행자가 진다.

- 이 용역과 관련한 각종 보안 사고에 대하여는 과업수행자가 모든 책임을 져야 하며, 보안사항 위반 시 문화재청은 계약 후에도 계약 해지와 함께 인적․물적․ 기간적 손실에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.

다. 과업 변경 조건

- 문화재청이 필요하다고 인정할 때

라. 계약 해지

- 과업수행자가 정당한 이유 없이 약정한 착수기일을 경과하고도 수탁사업을 착수하지 아니한 경우

- 문화재청과 사전 협의 없이 인력, 장비, 시설, 임차 등 무단으로 변경하는 경우

- 계약사항, 과업내용 및 기타 지시사항을 이행하지 아니한 경우

- 과업수행자의 사정으로 인해 과업수행기간 이내에 과업을 완료하지 못하거나 과업수행자의 명백한 귀책사유로 인해 과업을 완료할 가능성이 명백히 없다고 인정되는 경우

- 업체 선정 시 제출한 제안서의 내용과 실제 과업 수행 내용, 회사 소개 내용 등에 중대한 차이가 있어 적절한 과업수행을 기대할 수 없는 경우

- 기획, 구성, 편집 등 제작물의 완성도가 현저히 미달되는 경우

- 기타 정당한 요구사항을 이행하지 아니하는 경우

- 상기 계약(약정)해지사항에 해당할 경우 문화재청은 즉시 계약(양정)을 해지 할 수 있으며, 과업수행자에 대하여 일체의 용역 대가를 지불하지 아니하며 기 지급분이 있을 경우 과업수행자는 이를 일체 반환조치 및 손해배상을 하여야 한다.

마. 관련 법규 준수

- 과업내용서의 내용상 해석에 차이가 있을 경우 문화재청의 해석을 우선 한다.

- 과업수행자는 문화재청의 이익을 보호하는 입장에서 과업을 수행하며 경제적․ 기술적 등의 방법을 통해 경비를 절감하는데 정당한 조치를 취하여야 한다.

바. 소유권 및 저작권

- 본 사업의 결과물 일체(이미지 포함)에 대한 소유권 및 저작권은 문화재청에 있으며, 허가 없이 일부 또는 전부를 사용할 수 없다.

※ 필요시 해당 자료를 문화재청(국립고궁박물관)에 요구할 수 있다. 단. 해당 시설물의 경우 문화재를 활용한 개발 자료이므로 사용 목적과, 사용처에 따라 공문 또는 해당 보충 자료를 요구할 수 있음(예시: 문화재 주변, 공공장소 / 지방자치단체, 공공기관 등)

- 만일, 이 용역을 수행하기 위하여 제3자의 저작물을 이용한 경우 제3자에게 저작재산권을 양도받거나 이용허락을 받음으로써 문화재청이 해당 산출물을 이용함에 있어서 법적 또는 기술적 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

- 용역 수행으로 발생한 저작물에 대한 모든 저작권(2차적 저작물 작성권 포함)을 문화재청에게 양도한다. *관리 운영을 원활하게 수행하기 위해 필요시 상호 협의 하에 제외될 수 있다.

- (초상권)□과업수행기관 등 사업자(수탁자)□는 이 용역의 결과로 창작된 산출물 및 자료인 사진저작물에 인물이 포함된 경우 제3자가 해당 저작물을 이용하는데 초상권에 관하여 민형사상 책임이 발생하지 않도록 하여야 한다.

- 문화재청은 저작물에 대하여 수정․  변경하여 이용할 수 있고, ‘수탁자’는 저작인격권을 근거로 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

- ‘과업수행기관 등 사업자(수탁자)’는 저작물 작성과 관련하여 저작권 등 타인의 권리를 침해함으로 인하여 문화재청에게 손해가 발생한 경우에는 ‘과업수행기관 등 사업자’는 그 손해를 배상하여야 한다.

2. 사업비정산 등 회계처리

○ 사업비 집행 시 국가재정법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령, 국가회계법, 보조금 관리에 관한 법률에 따라야 하며, 기업회계의 적정성을 확보하기 위하여 사후원가업체를 지정하여 원가정산, 회계검사를 실시하고 보고서를 제출하여야 한다.(회계검사 예산 사업비에 포함)

○ 사업비는 문화재청과 계약한 산출내역서를 근거로 정산하며, 총액을 초과한 소요금액에 대하여 문화재청에서 지급하지 않는다.

※ 단, 문화재청의 사전승인을 득하여(공문을 통한 행정처리) 실시한 경우, 총액을 초과한 금액에 대해 실비정산 할 수 있다.

○ 사업의 이행확보를 위하여 사업비 청구 시 문화재청을 피보험자로 하는 서울보증보험(주)에서 발행한「이행보증보험증권」 원본을 제출하여야 하며, 이행보증 기간은 계약일로 ~ 1년까지로 한다.(단, 보험료는 수탁기관의 자체예산으로 부담한다).

○ 수탁기관은 사업비를 문화재청이 정하는 목적과 용도에 따라 집행하여야 하며, 인건비(운영요원 사례, 출연료 등)는 타 비용에 우선 지출하여야 한다.

※ 인건비 지출 시에는 관련 규정에 의거 원천징수 등을 하고, 세무관서에 신고(납부)하여야 하며, 이에 대한 증빙자료(영수증 등) 첨부해야 함

○ 수탁기관은 별도의 회계 책임자를 지정하여 보고하고 운영하여야 하며, 예산집행은 세금계산서, 법인신용카드, 입금증(무통장입금) 등의 방법으로 하며 특별한 경우 외에는 현금지출을 할 수 없다.

○ 수탁기관은 문화재청에 직원명부를 제출하여야 한다.

3. 특이사항

가. 제작 및 현장 업무

○ 설치작업 전 모든 부속자재는 샘플을 제출하여야 하고 구조적으로 타당성을 조사하여 승인을 받은 뒤 설치에 임한다.

○ 광량을 고루 분포시켜 균일한 빛 밝기가 나오도록 하여 이미지 표현 및 전시품이 안전하게 빛에 노출될 수 있도록 문제없이 제작한다.

○ 램프의 수명시간을 확인하고 전시시간 중 램프 교체가 없어야 하며 보행자, 설치 작업자 등을 위해 안전한 조명 설치가 이루어져야 한다.

○ 안정기는 KS제품의 안정기를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

○ 시안이 완성된 자료는 문화재청 감독관과의 협의 후 검토 확인하여야 한다.

○ 검토 과정 중 육안으로 발견할 수 없는 이상으로 인한 문제 발생 혹은 검토 받은 시안(샘플 및 도면)과 결과물이 다른 경우 감독관의 지시에 따라 즉시 수정․  재제작 하여야 한다.

○ 배선 위치 및 자재는 감독관이 지정하는 위치에서 지정 자재를 사용하여야 하며 경우에 따라서는 전시 시간에 효과적인 작동을 위해 플러그 스위치를 사용하여야 한다.(종로구청 도로과, 문화재청 전시홍보과 협의)

○ 배선은 보수 및 관리가 용이하게 정돈 설치되어야 한다.

○ 배선의 연결 부분은 누전 현상이 없게 사용하여야 한다.

※ 기타 안전에 관한 모든 원칙을 준수하여야 하며, 발생하는 사고에 의한 과실이 발생한 경우 ‘과업수행기관 등 사업자’는 그 손해를 배상하여야 한다.

※ 설계와 관련한 디자인 등 사업 관련 성과물에 대한 저작권은 문화재청에 귀속한다.

나. 현장 점검 및 설치

○ 현장의 반입은 지정된 장소에 일반 화물로 반입하여야 한다.

○ 현장물품 반입 시 물품목록표를 작성하여 내부에 반입하도록 하며, 물품반입 사진을 함께 찍어두어 요구시(현장사진) 제출할 수 있도록 한다.

○ 운반 시 파손 또는 흠집이 생기지 않도록 최대한 보양하여 운반하여야하며, 현장설치 시 시설이 손상되었을 경우 원상복구하여야 한다.

○ 지정된 위치에 정확하게 부착·설치하여야 한다.

○ 만일, 철거가 필요한 경우를 대비하여 원상복구가 가능하도록 제작, 설치를 하여야 한다.

○ 설치 완료 후 향후 추진을 위한 샘플제품은 추가로 제작하여 보존될 수 있도록 제작하여 제출한다.(향후에 설치할 수 있도록 점·소등이 원활히 되어야 함)

다. 철거 및 운반 시 유의사항

○ 전시물 철거는 신속히 처리하여야 한다.

○ 폐기물 반출은 반드시 지정된 폐기물 처리업체가 처리토록 하여야 한다.

라. 공통사항

○ 과업수행로 인해 종로 거리가 손상되거나 문화재[사각유리등]의 가치를 훼손하지 않아야 함

○ 사전 협의된 제작순서에 의거하여 일정을 조율하고 제작·설치하여야 한다.

○ 반입된 자재를 분류하여 제작 전 감독관에게 검사를 받고 사용하여야 한다.

○ 검수한 자재는 제작 위치에 이동, 제작 순서의 역순으로 정리, 보관하여 보행자의 안전과 통행을 방해하지 않는다.

※ 설치시 보행자의 통행이 방해가 될 경우, 인제책, 안내물 등을 비치하여 인지시켜야 하며, 종로구청·문화재청과 필히 협의하며 임의로 추진하지 않는다.

○ 설치 시 부주의로 인한 손상제품은 교체·수리하며, 정도가 약한 손상은 감독관의 승인 하에 현장 보수하여야 한다.

○ 공사에 사용되는 모든 자재는 친환경자재를 사용하도록 한다.

○ 다음사항에 해당하는 사례가 발생하였을 경우 문화재청의 판단에 의해 일방적으로 용역계약(약정)을 해지할 수 있으며, 용역수행자(수탁자)는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없고 어떠한 형태로든 보상을 청구할 수 없다.

- 과업내용서에 부합하지 않게 용역 수행하였거나 계약(위탁)내용에 대한 문화재청의 지시에 순응하지 않을 때

- 용역 수행이 부진하여 용역(위탁)기간 내에 용역을 완료할 수 없다고 판단될 때

마. 기타 사항

○ 용역계약(약정)서 및 과업내용서에 명시되지 아니한 사항이나 자구의 해석에 관하여는 문화재청과 협의하여 시행한다.

○ 용역 수행과 관련하여 민원이 발생하지 않도록 신중을 기하여야 한다.

○ 과업내용서에 언급하지 않은 사항이나 수행 중 의문사항이나 문제점이 있으면 문화재청과 협의하여 처리한다.

○ 설치, 철거 및 이전 시 시설의 손상을 가했을 경우 원상태로 복구하여야 한다.

○ 설치될 주변이 문화재 지역인 경우 주변 문화재 건물이 훼손 되지 않도록 한다.

○ 본 이전설치와 관련하여 사다리·전동리프트, 작업용 공구 등의 안전한 사용 및, 현장내 안전사고 예방을 위한 안전교육을 실시하여야 하며, 현장 내 화재예방을 위한 소화기 등을 반드시 비치 운영하여야 하고, 현장대리인은 용역 진행시에는 반드시 현장 내에 상주하여야 한다.

○ 본 과업의 전시공간이 관람객이 드나드는 문화재 지역임을 감안하여 언행의 조심 및 금연 등을 준수하여야 하며 화재 발생 및 민원 발생 사항에 대하여 각별한 조심을 하여야 한다.

4. 과업 성과물 및 보고

가. 주요 성과물 제출

○ 설계도 등 기타 인쇄물은 인쇄 전에 문화재청의 검토를 받아야 함

○ 성과품은 감독관과 사전 협의 후 납품

○ 문화재청이 과업 성과품에 대하여 미흡한 부분의 수정․ 보완을 요구할 경우 완료 후라도 과업수행자 부담으로 수정․ 보완하여 제출하여야 함

나. 성과물 작성

○ 용역 기간 동안 제작된 책자형태의 모든 인쇄물 2부,

○ 외장하드 : 최종 데이터 2개[최종결과보고서(PDF, HWP), 진행 과정 촬영 사진(착수, 공정, 완료), 등 용역 기간 중 생산된 모든 파일을 저장]

※ 도면의 경우 CAD파일_버전 11이하, PDF파일, JPEG파일 각각 폴더를 생성하여 제출

○ 최종 결과보고서 : 5부 이상

○ 문화재청에서 요구하는 자료 또는 기타자료 등

※ 성과품 제출은 사정에 따라 수량이 조정될 수 있음

다. 보고

○ 착수보고회(사업착수 30일 이내), 1차 중간보고회(11월 중) 최종보고회(12월 초) 등 문화재청과 협의 후 실시

※ 회의 횟수는 추진일정에 따라 변동될 수 있음

○ 수시 보고 및 제출 : 최소 2주 간격으로 간이 보고

※ 이메일(wisdomljh@korea.kr)로 공정 사진보고(붙임 4. 사진보고 양식 참조)

붙임 : 1. 사각유리등 설계도 1부.

2. 관련 문화재 사진 목록 1부.

3. 설치위치도 1부.  끝.

붙임 1	사각유리등 설계도

□ 사각유리등 천장등 측면도(위) / 단면도(아래)
	3D 가상 구현 모습

※ 선정 업체에서 현장 방문을 원할 경우 미리 문화재청과 협의 후 가능

□ 사각유리등 천장등 상위도(위) / 단면도(아래)

붙임 2	관련 문화재 사진

□ 사각유리등 천장등 상위도(위) / 단면도(아래)

붙임 3	설치위치도

□ 사각유리등 천장등 상위도(위) / 단면도(아래)

종로구청과 협의 하에 위치는 변경될 수 있음

설치거리	효자로	삼청로	청와대로	창의문로	인사동
형태	1등용	1등용	2등용	1등용	1,2등용

붙임 4	사진보고 양식(참조) p.21

아래의 문서를 활용하여 제출

사 진 보 고

사 업 명:

사업기간:

내용 / 일자	내용 / 일자
내용 / 일자	내용 / 일자

보고자:             (인) 또는 서명

년       월      일